Дело № 2-662/2019

91RS0024-01-2018-004444-33

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Ялта 14 февраля 2019 года

Ялтинский городской суд Республики Крым в составе председательствующего судьи Корпачевой Л.В. при секретаре Калугиной О.А. с участием представителя истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о признании бездействия незаконным, возложении обязательства совершить определенные действия,

у с т а н о в и л :

ФИО3 обратился в суд с иском к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» (далее - ГУП РК «Крымэнерго») о признании незаконным бездействия, выраженного в неисполнении договора от 15 февраля 2017 года №, возложении обязательства осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям жилого дома по адресу: 

<

адрес>.

Исковые требования мотивированы тем, что 15 февраля 2017 года между истцом и ответчиком заключен договор №, по условиям которого ответчик, являясь сетевой организацией, принял обязательства в течение 6 месяцев со дня заключения договора осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям жилого дома истца по адресу: 

<

адрес>. Истец обязательства по внесению платы исполнил 28 марта 2017 года, им были получены технические условия для присоединения к электрическим сетям, разработан проект внешнего электроснабжения электроустановки жилого дома и направлено уведомление ответчику о выполнении технических условий. Вместе с тем ответчик в отсутствие уважительных причин до настоящего времени не выполнил обязательства по договору.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержала, просила их удовлетворить.

Представитель ответчика в судебном заседании с иском не согласилась, указала на истечение срока действия технических условий, являющихся неотъемлемой частью заключенного сторонами договора, соответственно истечение срока действия договора. С предложением о продлении данного срока истец в сетевую организацию не обращался. Кроме того, истец своевременно не уведомил сетевую организацию о выполнении им технических условий, что не позволило ответчику своевременно исполнить условия договора по проверке выполнения заявителем технических условий и фактическому присоединению энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям. Ответчик не отказывался от выполнения обязательств по договору, право истца не нарушено, в связи с чем отсутствуют основания для возложения обязанности исполнить условия договора.

В соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие истца.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что ФИО3 на праве собственности принадлежит жилой дом по адресу: 

<

адрес>, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.

15 февраля 2017 года между ГУП «Крымэнерго» (сетевая организация) и ФИО3 (заявитель) заключен договор №, по которому сетевая организация обязалась осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям электроустановки жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение.

Согласно п. 4 договора технические условия являются неотъемлемой частью договора, приведены в приложении № 1. Срок выполнения мероприятий по техническому присоединению – 6 месяцев со дня заключения договора (п. 5 договора).

В соответствии с п. 6.2 договора сетевая организация обязана в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя.

Также сетевая организация обязана не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в п. 6.2 договора с соблюдением срока, установленного п. 5 договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю (п. 6.3 договора).

П. 8.2 договора установлено, что после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

В соответствии с п. 10 договора размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей. Внесение платы осуществляется заявителем в течение 30 календарных дней с момента подписания договора (п. 11 договора).

Согласно Приложению № 1 к договору 13 декабря 2016 года Ялтинским районом электрических сетей ГУП РК «Крымэнерго» ФИО3 выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям электроустановки жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с установлением срока их действия – 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Во исполнение условий указанного договора ФИО3 28 марта 2017 года ГУП РК «Крымэнерго» внесена плата в размере 550 рублей за технологическое присоединение к электрическим сетям.

14 апреля 2017 года ГУП РК «Крымэнерго» согласовало проектную документацию по электроснабжению жилого дома ФИО3 по адресу: 

<

адрес>.

17 августа 2017 года представителем ФИО3 подано в ГУП РК «Крымэнерго» уведомление о выполнении технических условий с просьбой провести проверку их выполнения и осмотреть присоединяемые электроустановки, произвести допуск прибора учета.

25 мая 2018 года на обращения ФИО3 о предоставлении информации относительно технологического присоединения по договору от 15 февраля 2017 года № ГУП РК «Крымэнерго» сообщило, что по объекту разрабатывается проектно-сметная документация. В связи с большим объемом работ, выполнением эксплуатационных и ремонтных работ создаются дополнительные бригады для выполнения строительно-монтажных работ по технологическому присоединению. Объект находится на рассмотрении способа реализации. Обращение оставлено на контроле до полного решения всех вопросов, изложенных в нем.

Распоряжением Ялтинского района электрических сетей ГУП РК «Крымэнерго» 9 января 2019 года утверждена рабочая документация по электроснабжению объекта ФИО3 по адресу: 

<

адрес>.

13 февраля 2019 года представителем ФИО3 в ГУП РК «Крымэнерго» подано заявление о продлении срока действия технических условий – приложения к договору от 15 февраля 2017 года №.

Указанные обстоятельства дела подтверждены исследованными доказательствами и сторонами не оспариваются.

В силу п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям установлен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861.

В соответствии с п. 3 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами (п. 6 Правил).

П. 7 Правил установлена следующая процедура технологического присоединения: подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение; заключение договора; выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности; составление акта об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с п. 18 Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий; разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий; проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий; выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

П. 27 Правил предусмотрено, что при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения сетевая организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

Согласно п. 85 договора для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий.

Судом установлено, что между истцом и ответчиком, являющимся сетевой организацией, заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям электроустановки принадлежащего истцу жилого дома. Истцом обязательства по внесению платы за технологическое присоединение, а также разработке проектной документации выполнены, в пределах установленного договором срока представитель истца уведомил о выполнении технических условий технологического присоединения, в связи с невыполнением сетевой организацией технологического присоединения представителем истца также подано заявление о продлении срока действия технических условий, вместе с тем ответчиком обязательства по договору до настоящего времени не выполнены.

Обязательства в силу положений ст. ст. 309, 310 ГК РФ должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Каждое лицо в силу установленных ст. 46 Конституцией Российской Федерации гарантий, положений ст. 11 ГК РФ, ст. 3 ГПК РФ вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав, свобод и охраняемых законом интересов.

С установленных обстоятельств, суд приходит к выводу об обоснованности исковых требований, при этом доводы представителя ответчика основаны на неправильном применении норм материального права.

В связи с удовлетворением иска в соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ ответчиком подлежат возмещению понесенные истцом судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

иск ФИО3 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о признании бездействия незаконным, возложении обязательства совершить определенные действия удовлетворить.

Признать незаконным бездействие Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго», выразившееся в неисполнении заключенного 15 февраля 2017 года между ФИО3 и Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымэнерго» договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома.

Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям жилого дома по адресу: 

<

адрес>.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в пользу ФИО3 судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Крым в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Ялтинский городской суд Республики Крым.

Судья Л.В. Корпачева