РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 июня 2018г. №2-2064

Дмитровский городской суд Московской области в составе судьи Пресниковой И.А., при секретаре Грибковой К.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 ФИО5 к ООО «Интерснаб» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, излишне уплаченной суммы, 

УСТАНОВИЛ:

Истец обратилась в суд с иском о взыскании излишне уплаченных денежных средств по договору, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требования потребителя, ссылаясь на то, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ООО «Интерснаб» был заключен договор участия в долевом строительстве № многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, микрорайон Строителей, на земельном участке с кадастровым номером №. Обязательство по оплате стоимости квартиры исполнено истцом в полном объеме в размере 

<

данные изъяты> коп. Ответчик принял на себя обязательства передать истцу 

<

адрес>, площадью 

<

данные изъяты>., в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Однако, разрешение на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию было получено ответчиком ДД.ММ.ГГГГ, а квартира передана истцу ДД.ММ.ГГГГ, т.е. с нарушением сроков, предусмотренных условиями договора. Истец просит суд взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче истцу квартиры за период с ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты>., излишне уплаченные денежные средства по договору в размере 

<

данные изъяты>., неустойку, связанную с неисполнением обязательства по возврату излишне уплаченных денежных средств по договору в сумме 

<

данные изъяты>., штраф 

<

данные изъяты>. и компенсацию морального вреда в размере 

<

данные изъяты> коп., а также издержки, связанные с рассмотрением дела 

<

данные изъяты>.

Представитель ответчика в суд не явился, уведомлен надлежащим образом, в материалы дела представлен отзыв, в котором ответчик выразил несогласие с иском, просил применить положения ст.333 ГК РФ.

Суд находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению частично.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статья 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусматривает обязанность исполнителя осуществить выполнение работы в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ. между сторонами был заключен договор участия в долевом строительстве № многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, микрорайон Строителей, на земельном участке с кадастровым номером №. Обязательство по оплате стоимости квартиры было исполнено истцом в полном объеме в размере 

<

данные изъяты> что подтверждается платежными документами. Ответчик принял на себя обязательства передать истцу квартиру №, площадью 

<

данные изъяты>.м., в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ со дня получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. и завершить передачу квартиры в течение ДД.ММ.ГГГГ, таким образом, в срок до ДД.ММ.ГГГГ Однако, разрешение на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию было получено ответчиком ДД.ММ.ГГГГ, а квартира передана истцу ДД.ММ.ГГГГ, т.е. с нарушением сроков, предусмотренных условиями договора. Истец просит суд взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за просрочку исполнения обязательств по передаче истцу квартиры за период с ДД.ММ.ГГГГ. в размере 

<

данные изъяты>. Суд полагает данные требования удовлетворить, но размер неустойки составит 

<

данные изъяты>. за указанный период, поскольку истцом неправильно исчислялся размер неустойки от суммы оплаты по договору 

<

данные изъяты>., по договору же была оплачена сумма 

<

данные изъяты>. Неустойка подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

В силу положений ст.6 ФЗ от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок - секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи (часть 1); в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере (часть 2); в случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 3).

Согласно ч.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Суд приходит к выводу о том, что ответчик допустил нарушение срока передачи объектов, в связи с чем имеет место нарушение прав потребителя в этой части.

Представителем ответчика заявлено ходатайство о несоразмерности заявленных сумм неустойки и штрафа последствиям нарушения обязательства.

Согласно правовой позиции, сформулированной в Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации №7 от 24 марта 2016 года «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» при взыскании неустойки с физических лиц правила статьи 333 ГК РФ могут применяться не только по заявлению должника, но и по инициативе суда, если усматривается очевидная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства (пункт 1 статьи 333 ГК РФ). 

Согласно Определению Конституционного суда Российской Федерации от 14 октября 2004 года №293-О, право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательств. С учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в пункте 2 Определения от 21 декабря 2000 года №263-О, положения пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба.

Таким образом, предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, на реализацию требования части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, в связи с чем суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба и разрешить вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства.

В данном случае, оценивая специфику правоотношений, возникших между истцом и ответчиком, обстоятельства возникновения обязательства и характер охраняемого государством блага, периоды просрочки исполнения обязательства, рассчитанный размер неустойки, объём вложенных истцом денежных средств, суд не находит основания для применения статьи 333 ГК РФ к предъявленной истцом неустойке.

Истцом также предъявлены требования о взыскании излишне оплаченной денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> По договору долевого участия, заключенному между сторонами, истец должна была получить квартиру общей площадью 

<

данные изъяты> а фактически получила 

<

данные изъяты>., т.е. переплата составила за 

<

данные изъяты> в размере 

<

данные изъяты> коп., данная сумма должна была быть возвращена ответчиком истцу в срок не позднее 30 рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи квартиры. Данная сумма до настоящего времени не возвращена ответчиком, поэтому она подлежит взысканию в пользу истца, что предусмотрено условиями договора.

Что касается требований о взыскании неустойки за не возврат указанной денежной суммы в размере 

<

данные изъяты>. на основании ст.23 Закона РФ «О защите прав потребителей» за период с 02.02.18г. по 13.04.18г., то суд данные требования находит не подлежащими удовлетворению, поскольку в это случае истец избрала ненадлежащий способ защиты нарушенного права. Положениями пункта 1 статьи 23 Закона «О защите прав потребителей» на который ссылается истец в обоснование заявленных данных требований, за нарушение предусмотренных статьями 20,21 и 22 настоящего Закона сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномочены индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара. Между сторонами сложились иные правоотношения, которые не регулируются приведенной выше нормой закона, поэтому в удовлетворении данной части требований надлежит отказать.

Из анализа норм действующего законодательства следует, что неустойка представляет собой меру ответственности за нарушение исполнения обязательств, носит воспитательный и карательный характер для одной стороны и одновременно компенсационный, то есть, является средством возмещения потерь, вызванных нарушением обязательств для другой стороны и не может являться способом обогащения одной из сторон.

Суд, учитывая изложенные обстоятельства дела, полагает возможным снизить размер штрафа, подлежащего ко взысканию с ответчика в пользу истца, при этом суд полагает необходимым отметить следующее.

Поскольку штраф, установленный п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителя", с учетом положений ст.ст. 330, 333 ГКРФ является разновидностью санкции, установленной законом за ненадлежащее исполнение возникших перед потребителем обязательств, то положения ст. 333 ГК РФ могут быть применены и при взыскании указанного штрафа.

Конституционный Суд РФ в Определении от 21.12.2000 года N 263-О указал, что положения п. 1 ст. 333 ГК РФ содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба. Поэтому суд полагает возможным снизить размер штрафа до 

<

данные изъяты>.

В части требований о компенсации морального вреда, суд приходит к следующему.

В соответствии с положениями статьи 15 Закона РФ от 7 февраля 1992 года №2300-I «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

При определении размера подлежащего взысканию морального вреда, с учётом вышеизложенного, а также, учитывая период нарушения прав истца, суд исходит из требований разумности и справедливости, учитывает характер физических и нравственных страданий с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, индивидуальных особенностей потерпевшего, степени вины ответчика, а также с учетом иных доказательств, и находит, что разумной и справедливой является компенсация морального вреда в размере 

<

данные изъяты>.

В остальной части требования о компенсации морального вреда не подлежат удовлетворению.

Требования истца о взыскании расходов по оплате юридических услуг в размере 

<

данные изъяты>., подлежат удовлетворению частично, в сумме 

<

данные изъяты>., принимая во внимание положения ст.98 ГПК РФ о частичном удовлетворении исковых требований истца.

Таким образом, оценивая в совокупности все обстоятельства данного дела, положения закона и представленные сторонами доказательства, суд находит иск истца обоснованным и подлежащим удовлетворению частично, в указанном выше объеме.

На основании изложенного и руководствуясь Законом РФ «О защите прав потребителей», ст.ст. 193-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск ФИО1 удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Интерснаб» в пользу ФИО1 ФИО6 неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ. в размере 

<

данные изъяты>., излишне уплаченную сумму в размере 

<

данные изъяты>., компенсацию морального вреда в размере 

<

данные изъяты>., штраф в сумме 

<

данные изъяты> руб., расходы по оплате юридических услуг в размере 

<

данные изъяты> а всего взыскать 

<

данные изъяты>

В остальной части иска ФИО1 о взыскании неустойки за невозврат денежной суммы, штрафа, компенсации морального вреда – отказать.

Взыскать с ООО «Интерснаб» госпошлину в доход государства в размере 

<

данные изъяты>.

Решение может быть обжаловано в Мособлсуд в течение месяца через Дмитровский горсуд.

СУДЬЯ: