Дело № 2-458/2019

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

25 января 2019 года г. Ростов-на-Дону

Ленинский районный суд г.Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Островской Т.В.,

при секретаре Демьянец С.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «Полет» о взыскании неустойки по договору о долевом участии в строительстве, штрафа, компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л:

Истец ФИО1 обратилась в суд с иском, где в обоснование заявленных требований указала, что 18.02.2016 года между ней и ответчиком был заключен договор о долевом участии в строительстве №30В-146. В соответствии с п.1.1 договора, застройщик обязался своими и (или) с привлеченными силами построить (создать) многоквартирный жилой дом № этап строительства по адресу: г.Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, территория бывшего аэродрома ДОСААФ, участок IV на земельном участке площадью 26 197 кв.м. с кадастровым номером 61:44:000000:1083 и передать в установленный срок объект долевого строительства в собственность, а участник долевого строительства обязался в предусмотренные договором сроки, размере и порядке уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства в объекте недвижимости, при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома.

В соответствии с п. 4.1 договора № объект долевого строительства представляет собой однокомнатную квартиру №146 общей площадью 38,77 кв.м. на 3 этаже в третьем подъезде многоквартирного дома. 

Оплата по договору произведена истцом в полном объёме в размере 11822190,00 рублей. 

Пунктом 2.4 договора, застройщик обязался передать объект долевого строительства не позднее 4 квартала 2016 года. 

Дополнительным соглашением от 10.01.2017 года к договору о долевом участии в строительстве № от 18.02.2016 года, срок подготовки объекта недвижимости завершеннного строительством к вводу в эксплуатацию был продлен до 31.03.2017 года, о чем пунктом 2 внесены изменения в п.2.4 договора. 

Дополнительным соглашением от 26.05.2017 года к договору о долевом участии в строительстве № от 18.02.2016 года, срок подготовки объекта недвижимости завершеннного строительством к вводу в эксплуатацию был продлен до 30.06.2017 года, о чем пунктом 2 внесены изменения в п.2.4 договора. 

Однако, ответчик нарушил срок передачи объекта долевого строительства истцу, до настоящего времени акт-приема передачи не подписан сторонами.

Истцом была направлена досудебная претензия с требованием о выплате неустойки, однако она оставлена ответчиком без удовлетворения. 

На основании изложенного, истец просит суд взыскать с ответчика ООО «Полет» неустойку за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства в размере 426392,46 рублей за период с 31.08.2017 года по 11.12.2018 года, компенсацию морального вреда в размере 50000,00 рублей, штраф, расходы по оплате услуг представителя в размере 20000,00 рублей.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, доверив рассмотрение дела с участием своих представителей.

Представители истца ФИО2 и ФИО3, действующие на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержали и просили их удовлетворить.

Ответчик ООО «Полет», извещенный судом налдежащим образом, своего представителя в судебное заседание не направил. 

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии истца и ответчика в порядке ст.167 ГПК РФ.

Выслушав представителей истца и исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

Из материалов дела следует, что 18.02.2016 года между ООО «Полет» и ФИО1 был заключен договор №30В-146 о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома № по адресу: г.Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, территория бывшего аэродрома ДОСААФ участок IV на земельном участке площадью 26 197 кв.м, с кадастровым номером 61:44:0000001083, согласно которому застройщик обязался в установленный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить жилой дом с помещениями общественного назначения, и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать в собственность участнику долевого строительства объект долевого строительства в вышеуказанном доме.

Согласно п.2.4 договора, срок передачи объекта участнику долевого строительства - не позднее 4 квартала 2016 года, то есть 31.12.2016 года. 

Дополнительным соглашением от 10.01.2017 года к договору о долевом участии в строительстве № от 18.02.2016 года, срок подготовки объекта недвижимости завершеннного строительством к вводу в эксплуатацию был продлен до 31.03.2017 года, о чем пунктом 2 внесены изменения в п.2.4 договора. 

Дополнительным соглашением от 26.05.2017 года к договору о долевом участии в строительстве № от 18.02.2016 года, срок подготовки объекта недвижимости завершеннного строительством к вводу в эксплуатацию был продлен до 30.06.2017 года, о чем пунктом 2 внесены изменения в п.2.4 договора. 

В соответствии с п.4.1 договора, объектом долевого строительства являлась однокомнатная квартира №146 общей (проектной) площадью 38,77 кв.м., в том числе жилой (проектной) площадью 16,81 кв.м., расположенная на 3-ом этаже в третьем подъезде многоквартирного жилого дома. 

Истец свои обязательства по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома № от 18.02.2016 года исполнил в полном объеме, оплатив общую сумму 1822 190,00 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от 14.03.2016 года.

До настоящего времени ООО «Полет» не передал квартиру №146 по договору № о долевом участии в строительстве от 18.02.2016 года ФИО1, акт приема передачи квартиры не подписан сторонами.

В соответствии с п.2 статьи 27 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» №214-ФЗ от 30.12.2004 года, вступившего в силу с 01 апреля 2005 года, его действие распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, разрешения на строительство которых получены после вступления в силу данного Федерального закона.

В соответствии с п.1 статьи 4 Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 года одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и(или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и(или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и(или) иного объекта недвижимости.

Статьей 8 Федерального закона предусмотрено, что передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства осуществляются по подписываемым сторонами передаточному акту или иному документу о передаче. Передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

При этом с момента подписания передаточного акта обязательства застройщика по договору долевого участия считаются исполненными, что следует из пункта 1 статьи 12 Федерального закона.

В силу статьи 16 Федерального закона право собственности участника долевого строительства на объект долевого строительства подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и настоящим Федеральным законом. Основанием для государственной регистрации права собственности участника долевого строительства на объект долевого строительства являются документы, подтверждающие факт его постройки (создания), - разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входит объект долевого строительства, и передаточный акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства.

В соответствии с ч.1 ст.6 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» - застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи.

В соответствии с ч.3 ст.6 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» - в случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее, чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Иных дополнительных соглашений об изменении планового срока окончания строительства и ввода в эксплуатацию данного объекта недвижимости между истцом и ООО «Полет» не заключалось.

По наступлению срока сдачи жилого дома передача квартиры не была осуществлена, поскольку спорный жилой дом не был введен в эксплуатацию.

В соответствии со ст.10 Федерального Закона №214-ФЗ, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежащее исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.

В соответствии с ч.2 ст.6 Федерального Закона №214-ФЗ, в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Анализируя обстоятельства дела, представленные доказательства, суд приходит к выводу о нарушении исполнения обязательств ответчиком, взятых на себя по договору участия в долевом строительстве. Доказательств отсутствия вины суду не представлено. Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для привлечения к гражданской ответственности ответчика, а требования истца о взыскании денежных средств подлежат удовлетворению.

Таким образом, требования истца о взыскании с ответчика неустойки законны и обоснованы, в связи с чем подлежат удовлетворению. 

Расчет неустойки за период с 31.08.2017 года по 11.12.2017 года составляет 578363,11 рублей (1822 190,00 рублей х 9% х 1/300 х 529 дней х 2 дня = 578363,11 рублей), исходя из ключевой ставки в размере 9% по состоянию на дату исполнения договора.

Согласно ч.3 ст.196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако суд может выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Статья 39 ГПК РФ предусматривает, что основание и предмет иска определяет истец. Суд не обладает правом без согласия истца изменить основания или предмет исковых требований, заявленных истцом.

То есть, суд, учитывая заявленные истцом требования о взыскании неустойки за несоблюдение срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства за период с 31.08.2017 года по 11.12.2018 года в размере 426392,46 рублей, считает их обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Разрешая требования истца о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей, суд приходит к следующему.

В соответствии с требованием ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В соответствии с ч.9 ст.4 ФЗ №214-ФЗ к отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом.

В силу ст. 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. При этом наличие вины причинителя вреда (в любой форме) предполагается, а обязанность доказывать отсутствие вины лежит на причинителя морального вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Суд считает, что моральный вред истцу причинен в результате неисполнения ответчиком обязательств по приобретению имущества, а именно жилья, при предоставлении ответчику значительных денежных средств. Факт причинения покупателю по вине ответчика морального вреда суд считает установленным, размер денежной компенсации которого определяет в размере 2000,00 рублей, полагая указанную сумму разумной и соразмерной с учетом периода просрочки исполнения обязательства.

В соответствии со ст. 13 Закона РФ «О Защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Штраф, предусмотренный п.6 ст.13 Закона РФ от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», является самостоятельной мерой ответственности, которая установлена законом императивно и применяется судом в обязательном порядке при удовлетворении требований потребителя, установленных законом, независимо от того, заявлялось ли такое требование суду. То есть взыскание штрафа является обязанностью суда.

Поскольку требования истца не были удовлетворены ответчиком в добровольном порядке, чем были нарушены его права как потребителя, с ответчика в его пользу подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, в размере 214196,23 рублей (426392,46 рублей + 2 000,00 рублей х 50%= 214196,23 рублей).

В соответствии со ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Данная статья предоставляет суду право уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение расходов по оплате услуг представителя. Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные стороной, в пользу которой принято судебное решение, с противоположной стороны в разумных пределах является одним из правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителей, соблюдения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон.

При определении суммы, подлежащей взысканию в счет возмещения расходов по оплате юридических услуг, суд исходит из среднего уровня оплаты аналогичных услуг, учитывает степень сложности гражданского дела, цену иска, а также принимает во внимание объем проведенной представителем истца по делу работы и количество судебных заседаний, в которых представитель истца принимал участие.

С учетом степени сложности настоящего дела, объема оказанных представителем услуг, количества состоявшихся по делу судебных заседаний, суд считает разумным и справедливым взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату услуг представителя в размере 20 000,00 рублей.

На основании ст.103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере 7764,00 рублей с учетом требований нематериального характера.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Полет» в пользу ФИО1 неустойку за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в размере 426392,46 рублей, компенсацию морального вреда в размере 2000,00 рублей, штраф в размере 214196,23 рублей, судебные расходы по оплате услуг предствителя в размере 20000,00 рублей, а всего взыскать 662588,69 рублей.

Взыскать с ООО «Полет» в местный бюджет государственную пошлину в размере 7764,00 рублей. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Ростовский областной суд через Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 28 января 2019 года.

Судья Островская Т.В.