50RS0052-01-2024-000431-69

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 марта 2024 года гор. Щёлково Московской области

Щёлковский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Торбика А.В., при ведении протокола помощником судьи Грачевой К.О., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-1756/2024 по иску ПАО «Россети Московский регион» к ФИО1 ФИО4 о расторжении договора технологического присоединения

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд мотивируя тем, что между ПАО «Россети Московский регион» - Филиалом «Южные электрические сети» и ФИО1 ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № энергопринимающих устройств Заявителя, ориентировочно расположенных по адресу: 

<

адрес> кадастровый номер земельного участка: № Максимальная мощность 15 кВт, категория надежности: третья, класс напряжения: 0,4 кВ.

Неотъемлемой частью и приложением к Договору являются технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Технические условия), предусматривающие выполнение мероприятий по технологическому присоединению как со стороны Сетевой организации, так и со стороны Заявителя.

В соответствии с пунктом 10 Раздела 3 Договора плата за технологическое присоединение по Договору определена в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 26.03.2013 №, и составляет: 550,00 (Пятьсот пятьдесят рублей ноль копеек) с НДС.

Согласно пункту 11 Раздела 3 Договора Заявитель обязался надлежащим образом исполнять обязательства по плате расходов за оказание услуг по осуществлению технологического присоединения путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Сетевой организации в форме 100% платежа в течение 10 рабочих дней с момента вступления в действие Договора.

В настоящее время на расчётный счёт ПАО «Россети Московский регион» в счёт погашения стоимости платы за технологическое присоединение поступили денежные средства в размере 550,00 (Пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек) рублей.

Подготовка и выдача технических условий является одним из мероприятий по технологическому присоединению (п.18 (а) Правил технологического присоединения), обязанность выполнения которого наступает у сетевой организации непосредственно с момента получения заявки на осуществление технологического присоединения до заключения Договора технологического присоединения.

Подготовка и выдача технических условий является одним из мероприятий по технологическому присоединению (п.18 (а) Правил технологического присоединения), обязанность выполнения которого наступает у сетевой организации непосредственно с момента получения заявки на осуществление технологического присоединения до заключения Договора технологического присоединения.

Так как срок Технических условий, установленный Договором - 2 года, истёк ДД.ММ.ГГГГ а по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата выставления претензии) Заявитель не направил в адрес Сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, срок осуществления мероприятий по вине Заявителя оказался нарушенным.

На основании изложенного, просит суд:

Расторгнуть Договор № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения.

Взыскать с ФИО1 ФИО6 в пользу ПАО «Россети Московский регион» расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000,00 (Шесть тысяч рублей 00 копеек) рублей.

Стороны в судебное заседание не явились, извещены.

Исследовав материалы дела, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с согласованными условиями и требованиями закона, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу п.п. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечёт для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В судебном заседании установлено, что между ПАО «Россети Московский регион» - Филиалом «Южные электрические сети» и ФИО1 ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № энергопринимающих устройств Заявителя, ориентировочно расположенных по адресу: 

<

адрес> кадастровый номер земельного участка: № Максимальная мощность 15 кВт, категория надежности: третья, класс напряжения: 0,4 кВ.

Неотъемлемой частью и приложением к Договору являются технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Технические условия), предусматривающие выполнение мероприятий по технологическому присоединению как со стороны Сетевой организации, так и со стороны Заявителя.

В соответствии с пунктом 10 Раздела 3 Договора плата за технологическое присоединение по Договору определена в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 26.03.2013 №, и составляет: 550,00 (Пятьсот пятьдесят рублей ноль копеек) с НДС.

Согласно пункту 11 Раздела 3 Договора Заявитель обязался надлежащим образом исполнять обязательства по плате расходов за оказание услуг по осуществлению технологического присоединения путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Сетевой организации в форме 100% платежа в течение 10 рабочих дней с момента вступления в действие Договора.

В настоящее время на расчётный счёт ПАО «Россети Московский регион» в счёт погашения стоимости платы за технологическое присоединение поступили денежные средства в размере 550,00 (Пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек) рублей.

Подготовка и выдача технических условий является одним из мероприятий по технологическому присоединению (п.18 (а) Правил технологического присоединения), обязанность выполнения которого наступает у сетевой организации непосредственно с момента получения заявки на осуществление технологического присоединения до заключения Договора технологического присоединения.

Подготовка и выдача технических условий является одним из мероприятий по технологическому присоединению (п.18 (а) Правил технологического присоединения), обязанность выполнения которого наступает у сетевой организации непосредственно с момента получения заявки на осуществление технологического присоединения до заключения Договора технологического присоединения.

Так как срок Технических условий, установленный Договором - 2 года, истёк ДД.ММ.ГГГГ а по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата выставления претензии) Заявитель не направил в адрес Сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, срок осуществления мероприятий по вине Заявителя оказался нарушенным.

В соответствии с п.16(6) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861 (далее - «Правила») срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий; б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий; в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий; г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

В связи с неисполнением Заявителем своих обязательств Сетевая организация лишилась возможных доходов за передачу электроэнергии на которую была вправе рассчитывать при заключении Договора и его надлежащем исполнении. При этом в связи с истечением ДД.ММ.ГГГГ срока действия Технических условий № от ДД.ММ.ГГГГ, дальнейшее исполнение Договора стало невозможно. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что ответчиком нарушены существенные условия Договора.

Для соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес - Заявителя было направлено Соглашение о расторжении Договора, а также Претензия № от ДД.ММ.ГГГГ, которые оставлены без ответа и добровольного исполнения.

На основании изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению.

В силу ст. 98 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика в пользу истца судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск ПАО «Россети Московский регион» к ФИО1 ФИО8 о расторжении договора технологического присоединения -удовлетворить.

Расторгнуть Договор № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения.

Взыскать с ФИО1 ФИО9 (паспорт РФ №) в пользу ПАО «Россети Московский регион» (ИНН №) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000,00 (Шесть тысяч рублей 00 копеек) рублей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Московский областной суд через Щелковский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья А.В. Торбик

Мотивированное решение изготовлено 04 марта 2024 года