дело № 2-814/2024

22RS0008-01-2024-001106-09

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

28 ноября 2024 года г.Заринск

Заринский городской суд Алтайского края в составе:

председательствующего Черновой М.Н.

при секретаре Кочемаевой Т.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Заринского межрайонного прокурора в интересах ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» в лице Филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение

УСТАНОВИЛ:

Заринский межрайонный прокурор в интересах ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» в лице Филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение. В обоснование иска ссылается, что Заринской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению ФИО1 по вопросу нарушения ее прав при технологическом присоединении к электрическим сетям энергопринимающих устройств малоэтажной жилой застройки, по адресу: 

<

адрес>, СНТ «

<

адрес> №.

Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» и Ой Т.И. заключен договор №.№ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающих устройств малоэтажной жилой застройки (далее - Договор), расположенной по адресу: 

<

адрес>, СНТ «

<

данные изъяты>», участок №.

Пунктом 5 Договора предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Однако, до настоящего времени договор не исполнен, установленное в жилой застройке энергопринимающее устройство к сети электроснабжения не подключено.

Заринской межрайонной прокуратурой ДД.ММ.ГГГГ внесено представление об устранении нарушений директору филиала ПАО «Россети Сибирь» - «АлтайЭнерго». Согласно ответу на представление, поступившему ДД.ММ.ГГГГ, несвоевременное исполнение мероприятий по технологическому присоединению со стороны ПАО «Россети Сибирь» связано с дефицитом источников финансирования для выполнения в полном объеме обязательств по договорам технологического присоединения заявителей и на реализацию мероприятий капитального характера. Таким образом сроки выполнения работ по вышеуказанному договору не определены.

Просит возложить обязанность на ПАО «Россети Сибирь» «АлтайЭнерго» осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающих устройств малоэтажной жилой застройки, по адресу: 

<

адрес>, СНТ «

<

данные изъяты>», участок №, в соответствии с договором №.№ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенным ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1. Установить ответчику срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено - 1 месяц с момента вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседании представитель истца ФИО2 поддержала заявленные требования. Дополнительно уточнила, что просит обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в течение трех месяцев со дня вступления настоящего решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимаюших устройств, принадлежащих ФИО1, расположенных по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>, СНТ «

<

данные изъяты>», участок №, к электрическим сетям, в соответствии с условиями, установленными договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ПАО «Россети Сибирь» и Ой Т.И. и Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

В судебном заседании истец Ой Т.И. поддержала заявленные требования с учетом уточнений. 

Представитель ответчика не явился в судебное заседание, представил письменные возражения, в которых просил отказать в удовлетворении иска. 

Суд, заслушав стороны, изучив материалы дела, приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с ч. 3 ст. 154 ГК РФ, для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

В соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии с ч. 1 ст. 433 ГК РФ, договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ между Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ПАО «Россети Сибирь») и Ой Т.И. был заключен договор №.№ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Согласно п.1 договора, по настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) "Объект сельскохозяйственного производства", в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 5 кВт;

категория надежности третья;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,23 кВ;

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно п.2 договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения "Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом)", расположенного (который будет располагаться) по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 

<

адрес>, СНТ «

<

данные изъяты>», участок №, кадастровый номер земельного участка №.

Согласно п.3 договора, точка (и) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты Заявителя.

Согласно п.4 договора, технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

Согласно п.5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

Согласно п.6 договора, сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технологических условиях.

Обязанности сторон определены в разделе 2 договора.

Согласно п.10 договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Решением 

<

адрес> по государственному регулированию цен и тарифов от ДД.ММ.ГГГГ № составляет 21280 руб., в том числе НДС 20 % в сумме 3546,67 руб. 

Договор представлен сторонами в электронном виде. Факт заключения договора и его условия сторонами не оспаривались в судебном заседании.

Как установлено в судебном заседании, Ой Т.И. со своей стороны выполнила все условия указанного выше договора, технических условий, в том числе произвела оплату за технологическое присоединение в полном объеме.

Доказательств обратного представителем ответчика не представлено в судебное заседание. 

Однако, до настоящего времени, в нарушение установленного п.5 договора срока его исполнения, ПАО «Россети Сибирь» не исполнило взятые на себя обязательства по договору, не осуществило технологическое присоединение к электросетям, ссылаясь на отсутствие финансирования.

Заринской межрайонной прокуратурой ДД.ММ.ГГГГ внесено представление об устранении нарушений директору филиала ПАО «Россети Сибирь» - «АлтайЭнерго».

Согласно ответу на представление, поступившему ДД.ММ.ГГГГ, несвоевременное исполнение мероприятий по технологическому присоединению со стороны ПАО «Россети Сибирь» связано с дефицитом источников финансирования для выполнения в полном объеме обязательств по договорам технологического присоединения заявителей и на реализацию мероприятий капитального характера.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Статья 12 ГК РФ предусматривает защиту гражданских прав путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Факт нарушения ответчиком сроков выполнения обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ нашел свое подтверждение в судебном заседании, в связи с чем требование об обязании публичного акционерного общества «Россети Сибирь» осуществить технологическое присоединение энергопринимаюших устройств, принадлежащих ФИО1, расположенных по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>, СНТ «

<

данные изъяты>», участок №, к электрическим сетям, в соответствии с условиями, установленными договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ПАО «Россети Сибирь» и Ой Т.И. и Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, подлежит удовлетворению.

Каких-либо доказательств существования технических либо иных независящих от ответчика препятствий объективного характера для создания возможности подключения энергопринимающих устройств объекта ответчика к электрическим сетям, ответчик в адрес истца, а также в судебное заседание не предоставил.

В соответствии со ст.206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.

В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом (ч.2).

В своем отзыве представитель ответчика указал, что если исполнение договора связано со строительством ТП 10/0.4 кВ, ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ, то действительный срок исполнения таких мероприятий равен 3 месяцам, если связано только со строительством опор ВЛ 0.4 кВ, то в таком случае достаточно обычных для практики исполнения судебных актов по аналогичной категории споров в размере 2 месяцев с даты вступления судебного акта в законную силу. 

В судебном заседании представитель истца уточнил требования в части предоставления срока для выполнения обязательства, просил предоставить срок в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Заслушав мнение сторон, суд полагает возможным предоставить ответчику срок для осуществления технологического присоединения энергопринимаюших устройств, принадлежащих Ой Т.И. в течение трех месяцев со дня вступления настоящего решения суда в законную силу.

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 руб. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194, 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Заринского межрайонного прокурора в интересах ФИО1 удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (

<

данные изъяты>) в течение трех месяцев со дня вступления настоящего решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимаюших устройств, принадлежащих ФИО1, расположенных по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>, СНТ «

<

данные изъяты>», участок №, к электрическим сетям, в соответствии с условиями, установленными договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ПАО «Россети Сибирь» и Ой Т.И. и Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (

<

данные изъяты>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300 руб. 

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение одного месяца со дня составления мотивированного решения через Заринский городской суд.

Судья Заринского 

городского суда М.Н.Чернова 

Мотивированное решение изготовлено 12.12.2024 года.