Дело №2-336/2017 года

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

11 июля 2017 года г.Чаплыгин

Чаплыгинский районный суд Липецкой области в составе:

председательствующего судьи Никифоровой И.Б.

при секретарях Выприцкой Г.Н., Камышниковой Е.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Абада Груп» к ответчику ФИО1 о взыскании задолженности по договору на ремонтно-отделочные работы, пени, неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору,

У С Т А Н О В И Л:

ООО «Абада Груп», в лице генерального директора ФИО2, обратилось в суд с исковым заявлением к ответчику ФИО1 о взыскании суммы долга по Договору № на ремонтно-отделочные работы от 25.04.2016 года в размере 103 701 рубль 23 копейки, суммы неустойки вследствие просрочки оплаты по Договору № на ремонтно-отделочные работы от 25.04.2016 года в размере 18 383 рубля 44 копейки, суммы уплаченной госпошлины в размере 3642 рубля.

В обоснование своих требований указали, что между ФИО1 и ООО «Абада Груп» были заключены Договоры №ВККР 1054-162 от 25.04.2016 года на ремонтно-отделочные работы на объекте, расположенном по адресу: 

<

адрес> Договор купли-продажи материалов №162 от 25.04.2016 года.

В соответствии с п.1.1. Договора предусмотрено, что Подрядчик ООО «Абада Груп» обязуется выполнить по заданию Заказчика ФИО1 ремонтно-отделочные работы в помещениях Заказчика, расположенных по адресу: 

<

адрес>, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Пунктом 3.1. Договора предусмотрено, что за выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение в размере 166 000 рублей 00 копеек.

Согласно пункту 3.3. Договора № от 25.04.2016 года на ремонтно-отделочные работы, сторонами был согласован следующий порядок оплаты:

- в день подписания настоящего Договора Заказчик производит следующий авансовый платеж в размере 10 000 рублей;

- не позднее двух рабочих дней после подписания промежуточного акта сдачи- приемки работ (приемки указанных в акте сдачи-приемки работ) Заказчик производит платеж в размере стоимости работ согласно Смете и Акту приемки-сдачи работ, при этом внесенный авансовый платеж не учитывается;

- не позднее одного рабочего дня после завершения всех работ в соответствии с настоящим Договором и Сметой (со всеми изменениями и дополнениями) и окончательной приемки работ по настоящему Договору Заказчик производит полный расчет по настоящему Договору с учетом внесенного авансового платежа.

Истец выполнил свои обязательства перед Ответчиком, о чем свидетельствует подписанные Сторонами акты сдачи-приемки работ от 18.05.2016 года и 23.06.2016 года по Договору №№ на ремонтно-отделочные работы от 25.04.2016 года.

В итоге, фактическая стоимость выполненных работ с учетом скидки 20 % составляет 178487 рублей.

Согласно акту сверки в счет оплаты работ по Договору № на ремонтно-отделочные работы от 25.04.2016 года Ответчиком были внесены денежные средства в размере 65 133 рубля 00 копеек.

Со стороны ответчика сформировалась задолженность в размере 113 354 рубля 00 копеек.

В соответствии с Договором купли-продажи № от 25.04.2016 года, Продавец обязуется передать в собственность Покупателя товары согласно Спецификации (Приложение 1 к договору купли-продажи №), которая является неотъемлемой частью договора, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Цена Товара купли-продажи № составила денежную сумму в размере 134 354 рубля (часть 2 Договора).

Оплата указанной суммы производится в порядке, предусмотренном Договором, а именно:

- не позднее трех рабочих дней с момента заключения Договора Покупатель обязуется передать продавцу сумму предоплаты 10 000 (десять тысяч) рублей.

- в день передачи Товара Покупателю последний обязуется осуществить окончательный расчет и передать Продавцу сумму в полном размере от цены Товара, с учетом предоплаты.

По Договору купли-продажи № Продавцом выполнены следующие действия, направленные на исполнение своих обязательств по договору:

- доставлен строительный материал и оказаны услуги по разгрузке и доставке;

- вывезен строительный материал, от которого покупатель отказался. 

Общая сумма за фактически отгруженные материалы составила 146 048 рублей 23 копейки.

Во исполнение условий Договора купли-продажи материалов № от 25.04.2016 года Ответчиком внесена оплата стоимости материалов на сумму 155 701 рубль 00 копеек.

Учитывая размер переплаты по Договору купли-продажи материалов № от 25.04.2016 года в размере 9 652 рубля 77 копеек, посредством проведения взаимозачета денежных средств по Договорам № на ремонтно-отделочные работы от 25.04.2016 года и № от 25.04.2016 года на куплю-продажу материалов сумма основного долга Ответчика перед Истцом составила 103701 рубль 23 копейки и относится к договору № на ремонтно-отделочные работы от 25.04.2016 года.

20.07.2016 года в связи с тем, что сформировалась задолженность, Ответчику была направлена претензия (по адресу регистрации и по адресу осуществления ремонтно-отделочных работ) в порядке досудебного урегулирования. В претензии Ответчику было предложено до 01.08.2016 года погасить свою задолженность перед ООО «Абада Груп».

Ответчик данную претензию получила 26.07.2016 года по адресу проведения ремонтно-отделочных работ, по адресу регистрации не получила. Ответчик ответа на нее не предоставила, действий, направленных на погашение сформировавшейся задолженности, не предприняла.

В соответствии с п.3.3. Договора № на ремонтно-отделочные работыот 25.04.2016 года Заказчик должен внести оплату части выполненных работ в срок не позднееодного рабочего дня после завершения всех работ в соответствии с настоящим договором исметой (со всеми изменениями и дополнениями) и окончательной приемки работ понастоящему договору с учетом внесенного авансового платежа.

Заключительный Акт приемки-сдачи работ подписан Ответчиком 23.06.2016 года. Сучетом положений п.3.3 просрочка платежа считается с 25.06.2016 года. По состоянию на 06.10.2016 года количество дней просрочки составило 103 дня.

Размер неустойки составляет 18383 рубля.

В ходе судебного разбирательства от ООО «Абада Груп», в лице генерального директора ФИО2, поступили уточнения исковых требований, согласно которых он просил суд взыскать с ответчика ФИО1 сумму долга по Договору № на ремонтно-отделочные работы от 25.04.2016 года в размере 102 218 рублей 23 копейки, сумму неустойки вследствие просрочки оплаты по Договору № на ремонтно-отделочные работы от 25.04.2016 года в размере 18 231 рубль, сумму уплаченной госпошлины в размере 3608 рублей 98 копеек.

Истец ООО «Абада Груп», в лице представителя по доверенности ФИО3, участвующего в судебном заседании по ВКС с Тимирязевским районным судом г.Москвы, исковые требования с учетом уточнений поддержал, сославшись на доводы, изложенные в уточненном исковом заявлении.

Ответчик ФИО1, и ее представитель по устному заявлению ФИО4 в судебном заседании требования ООО «Абада Груп» не признали, предоставили возражения на исковое заявление, в которых просили отказать ООО «Абада Груп» в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела в целом, суд считает требования истца ООО «Абада Груп» подлежащими удовлетворению, но не в полном объеме. К такому выводу суд пришел по следующим основаниям.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образомв соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, апри отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями деловогооборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение егоусловий не допускаются (статья 310 ГК РФ).

Согласно ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п.1 ст.711 ГК РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Судом установлено, что 25.04.2016 года между ООО «Абада Груп» (Подрядчик) и ФИО1 (Заказчик) были заключены Договор № на ремонтно-отделочные работы и Договор № купли-продажи материалов.

В судебном заседании ответчиком данные обстоятельства не оспаривались.

Согласно п.1.1. Договора на ремонтно-отделочные работы предусмотрено, что Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика ремонтно-отделочные работы в помещениях Заказчика, расположенных по адресу: 

<

адрес>, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Пунктом 3.1. указанного Договора предусмотрено, что за выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение в размере 166 000 рублей.

В соответствии с пунктом 3.2, Договора, стоимость работ может меняться в соответствии с п.п.2.2., 2.6 настоящего Договора, а также в случаях предусмотренных действующем законодательством РФ.

В соответствии с п.3.4. Договора, стоимость работ по настоящему Договору и отдельных этапов может быть изменена в случае изменения Заказчиком перечня и объема работ по Объекту, о чем составляется дополнительное соглашение и вносятся изменения в смету.

На основании п.2.6. Договора, в случае изменения по желанию Заказчика или по объективной необходимости предусмотренного Сметой на ремонтно-отделочные работы объема и перечня работ, Заказчик утверждает изменение Сметы, утверждает изменение сроков выполнения работ (подписывает необходимые дополнительные соглашения к настоящему Договору), а также оплачивает превышение стоимости работ на Объекте, в случае его возникновения, в порядке предусмотренном дополнительным соглашением сторон.

Согласно п.3.3. № 1054-162 от 25.04.2016 года на ремонтно-отделочные работы, сторонами был согласован следующий порядок оплаты:

- в день подписания настоящего Договора Заказчик производит следующий авансовый платеж в размере 10 000 (десять тысяч) рублей;

- не позднее двух рабочих дней после подписания промежуточного акта сдачи- приемки работ (приемки указанных в акте сдачи-приемки работ) Заказчик производит платеж в размере стоимости работ согласно Смете и Акту приемки-сдачи работ, при этом внесенный авансовый платеж не учитывается;

- не позднее одного рабочего дня после завершения всех работ в соответствии с настоящим Договором и Сметой (со всеми изменениями и дополнениями) и окончательной приемки работ по настоящему Договору Заказчик производит полный расчет по настоящему Договору с учетом внесенного авансового платежа.

По запросу суда ООО «Абада Груп» предоставило оригинал договора № на ремонтно-отделочные работы от 25.04.2016 года. 

Свою подпись в договоре ответчик ФИО1 в судебном заседании удостоверила.

25.04.2016 года между ООО «Абада Груп» и ФИО1 было заключено дополнительное соглашение к договору № о порядке предоставления скидки. В соответствии с п.1 соглашения, заказчику предоставляется скидка по договору № в размере 20%. В соответствии с п.6 соглашения, скидка учитывается во время произведения итогового расчета по договору №. В соответствии с абз.3 п.6 соглашения, в случае увеличения стоимости договора № предоставленная скидка изменяется в пределах, предусмотренных п.1 настоящего соглашения. То есть скидка в размере 20 % предоставляется от увеличенной стоимости договора.

06.05.2016 года между ООО «Абада Груп» и ФИО1 было заключено дополнительное соглашение №1 к договору № на ремонтно-отделочные работы (на уменьшение объема работ), в соответствии с которым общая стоимость работ была уменьшена на 31 278 рублей и составила 134 722 рубля.

06.05.2016 года между ООО «Абада Груп» и ФИО1 было заключено дополнительное соглашение №2 к договору № на ремонтно-отделочные работы (на увеличение объема работ), в соответствии с которым общая стоимость работ была увеличена на 68 393 рубля и составила 203 115 рублей.

03.06.2016 года между ООО «Абада Груп» и ФИО1 было заключено дополнительное соглашение №3 к договору № на ремонтно-отделочные работы (на уменьшение объема работ), в соответствии с которым общая стоимость работ была уменьшена на 5 604 рубля и составила 197 511 рублей.

23.06.2016 года между ООО «Абада Груп» и ФИО1 было заключено дополнительное соглашение №4 к договору № на ремонтно-отделочные работы (на увеличение объема работ), в соответствии с которым общая стоимость работ была увеличена на 23 744 рубля и составила 221 255 рублей.

По запросу суда ООО «Абада Груп» предоставило оригиналы указанных дополнительных соглашений о порядке предоставления скидки от 25.04.2016 года, №1 (на уменьшение объема работ) от 06.05.2016 года, №2 (на увеличение объема работ) от 06.05.2016 года, №3 (на уменьшение объема работ) от 03.06.2016 года, №4 (на увеличение объема работ) от 23.06.2016 года. 

Свои подписи в указанных дополнительных соглашениях ответчик ФИО1 в судебном заседании удостоверила.

Таким образом, общая стоимость согласованных работ составила 221 255 рублей.

В соответствии с абз.2, 3, 4 п.2.7. Договора № от 25.04.2016 года Подрядчик имеет право в любое время при производстве работ по настоящему Договору, но не чаще, чем один раз в три дня предоставить Заказчику для подписания акт сдачи-приемки выполненных к данному моменту работ (промежуточный акт). Заказчик обязуется подписать указанные выше акты при условии, что работы выполнены качественно и претензий к Подрядчику нет.

По договору № от 25.04.2016 года работы на Объекте начаты в сроки, предусмотренные договором.

Истец выполнил свои обязательства перед Ответчиком, о чем свидетельствует подписанные Сторонами акты сдачи-приемки работ от 18.05.2016 года и 23.06.2016 года по Договору № на ремонтно-отделочные работы от 25.04.2016 года. Доказательств обратного ответчик в судебном заседании не предоставила. 

Свои подписи в актах сдачи-приемки работ ответчик ФИО1 в судебном заседании также удостоверила.

Заявлений и претензий к качеству, объему работ ответчиком предъявлено не было. Обязанность внести оплату за выполненные работы, с учетом положений п.3.3.Договора № на ремонтно-отделочные работы от 25.04.2016 года уОтветчика возникла 25.06.2016 года.

Согласно расчета, не оспоренного в суде ответчиком и представленных в суд вышеперечисленных документов,фактическая стоимость выполненных работ составляет 221 255 рублей (без учета скидки) и с учетом скидки 20 % - 177 004 рубля.

Согласно акту сверки в счет оплаты работ по Договору № на ремонтно-отделочные работы от 25.04.2016 года Ответчиком были внесены денежные средства в размере 65 133 рубля 00 копеек. Указанные обстоятельства ответчик ФИО1 подтвердила, с суммой согласилась.

Таким образом, суд соглашается с позицией стороны истца о том, что у ответчика сформировалась задолженность в размере 111 871 рубль 00 копеек (177 004 рубля - 65 133 рубля).

В соответствии с Договором купли-продажи № от 25.04.2016г., Продавец обязуется передать в собственность Покупателя товары согласно Спецификации (Приложение 1 к договору купли-продажи №), которая является неотъемлемой частью договора, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Цена Товара купли-продажи № составила денежную сумму в размере 134 500 рублей (часть 2 Договора).

Оплата указанной суммы производится в порядке, предусмотренном Договором, а именно:

- не позднее трех рабочих дней с момента заключения Договора Покупатель обязуется передать продавцу сумму предоплаты 10 000 (десять тысяч) рублей.

- в день передачи Товара Покупателю последний обязуется осуществить окончательный расчет и передать Продавцу сумму в полном размере от цены Товара, с учетом предоплаты.

По Договору купли-продажи № Продавцом выполнены следующие действия, направленные на исполнение своих обязательств по договору:

1) доставлен строительный материал и оказаны услуги по разгрузке и доставке,

2) вывезен строительный материал, от которого Покупатель отказался.

Общая сумма за фактически отгруженные материалы составила 146 048 рублей 23 копейки.

Согласно искового заявления и пояснений представителя истца в связи с увеличением объема работ возникла необходимость в приобретении заказчиком дополнительного материала. Этим объясняется увеличение объема и стоимости поставленного материала, по сравнению с договором купли-продажи № от 25.04.2016 года.

Во исполнение условий Договора купли-продажи материалов № от 25.04.2016 года Ответчиком внесена оплата стоимости материалов на сумму 155 701 рубль 00 копеек.

Учитывая размер переплаты по Договору купли-продажи материалов в размере 9 652 рубля 77 копеек, посредством проведения взаимозачета денежных средств по Договорам № на ремонтно-отделочные работы и купли-продажи материалов сумма основного долга Ответчика перед Истцом составляет 102218 рублей 23 копейки и относится к договору № на ремонтно-отделочные работы от 25.04.2016 года.

Согласно справки генерального директора ООО «Абада Груп» договор № купли-продажи материалов от 25.04.2016 года утерян.

20.07.2016 года Ответчику была направлена претензия (по адресу регистрации и по адресу осуществления ремонтно-отделочных работ) в порядке досудебного урегулирования (исх. №403 от 20.07.2016 года). В претензии Ответчику было предложено до 01.08.2016 года погасить задолженность перед ООО «Абада Груп».

Ответчик получила 26.07.2016 года данную претензию по адресу проведения ремонтно-отделочных работ, по адресу регистрации - не получила. Ответа на претензию ответчик не предоставила, действий, направленных на погашение сформировавшейся задолженности, не предприняла.

Пунктом 5.1 Договора № от 25.04.2016 года на ремонтно-отделочные работы предусмотрена ответственность Заказчика за нарушение обязательств по оплатевыполненных работ в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

В соответствии с п.3.3. Договора № на ремонтно-отделочные работыот 25.04.2016 года Заказчик должен внести оплату части выполненных работ в срок не позднееодного рабочего дня после завершения всех работ в соответствии с настоящим договором исметой (со всеми изменениями и дополнениями) и окончательной приемки работ понастоящему договору с учетом внесенного авансового платежа.

Заключительный Акт приемки-сдачи работ подписан Ответчиком 23.06.2016 года.

В судебном заседании ответчиком данное обстоятельство не оспаривалось, подпись в акте приемки-сдачи ответчиком была подтверждена.

С учетом условий договора, сучетом положений п.3.3 договора просрочка платежа считается с 25.06.2016 года.

Истец просит суд взыскать неустойку по состоянию на 06.10.2016 года. 

На указанную дату количество дней просрочки составило 103 дня.

Таким образом, размер неустойки по Договору № на ремонтно-отделочные работы от 25.04.2016 года за период с 25.06.2016 года по 06.10.2016 года составляет 18 231 рубль = (177004 х 0,1%) х 103. 

Суд полагает, что данные требования истца подлежат частичному удовлетворению.

В судебном заседании ответчик и ее представитель просили суд снизить размер неустойки исходя из материального положения ответчика ( ФИО5 является пенсионеркой, инвалидом третьей группы, ее пенсия согласно представленной в суд справки составляет не более 15000 рублей), сложившихся для нее тяжелых жизненных обстоятельств ( ее дочь, ФИО6 больна онкологическим заболеванием, находится на лечении).

Ответчик просила суд также учесть, что исковое заявление истцы подали в суд спустя более трех месяцев с момента нарушения обязательства, с момента выставления ей претензии с указанием срока для добровольного возмещения причиненного им ущерба.

При таких обстоятельствах суд находит размер неустойки явно несоразмерным последствиям нарушения обязательства, принимая во внимание компенсационный характер неустойки, отсутствия доказательств наличия у истца убытков, наступивших вследствие нарушения ответчиком условий договора, установленных по делу обстоятельств, согласно которым ответчик частично выполнила свои обязательства по договору, своевременно внесла часть суммы указанную в договоре, считает возможным уменьшить размер неустойки до 5000 рублей, поскольку данная сумма обеспечит соблюдение баланса между последствиями ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств и примененной к нему мерой ответственности.

Согласно ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. 

Судебные расходы по оплате госпошлины взыскиваются судом пропорционально удовлетворенным исковым требованиям, то есть в размере 3 344 рубля 36 копеек.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ответчика ФИО1 в пользу ООО «Абада Груп» сумму долга по договору № на ремонтно-отделочные работы от 25.04.2016 года в размере 102218 рублей 23 копейки, неустойку вследствие просрочки оплаты по Договору № № на ремонтно-отделочные работы от 25.04.2016 года в размере 5000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 3344 рубля 36 копеек, а всего взыскать 110 562 (сто десять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 59 копеек.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через Чаплыгинский районный суд Липецкой области в течение месяца с момента изготовления решения суда в окончательной форме.

Председательствующий И.Б.Никифорова

Решение в окончательной форме изготовлено 17 июля 2017 года.