Дело №2-932/2025 (2-7094/2024)

УИД 39RS0002-01-2024-009270-48

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

3 февраля 2025 года г. Калининград

Центральный районный суд г. Калининграда в составе: 

председательствующего судьи Сараевой А.А.,

при секретаре Дождёвой В.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 ФИО6 к АО «Россети Янтарь» о понуждении выполнить обязательства по договору технологического присоединения, взыскании компенсации морального вреда, неустойки, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратилась с иском в суд к АО «Россети Янтарь», в котором ссылаясь на невыполнение ответчиком своих обязательств, просила обязать ответчика осуществить технологическое присоединение малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом) расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

 адрес > к электрическим сетям в соответствии с договором № в течение 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу; взыскать с ответчика в свою пользу неустойку в размере 58501,22 рубль; компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей.

Истец ФИО1, извещавшаяся о дате и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явилась, о причине неявки суду не сообщила, ходатайств об отложении не заявляла. Ее представитель по доверенности ФИО2, исковые требования поддержала в полном объеме, их просила удовлетворить, указав на отсутствие возражений по установлению ответчику месячного срока для исполнения обязательств по договору со дня вступления в законную силу решения суда. 

Представитель ответчика АО «Россети Янтарь» по доверенности ФИО3, в судебном заседании возражала против удовлетворения требований иска по основаниям, изложенным в письменном отзыве на исковое заявления. Не оспаривая факта заключения договора об осуществлении технологического присоединения, ссылается на то, что порядок технологического присоединения к электрическим сетям регламентируется Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства № 861 от 27.12.2004 года. АО «Россети Янтарь» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта истца необходимо: подготовить и утвердить техническое задание, которое предусматривает какие мероприятия в целях технологического присоединения заявителя будут выполнены АО «Россети Янтарь»; путем проведения конкурентных процедур выбрать подрядную организацию на выполнение проектных и изыскательных работ; после принятия проектной документации путем проведения конкурентных процедур выбрать подрядную организацию на выполнение строительно-монтажных работы с поставкой оборудования; в случае невозможности заключения или выполнения договора на строительно-монтажные работы принять решение о выполнении работ собственным силами общества. В рамках исполнения обязательств по указанному договору со стороны АО «Россети Янтарь» разработано, утверждено и передано в работу техническое задание по титулу №: «Строительство ЛЭП 0,4 кВ (Т-659), организация системы учета электроэнергии по ул.Урицкого в г.Калининраде». Для разработки рабочей документации заключен договор с подрядной организацией ООО «Энергопроект» № от 13.12.2023 года. 27.04.2024 года объект включен в состав рамочного договора подряда №№ от 13.12.2023 года путем подписания заявки №1 (лот № 1.1.8) на выполнение работ «Под ключ». В настоящее время ООО «Энергопроект» фактически выполнил работы (прибор учета принят в эксплуатацию), идет документарная приемка выполненных работ по строительству ЛЭП и подстанции. 09.12.2024 года АО «Россети Янтарь» составлен акт 4621 допуска прибора учета. Таким образом, со стороны ответчика предприняты все необходимые меры по исполнению условий договора. Задержка сроков по осуществлению технологического присоединения связана с большим объемом работ для подрядной организации. Просит установить для Общества не менее одного месяца для окончательного выполнения работ по договору. АО «Россети Янтарь» не согласно с требованием относительно компенсации морального вреда. Лицо, требующее возмещения морального вреда, должно доказать факт его причинения, противоправный характер действий ответчика, размер, а также причинную связь между причинением вреда и действиями ответчика. Отсутствие хотя бы одного из указанных условий, необходимых для применения ответственности, влечет отказ в удовлетворении иска. Каких-либо доказательств причинения морального вреда и причинно-следственной связи между предметом спора и наступившими последствиями истец в дело не представил, не доказав, таким образом, факт причинения ему морального вреда. Просит снизить размер компенсации морального вреда до разумных пределов. Условиями договора и Правилами 861 предусмотрено начисление неустойки за нарушение сторонами условий договора, которая не может превышать размер неустойки, за год просрочки. При этом, неустойка в случае явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть снижена судом в соответствии с положениями статьи 333 ГК РФ. При определении размера неустойки просит применить статью 333 ГК РФ, поскольку неустойка в размере 58 501,22 рубль ведет к неосновательному обогащению истца и несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав все доказательства по делу в их совокупности, и дав им оценку в соответствии со статьей 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В соответствии с пунктом 2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно подпункту «б» пункта 16 вышеуказанных Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Согласно пункту 16.3 указанных Правил обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 18 указанных Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

Как установлено и подтверждается материалами дела, ФИО1 является собственником земельного участка с кадастровым номером № категория земель – земли населенных пунктов для индивидуальной жилой застройки, для обслуживания жилого дома, с расположенным на нем жилым домом с кадастровым номером № по адресу: 

<

 адрес >

18.07.2023 между ФИО4 и АО «Россети Янтарь» заключен договор № осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствие с которым АО «Россети Янтарь» обязалось для электроснабжения объекта: малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом), расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

 адрес > (кадастровый № осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта, обеспечить готовность объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулировать отношения с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15,00 кВт, категория надежности - третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ., максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 (кВт). 

Пунктом 5 договора предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора, то есть до 18 июля 2024 года.

В соответствии с пунктом 10 договора размер платы за технологическое присоединение составляет 86 31,15 рубль, в том числе НДС 14338,52 рублей. 

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется в следующем порядке: а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета; б) 30 процентов за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; в) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; г) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям (пункт 11 договора). 

Датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (пункт 12 договора). 

Обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение ФИО4 исполнены в полном объеме, что подтверждается справкой по операции Сбербанк Онлайн от 18 июля 2023 года на сумму 86 031,15 рублей. 

В связи с переходом к ФИО1 прав на указанный в условиях типового договора № от 18.07.2023 года земельный участок, расположенный по адресу: г

<

 адрес > (кадастровый №) на основании договора купли-продажи земельного участка от 29.01.2024 года, соглашения от 01.03.2024 года о переуступке прав и обязанностей по договору об осуществлении технологического присоединения №№ на основании обращения заявителя от 16.07.2024 года стороны пришли к соглашению о переходе всех прав и обязанностей по соответствующему условиям типового договора к заявителю. 

Из материалов дела следует, что согласно договору № об осуществлении технологического присоединения, технологическое присоединение к электрическим сетям предусматривалось в пределах заявленной мощности потребления до 15 кВт включительно, следовательно, истец относится к категории заявителей, указанных в пункте 14 вышеуказанных Правил и тем самым, мероприятия по технологическому присоединению принадлежащего ему объекта к электрическим сетям не могут превышать 6 месяцев со дня заключения договора, срок окончания работ по технологическому присоединению объекта истца истекал 18.01.2024 года. 

Согласно пункту 10 Технических условий №Г-5456/23, являющихся приложением к договору, сетевая организация обязана выполнить следующие мероприятия: в случае прокладки КЛ-1 кВ на границе земельного участка объекта установить СП-0,4 кВ. оборудованный группами «рубильник-предохранитель» или автоматическими выключателями на номинальный ток по расчету, с возможностью установки прибора учета (ПУ) электроэнергии; произвести проектирование, монтаж эл.сети от опоры ВЛ -0,4 кВ №18 или №19 (уточнить при проектировании), проходящей по ул.Урицкого, до СП нового (п.10.1) КЛ-1 кВ сечением не менее 25 кв.мм, (ориентировочно 60м). Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом; установить прибор учета (ПУ) и автоматический выключатель в СП новом (п.10.1) Тип ПУ определить техническим заданием; в случае строительства ВЛ.: от опоры В Л-0,4 кВ№18 или №19 (уточнить при проектировании), проходящей по ул.Урицкого, до границ участка объекта заявителя построить ВЛ-1 кВ проводом системы СИП сечением не менее 25 кв.м. (ориентировочно 60 м). Работы выполнить в соответствие с разработанным проектом; прибор учета (ПУ) установить на опоре (№ уточнить при монтаж) ВЛ-0,4 кВ (10.4), установленной не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя. От зажимов провода ВЛ-0,4 кВ до ПУ выполнить монтаж СИП или КЛ расчетного сечения; в связи с присоединением дополнительной мощности при необходимости в РУ-0,4 кВ ТП-659 произвести замену группы «рубильник-предохранитель» (пункты 10.1-10.6).

В соответствии с пунктом 11 Технических условий заявитель осуществляет монтаж сети 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ- 0,4 кВ объектаКЛ-1 расчетного сечения. 

Согласно пункту 7 Технических условий точкой присоединения к электрической сети являются контакты соединения на приборе учета (ПУ). Точка присоединения к электрической сети является границей балансовой принадлежности с АО «Россети Янтарь» и распространяется не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя. 

На основании заявления ФИО1 от 12.08.2024 года, Управлением антимонопольной службы по Калининградской области 05.09.2024года в отношении АО «Россети Янтарь» возбуждено дело об административном правонарушении №№ предусмотренном частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ. Постановлением заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области от 26.09.2024 года №03/04/9.21-807/2024 по делу об административном правонарушении АО «Россети Янтарь» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 600 000 рублей, за нарушение сроков исполнения обязательств по договору № об осуществлении технологического присоединения.

Как следует из доводов ответчика и представленных документов, АО «Россети Янтарь» в рамках исполнения обязательств по договору разработано, утверждено и передано в работу техническое задание по титулу техническое задание №Г/031315/2023: «Строительство ЛЭП 0,4 кВ (Т-659), организация системы учета электроэнергии по ул. Урицкого в г. Калининграде». 

В соответствие с рамочным договором № от 13.12.2023 года, между АО «Россети Янтарь» и ООО «Энергопроект» 27.04.2024 года оформлена заявка №1 «Под ключ», в соответствие с которой подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить в соответствие с утвержденным техническим заданием (Приложение № 1-1.2 к настоящей заявке) и утвержденной рабочей документацией работы по выполнению инженерных изысканий, разработке рабочей документации, выполнению строительно-монтажных работ и поставке оборудования по объектам, перечень которых указан в приложении № 2 к настоящей заявке и сдать их результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить в порядке, предусмотренном заявкой. 

Начало работ – с момента подписания настоящей заявки (в соответствие с календарным планом работ), окончание работ – в соответствие с календарным планом.

В настоящее время ООО «Энергопроект» фактически выполнил работы (прибор учета принят в эксплуатацию), идет документарная приемка выполненных работ по строительству ЛЭП и подстанции. 

09.12.2024 года АО «Россети Янтарь» составлен акт № 4621 о допуске прибора учета.

Как следует из доводов представителя ответчика планируемый срок окончательного завершения работ один месяц с момента вступления решения в законную силу. 

Поскольку на момент рассмотрения дела технологическое присоединение не осуществлено, АО «Россети Янтарь» не выполнило обязательств по договору технологического присоединения, при этом право истца на своевременное и надлежащее выполнение условий договора, не может быть поставлено в зависимость от взаимоотношений между юридическими лицами, либо по иным основаниям, суд приходит к выводу, что в результате виновного бездействия ответчика нарушены права истца, как потребителя услуги.

При таких обстоятельствах суд, требование истца о возложении на АО «Россети Янтарь» обязанности выполнить технологическое присоединения к электрическим сетям законно и обоснованно, вследствие чего, подлежит удовлетворению.

Согласно статье 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Определяя срок выполнения работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, суд учитывает период неисполнения и критерий сезонности, устанавливает АО «Россети Янтарь» срок выполнения работ по технологическому присоединению - в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

В силу абзаца третьего подпункта «в» пункта 16 Правил №861 предусмотрена обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

В соответствии с положениями пункта 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Истцом произведен расчет неустойки за период с 18.01.2024 года по 17.10.2024 года, размер которой составляет 58501,22 рубль. 

Вместе с тем, неустойка за нарушение срока исполнения обязательств, подлежащая начислению ответчику, подлежит исчислению со следующего дня после наступления срока обязательств, то есть с 19.01.2024 года по 17.10.2024 года (дата определена истцом) и составляет 58 716 рублей (86 031,15 х 0,25% х 273 дней).

Суд рассматривает дело в пределах заявленных исковых требований.

При таких обстоятельствах, с ответчика подлежит взысканию неустойка за период с 19.01.2024 года по 17.1.2024 года в размере 58 501,22 рубль.

Оснований для применения положений статьи 333 ГК РФ и снижения размера договорной неустойки, по доводам представителя ответчика, у суда не имеется. 

В соответствии со статьей 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

С учетом характера и длительности допущенного ответчиком нарушения, степени нравственных страданий истца ФИО1 требований разумности и справедливости, суд определяет размер компенсации морального вреда, подлежащий взысканию с ответчика в пользу истца, в размере 5 000 рублей. 

Оснований для взыскания компенсации морального вреда в заявленном размере суд не усматривает.

Возражения стороны ответчика о недоказанности причинения истцу моральных страданий, причинно-следственной связи между предметом спора и наступившими последствиями, является несостоятельным, поскольку исходя из разъяснений пункта 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», достаточным условием для взыскания компенсации морального вреда является установление судом факта нарушения прав потребителя.

Согласно пункту 6 статьи 13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Пунктом 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке исполнителем, суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

С учетом изложенного, с ответчика в пользу истца ФИО1 подлежит взысканию штраф в размере 31750,61 рублей ((58501,22+5000) х 50%).

В соответствии с частью 1 статьи 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6 000 рублей.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО1 ФИО7 удовлетворить частично.

Обязать АО «Россети Янтарь» (№, ОГРН №) исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № осуществить технологическое присоединение – малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом) расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

 адрес >) к электрическим сетям в соответствии с договором №5456/06/23 и техническими условиями №Г-5456/23 в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» (№) в пользу ФИО1 ФИО8, 

<

 Дата > года рождения (СНИЛС №) договорную неустойку за период с 19.01.2024 года по 17.10.2024 года в размере 58501,22 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, штраф в размере 31750,61 рублей, а всего 95251,83 рубль.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Калининградского областного суда через Центральный районный суд г. Калининграда в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 17 февраля 2025 года.

Судья А.А. Сараева