Дело № 2-3784/25

23RS0036-01-2025-010292-58

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ЗАОЧНОЕ)

20 октября 2025 года г. Краснодар

Октябрьский районный суд г. Краснодара в составе:

председательствующего – судья Прибылов А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению АО «Россети Кубань» к ФИО2 о взыскании неустойки, 

УСТАНОВИЛ:

АО «Россети Кубань» обратилось в суд с иском к ФИО2, в котором просит взыскать неустойку в размере 631 149 руб. 36 коп., государственную пошлину в размере 17 623 руб. 

В обоснование иска указано, что между ПАО «Россети Кубань» и ФИО2 заключен Договор от ДД.ММ.ГГГГ № об осуществлении технологического присоединения энергопринимающего устройства объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес> к/н №. Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с п. 10 Договора составил 414 141,13 руб., кроме того НДС 20% в размере 82 828,23 руб., а всего 496 969, 36 руб. В соответствии с п. 4 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составил 6 месяцев со дня заключения договора, а именно до 02.02.2024. АО «Россети Кубань» выполнило свои обязательства по Договору, при этом ответчиком обязательства не исполняются.

В судебное заседание представитель истца не явился, просил рассмотреть дело в свое отсутствие. 

Ответчик о времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом, в судебное заседание не явился, сведений о причинах неявки суду не представил и не просил о рассмотрении дела в свое отсутствие, в связи с этим суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, в порядке заочного судопроизводства.

Исследовав представленные доказательства и иные материалы гражданского дела, оценив относимость, допустимость и достоверность каждого из доказательств в отдельности, а также их взаимную связь и достаточность в совокупности, суд находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из содержания искового заявления и подтверждается материалами дела, между ПАО «Россети Кубань» и ФИО1 заключен Договор от 02.08.2023 № об осуществлении технологического присоединения энергопринимающего устройства объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>, к/н №

24.01.2025 произошла смена наименования с ПАО «Россети Кубань» на АО «Россети Кубань», что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.01.2025 № ЮЭ№.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с п. 10 Договора составил 414 141,13 руб., кроме того НДС 20% в размере 82 828,23 руб., а всего 496 969, 36 руб.

В соответствии с п. 4 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составил 6 месяцев со дня заключения договора, а именно до 02.02.2024.

В силу подпункта "в" пункта 16 Правил N 861 (в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 N 999, от 10.03.2020 N 262, от 02.03.2021 N 299) договор технологического присоединения должен содержать в качестве существенного условия положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами N 861 сроков исполнения своих обязательств, в том числе: обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 данных Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВт и ниже), в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей (1 100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) данных Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей (1 100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) данных Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки).

При нарушении одной из сторон обязательств, принятых по договору о технологическом присоединении, ответственность за такое нарушение наступает в соответствии с общими нормами о гражданской правовой ответственности.

Договор технологического присоединения в силу статьи 426 ГК РФ является публичным договором. Наличие публичного элемента в гражданско-правовых отношениях свидетельствует о том, что стороны отношений не в полной мере свободны в установлении своих прав и обязанностей, в определении условий договора. Такое ограничение может влиять и на возможность выбора альтернативных способов разрешения спора из таких отношений. Однако участники гражданских правоотношений в силу их диспозитивной природы должны иметь явное и однозначное представление о наличии такого ограничения (Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с выполнением функций содействия и контроля в отношении третейских судов и международных коммерческих арбитражей, утвержденный Президиумом ВС РФ 26 декабря 2018 года).

01.02.2024, 02.12.2024 и 28.02.2025 между сторонами подписаны дополнительные соглашения к Договору № от 02.08.2023 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя о продлении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

В соответствии с пунктами 2 и 3 соглашений указанных соглашений, продление срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению осуществляется на условиях оплаты Заявителем неустойки, согласно п. 18 Договора неустойка рассчитывается с 03.02.2024 и составляет 1 242 руб. 42 коп. в день. Окончательный расчет неустойки производится на дату подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с п. 18 Договора, сторона, нарушавшая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от общего размера платы за технологическое присоединение по Договору за каждый день просрочки.

АО «Россети Кубань» выполнило свои обязательства по Договору, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения от 25.06.2025 и актом о выполнении технологических условий от 25.06.2025.

Вместе с тем, согласно пункту 16(6) Правил N 861 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 N 999) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем, если заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

Так как положения пункта 16(6) Правил N 861 прямо приравнивают нарушение заказчиком сроков внесения платы за технологическое присоединение к нарушению сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению, то сетевая организация вправе требовать от заявителя, нарушившего срок внесения платы за технологическое присоединение, уплаты законной неустойки в размере, определенном подпунктом "в" пункта 16 названных Правил.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

Согласно материалам дела ответчиком обязательства по Договору от 02.08.2023 № не исполняются. Обратного суду не представлено.

Установлено, что количество дней нарушения ответчиком исполнения обязательства с момента истечения срока, установленного п. 4 Договора, по состоянию на 24.06.2025 составило 508 дней.

Согласно расчету представленному истцом, неустойка составляет 631 149 руб. 36 коп. (1 242 руб. 42 коп. * 508 дней).

Данный расчет судом проверен, признан арифметически верным, контррасчет ответчиком не представлен.

В целях досудебного урегулирования спора истец направил в адрес ответчика досудебную претензию № КЭС/04/681-исх от 11.07.2025, которая оставлена без удовлетворения.

На основании изложенного, учитывая, что ответчиком нарушен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный Договором от 02.08.2023 № и дополнительными соглашениями от 01.02.2024, 02.12.2024 и 28.02.2025, суд находит требования истца законными и обоснованными, поэтому подлежащими удовлетворению в полном объеме. 

Согласно ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В силу ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Истцом при подаче иска оплачена государственная пошлина в размере 17 623 руб., что подтверждается платежным поручением № 2996 от 28.08.2025, которую суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 – 199, 233-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования АО «Россети Кубань» к ФИО2 о взыскании неустойки удовлетворить.

Взыскать с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (паспорт № №, выдан 

<

адрес>) в пользу АО «Россети Кубань» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) неустойку в размере 631 149 рублей 36 копеек, государственную пошлину в размере 17 623 рубля, а всего взыскать 648 772 (шестьсот сорок восемь тысяч семьсот семьдесят два) рубля 36 копеек.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд г. Краснодара через Октябрьский районный суд г. Краснодара в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 20.10.2025.

Судья А.А. Прибылов