Дело №

УИД 41RS0№-60

РЕШЕНИЕ

 

именем Российской Федерации 

г. Петропавловск-Камчатский ДД.ММ.ГГГГ 

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в составе:

председательствующего судьи Нетеса С.С., 

при секретаре судебного заседания Ефремовой Л.Н., 

с участием:

представителя истца ФИО1, 

представителя ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3 к Публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» о возложении обязанности исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, присуждении судебной неустойки, 

установил:

ФИО3 обратился в суд к Публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (далее - ПАО «Камчатскэнерго») о возложении обязанности исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, присуждении судебной неустойки. В обоснование заявленных исковых требований указал, что истец является собственником имущества: объекта недвижимости: нежилое здание, нежилая четырехэтажная блок-вставка площадью 309,7 кв. м, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 

<

адрес>, с кадастровым номером №, назначение – нежилое, количество этажей – 3, в том числе подземных – 1, которое ремонтирует для личного проживания.

ДД.ММ.ГГГГ между истцом и сетевой организацией ПАО «Камчатскэнерго» был заключен договор № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Оплата по договору была осуществлена в полном объеме в соответствии с пунктом 10 договора в сумме 45 108 руб. на основании выставленного счета на оплату № ПП№ от ДД.ММ.ГГГГ 

ДД.ММ.ГГГГ по причине неисполнения сетевой организацией ПАО «Камчатскэнерго» технических условий, сторонами было заключено дополнительное соглашение к условиям типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № № от ДД.ММ.ГГГГ, пунктом 1 которого стороны договорились продлить срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению сроком до ДД.ММ.ГГГГ включительно. Несмотря на то, что срок, установленный дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № № от ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ истек, сетевая организация работы по пункту 10 технических условий не произвела, технологическое присоединение согласно условиям договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № № от ДД.ММ.ГГГГ не осуществила. 

Таким образом, коммерческая организация ПАО «Камчатскэнерго», фактически являющаяся монополистом на рынке продажи электроэнергии, необоснованно уклоняется от заключения публичного договора, что недопустимо в силу прямого указания статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 5 Закона Российской Федерации «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Своими действиями ПАО «Камчатскэнерго» нарушает права истца как потребителя, а также антимонопольное законодательство. Так как сетевая организация отказывает в заключении договора технологического присоединения к электрическим сетям, то истец не может заключить договор электроснабжения. 

Истец выполнил обязательство по оплате расходов на технологическое присоединение, а также выполнил на своем объекте все мероприятия, необходимые для осуществления технологического присоединения его энергопринимающих устройств. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика была направлена претензия с требованием в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ выполнить условия договора, технических условий и осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, которая осталась без ответа. До настоящего времени требования об исполнении условий договора не исполнены и на сегодняшний день работ, предусмотренных по договору, ответчиком не проводилось.

Срок исполнения обязательств четко определен договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенным между истцом и ответчиком. Каждая сторона приняла на себя обязательства, которые до настоящего времени ответчиком не выполнены. Каких-либо обстоятельств, порождающих у ответчика права на невыполнение работ по осуществлению технологического присоединения объекта к электрическим сетям, либо влекущих освобождение сетевой организации от указанного обязательства, не имеется. При таком положении, установив факт просрочки исполнения обязательств ответчиком по договору на технологическое присоединение и нарушение прав истца как потребителя услуги, суд вправе возложить на ответчика обязанность исполнить обязательство по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с установленными в нем условиями. Полагает, что требования подлежат удовлетворению по возложению на ответчика обязанности к исполнению договора в полном объеме. Просит установить ответчику срок для исполнения возложенных на него решением суда обязательств с учетом принципа разумности, а также объема необходимых для исполнения решения суда действий - 5 дней. 

Просит суд определить размер и порядок взыскания с ответчика судебной неустойки на случай неисполнения решения суда в размере 1000 руб. в день с ежедневным удвоением. 

На основании изложенного истец просил суд возложить на ответчика обязанность исполнить договор № № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в пятидневный срок. Присудить судебную неустойку в размере 1000 руб. в день с ежедневным удвоением. 

Истец ФИО3 о времени и месте судебного заседания извещен, участия не принимал, направил представителя.

В судебном заседании представитель истца ФИО1, действующий на основании доверенности, исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

В судебном заседании представитель ответчика ФИО2, действующая на основании доверенности, исковые требования не признала по основаниям, изложенным в возражениях на исковое заявление.

Согласно возражениям на исковое заявление истец указывает, что общество уклоняется от заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Указанное не соответствует действительности и опровергается материалами дела. 

Между ПАО «Камчатскэнерго» и ИП ФИО3 заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до ДД.ММ.ГГГГ Утверждение истца о том, что причиной заключения указанного дополнительного соглашения явилось неисполнение ответчиком технических условий, документально не подтверждается. При этом истец скрывает от суда следующие обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора по существу. ДД.ММ.ГГГГ истец обратился к ответчику с заявлением об увеличении мощности по указанному договору со значения 15 кВт до значения 30 кВт. Заявление об увеличении мощности рассмотрено, истцу направлен проект дополнительного соглашения №, которым стороны предусмотрели изменение размера платы за технологическое присоединение, аннулирование ранее выданных технических условий, выдачу новых технических условий, новый срок выполнения мероприятий.

Поскольку изменились условия технологического присоединения, возникла необходимость выдачи новых технических условий с учетом мощности 30 кВт, в связи с чем срок выполнения мероприятий по новым техническим условиям составляет 4 месяца с даты заключения дополнительного соглашения, так как это существенное условие договора, которое затрагивается выдачей новых технических условий. Сетевая организация, действуя в рамках публичного договора, правомерно действовала, предложив истцу подписать дополнительное соглашение на желаемую величину мощности. Истец, получив проект указанного дополнительного соглашения №, письмом от ДД.ММ.ГГГГ входящий № отказал в его подписании. Таким образом, истец вводит суд в заблуждение, утверждая об отказе сетевой организации в заключении договора, поскольку его изменившаяся потребность в технологическом присоединении на 30 кВт повлекла необходимость согласования новых технических условий и нового срока выполнения мероприятий. 

Истец ДД.ММ.ГГГГ обратился с требованием к сетевой организации завершить технологическое присоединение в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, но при условии, что ему нужна новая мощность в рамках указанного договора (следовательно, и заключение дополнительного соглашения), такое требование не является обоснованным, разумным и исполнимым, не основано на нормах закона. После того, как сетевая организация исчерпала возможные способы заключить дополнительное соглашение на увеличение мощности, истцу был направлен проект дополнительного оглашения № с продлением срока выполнения мероприятий на существующую величину мощности. 

Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ с протоколом разногласий от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом урегулирования разногласий к протоколу разногласий от ДД.ММ.ГГГГ истец и ответчик согласовали продление срока выполнения мероприятий до ДД.ММ.ГГГГ Истец, действуя добросовестно и разумно, при заключении дополнительного соглашения проявил свою волю на изменение условий сделки. Иное материалами дела не подтверждается, сведения об оспаривании дополнительного соглашения и признании его недействительной сделкой отсутствуют. Истец не вправе ссылаться на просрочку исполнения обязательства в рамках договора и дополнительного соглашения, условия которых уже изменены иным дополнительным соглашением №. Полагают, что срок выполнения мероприятий истекает лишь ДД.ММ.ГГГГ, а просрочка исполнения обязательств не может возникнуть ранее, чем ДД.ММ.ГГГГ Истец, обращаясь в суд с требованием о понуждении исполнить обязательство, срок исполнения по которому еще не наступил, действует неправомерно. Более того, скрывая от суда обстоятельство об изменении условий договора, истец пытается использовать право на судебную защиту как механизм для одностороннего изменения условий обязательства. Вопреки мнению истца, судебная система не может служить способом манипулировать стороной договора и удовлетворения своих бесконечных потребностей, не основанных на нормах права и установленном законом порядке. С учетом изложенного, действия истца надлежит квалифицировать как злоупотребление правом. Нарушение участниками гражданского оборота при заключении договора статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, выразившееся в злоупотреблении правом, отнесено законом к числу самостоятельных оснований для отказа в удовлетворении требований.

С учетом изложенного, исковые требования не являются обоснованными. Заявленное истцом основание исковых требований – факт просрочки сетевой организацией выполнения мероприятий по договору – не подтверждается документально, В связи с изложенным, требование истца о присуждении судебной неустойки в размере 1000 руб. в день с ежедневным удвоением не является обоснованным и не подлежит удовлетворению. В удовлетворении искового заявления о возложении обязанности на ответчика исполнить договор № ОТП-22-00794 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в пятидневный срок, присуждении судебной неустойки в размере 1000 руб. в день с ежедневным удвоением просили отказать.

Выслушав представителей сторон, изучив материалы настоящего гражданского дела, суд приходит к следующему.

Согласно пункту 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. 

В силу пункта 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно пункту 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Пунктом 4 статьи 421 ГК РФ предусмотрено, что условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

В силу пункта 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии с пунктом 1 статьи 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

В силу положений статьи 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

В силу обязательств одно лицо (должник) обязано совершать в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (статьи 307 и 309 ГК РФ). Обязательства должны исполняться надлежащим образом, только исполнение обязательства, произведенное надлежащим образом, прекращает обязательство (статья 408 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» в силу пункта 3 статьи 154 и пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Соглашение сторон может быть достигнуто путем принятия (акцепта) одной стороной предложения заключить договор (оферты) другой стороны (пункт 2 статьи 432 ГК РФ), путем совместной разработки и согласования условий договора в переговорах, иным способом, например, договор считается заключенным и в том случае, когда из поведения сторон явствует их воля на заключение договора (пункт 2 статьи 158, пункт 3 статьи 432 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 453 ГК РФ при изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.

В соответствии с пунктом 3 статьи 453 ГК РФ в случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения.

Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Камчатскэнерго» (сетевая организация) и ИП ФИО3 (заявитель) был заключен договор № ОТП-22-00794 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому сетевая организация принимает на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение): «Электроустановка 0,4 кВ блок-вставки», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) с учетом следующих характеристик: 

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт;

- категория надежности 3;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: нет. 

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – договор). Сетевая организация и заявитель являются сторонами договора (далее – стороны) (пункт 1 условия типового договора) (л.д. 44-48).

В соответствии с пунктом 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: «Блок-вставка», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 

<

адрес> (кадастровый №).

Согласно пункту 3 договора точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее – технические условия) и располагается на расстоянии 0 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет пять лет со дня заключения настоящего договора (пункт 4 договора).

Пунктом 5 договора предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет четыре месяца со дня заключения настоящего договора.

Согласно пункту 6 договора сетевая организация обязуется:

- надлежащим образом исполнять обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже);

- не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже).

В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации. 

В соответствии с пунктом 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением РСТиЦ Камчатского края Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 45 108 руб., в том числе НДС - 7518 руб. 

Согласно пункту 14 договора договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или в судебном порядке.

В соответствии с пунктом 21 договора договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору.

Приложением к договору являются технические условия для присоединения объекта к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №-ПС «Дачная»-76, в пункте 10 которых перечислены мероприятия, подлежащие осуществлению сетевой организацией, в пункте 11 мероприятия, подлежащие осуществлению заявителем (л.д. 49-50).

Согласно пункту 10 технических условий сетевая организация осуществляет:

- строительство ЛЭП до 1 кВ расчетного сечения от РУ-0,4 кВ ТП-607 до точки присоединения энергопринимающего устройства заявителя;

- установку на границе раздела балансовой принадлежности сетей интеллектуального прибора учета электроэнергии с возможностью удаленного сбора данных;

- разработку проекта электроснабжения объекта до точки присоединения энергопринимающего устройства заявителя.

Срок действия настоящих технических условий составляет пять лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (пункт 12 технических условий). 

В соответствии с пунктом 13 технических условий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет четыре месяца со дня заключения настоящего договора.

Как следует из платежного поручения, ДД.ММ.ГГГГ заявителем ИП ФИО3 произведена оплата по счету на оплату от ДД.ММ.ГГГГ № ПП№ в размере 45 108 руб., в том числе НДС в размере 7518 руб. (л.д. 53, 52).

ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Камчатскэнерго» от заявителя ИП ФИО3 получено уведомление о выполнении мероприятий, предусмотренных техническими условиями №-ПС «Дачная»-76 на технологическое присоединение, являющимися неотъемлемым приложением к договору на технологическое присоединение от ДД.ММ.ГГГГ № ОТП-2200794 с максимальной мощностью Р макс 15 кВт, в полном объеме (л.д. 54-55).

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Камчатскэнерго» (сетевая организация) и ИП ФИО3 (заявитель) заключено дополнительное соглашение к условиям типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ОТП-22-00794 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в соответствии с пунктом 14 условий типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ОТП-22-00794 от ДД.ММ.ГГГГ стороны пришли к соглашению:

Продлить срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению до ДД.ММ.ГГГГ 

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны руководствуются договором.

Настоящее соглашение вступает в законную силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон.

Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны (л.д. 51).

Из содержания искового заявления следует, что мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные техническими условиями, ответчик сетевая организация ПАО «Камчатскэнерго» в установленный договором срок не произвела. 

ДД.ММ.ГГГГ истец обратился к ответчику с претензией, в которой просил в срок до ДД.ММ.ГГГГ выполнить требования договора, Технических условий и осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя (л.д. 56-57).

В соответствии с положениями статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии (пункт 2 статьи 539 ГК РФ).

Правоотношения сторон по договору технологического присоединения регулируются Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Правила), положениями Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

На основании пункта 3 Правил недискриминационный доступ к услугам по передаче электрической энергии предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям независимо от организационно-правовой формы и правовых отношений с лицом, оказывающим эти услуги.

Сетевая организация при оказании услуг по передаче электрической энергии обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

В соответствии с пунктом 4 Правил потребителями услуг по передаче электрической энергии являются лица, владеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к электрической сети (в том числе опосредованно) субъекты оптового рынка электрической энергии, осуществляющие экспорт (импорт) электрической энергии, а также энергосбытовые организации и гарантирующие поставщики в интересах обслуживаемых ими потребителей электрической энергии (с ДД.ММ.ГГГГ - на условиях определения обязательств по оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении точек поставки каждого потребителя электрической энергии, обслуживаемого энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком). Услуги по передаче электрической энергии предоставляются сетевой организацией на основании договора о возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии (далее - договор).

Согласно пункту 9 Правил договор является публичным и обязательным к заключению для сетевой организации.

В силу пункта 16 Правил перечень мероприятий по технологическому присоединению, срок и обязательства сторон по их выполнению являются существенными условиями договора технологического присоединения.

Согласно статье 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать во взаимосвязи с положениями пункта 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации и статьи 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле (часть 1 статьи 57 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства, в том числе заключение экспертизы, не имеют для суда заранее установленной силы. 

Согласно части 2 статьи 195 ГПК РФ суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

Как следует из представленного ответчиком заявления ИП ФИО3, полученного сетевой организацией ДД.ММ.ГГГГ, заявитель просил увеличить мощность по договору № с 15 кВт до 30 кВт (л.д. 94).

Сетевой организацией по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления было разработано и направлено заявителю для подписания дополнительное соглашение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ № ОТП-22-00794 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с техническими условиями для присоединения объекта к электрическим сетям (л.д. 95-98).

ДД.ММ.ГГГГ от истца ответчиком получено уведомление об отказе в подписании дополнительного соглашения № к договору от ДД.ММ.ГГГГ № ОТП-22-00794 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в связи с несогласием с условиями предлагаемого к подписанию соглашения и просьбой исполнения заключенного договора № ОТП-22-00794 от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № к нему (л.д. 99).

Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ с протоколом разногласий от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом урегулирования разногласий к протоколу разногласий от ДД.ММ.ГГГГ истец и ответчик согласовали продление срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению до ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 101-111). 

Как разъяснено в абзацах 2 и 3 пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В силу пункта 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

В данном случае факт злоупотребления правом со стороны ПАО «Камчатскэнерго» не установлено, согласно дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом, учитывая, что срок исполнения обязательства не нарушен, поскольку продлен до ДД.ММ.ГГГГ, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований истца ФИО3 к ПАО «Камчатскэнерго» о возложении обязанности исполнить договор № ОТП-22-00794 от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Поскольку суд отказывает в удовлетворении основного требования о возложении обязанности исполнения договора, требования, производные от основного – о взыскании неустойки также не подлежат удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд 

решил:

в удовлетворении исковых требований ФИО3 (паспорт №) к Публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ИНН №) о возложении обязанности исполнить договор № № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, присуждении судебной неустойки отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ 

Председательствующий подпись С.С. Нетеса 

Подлинник судебного постановления подшит в деле №, находящемся в производстве Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края.