Судья: Некрасова В.С. № 33-1927/2026

24RS0017-01-2025-006122-67

2.179

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

25 февраля 2026 года город Красноярск

Судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда в составе председательствующего Крятова А.Н.,

судей Русанова Р.А., Каплеева В.А.

при ведении протокола помощником судьи Надешкиной А.А.,

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Крятова А.Н.

дело по иску ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей

по апелляционной жалобе представителя ПАО «Россети Сибирь» - ФИО2

на решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 

<

дата> года, которым постановлено:

«Исковые требования ФИО1, 

<

дата> г.р. (паспорт гражданина РФ №, выдан 

<

дата>) - удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ИНН №) осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с условиями договора № от 23.01.2025г. объект – «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес> кадастровый номер земельного участка №, 

<

адрес>, в срок не позднее двух месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН №) в пользу ФИО1, 

<

дата> г.р. (паспорт гражданина РФ № выдан 

<

дата>) - неустойку по договору за период с 25 июля 2025 года по 27 ноября 2025 года в размере 21 148 рублей 37 копеек, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, штраф за нарушение прав потребителя в размере 13 074 рубля 18 копеек, расходы по оплате нотариальной доверенности в размере 2 700 рублей, почтовые расходы в размере 80 рублей.

Взыскивать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН №) в пользу ФИО1, 

<

дата> г.р. (паспорт гражданина РФ №, выдан 

<

дата>) неустойку по договору в размере 0,25 % в день, начисляемую на сумму 67674 рубля 79 копеек, начиная с 28.11.2025 года по дату фактического исполнения ответчиком обязательств по договору № от 23.01.2025г.

Взыскивать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН №) в пользу ФИО1, 

<

дата> г.р. (паспорт гражданина РФ №, выдан 

<

дата>) судебную неустойку за неисполнение решения суда в части осуществления технологического присоединения к электрическим сетям по договору № от 23.01.2025г. к электрическим сетям по истечению двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения в размере 50 рублей за каждый календарный день просрочки.

В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН №) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 10 000 рублей».

Заслушав докладчика, судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей.

Требования мотивированы тем, что 23 января 2025 года между сторонами заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта истца «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес> кадастровый номер земельного участка № Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определен 6 месяцев со дня заключения договора. Истец свои обязательства, предусмотренные договором, технологическими условиями, исполнил в полном объеме. Сетевая организация возложенные на нее обязанности по договору об осуществлении технологического присоединения до настоящего времени не исполнила.

Просил (с учетом уточнений) обязать ПАО «Россети Сибирь» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта истца, определенную техническими условиями, договором от 23 января 2025 года в срок не позднее одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу; взыскать с ПАО «Россети Сибирь» неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению за период с 25 июля 2025 года по 27 ноября 2025 года в размере 21 148,37 рублей, а также с 28 ноября 2025 года по день фактического исполнения обязательств за каждый день просрочки в размере 0,25%, подлежащих начислению на сумму платы за технологическое присоединение - 67 674,79 рублей, штраф, компенсацию морального вреда 10 000 рублей, почтовые расходы в размере 80 рублей, расходы на оплату доверенности в размере 2 700 рублей, а также судебную неустойку 1 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда в части возложенной судом обязанности с 31 дня по 210 день после вступления решения суда, в размере 5 000 рублей - с 211 дня после вступления решения суда в законную силу и по день фактического исполнения возложенной судом обязанности.

Судом первой инстанции постановлено вышеприведенное решение.

В апелляционной жалобе представитель ПАО «Россети Сибирь» - ФИО2 просит решение изменить, установив срок исполнения возложенной судом обязанности не менее 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Указывает, что решение в установленный судом срок является неисполнимым, в связи с тяжелым материальным положением сетевой организации, недостаточностью финансирования и тем, что расходы, которые понесет сетевая организация при исполнении условия договора, значительно превысят внесенную заявителем плату за технологическое присоединение. Также просит снизить размер судебной неустойки.

В возражениях на апелляционную жалобу представитель ФИО1 – ФИО3 просит решение оставить без изменения.

Лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте рассмотрения дела по апелляционной жалобе заказными письмами с уведомлением о вручении; в связи с чем неявка кого-либо из них не может служить препятствием к рассмотрению дела.

Проверив материалы дела и решение суда в пределах, предусмотренных ч. 1 ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав объяснения представителя ФИО1 – ФИО3, согласившегося с решением, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В силу п. 1 ст. 26 Федерального закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила технологического присоединения), которые определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

На основании п. 3 Правил технологического присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно п. 6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В соответствии со ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

На основании ст. 408 ГК РФ обязательство прекращается надлежащим исполнением.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, земельный участок, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес> принадлежит на праве собственности ФИО1

23 января 2025 года между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и ФИО1 (заявитель) заключен договор № об осуществлении технологического присоединения, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению электропринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 9 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ., максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Технологическое присоединение необходимо для энергоснабжения объекта – «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Россия, Красноярский край, кадастровый номер земельного участка № 

<

адрес>

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п. 5 договора).

Пунктом 10 договора определен размер платы за технологическое присоединение, который определяется в соответствии с приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 28.11.2024 №58-э с изменениями, внесенными приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 25.12.2024 №100-э, и составляет 67 674,79 руб., в том числе НДС 20% в сумме 11 279,13 руб.

Плата за технологическое присоединение произведена истцом в полном объеме, что подтверждается чеком по операции.

Технические условия являются неотъемлемой частью договора.

Согласно п. 10 технических условий № сетевая организация осуществляет организационные мероприятия: подготовка технических условий на технологическое присоединение; обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления электропринимающих устройств заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательств РФ и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, а также требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» для энергоснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и согласование со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством; троительство ЛЭП-0.4 кВ от точки, указанной в пункте №7 настоящих ТУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом; определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ЛЭП-0.4 кВ.; выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

В соответствии с п. 6 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающих устройств заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технологических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже); не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже).

Согласно ответу ПАО «Красноярскэнергосбыт» договор энергоснабжения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ФИО1 в отношении объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер № либо иным лицом, не заключался, финансово-лицевой счет не открывался.

Разрешая спор, суд первой инстанции, достоверно установив, что ПАО «Россети Сибирь» не исполнены в срок обязательства по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта ФИО1, возложенные на него договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, учитывая срок неисполнения обязательства без уважительных причин, пришел к выводу о возложении на ПАО «Россети Сибирь» обязанности по осуществлению технологического присоединения в срок не позднее двух месяцев с даты вступления решения в законную силу.

В связи с нарушением ПАО «Россети Сибирь» срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, суд, с учетом положения п. 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, не усмотрев оснований для применении положений ст. 333 ГК РФ, взыскал неустойку за период с 25 июля 2025 года по 27 ноября 2025 года в размере 21 178,37 рублей, а также с 28 ноября 2025 года по день исполнения обязательств в размере 0,25 % за каждый день просрочки, исходя из размера платы за технологическое присоединение – 67 674,79 рублей.

В связи с нарушением прав истца, как потребителя, в соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», с учетом критерия разумности и справедливости, суд определил ко взысканию компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, которую взыскал в пользу истца с ПАО «Россети Сибирь». На основании п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей суд также взыскал с ПАО «Россети Сибирь» штраф в размере 13 074,18 рублей, не усмотрев оснований для применения положений ст. 333 ГК РФ.

На основании п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, суд взыскал с ПАО «Россети Сибирь» в пользу истца судебную неустойку в размере 50 рублей за каждый день неисполнения решения суда по истечении двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу и до его фактического исполнения.

В соответствии со ст. 98, ГПК РФ, с учетом документального подтверждения несения расходов, суд взыскал с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 расходы по удостоверению доверенности в размере 2 700 рублей, почтовые расходы в размере 80 рублей

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, поскольку они достаточно мотивированы, основаны на исследовании доказательств, их оценке в соответствии с правилами, установленными в ст. 67 ГПК РФ, и правильном применении норм материального права, регулирующих спорные правоотношения.

Решение в части возложения на ПАО «Россети Сибирь» обязанности по технологическому присоединению, договорной неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов сторонами не обжалуется, а значит, предметом апелляционного рассмотрения не является.

Доводы апелляционной жалобы, которые сводятся к несогласию с установленным судом сроком осуществления технологического присоединения, не могут быть приняты во внимание, поскольку каких-либо новых доказательств, не являющихся предметом рассмотрения судом первой инстанции, сторонами в суд апелляционной инстанции не представлено.

Доказательств наличия обстоятельств, объективно препятствующих исполнению своих обязательств, затруднительному финансовому положению, ответчиком не представлено.

Срок исполнения обязательств, вопреки доводам апелляционной жалобы, установлен судом с учетом принципа разумности, исходя из фактических обстоятельств дела, длительности срока неисполнения обязательств и объема работ, которые необходимо осуществить сетевой организации для технологического присоединения объекта истца. Увеличение или уменьшение данного срока не будет соответствовать необходимости установления балансов интересов обеих сторон.

Доводы апелляционной жалобы о том, что просрочка исполнения обязательств по договору вызвана недостатком финансирования и тем, что расходы, которые понесет сетевая организация при исполнении условий договора значительно превысят внесенную заявителем плату за технологическое присоединение, судебная коллегия не принимает, поскольку объективных причин невозможности проведения мероприятий по технологическому присоединению до настоящего времени суду не представлено, и не могут служить основанием для освобождения ответчика от исполнения своих обязательств по договору с истцом. Ответчик при заключении договора об осуществлении технологического присоединения сам установил срок исполнения договора, при этом должен был учитывать все технические особенности присоединения конкретного объекта к электрическим сетям, а так же планировать финансирование своей хозяйственной деятельности.

Кроме того, судебная коллегия обращается внимание, что стороной ответчика не представлено достоверных доказательств, подтверждающих выполнение сетевой организацией технологического присоединения, путем выполнения технических условий.

Злоупотребления своими правами со стороны истца судебная коллегия не усматривает.

Доводы апелляционной жалобы о несоразмерности взысканного судом размера судебной неустойки последствиям неисполнения обязательства судебной коллегией отклоняются.

Определяя размер судебной неустойки, суд первой инстанции исходил из того, что судебная неустойка является мерой ответственности за неисполнение судебного акта, устанавливается в целях дополнительного воздействия на должника для побуждения исполнить возложенную на него судом обязанность, и не имеет целью возмещение взыскателю убытков.

Оценка соразмерности взысканного размера судебной неустойки дана судом в соответствии с требованием закона, исходя из своего внутреннего убеждения, основанного на всестороннем, полном, объективном исследовании всех обстоятельств дела, представленных доказательств, с которой судебная коллегия соглашается; оснований для уменьшения неустойки судебная коллегия не усматривает, так как взысканный судом размер судебной неустойки в размере 50 рублей в день соответствует принципам справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, устанавливает необходимый баланс интересов обеих сторон, соответствует степени затруднительности исполнения судебного акта.

С учетом изложенного, оснований для изменения решения суда по доводам апелляционной жалобы не имеется.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену решения суда первой инстанции в апелляционном порядке, не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 328 ГПК РФ, судебная коллегия

о п р е д е л и л а:

решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 27 ноября 2025 оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя ПАО «Россети Сибирь» ФИО2 – без удовлетворения.

Председательствующий: А.Н. Крятов

Судьи: Р.А. Русанов

В.А. Каплеев

Изготовлено в окончательной форме 02 марта 2026 года