Дело №

УИД №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ г. Истра МО 

Истринский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Асташкиной О.В.,

при секретаре Бариновой О.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «ДИОГЕН» о расторжении договора на разработку проекта и проведение работ, взыскании уплаченных по договору денежных средств, 

у с т а н о в и л:

Истец ФИО1 обратился в суд с иском к ООО «ДИОГЕН» о расторжении договора и взыскании денежных средств, уплаченных по договору на разработку проекта и проведение работ № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1000000 руб., штрафа в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В обоснование иска указал, что по условиям заключенного между сторонами указанного договора, ответчик обязуется по заданию истца в установленный договором срок выполнить работы в соответствии с п. 1.2 договора, а истец обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять результат работ и уплатить обусловленную договором цену. Общий объем работ по договору составил: разработка проектной документации для присоединения к газораспределительным сетям жилого дома, который будет построен и расположен на земельном участке общей площадью 

<

данные изъяты> кв.м по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером №; проведение строительно-монтажных работ согласно подготовленному проекту для присоединения к газораспределительным сетям указанного жилого дома. Стоимость работ по договору составила 1500000 руб. ДД.ММ.ГГГГ истцом были внесены денежные средства в размере 1000000 руб. за разработку проектной документации для присоединения к газораспределительным сетям жилого дома и аванс в размере 50 % за проведение строительно-монтажных работ, что подтверждается квитанцией к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако услуги по договору (п. 1.2) ответчиком оказаны не были, денежные средства не возращены до настоящего времени. Направленная в адрес ответчика претензия оставлена без ответа. 

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, своего представителя в суд не направил.

Представитель ответчика ООО «ДИОГЕН» по доверенности ФИО2 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие представителя ответчика (л.д. №).

Исследовав материалы дела, дав юридическую оценку собранным по делу доказательствам, суд приходит к следующему. 

Согласно ст. 309, 310 Гражданского Кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с п. 1 и п. 4 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422).

Согласно ч. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу ч. 1 ст. 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

В соответствии с положениями п. п. 1 - 4 ст. 4 Закона РФ от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется. Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использования в соответствии с этими целями. При продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обязан передать потребителю товар, который соответствует образцу и (или) описанию.

За нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором (п. 1 ст. 13 вышеназванного Закона).

Из материалов дела усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ между сторонами был заключен договор № на разработку проекта и проведение работ, по условиям которого ответчик обязуется по заданию истца в установленный договором срок выполнить работы, указанные в п. 1.2 договора, а истец обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять результат работ и уплатить обусловленную договором цену.

Общий объем работ по договору составляет: разработка проектной документации для присоединения к газораспределительным сетям жилого дома, который будет построен и расположен на земельном участке общей площадью 

<

данные изъяты> кв.м по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> с кадастровым номером №; проведение строительно-монтажных работ согласно подготовленному проекту для присоединения к газораспределительным сетям указанного жилого дома. 

Стоимость работ по договору составила 1500000 руб. (п. 4.1), 500000 руб. – разработка проекта присоединения к газораспределительным сетям жилого дома, 1000000 руб. – проведение строительно-монтажных работ. 

Стоимость по настоящему договору не окончательная и может быть увеличена в случае внесения изменений в проект, что оформляется дополнительным соглашением. 

Оплата работ осуществляет поэтапно: 100 % оплачивается за разработку проекта присоединения к газораспределительным сетям жилого дома в течение трех дней с момента подписания договора; аванс за проведение строительно-монтажных работ в размере 50 % оплачивается в течение трех дней с момента утверждения проекта (п. 4.2).

ДД.ММ.ГГГГ истцом были внесены денежные средства в размере 1000000 руб. за разработку проектной документации для присоединения к газораспределительным сетям жилого дома и аванс в размере 50 % за проведение строительно-монтажных работ, что следует из квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. №). 

Срок выполнения работ по договору определен пп. 3.1-3.2. К выполнению работ подрядчик приступает в течение трех дней с момента оплаты авансового платежа по первому этапу. ДД.ММ.ГГГГ - срок для разработки проектной документации; ДД.ММ.ГГГГ - для строительно-монтажных работ, срок начала работ согласовывается с заказчиком после утверждения проекта присоединения к газораспределительным сетям. 

По завершению работ подрядчик передает заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (п. 3.3).

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до ДД.ММ.ГГГГ (п. 2.1).

Как указано истцом, ответчиком обязательства по договору не исполнены, перечисленные им денежные средства по договору не возвращены.

В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В соответствии со ст. 28 Закона «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Ответчик ООО «ДИОГЕН» исковые требования признал, последствия признания иска известны и понятны, о чем представлено письменное заявление за подписью представителя ответчика по доверенности ФИО2

Суд считает, что признание иска ответчиком не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. 

В соответствии со ст.173 ГПК РФ, при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

На основании изложенного с ответчика в пользу истца подлежат взысканию денежные средства, уплаченные по договору на разработку проекта и проведение работ № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1000000 руб., а также в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 500 000 рублей, а договор подлежит расторжению. 

В соответствии со ст. 103 с ответчика в доход государства подлежит взысканию государственная пошлина в размере 13200 рублей.

Поскольку ответчиком ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ в отношении штрафных санкций не заявлено, судом положения данной статьи не применены. 

Руководствуясь ст.ст. 56,194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Иск ФИО1 к ООО «ДИОГЕН» о взыскании денежных средств по договору на проведение работ – удовлетворить. 

Расторгнуть договор на разработку проекта и проведение работ № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ДИОГЕН» и ФИО1.

Взыскать с ООО «ДИОГЕН» в пользу ФИО1 денежные средства, уплаченные по договору на разработку проекта и проведение работ № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1000000 руб., штраф в размере 500000 рублей, а всего взыскать 1500000 рублей.

Решение суда может быть обжаловано в Московский областной суд через Истринский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Председательствующий: подпись 

Мотивированное составлено ДД.ММ.ГГГГ