КОПИЯ

70RS0003-01-2020-007399-16

2-2133/2020

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

15 октября 2020 года Октябрьский районный суд г.Томска в составе:

председательствующего судьи Вылегжанина М.А., 

при секретаре Полубабкиной А.М.,

помощник судьи Артёмова Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств, оплаченных по договору подряда и судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО2 о взыскании денежных средств, оплаченных по договору подряда на проведение ремонтно-отделочных работ от 02.05.2020 в размере 77800,00 руб.

Свои требования истец мотивировала тем, что 02.05.2020 между ней и ФИО2 заключендоговорподрядана проведение ремонтно-отделочных работ, по условиям которого подрядчик взял на себя обязательства в установленный договором срок выполнить по заданию заказчика работы по текущему ремонту помещений, расположенных по адресу: 

<

...>, под. 2, а заказчик обязуется принять работы и оплатить обусловленную цену, при этом общая сумма по договору составила 101000,00 руб. (п. 5.1 договора подряда). В п.6.1 договора подряда указано, что размер аванса составляет 50 % от общей суммы. Соответственно, заказчик обязан был оплатить подрядчику 50500 рублей. Окончательный расчет должен был быть произведен в течение 3 дней с даты выполнения работ и подписания соответствующего акта (п. 6.3 договора подряда). Как следует из собственноручных записей на последнем листе договора подряда, исполнитель получил следующие суммы от заказчика: 02.05.2020 сумму в размере 34500 рублей за материалы и 33000 рублей за работу, 04.05.2020 – сумму в размере 7300 рублей за работы и дополнительные материалы, 20.05.2020 – сумму в размере 3000 рублей за работы, а всего 77800 рублей. Учитывая вышеизложенное, истец выполнила свои обязательства по оплате даже больше, чем это предусмотрено условиями договора подряда. Как следует из п.4.2 договора подряда, срок окончания работ – 05.06.2020. Однако, в указанный срок ответчик работы не выполнил, денежные средства не возвратил, на телефонные звонки перестал отвечать. Учитывая изложенное, расходы, которые истец произвела в виде оплаты ответчику по договору подряда, являются её убытками и подлежат взысканию с подрядчика (ответчика).

Истец, будучи надлежащим образом извещёна о дате, месте и времени судебного заседания в суд не явилась, заявлений не представила.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, при этом судом были предприняты все необходимые меры по надлежащему извещению ответчика о времени и месте рассмотрения дела, однако судебные повестки, направленные по известным суду адресам, получены не были и вернулись в суд с отметкой почтового отделения «истек срок хранения».

Из адресной справки УМВД России по Томской области от 03.09.2020 следует, что ФИО2 зарегистрирован по адресу: 

<

...>. Из материалов дела следует, что адрес регистрации ответчика совпадает с его фактическим местом жительства. 

В соответствии со ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

На основании ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В соответствии со ст. 113 ГПК РФ лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату (ч. 1). Судебное извещение, адресованное лицу, участвующему в деле, направляется по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, или его представителем. В случае, если по указанному адресу гражданин фактически не проживает, извещение может быть направлено по месту его работы (ч. 4).

В соответствии со ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Таким образом, при сложившихся обстоятельствах, поскольку ответчик не обеспечил получение почтовой корреспонденции по адресу места проживания, места регистрации он несет риск ответственности неполучения юридически значимых сообщений. 

В данном случае в отсутствие уважительных причин, препятствовавших получению судебного извещения по месту жительства, месту регистрации ответчик ФИО2 не проявил ту степень заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась в целях своевременного получения направляемого ему судом извещения. 

Таким образом, обязанность по извещению ФИО2 была выполнена судом надлежащим образом, а неполучение им судебных извещений произошло по причинам, зависевшим от него самого.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд рассмотрел дело в отсутствие не явившихся лиц.

Изучив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статья 310 ГК РФ предусматривает, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. 

Согласно статье 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ.

Статьей 719 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности не предоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнениядоговораи потребовать возмещенияубытков.

В соответствии со ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

Ст. 745 ГК РФ предусмотрено, что обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик.

В соответствии с п.2 ст.405 ГК РФ если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Согласно ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Судом установлено, что 02.05.2020 года между ФИО1 (заказчик) и ФИО2 (подрядчик) заключендоговорподряда на проведение ремонтно-отделочных работ на объекте по адресу: ... (л.д. 6-10).

Согласно п. 4.1 договора подрядчик приступает к выполнению работ в течение 3-х рабочих дней с момента получения авансовых денежных средств от Заказчика.

В соответствии с п. 4.2 договора срок выполнения работ по настоящему Договору составляет 30 рабочих дней с момента начала выполнения работ, предусмотренного п. 4.1 настоящего договора (начальный срок выполнения работ 05 мая 2020 года, конечный срок 05 июня 2020 года).

Согласно п. 5.1 договора за выполненные подрядчиком работы по настоящему договору заказчик выплачивает в соответствии со сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ денежную сумму в размере 101000,00 руб.

Авансовые платежи в размере 50% от общей суммы, указанной в п. 5.1 настоящего договора производятся Заказчиком в течение 3-х банковских дней с даты подписания настоящего договора (п. 6.1договора).

Окончательный расчёт в размере 50% от обшей суммы, указанной в п. 5.1 настоящего договора производится заказчиком после окончания работ в течение 3-х банковских дней с даты подписания акта выполненных работ (п.6.3 договора).

В соответствии с п. 7.1окончательная сдача результатов работ и их приема оформляются актом выполненных работ, который подписывается обеими сторонами в течение 3-х рабочих дней после окончания работ.

В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлением от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодными для нормального использования заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков течение 10 календарных дней (п.9.1 договора).

В случае нарушения подрядчиком сроков договора по причинам, не оговорённым в настоящем договоре, заказчик вправе удержать из подлежащей к оплате суммы неустойку в размере 0,1 % от суммыдоговораза каждый день просрочки от суммы договора, но не более 1%(п.9.2 договора).

Как следует из договора подряда от 02.05.2020, ФИО1 принятые по договору обязательства исполнила в размере 77 800,00 руб., так как произвела оплату стоимости работ в соответствии с условиями договора: 02.05.2020 в размере 34500,00 руб. – за материалы; 33000,00 руб. – за работу; 04.05.2020 в размере 7 300,00 руб. – за работу и дополнительные материалы; 20.05.2020 в размере 3 000,00 руб. – за работу.

Между тем, ФИО2 нарушил установленные разделом 4 договора подряда на проведение ремонтно-отделочных работ от 02.05.2020 сроки выполнения работ.

Акт сдачи-приемки выполненных работ сторонами подписан не был, в нарушение ст. 56 ГПК РФ документов, свидетельствующих об обратном в материалы дела не представлено.

Доказательств невозможности выполнения работ в предусмотренный договором срок по вине заказчика ответчиком суду по правилам ст.56 ГПК РФ не представлено.

Учитывая вышеизложенное, свои обязательства по договору подряда от 02.05.2020 ответчик в полном объеме в установленные сроки не выполнил, доказательств обратного в материалы дела не представлено.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что до настоящего времени уплаченные истцом по договору подряда от 02.05.2020 денежные средства в общем размере 77 800 рублей не возвращены, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований истца о взыскании с ответчика убытков по договору подряда на проведение ремонтно-отделочных работ от 02.05.2020 в размере 77 800 рублей, внесенных истцом ответчику в качестве предоплаты за работу и материалы по договору подряда на проведение ремонтно-отделочных работ от 02.05.2020.

Ч. 1 ст. 98 ГК РФ предусмотрено, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

В соответствии с ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В рамках рассмотрения настоящего дела истцом понесены расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 534,00 руб.

Учитывая обстоятельства дела, размер удовлетворенных требований, суд приходит к выводу о том, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 2534,00 руб. 

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ суд,

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств, оплаченных по договору подряда и судебных расходов, удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 убытки по договору подряда на проведение ремонтно-отделочных работ от 02.05.2020 в размере 77 800,00 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 534,00 руб.

Решение может быть обжаловано в Томский областной суд в течение месяца со дня изготовления в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г. Томска.

Судья /подпись/

Копия верна

Судья М.А.Вылегжанин

Секретарь: А.М. Полубабкина 

«__» _____________ 2020 года

Мотивированный текст решения изготовлен 22 октября 2020 года.

Оригинал находится в деле № 70RS0003-01-2020-007399-16 Октябрьского районного суда г.Томска