Решение

 

Именем российской федерации

17 ноября 2020 г.

Видновский городской суд Московской области в составе: 

председательствующего судьи Гоморевой Е.А.

при секретаре судебного заседания Кондобаровой А.А. 

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 2-3815/2020 по иску ПАО «МРСК Сибири» в интересах филиала ПАО «МРСК Сибири- Кузбассэнерго-РЭС» к ФИО1 о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ о технологическом присоединении и по встречному иску ФИО1 к ПАО «МРСК Сибири» о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по технологическому присоединению

УСТАНОВИЛ:

ПАО «МРСК Сибири» в интересах филиала ПАО «МРСК Сибири- Кузбассэнерго-РЭС» обратился в суд с требованием к ответчице, в котором просил: 

-Взыскать с ФИО3 в пользу ПАО «МРСК Сибири», в лице филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» неустойку по договору от 17.01.2017 № за период с 18.01.2018 по 30.07.2018 в размере 90 560,78 рублей, расходы по государственной пошлине в размере 2 916,82 руб.

ФИО1 обратилась в суд со встречным иском, в котором просила взыскать в ее пользу неустойку по договору от 17 января 2017 года за период с 18 января 2018 года в размере 90 560 руб. 78 коп., расходы по оплате госпошлины – 2 916 руб. 82 коп., на представительство в суде – 50 000 руб. 

Требования ПАО «МРСК Сибири» мотивировал тем, что 17.01.2017 между ПАО «МРСК Сибири», в лице филиала ПАО «МРСК Сибири» -«Кузбассэнерго - РЭС» (далее - Сетевая организация) и ФИО2 (далее - Заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения № (далее - Договор).

Согласно п. п. 1 Договора, Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее-технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 25 кВт; категория надежности третья; - класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения электроустановок хозяйственной постройки, расположенной по адресу: 

<

адрес>

В п. 5 Договора, установлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, который составляет 1 год со дня заключения договора.

В п. 8 Договора предусмотрено, что Заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях, а именно п. 11 Технических условий, что является неотъемлемой частью договора (Приложение № к договору). После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка Заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий.

Разделом III Договора установлен размер платы за технологическое присоединение в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2017 № 751 и составляет 197 690,74 руб..

Таким образом, неустойка за нарушение срока исполнения обязательств составит в соответствии с п. 17 раздела V Договора, 0, 25% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более чем за один год. А именно:

90 560,78 руб. и сходя из расчета: 197 690,74 руб. х 0,25% х 193 дней (за период с 18.01.2018 по 30.07.2019) = 90 560,78 руб.

Указывает в иске, что пени рассчитаны за период сначала окончания исполнения договора ( с 18.01.2018) до осуществления фактического технологического присоединения т.е. подписания акта об осуществлении технологического присоединения и акта о выполнении технических условий (30.07.2018). 

10.10.2019 в адрес ответчика была направлена претензия № 1.4/03/9802-исх с предложением, надлежащим образом, исполнить со своей стороны мероприятия по технологическому присоединению. Претензия оставлена без рассмотрения.

В судебное заседание представитель истца не явился, о дне слушания извещался надлежащим образом, просил рассмотреть дело в его отсутствие. 

Представитель ответчика в судебном заседании с первоначально заявленными требованиями не согласен. Просил удовлетворить встречный иск. 

Пояснил, что истцы сами не выполнили свои обязательства по технологическому присоединению. Его доверительница все сделала, что была обязана по договору. Поэтому просил отказать в первоначально заявленном требовании, удовлетворить встречный иск. 

Суд, выслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, считает, что первоначально заявленные требования удовлетворению не подлежат, во встречных требованиях также необходимо отказать на основании следующего

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполнятся надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В соответствии с п. 17 раздела V Договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренной договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0, 25% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более чем за один год.Как установлено, 17.01.2017 между ПАО «МРСК Сибири», в лице филиала ПАО «МРСК Сибири» -«Кузбассэнерго - РЭС» и ФИО2, заключен договор об осуществлении технологического присоединения № ( л.д. 7)

Согласно ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» Правительство Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике устанавливает порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических лиц и физических лиц к электрическим сетям, утверждает правила оптового рынка и основные положения функционирования розничных рынков.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального Закона № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В пункте 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), установлено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно п. п. 1 Договора, Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее-технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 25 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения электроустановок хозяйственной постройки, расположенной по адресу 

<

адрес> 

<

адрес>

В п. 5 Договора, установлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, который составляет 1 год со дня заключения договора.

В п. 8 Договора предусмотрено, что Заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях, а именно п. 11 Технических условий, что является неотъемлемой частью договора (Приложение № 1 к договору). После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка Заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий.

В соответствии с представленными техническими условиями №

( л.д. 9), заявитель, т.е. ФИО1: устанавливает щит учета электроэнергии; ввод до щита учеты выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки и др ( раздел 11 ТУ). 

В технических условиях не указано – в какой именно период времени ответчик обязана выполнить технические условия. К тому же, срок действия технических условий – 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (п.12). 

В связи с этим, суд считает, что в требовании к ответчику о взыскании неустойки за нарушение срока исполнения обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения необходимо отказать. 

В соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения, именно Заявитель, т.е. ответчица должна уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий ( пп.2 п. 8 договора), Сетевая организация со своей стороны в течение 5 дней с момента уведомления Заказчиком о выполнении технических условий, осуществляет мероприятия по непосредственному присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств Заявителя. 

Акт о выполнении технических условий подписан между сторонами 30 июля 2018 года. Акт об осуществлении технологического присоединения, подписан 30 июля 2018 года ( л.д. 22) Таким образом, истец в установленные договором 5 дней осуществил технологическое присоединение. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что во встречном иске также необходимо отказать, поскольку истец не смог своевременно выполнить обязательств, вытекающие из заключенного между сторонами договора по подключению электроэнергии в срок до 17 января 2018 года только в связи с тем, что энергопринимающие устройства ответчика были подготовлены к 30 июля 2018 года. 

В связи с этим, суд считает, что во встречном требовании также необходимо отказать. 

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ суд,

РЕШИЛ:

В требовании ПАО «МРСК Сибири» в интересах филиала ПАО «МРСК Сибири- Кузбассэнерго-РЭС» к ФИО1 о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору от 178 января 2017 года № за период с 18 января 2018 года по 30 июля 2018 года в размере 90 50 руб. 78 коп., компенсации расходов по оплате госпошлины – отказать. 

В требовании ФИО3 к ПАО «МРСК Сибири» о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору от 178 января 2017 года № за период с 18 января 2018 года по 30 июля 2018 года в размере 90 50 руб. 78 коп., компенсации расходов по оплате госпошлины, расходов на оплату услуг представителя – отказать. 

Решение может быть обжаловано в Мособлсуд в течение месяца через Видновский суд с момента подготовки мотивированного решения. 

Судья: Гоморева Е.А.