№ 2-230/2020 года

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 мая 2020 года г. Миллерово

Миллеровский районный суд Ростовской области в составе

председательствующего судьи Шоркиной А.В.,

при секретаре судебного заседания Розовой О.В.,

с участием помощника Миллеровского межрайонного прокурора Пятицкой С.В.,

представителя МО «Миллеровский район» ФИО1,

представителя третьего лица ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Миллеровского межрайонного прокурора в защиту интересов муниципального образования «Миллеровский район» к ФИО3, третье лицо Муниципальное учреждение « Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района» о взыскании ущерба, причиненного преступлением,

у с т а н о в и л:

Миллеровский межрайонный прокурор обратился в Миллеровский районный суд с иском в защиту интересов муниципального образования «Миллеровский район» к ФИО3 о взыскании ущерба, причиненного преступлением. В обосновании иска указав, материалами уголовного дела по обвинению ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, установлено, что ответчик, являясь на основании приказа № 1 от 27.06.2013 директором общества с ограниченной ответственностью «РНРпроектДом», наделенный в соответствии с уставом ООО «РНРпроектДом» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по общему руководству текущей деятельностью предприятия, предоставлении интересов предприятия и совершения сделок от имени предприятия, издании приказов о назначении на должность работников предприятия, об их переводе и увольнении, неся полную материальную ответственность за ущерб, причиненный организации по вине руководителя, ответственность за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, за последствия выполнения его распоряжений, умышлено, обладая, в силу своего служебного положения, неограниченным доступом к денежным средствам, находящихся на расчетном счете ООО «РНРпроектДом», имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, совершенного с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, осуществляя деятельность в рамках Областного закона от 22.06.2006 № 499-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», и постановления Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539 «Об обеспечении жилыми помещениями и расходования субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», действуя из корыстных побуждений, находясь на территории Ростовской области, в период времени с 21.10.2014 по 01.03.2016 путем обмана похитил денежные средства в общей сумме 12041828 рублей 50 копеек, принадлежащие Муниципальному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района» (далее по тексту МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района»), чем причинил МУ«Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» материальный ущерб в особо крупном размере.

ФИО3, являясь директором ООО «РНРпроектДом», действуя единым преступным умыслом, не намереваясь изначально исполнять свои обязательства перед заказчиком МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района», в целях хищения денежных средств, подал от имени ООО «РНРпроектДом» на электронной площадке «РТС-Тендер» 26 заявок на участие в электронных аукционах на право заключения муниципальных контрактов с МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» на долевое участие в строительстве многоквартирного 2-х этажного жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес>, и на долевое участие в строительстве многоквартирного 3-х этажного жилого дома расположенного по адресу: 

<

...>, позиция 2, с целью приобретения жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность для включения в специализированный жилищный фонд, тем самым заверил МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» в лице начальника ФИО4, что в ООО «РНРпроектДом» имеются специалисты и оборудование для строительства вышеуказанных домов, выступив в качестве застройщика, обязался качественно и в срок выполнить работы по возведению вышеуказанных домов.

01.12.2014 г. ответчик, находясь в помещении МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района», расположенном по адресу: 

<

...>, заключил с данным учреждением в лице начальника ФИО4 муниципальный контракт №2014.353062 от 01.12.2014 долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома с целью приобретения жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность для включения в специализированный жилищный фонд, по условиям которого ООО «РНРпроектДом» в лице директора ФИО3, обязалось до 01.12.2015 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома, передать жилое помещение (квартиру) № 9, площадью 25 кв.м., расположенное в данном многоквартирном доме, в состоянии, соответствующем условиям контракта, описания объекта закупки, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям предусмотренным законодательствам РФ, в срок не позднее 01.12.2015, а МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района», в свою очередь, обязалось поэтапно уплатить обусловленную контрактом цену - 827500 рублей, а именно: первый этап (аванс) – средства в размере 30% от стоимости муниципального контракта перечисляются в течении 30 рабочих дней после государственной регистрации Муниципального контракта; второй этап - средства в размере 70% от стоимости муниципального контракта перечисляются Участником до 31 декабря 2014 г.. Начальник МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» ФИО4, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, во исполнение условий муниципального контракта №2014.353062 от 01.12.2014, срасчетного счета МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» №40204810400000000650, открытого в Отделении по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка РФ, перечислил 29.12.2014 на расчетный счет ООО«РНРпроектДом» №40702810052090098533, открытый в Юго-Западном Банке ОАО«Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону, денежные средства в сумме 248250рублей, а затем, так же перечислил 29.12.2014 денежные средства в сумме 579250рублей, а всего в общей сумме 827 500 рублей, тем самым, МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» выполнило в полном объеме свои обязательства по указанному муниципальному контракту. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, ФИО3, 02.12.2014 находясь в помещении МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района», расположенном по адресу: 

<

адрес> заключил с данным учреждением муниципальные контракты №2014.365331 от 02.12.2014, №2014.365724 от 02.12.2014, №2014.365739 от 02.12.2014, №2014.365740 от 02.12.2014, №2014.365743 от 02.12.2014, №2014.365753 от 02.12.2014, №2014.365757 от 02.12.2014, №2014.365761 от 02.12.2014, №2014.365765 от 02.12.2014 долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома с целью приобретения жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность для включения в специализированный жилищный фонд, по условиям которого ООО «РНРпроектДом» в лице директора ФИО3, обязалось до 01.12.2015 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) дом, расположенный по адресу: 

<

...>, позиция 2, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома, передать жилые помещения (квартиры) № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18 площадью 25 кв.м., расположенные в данном многоквартирном доме, в состоянии, соответствующем условиям контракта, описания объекта закупки, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям предусмотренным законодательствам РФ, в срок не позднее 01.12.2015, а МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района», в свою очередь, обязалось поэтапно уплатить обусловленную контрактами цену - 827500 рублей за каждую квартиру, а именно: первый этап (аванс) – средства в размере 30% от стоимости муниципального контракта перечисляются в течении 30 рабочих дней после государственной регистрации каждого Муниципального контракта; второй этап - средства в размере 70% от стоимости каждого муниципального контракта перечисляются Участником до 31 декабря 2014 г.. Во исполнение условий вышеуказанных муниципальных контрактов, с расчетного счета МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» на расчетный счет ООО «РНРпроектДом» были перечислены денежные средства в сумме 248250 рублей за каждую из вышеуказанных квартир, а затем, так же 29.12.2014 перечислены денежные средства в сумме 579 250 рублей за каждую из вышеуказанных квартир, а всего в общей сумме 827 500 рублей за каждую из вышеуказанных квартир.

Кроме того, ФИО3, 02.12.2014 находясь в помещении МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района», заключил с данным учреждением муниципальные контракты №2014.365774 от 02.12.2014, №2014.365779 от 02.12.2014, №2014.365783 от 02.12.2014, №2014.365788 от 02.12.2014, №2014.365790 от 02.12.2014, №2014.365797 от 02.12.2014, №2014.365800 от 02.12.2014, №2014.365807 от 02.12.2014 долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома с целью приобретения жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность для включения в специализированный жилищный фонд, по условиям которых ООО «РНРпроектДом» в лице директора ФИО3, обязалось до 01.12.2015 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> позиция 1, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома, передать жилые помещения (квартиры) № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 площадью 25 кв.м., расположенные в данном многоквартирном доме, в состоянии, соответствующем условиям контракта, описания объекта закупки, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям предусмотренным законодательствам РФ, в срок не позднее 01.12.2015, а МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района», в свою очередь, обязалось поэтапно уплатить обусловленную контрактом цену - 827500 рублей за каждую квартиру, а именно: первый этап (аванс) – средства в размере 30% от стоимости муниципального контракта перечисляются в течении 30 рабочих дней после государственной регистрации Муниципального контракта; второй этап - средства в размере 70% от стоимости муниципального контракта перечисляются Участником до 31 декабря 2014 г.. С расчетного счета МУ«Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» на расчетный счет ООО«РНРпроектДом» перечислены денежные средства в сумме 248250 рублей за каждую из вышеуказанных квартир, а затем, 29.12.2014 перечислены денежные средства в сумме 579250рублей за каждую из вышеуказанных квартир, а всего в общей сумме 827 500 рублей за каждую из вышеуказанных квартир, тем самым, МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» выполнило в полном объеме свои обязательства по указанным муниципальным контрактам. 

Между ФИО3 и МУ «УЖКХ, с/т Миллеровского района» 02.12.2014 заключен муниципальные контракты №2014.365268 и №2014.365280 долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома с целью приобретения жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность для включения в специализированный жилищный фонд, по условиям которых ООО «РНРпроектДом» в лице директора ФИО3, обязалось до 01.04.2015 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома, передать жилые помещения (квартиры) № 7, № 8 площадью 25 кв.м., расположенные в данном многоквартирном доме, в состоянии, соответствующем условиям контракта, описания объекта закупки, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям предусмотренным законодательствам РФ, в срок не позднее 01.04.2015, а МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района», в свою очередь, обязалось поэтапно уплатить обусловленную контрактом цену - 823362 рублей 50 копеек за каждую из вышеуказанных квартир, а именно: первый этап (аванс) – средства в размере 30% от стоимости муниципального контракта перечисляются в течении 30 рабочих дней после государственной регистрации Муниципального контракта; второй этап - средства в размере 70% от стоимости муниципального контракта перечисляются Участником до 31 декабря 2014 г.. Начальник МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» ФИО4, во исполнении условий вышеуказанных муниципальных контрактов, с расчетного счета МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» на расчетный счет ООО«РНРпроектДом» перевел денежные средства в сумме 247008 рублей 75 копеек за каждую из вышеуказанных квартир, а затем, так же перечислил 29.12.2014 денежные средства в сумме 576 353 рублей 75 копеек за каждую из вышеуказанных квартир, а всего в общей сумме 823362 рублей 50 копеек за каждую из вышеуказанных квартир.

Кроме того, ФИО3, 03.12.2014 находясь в помещении МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района», заключил с данным учреждением в лице начальника ФИО4 муниципальные контракты №2014.365978 от 03.12.2014, №2014.362993 от 03.12.2014 долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома с целью приобретения жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность для включения в специализированный жилищный фонд, по условиям которого ООО «РНРпроектДом» в лице директора ФИО3, обязалось до 01.04.2015 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома, передать жилые помещения (квартиры) № 1, № 2, площадью 25 кв.м., расположенные в данном доме, в состоянии, соответствующем условиям контракта, описания объекта закупки, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям предусмотренным законодательствам РФ, в срок не позднее 01.04.2015, а МУ«Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района», в свою очередь, обязалось поэтапно уплатить обусловленную контрактом цену - 843262 рублей 50 копеек за каждую из вышеуказанных квартир, а именно: первый этап (аванс) – средства в размере 30% от стоимости муниципального контракта перечисляются в течении 30 рабочих дней после государственной регистрации Муниципального контракта; второй этап - средства в размере 70% от стоимости муниципального контракта перечисляются Участником до 31 декабря 2014 г.. Начальник МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» во исполнение условий вышеуказанных муниципальных контрактов, с расчетного счета МУ«Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» перечислил 23.12.2014 на расчетный счет ООО «РНРпроектДом», денежные средства в сумме 252978 рублей 75 копеек, а затем, так же перечислил 23.12.2014 денежные средства в сумме 590283 рублей 75 копеек, а всего в общей сумме 843262 рублей 50 копеек за каждую из вышеуказанных квартир, тем самым, МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» выполнило в полном объеме свои обязательства по указанному муниципальному контракту. 

Между ответчиком ФИО3 и МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» 03.12.2014 заключили муниципальные контракты №2014.363079 от 03.12.2014, №2014.363145 от 03.12.2014, №2014.363159 от 03.12.2014 долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома с целью приобретения жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность для включения в специализированный жилищный фонд, по условиям которого ООО «РНРпроектДом» в лице директора ФИО3, обязалось до 01.04.2015 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) дом, расположенный по адресу: 

<

...>, позиция 2, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома, передать жилые помещения (квартиры) № 3, № 4, № 5 площадью 25 кв.м., расположенные в данном многоквартирном доме, в состоянии, соответствующем условиям контракта, описания объекта закупки, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям предусмотренным законодательствам РФ, в срок не позднее 01.04.2015, а МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района», в свою очередь, обязалось поэтапно уплатить обусловленную контрактом цену - 823362 рублей 50 копеек за каждую из вышеуказанных квартир, а именно: первый этап (аванс) – средства в размере 30% от стоимости муниципального контракта перечисляются в течении 30 рабочих дней после государственной регистрации Муниципального контракта; второй этап - средства в размере 70% от стоимости муниципального контракта перечисляются Участником до 31 декабря 2014 г.. Начальник МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» во исполнении условий вышеуказанных муниципальных контрактов, с расчетного счета МУ «УЖКХ, с/т Миллеровского района» перечислил 29.12.2014 на расчетный счет ООО«РНРпроектДом» денежные средства в сумме 247008 рублей 75 копеек, а затем, так же перечислил 29.12.2014 денежные средства в сумме 576 353 рублей 75 копеек, а всего в общей сумме 823362 рублей 50 копеек за каждую из вышеуказанных квартир.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, ФИО3, 03.12.2014 находясь в помещении МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» заключил муниципальный контракт №2014.363168 от 03.12.2014 долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома с целью приобретения жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность для включения в специализированный жилищный фонд, по условиям которого ООО «РНРпроектДом» в лице директора ФИО3, обязалось до 01.04.2015 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) дом, расположенный по адресу: 

<

...>, позиция 2, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома, передать жилое помещение (квартиру) № 6, площадью 25 кв.м., расположенное в данном многоквартирном доме, в состоянии, соответствующем условиям контракта, описания объекта закупки, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям предусмотренным законодательствам РФ, в срок не позднее 01.04.2015, а МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района», в свою очередь, обязалось поэтапно уплатить обусловленную контрактом цену - 823360 рублей, а именно: первый этап (аванс) – средства в размере 30% от стоимости муниципального контракта перечисляются в течении 30 рабочих дней после государственной регистрации Муниципального контракта; второй этап - средства в размере 70% от стоимости муниципального контракта перечисляются Участником до 31 декабря 2014 г.. МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» во исполнение условий муниципального контракта №2014.363168 от 03.12.2014, с расчетного счета МУ«Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» на расчетный счет ООО«РНРпроектДом» перечислило денежные средства в сумме 247008 рублей, а затем, так же перечислил 29.12.2014 денежные средства в сумме 576 352 рублей, а всего в общей сумме 823360 рублей, тем самым, МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» выполнило в полном объеме свои обязательства по указанному муниципальному контракту. 

ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, не намереваясь изначально исполнять свои обязательства перед заказчиком МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района», в целях хищения денежных средств, подал от имени ООО «РНРпроектДом» на электронной площадке «РТС-Тендер» 1 заявку на участие в электронном аукционе на право заключения муниципального контракта с МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» на долевое участие в строительстве многоквартирного 2-х этажного жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес> тем самым заверил МУ«Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» что в ООО«РНРпроктДом» имеются специалисты и оборудование для строительства вышеуказанного дома, выступив в качестве застройщика, обязался качественно и в срок выполнит работы по возведению вышеуказанного дома.

По результатам рассмотрения единственной заявки поданной на участие в электронном аукционе №0358300077315000055, рассмотренной МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» 30.10.2015, ООО «РНРпроектДом», будучи единственным участником аукциона, признано победителем.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, ФИО3, 12.11.2015 заключил с МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» муниципальный контракт №2015.418946 от 12.11.2015 долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома с целью приобретения жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность для включения в специализированный жилищный фонд, по условиям которого ООО «РНРпроектДом» в лице директора ФИО3, обязалось до 01.12.2015 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома, передать жилое помещение 

<

адрес> площадью 25 кв.м., расположенное в данном многоквартирном доме, в состоянии, соответствующем условиям контракта, описания объекта закупки, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям предусмотренным законодательствам РФ, в срок не позднее 01.12.2015, а МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района», в свою очередь, обязалось поэтапно уплатить обусловленную контрактом цену - 865000 рублей, а именно: ?30% цены Контракта, что составляет 259500 рублей, в течении 30 дней с даты государственной регистрации настоящего Контракта; - 60% цены Контракта, что составляет 519000 рублей, после выполнения Застройщиком отделочных работ, предусмотренных Техническим заданием; а так же – 10 % цены Контракта, что составляет 86500 рублей, после подписания передаточного акта участникам долевого строительства, а так же передачи документов Застройщиком, необходимых для государственной регистрации права муниципальной собственности на квартиру. Начальник МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» во исполнении условий муниципального контракта №2015.418946 от 12.11.2015, с расчетного счета МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» на расчетный счет ООО«РНРпроектДом» перечислил денежные средства в сумме 259500 рублей, а затем, так же перечислил 28.12.2015 денежные средства в сумме 519 000 рублей, а всего в общей сумме 778500 рублей, тем самым, МУ«Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» выполнило в полном объеме свои обязательства по указанному муниципальному контракту.

После чего, с целью создания видимости исполнения договорных обязательств, ООО«РНРпроектДом» под руководством ФИО3, выполнило часть строительных работ по возведению и отделке многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес> и часть строительных работ по возведению и отделке многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес> При этом после получения бюджетных денежных средств из МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района», предназначенных для строительства указанного жилья, ФИО3, в период с 23.12.2014 по 01.03.2016, тратил не на строительство данных домов, а на личные нужды, то есть совершал хищение бюджетных денежных средств. При этом, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, и вкладывать средства ООО«РНРпроектДом» в строительство указанного жилья, ФИО3 уволился по собственному желанию с должности директора ООО«РНРпроектДом» 01.03.2016. 

Всего МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» в период с 23.12.2014 по 28.12.2015 с расчетного счета перечислило на расчетный счет ООО«РНРпроектДом», денежных средств в общей сумме 22 300197 рублей 50 копеек, тем самым, выполнив в полном объеме свои обязательства со стороны заказчика. Указанные денежные средства ФИО3 должен был использовать на строительство многоквартирного дома расположенного по адресу: 

<

адрес> позиция 1 (10-квартирный дом), и на строительство многоквартирного дома расположенного по адресу: 

<

адрес>

Согласно условиям муниципальных контрактов, застройщик ООО«РНРпроектДом» в лице ФИО3 обязан передать Участнику – МУ«Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» в срок не позднее 1 апреля 2015 года 8 квартир и не позднее 1 декабря 2015 года 19 квартир по актам приема передачи, подписанными обеими Сторонами, в состоянии, соответствующем условиям Контракта, описания объекта закупки, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а так же иным обязательным требованиям предусмотренным законодательствам РФ. Установка сантехники, дверей окон, газовой (или электрической) плиты, оклейка обоями или окраска, осуществляется Застройщиком. При этом, согласно условиям указанных контрактов при недостатке вложенных денежных средств на строительство, расходы на строительство, не вошедшие в инвентарную (балансовую) стоимость, относятся на Застройщика. Однако, во исполнение условий указанных выше 27 муниципальных контрактов, ООО «РНРпроектДом» в лице ФИО3, выполнило только 14 контрактов, передав расположенные в многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес> квартиры с 1 по 8 - 27.11.2015 и квартиры с 9 по 14 - 15.02.2016, в собственность Муниципального образования «Миллеровский район», а остальные, с 1 по 9 квартиры в доме «Позиция 1» и с 15 по 18 квартиры в доме «Позиция 2» не были переданы участнику долевого строительства - МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района». При этом конструкция жилых домов и самих квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес> не соответствуют строительным, градостроительным, противопожарным (позиция 1), санитарным требованиям и иным нормам. 

Согласно заключению эксперта № 014-18 от 28.02.2018 строительно-технической экспертизы, проведённой «негосударственным судебным экспертом ФИО5», установлено, что ООО «РНРпроектДом» на строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> затратило 758072 рублей 77 копеек, а на строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, затратило 5444578 рублей, а всего в общей сумме 6202 650 рублей 77 копеек.

Согласно заключению эксперта № 014-18 от 28.02.2018 строительно-технической экспертизы, проведённой «негосударственным судебным экспертом ФИО5», установлено, что в доме расположенном по адресу: 

<

адрес> не выполнен значительный объем работ, а выполненные работы не соответствуют требованиям проекта и требованиям действующих норм. Стоимость жилого дома «Позиция 1», определенная по сборникам УПВС, на дату осмотра, с учётом выполнения 100% всех работ, составляет 2 977 505 рублей, а стоимость фактически выполненных объемов работ, составляет 758 072, 77 рубля, при этом общая величина затрат по строительству квартир с 1 по 9, составляет 683 287,30 рублей. Жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> частично заселен жильцами. В квартирах №15, №16, №17 и №18 не окончены работы по водонесущим коммуникациям, отоплению, электроснабжению и отделке. Величина затрат по строительству многоквартирного дома «Позиция 2» с учётом выполнения 100% всех работ, составляет 7 444 570 рублей, общая величина затрат по строительству квартир с №15 по №18, с учётом выполнения 100% всех работ, составляет 1 418 013,33 рублей, при этом величина фактических затрат по строительству многоквартирного дома составила 5444 578 рублей,. Экспертом установлено, что конструкция жилых домов и самих квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес> строительным, градостроительным, противопожарным (по позиции 1), санитарным требованиям и иным нормам, не соответствует. Для приведения жилого дома «Позиция 1» в соответствие с требованиями действующих норм, необходимо выполнить наружные стены, соответствующие требованиям норм по термическому сопротивлению, составляющему 2,941м2*С°/вт, окончить общестроительные и специальные работы. Для приведения жилого дома «Позиция 2» в соответствие с требованиями действующих норм, необходимо выполнить неоконченные работы по квартирам №15, №16, №17, №18 (отделочные и специальные работы), а так же облицевать наружные стены кирпичом с утеплением для повышения термического сопротивления наружных стен, исправить дефекты оконных заполнений, окончить устройство отмостки и исправить дефекты отмостки, утеплить чердачное перекрытие. Величина затрат по устранению выявленных несоответствий и приведения в соответствие требованиям действующих норм по «Позиции 1» составляет 2 219 432,23 рубля, а по «Позиции 2» составляет 1 999 992 рубля. Величина затрат по устранению выявленных несоответствий и приведения в соответствие требованиям действующих норм по квартирам с 1 по 14 в «Позиции 2» составляет 1333328,50 рублей.

Таким образом, многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> не введен в эксплуатацию, а расположенные в нем помещения – в количестве 9 квартир не переданы участнику долевого строительства - МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района», то есть ФИО3 не выполнил обязательства по указанным 9 муниципальным контрактам, бюджетные денежные средства в сумме 7398500 рублей, при строительстве указанного дома, похитил и потратил на собственные нужды. Так же не были переданы участнику долевого строительства - МУ «Управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района» 4 квартиры расположенные в жилом доме по адресу: 

<

адрес> «Позиция 2», то есть ФИО3 не выполнил обязательства по указанным 4 муниципальным контрактам, бюджетные денежные средства в сумме 3310000 рублей при строительстве указанного дома похитил и потратил на собственные нужды. В связи с чем ООО «РНРпроектДом» в лице директора ФИО3, свои обязательства по строительству многоквартирных домов для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не исполнило. 

То есть полученными на строительство 13 квартир, бюджетными денежными средствами, в общей сумме 10708500 рублей, ФИО3 распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

Из заключения эксперта № 014-18 от 28.02.2018 строительно-технической экспертизы, проведённой «негосударственным судебным экспертом ФИО5», следует, что расположенные в жилом доме по адресу: 

<

адрес> квартиры с 1 по 14, не соответствуют строительным, градостроительным и санитарным требованиям, а величина затрат по устранению выявленных несоответствий и приведения в соответствие требованиям действующих норм по квартирам с 1 по 14 в «Позиции 2» составляет 1333328 рублей 50 копеек. 

,Путем ненадлежащего исполнения условий 14 муниципальных контрактов, выраженного в уменьшении затрат на постройку, путем строительства указанных квартир в несоответствии строительным, градостроительным и санитарным требованиям, ФИО3 похитил выделенные на строительство указанного жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бюджетные денежные средства в сумме 1333 328 рублей 50 копеек, которые он должен был потратить при надлежащем строительстве данного дома.

Таким образом, ФИО3, используя свое служебное положение, действуя в личных корыстных целях, обманным путем похитил и в дальнейшем распорядился по собственному усмотрению бюджетными денежными средствами в общей сумме 12041828 рублей 50 копеек, чем причинил МУ «УЖКХ, с/т Миллеровского района» ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

В ходе проведении проверки установлено, что согласно решению Арбитражного суда Ростовской области от 09.08.2017 с ООО «РНРпроектДом» в пользу администрации Миллеровского района взыскана стоимость невыполненных работ по объекту – многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> в сумме 3808186 руб. Согласно решению Арбитражного суда Ростовской области от 25.10.2017 с ООО «РНРпроектДом» в пользу администрации Миллеровского района взыскана стоимость невыполненных работ по объекту – многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> в сумме 5252 250 руб.

На основании вышеизложенного, а также согласно заключению эксперта № 014-18 от 28.02.2018 строительно-технической экспертизы, проведённой «негосударственным судебным экспертом ФИО5», действиями ФИО3, связанными с не введением в эксплуатацию многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> а также не передачей участнику долевого строительства - МУ «УЖКХ, с/т Миллеровского района» расположенных в нем помещений – 9 квартир, муниципальному образованию «Миллеровский район» причинен ущерб в сумме 2146250 руб. 

Также проверкой установлено, что в результате ненадлежащего исполнения муниципальных контрактов по строительству многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> муниципальному образованию «Миллеровский район» причинен ущерб на сумму 835142 руб. 50 коп.

Таким образом, в результате совершения ФИО3 преступления муниципальному образованию «Миллеровский район» причинен ущерб в размере 2981 392 рубля 50 копеек, который просят взыскать с ответчика.

Помощник Миллеровского межрайонного прокурора в ходе судебного заседания заявленные требования поддержала.

Представитель МО Миллеровский район также поддержала исковые требования.

Ответчик ФИО3 по приговору Миллеровского районного суда от 24.07.2019 г. отбывает наказание в ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Ростовской области. Для выяснения позиции по заявленным требованиям в судебном заседании 26 февраля 2020 года посредством видеоконференц-связи ответчик указал, что заявленные исковые требования не признают. В адрес суда поступило возражение на иск, согласно которому ответчик указал, что заявленные требования не подлежат удовлетворению, поскольку отсутствуют гражданско-правовые отношения между ответчиком и МО «Миллеровский район», так как приговором установлено, что причинен ущерб от преступления МУ «УЖКХ, с/т Миллеровского района». Кроме того, считает, что экспертиза, проведенная негосударственным экспертом в рамках уголовного дела, ошибочная, недостоверная, основанная на неправильных методиках, расчетах, без учета всех необходимых данных (том 2 л.д. 1-13, 14). 

В дальнейшем о времени и месте судебного заседания ответчик уведомлялся надлежащим образом, видеоконференц-связь с ФКУ ИК-10 по техническим причинам не состоялась, в связи с чем, учитывая мнение участников процесса, позицию ответчика по заявленным требованиям, продолжительность рассмотрения дела, суд определил, рассмотреть дело в отсутствии ответчика, применив нормы ст. 167 ГПК РФ.

Представитель третьего лица считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы гражданского дела, уголовного дела в отношении ФИО3, приходит к следующему.

Согласно ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

По смыслу данной нормы вред рассматривается как всякое умаление охраняемого законом материального или нематериального блага, любые неблагоприятные изменения в охраняемом законом благе, которое может быть как имущественным, так и неимущественным (нематериальным).

Причинение имущественного вреда порождает обязательство между причинителем вреда и потерпевшим, вследствие которого на основании ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В силу п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В ходе судебного заседания было установлено, что приговором Миллеровского районного суда от 24.07.2019 года ФИО3 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (том 1 л.д.34-125). 

Согласно ст. 61 ГПК РФ вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 г. N 30 - П признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым, преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности.

Из Постановления Конституционного Суда РФ от 08.11.2016 г. N 22 - П также следует, что при рассмотрении иска о возмещении ущерба, причиненного подвергавшимся уголовному преследованию лицом, данные предварительного расследования, включая сведения об установленных органом предварительного расследования фактических обстоятельствах совершения деяния, могут в силу ч. 1 ст. 67 и ч. 1 ст. 71 ГПК РФ быть приняты судом в качестве письменных доказательств, которые наряду с другими имеющимися в деле доказательствами он обязан оценивать по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании.

Следовательно, факты, установленные вступившим в законную силу приговором суда, имеющие значение для разрешения вопроса о возмещении вреда, причиненного преступлением, впредь до их опровержения должны приниматься судом, рассматривающим этот вопрос в порядке гражданского судопроизводства.

Норма, установленная ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, не препятствует суду в рамках рассмотрения гражданского дела принять в качестве одного из доказательств приговор суда, затрагивающий интересы стороны в гражданском деле, и с учетом этого приговора наряду с другими доказательствами установить и оценить те или иные, имеющие значение для разрешаемого гражданского дела обстоятельства (Определение Конституционного Суда РФ от 26.11.2018 г. N 3007-О).

Приговором Миллеровского районного суда от 24.06.2019 года установлено ФИО3 причинил МУ «УЖКХ, с/т Миллеровского района» ущерб в общей сумме 12041828,50 руб. Данная сумма ущерба была определена экспертизой, проведенной негосударственным судебным экспертом ФИО5 в рамках уголовного дела. Приговором Миллеровского районного суда заключение эксперта признано допустимым доказательством, в связи с чем, при рассмотрении данного гражданского дела судом учитывается размер ущерба, причиненного преступлением, исходя из выводов указанной экспертизы (том 2 л.д.76-105).

Довод ответчика о том, что ущерб от преступления причинен МУ «УЖКХ, с/т Миллеровского района», и отсутствуют отношения с МО «Миллеровский район, судом отклоняется, поскольку МО «Миллеровский район» является учредителем МУ «УЖКХ, с/т Миллеровского района», и по муниципальным контрактам на расчетный счет ООО «РНРпроектДом» перечислялись бюджетные средства.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 09.08.2017 с ООО «РНРпроектДом» в пользу администрации Миллеровского района взыскана стоимость невыполненных работ по объекту – многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> позиция 2 в сумме 3808186 руб., решением Арбитражного суда Ростовской области от 25.10.2017 с ООО «РНРпроектДом» в пользу администрации Миллеровского района взыскана стоимость невыполненных работ по объекту – многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> в сумме 5252 250 руб. (том 1 л.д.149-164).

Принимая во внимание заключение эксперта № 014-18 от 28.02.2018 строительно-технической экспертизы, проведённой «негосударственным судебным экспертом ФИО5», действиями ФИО3, связанными с не введением в эксплуатацию многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> а также не передачей участнику долевого строительства - МУ «УЖКХ, с/т Миллеровского района» расположенных в нем помещений – 9 квартир, муниципальному образованию «Миллеровский район» причинен ущерб в сумме 2146250 руб. В результате ненадлежащего исполнения муниципальных контрактов по строительству многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> муниципальному образованию «Миллеровский район» причинен ущерб на сумму 835142 руб. 50 коп. Таким образом, МО «Миллеровский район» действиями ответчика причинен ущерб на сумму (2146250 руб. + 835142 руб. 50 коп. = 2981392 рубля 50 копеек, которая подлежит взысканию с ФИО3 в пользу МО «Миллеровский район» в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление Миллеровского межрайонного прокурора в защиту интересов муниципального образования «Миллеровский район» ФИО3, третье лицо Муниципальное учреждение « Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района» о взыскании ущерба, причиненного преступлением - удовлетворить.

Взыскать с ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: ул

<

адрес> ущерб, причиненный им в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в доход бюджета муниципального образования «Миллеровский район» в сумме 2981392 руб. 50 коп.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Ростовский областной суд через Миллеровский районный суд в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной редакции.

Судья А.В. Шоркина

Мотивированное решение будет изготовлено 25 мая 2020 года.