Дело № 2-1725/2021

39RS0004-01-2021-001748-53

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16 июля 2021 года г. Калининград

Московский районный суд г. Калининграда в составе:

председательствующего судьи Семенихина В.А.

при секретаре Ткаченко К.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Оборонэнерго» к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения, взыскании неустойки, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

АО «Оборонэнерго» обратилось в суд с исковым заявлением, указав, что АО «Оборонэнерго» является сетевой организацией, оказывающей услуги по технологическому присоединению и передаче электрической энергии. 19.04.2017 г. между сетевой организацией и ответчиком заключен договор № по условиям которого АО «Оборонэнерго» обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя. Щит ввода и учета 0,4 кВ (далее ЩВУ) объекта «Гаражи» расположенного по адресу: 

<

адрес>, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), а ответчик обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора, а также выполнить мероприятия по технологическому присоединению, указанных в технических условиях. Срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора. В соответствии с дополнительным соглашением № от 10.07.2018 г. срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до 10.07.2019 г. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек. Однако, со стороны ответчика, уведомлений о завершении мероприятий в адрес АО «Оборонэнерго» не поступало. Размер платы за технологическое присоединение составляет 

<

данные изъяты>, в том числе НДС 18 %. Указанный платеж ответчиком осуществлен в полном объеме. 21.11.2019 г. в адрес заявителя было направлено письмо о нарушении договорных обязательств по договору. Письмо ответчиком получено, но оставлено без ответа. 08.05.2020 г. истцом в адрес ответчика была направлена претензия о расторжения договора об осуществлении технологического присоединения, в которой истец указал, что в случае отсутствия необходимости в дальнейшем технологическом присоединении к электрическим сетям, филиал «Калининградский» предлагает расторгнуть договор, направив письменное обращение. Однако до настоящего времени ответа на претензию в адрес АО «Оборонэнерго» не поступало. Просит расторгнуть договор № от 15.11.2011 г. об осуществлении технологического присоединения; взыскать с ответчика неустойку за неисполнение мероприятий по технологическому присоединению в размере 1003,75 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 6400 руб.

Представитель истца АО «Оборонэнерго» в судебное заседание не явился, представив заявление с ходатайством о рассмотрении дела в его отсутствие.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещена надлежаще.

В соответствии с положением ч. 3 ст. 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, в связи, с чем суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности в соответствии со ст. 67 ГК РФ, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в частности, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом.

В силу ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике» технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Пунктом 3 Правил N 861 предусмотрено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

В соответствии с пунктом 16 (5) Правил N 861, нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления, которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

В соответствии с п. 18 Правил N 861 мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями; б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем) (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ); д) проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил; д(1)) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем; д(2)) выполнение мероприятий по обеспечению возможности вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя, присоединенного к электрическим сетям этой сетевой организации, в случае технологического присоединения вновь сооружаемого (реконструируемого) объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя к электрическим сетям той же сетевой организации в целях замещения им такого объекта по производству электрической энергии (мощности).

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таковых условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонние изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законами, иными правовыми актами или договором.

Судом установлено, что 19.04.2017 г. между АО «Оборонэнерго» и ФИО1 (заявителем) заключен договор № по условиям которого АО «Оборонэнерго» обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя щит ввода и учета 0,4 кВ (далее ЩВУ) объекта «Гаражи» расположенного по адресу: 

<

адрес>, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), а ФИО1 обязалаяь оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора, а также выполнить мероприятия по технологическому присоединению, указанных в технических условиях.

Технические условия являются неотъемлемой частью договора. Срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора (п. 4 договора от 19.04.2017 г.).

В соответствии с дополнительным соглашением № от 10.07.2018 г. срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до 10.07.2019 г. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, указанный в дополнительном соглашении № от 10.07.2018 г., истек.

Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» № 146-01тпэ/16 от 26.12.2016 г. и составляет 550 руб., в том числе НДС 18 % (п. 10 договора от 19.04.2017 г.).

Указанный платеж ответчиком осуществлен в полном объеме.

21.11.2019 г. истцом в адрес ФИО1 было направлено письмо о нарушении договорных обязательств по договору. Письмо ответчиком получено, но оставлено без ответа.

08.05.2020 г. истцом в адрес ФИО1 была направлена претензия о расторжения договора об осуществлении технологического присоединения, в которой истец указал, что в случае отсутствия необходимости в дальнейшем технологическом присоединении к электрическим сетям, филиал «Калининградский» предлагает расторгнуть договор, направив письменное обращение. Однако до настоящего времени ответа на претензию в адрес АО «Оборонэнерго» не поступало.

Обращаясь в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения, АО «Оборонэнерго» ссылается на существенное нарушение ответчиком условий данного договора.

В соответствии со ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть, досрочно расторгнут судом при существенном нарушении договора другой стороной. При этом существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В силу статьи 452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Невыполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению влечет невозможность осуществить фактическое присоединение объекта заявителя к сетям сетевой организации.

Ответчик нарушил обязанность по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в сроки, установленные условиями договора технологического присоединения и Правилами N 861. Уведомлений о выполнении технических условий ответчиком в адрес сетевой организации не поступало. По указанной причине АО «Оборонэнерго» не имеет возможности завершить процедуру технологического присоединения в установленные императивными нормами правил N 861 сроки.

Таким образом, требования истца о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения обоснованы и законны, в связи, с чем подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с п. 16 Правил договор об осуществлении технологического присоединения должен содержать следующие существенные условия: а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора; в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки; обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем третьим настоящего подпункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты: - право сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении договора в случае, предусмотренном пунктом 16(5) Правил; г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон; д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики (при осуществлении технологического присоединения по индивидуальном) проекту размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом особенностей, установленных разделом III Правил); е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение.

Пунктом 17 договора от 19.04.2017 г. предусмотрено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,5 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзаце порядке за год просрочки.

Согласно представленному истцом расчету сумма неустойки составляет 1003,75 руб.: 550*0,5 % = 2,75 руб. - за 1 день просрочки (2,75*365 дней просрочки = 1003,75 руб.).

Сумма неустойки, рассчитанная истцом, не нарушает прав истца, в связи, с чем указанная сумма неустойки подлежит взысканию в пользу истца в полном объеме.

В соответствии со ст. 88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 данного Кодекса. 

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 6400 руб. 

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования АО «Оборонэнерго» удовлетворить.

Расторгнуть договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Оборонэнерго» от 19.04.2017 года (дополнительное соглашение № к договору от 10.07.2018 года) между АО «Оборонэнерго» и ФИО1.

Взыскать с ФИО1 в пользу АО «Оборонэнерго» неустойку за невыполнение мероприятий по технологическому присоединению в размере 1003,75 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6400 руб., а всего взыскать 7403,75 руб.

Решение может быть обжаловано в Калининградский областной суд в апелляционном порядке через Московский районный суд г. Калининграда в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Мотивированное решение суда изготовлено 23 июля 2021 года.

Судья /подпись/