Гражданское дело № 2-41/26

УИД 24RS0034-01-2025-000610-85

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

(мотивированное)

с. Шалинское 02 марта 2026 г.

Манский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего - судьи Мордвинова А.П.,

при секретаре судебного заседания Тузовой С.С.,

с участием истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-41/26 по исковому заявлению ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о защите прав потребителей в сфере предоставления коммунальных услуг,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в Манский районный суд Красноярского края с исковым заявлением к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей в сфере предоставления коммунальных услуг.

Исковые требования ФИО1 аргументированы тем, что между ФИО1 и ПАО «Россети Сибирь» заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор ТП), и, согласно п. 1 Договора ТП, ПАО «Россети Сибирь» приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ФИО1 расположенных в границах участка по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №, 

<

адрес> (далее – Спорный земельный участок). ФИО1 и ПАО «Россети Сибирь» при заключении Договора ТП согласовали стоимость за технологическое присоединение Спорного земельного участка к электрическим сетям в размере 66 844 руб. 05 коп. (п. 10 Договора ТП), а также определили срок выполнения ПАО «Россети Сибирь» работ по данного технологическому присоединению в размере 06 месяцев со дня заключения Договора ТП. Договор ТП должен быть исполнен ПАО «Россети Сибирь» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, однако до настоящего времени ПАО «Россети Сибирь» свои обязательства по Договору ТП не исполнило. Договором ТП в п. 17 предусмотрено, что сторона нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный Договором ТП, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). ФИО1 ранее уже обращался с аналогичным исковым заявлением к ПАО «Россети Сибирь», в связи с чем Манским районным судом 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение по гражданскому делу №, согласно которому с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 была взыскана неустойка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а поскольку ПАО «Россети Сибирь» продолжает уклоняться от исполнения Договора ТП, то с данной Компании в пользу ФИО1 подлежит взыскание неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (338 дней) в сумме 56 483 руб. 22 коп., из расчета 66 844 руб. 05 коп. х 0,25% Х 338.

Основываясь на изложенном, ФИО1, просит суд: «взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 неустойку в сумме 56 483 руб. 22 коп., штраф согласно Закона «О защите прав потребителей»».

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, судом вынесены определения, в том числе в протокольной форме, на основании которых к участию в рассмотрении дела в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт», Администрация Березовского района Красноярского края, Администрация Есаульского сельсовета Березовского района Красноярского края, Администрация Сосновоборского муниципального округа Красноярского края (с учетом начавшейся процедуры ликвидации Есаульского сельсовета, как самостоятельного муниципального образования).

ПАО «Россети Сибирь», являясь ответчиком по исковым требованиям ФИО1, подало на них отзыв, и в этом обращении сторона просит суд отказать в удовлетворении заявленных исковых требований ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь», а в случае удовлетворения требований ФИО1 согласно ст. 333 ГК РФ снизить размер неустойки до 300 руб. 00 коп., а свою позицию по существу рассматриваемого гражданского дела ПАО «Россети Сибирь» аргументирует тем, что: 1) технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта малоэтажная жилая застройка, расположенного на Спорном земельном участке; 2) правилами на ПАО «Россети Сибирь» возложена императивная обязанность заключить с потребителем публичный договор технологического присоединения и исполнить его в установленный 06 месячный срок; 3) расходы территориальных сетевых организаций на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в часта, превышающей размер расходов на осуществление указанных мероприятий, исходя из которого рассчитаны стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, не подлежат учету при государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике; 4) расходы сетевой организации, которые не покрываются платой за технологическое присоединение, органом государственного регулирования так же не компенсируются, что приводит к необходимости покрытия данных расходов за собственный счет и образованию «выпадающих» доходов, при этом, затраты на технологическое присоединение часто в многократном размере превышают внесенную заявителями плату; 5) осуществить выполнение всех мероприятии в установленные Договором ТП сроки не представилось возможным ввиду убыточности компании, в соответствия с формами раздельного учета доходов и расходов филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» (ф.1.3 и 1.6) за 2024 г., убыток по предприятию составил (-) 1 382 000 000 руб. 00 коп. (ф.1.3. графа 5); 6) на конец 2024 г. кредитный портфель «Красноярскэнерго» составил 20 600 000 000 руб. 00 коп. ( или 42,08% от общего долга ПАО «Россети Сибирь»), кредитный портфель имеет структуру: 14 900 000 000 руб. 00 коп. под заимствования по операционной деятельности 5 700 000 000 руб. 00 коп. по инвестиционной деятельности; 7) затруднительное финансовое состояние ПАО «Россети Сибирь» также стало предметом совещания у заместителя министра энергетики РФ ФИО2 по вопросу «О функционировании и финансово-экономическом состоянии ПАО «Россети Сибирь» в части филиал а ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» (протокол от ДД.ММ.ГГГГ № ЕГ-265пр), по итогам совещания, нашел свое отражение факт достижения к концу 2024 г. долговой нагрузки ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» в размере 20 000 000 000 руб. 00 коп.; 8) ПАО «Россети Сибирь» принимаются все возможные меры к выполнению мероприятий, возложенных ТУ на Общество, на сложившаяся финансовая ситуация с непогашенным кредитным портфелем и средствами на его обслуживание приводит к проблемам дальнейшего кредитования, таким образом, в связи с тяжелым материальным положением и существенной финансовой нагрузкой на Общество по иным обязательствам, сроки исполнения договоров ТП затягиваются; 10) на сегодняшний день в целях ликвидации просроченных договоров ТП между ПАО «Россети-Сибирь» и Правительством Красноярского края ведется работа по подписанию регулярного соглашения, оферта направлена в Министерство тарифной политики Красноярского края письмом от 30 апреля 2025 г. № 1.3/01/376, в котором предусмотрено: финансирование 5 509 000 000 руб. на исполнение текущих просроченных договоров льготного ТП за период 05 лет с 2026 по 2030 гг.; финансирование 11 956 000 000 руб. 00 коп. на реализацию вновь заключаемых договоров ТП в период с 2026 по 2035 гг.; ликвидация просроченных обязательств по ЛТП в полном объёме за 07 лет с 2026 по 2032 гг., таким образом, формирование итоговых сроков исполнения просроченных договоров ТП целесообразно после заключения указанного регулярного соглашения, поскольку такие сроки подлежат корректировке в зависимости от объема выделенного финансирования; 11) задержка исполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно Договору ТП, заключенному с ФИО1 вызвана недостатком финансирования, а также высокой фактической стоимостью выполнения мероприятий по Договору, при этом, ПАО «Россети Сибирь» осуществляет все необходимые и возможные действия по исполнению Договора ТП и разработке наиболее скорейшего способа исполнения данной сделки и не имеет цели как-либо нарушать права и законные интересы ФИО1; 12) учитывая компенсационную природу неустойки, размер начисленной неустойки является чрезмерно завышенным, в целях соблюдения баланса между применяемой к ПАО «Россети Сибирь» мерой ответственности и последствиями ненадлежащего исполнения, принятого им обязательства, а также во избежание превращения института неустойки в способ обогащения кредитора, вопреки ее компенсационной функции, ПАО «Россети Сибирь» считает возможным снижение суммы неустойки по договору (л.д. 40 - 42).

Администрация Сосновоборского муниципального округа Красноярского края, являясь третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, подала в суд отзыв на исковое заявление ФИО1, в котором указывает на отсутствие возражений относительно заявленных требований, а также приводятся суждения о том, что на то, что: 1) между ПАО «Россети Сибирь» с ФИО1 заключен Договор ТП; 2) Администрацией Березовского района Красноярского края согласовано размещение электрических сетей на территории Есаульского сельсовета по титулу: «Строительство ВЛ -10 кВ ф. 130-2, ВЛИ - 0,4 кВ, установка ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения участков заявителей, и согласно этому документу, Администрация Есаульского сельсовета считает возможным строительство и размещение ЛЭП, согласно прилагаемому плану трассы; 3) ПАО «Россети Сибирь» от Администрации Березовского района Красноярского края получено разрешение на срок 49 лет на размещение объекта: линии электропередач классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование; 4) ПАО «Россети Сибирь» в предусмотренный Договором ТП срок не исполнило принятые на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, расположенных на Спорном земельном участке ФИО1 (л.д. 81 - 84).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе судебного заседания: 1) истец ФИО1 исковые требования поддержал в полном объеме, выразил согласие на рассмотрение дела в порядке заочного судопроизводства, обратил внимание суда на то, что заявленное ПАО «Россети Сибирь» снижение неустойки по Договору ТП фактически не понуждает к исполнению принятого ею на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, расположенных на принадлежащем ФИО1 Спорном земельном участке; 2) представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь», представители третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ПАО «Красноярскэнергосбыт», Администрация Березовского района Красноярского края, Администрации Есаульского сельсовета Березовского района Красноярского края, будучи надлежащим образом извещенными о времени и месте рассмотрения гражданского дела, в судебное заседание не явились, об уважительности причин неявки суду не сообщили, об отложении рассмотрения гражданского дела на другую дату не ходатайствовали, каких-либо возражений против заявленных ФИО1 исковых требований не принесли, в связи с чем их неявка признается судом неуважительной; 3) представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Администрации Сосновоборского муниципального округа Красноярского края, будучи надлежащим образом извещенным о времени и месте рассмотрения гражданского дела, в судебное заседание не явился, согласно поданного отзыва, просит рассмотреть данное дело без его участия (л.д. 84).

Разбирательство гражданского дела суд, согласно ст. ст. ст. 113, 153, 167, 233 ГПК РФ, проводит согласия стороны истца в заочном порядке при имеющейся явке сторон, в отсутствие неявившихся участников процесса, не пожелавших воспользоваться своим правом на личное участие в судебном заседании.

Рассмотрев представленные материалы гражданского дела, проверив их с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности суд, приходит к выводу о том, что заявленные ФИО1 исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Гражданским кодексом РФ (далее - ГК РФ) в пп. 1- 2, 4 ст. 1 регламентировано, что: 1) гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты; 2) граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе; 3) они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора; 4) никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Правилами пп. 1, 4, 5 ст. 10 ГК РФ установлено, что: 1) не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) (п. 1); 2) если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков (п. 4); 3) добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (п. 5).

Положениями ст. 12 ГК РФ определено, что защита гражданских прав осуществляется, в том числе путем: восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; компенсации морального вреда.

Правилами пп. 1- 4 ст. 421 ГК РФ предусмотрено, что: 1) граждане и юридические лица свободны в заключении договора; 2) понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством; 3) стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами; 3) стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор); 4) к отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора; 4) условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).

ГК РФ в ч. 1 ст. 422 установлено, что договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Правилами пп. 1 - 4 ст. 539 ГК РФ закреплено, что: 1) по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии (п. 1); 2) договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии (п. 2); 3) к отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними (п. 3); 4) к отношениям по договору снабжения электрической энергией правила настоящего параграфа применяются, если законом или иными правовыми актами не установлено иное (п. 4).

Положениями п. 1 ст. 779 ГК РФ закреплено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг) (п. 1 ст. 27 Закона РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

Правилами ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» установлено, что: 1) производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов; 2) расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Положениями ст. ст. 1, 2, ч. 1 ст. 26 Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», установлено, что: 1) этот Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии; 2) законодательство РФ об электроэнергетике основывается на Конституции РФ и состоит из ГК РФ, данного Федерального закона и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики федеральных законов, а также указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и иных нормативных правовых актов РФ, принимаемых в соответствии с указанными федеральными законами; 3) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.

Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в ст. ст. 3, 38 а также в п. 2 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения) регламентировано, что лица, приобретающие электрическую и тепловую энергию для собственных бытовых и (или производственных) нужд, являются потребителями.

27 декабря 2004 г. Правительством РФ издано Постановление № 861, которым утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения).

Положениями пп. 2, 3, 6 Правил технологического присоединения закреплено, что: 1) эти Правил распространяется на случаи: присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств; увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств; изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств; присоединения ранее присоединенных энергопринимающих устройств, выведенных из эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок более 01 года) в порядке, установленном Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26 июля 2007 г. № 484 «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации»; предусмотренные п. 41 этих Правил (при присоединении к сетям смежной сетевой организации); 2) технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами; 3) заключение договора является обязательным для сетевой организации; 4) при необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением; 5) независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Правилами технологического присоединения в подп. Б п. 16 предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 1) 06 месяцев - для заявителей, указанных в пп. 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 этих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 м. в городах и поселках городского типа и не более 500 м. в сельской местности; 2) для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 04 лет).

Правилами п. 17 Правилами технологического присоединения установлено, что: 1) в случае технологического присоединения объектов, указанных в абз. 4 и 5 п. 17 этих Правил и отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 м. в городах и поселках городского типа и не более 500 м. в сельской местности, плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих значений: стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок; стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, которая утверждается в отношении всей совокупности таких мероприятий уполномоченным исполнительным органом субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов для соответствующих случаев технологического присоединения в размере не более 10 000 руб. 00 коп. за кВт (превышение указанного значения допускается по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов) и не менее 3000 руб. 00 коп. за кВт - с 01 июля 2022 г., 4 000 руб. 00 коп. за кВт - с 01 июля 2023 г. и 5000 руб. 00 коп. за кВт - с 01 июля 2024 г., а в случае, если стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная в соответствии с настоящим абзацем, составляет менее платы за технологическое присоединение, рассчитанной в порядке, предусмотренном абз. 2 - 5 п. 17(4) данных Правил, то плата за технологическое присоединение рассчитывается в соответствии с абз. 2 - 5 п. 17(4) этих Правил; 2) с соблюдением требований абзацев первого - третьего настоящего пункта определяется плата за технологическое присоединение объектов микрогенерации заявителей - физических лиц, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации; 3) с соблюдением требований абз. 1 - 3 п. 17 данных Правил определяется плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Положениями подп. Д п. 18 Правил технологического присоединения установлено, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в том числе и проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX этих Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

Правилами технологического присоединения в пп. 84, 85, 89, 90, 102 регламентировано, что:

1) сетевая организация проводит осмотр присоединяемых электроустановок заявителя до распределительного устройства (пункта) заявителя (распределительного устройства трансформаторной подстанции, вводного устройства, вводного распределительного устройства, главного распределительного щита, узла учета) включительно (п. 84);

2) для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением ряда документов, предусмотренных указанными Правилами (п. 85);

3) при невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя; при осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки; повторный осмотр электроустановки заявителя осуществляется не позднее 03 рабочих дней после получения от него уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению; акт о выполнении технических условий оформляется после устранения выявленных нарушений (п. 89);

4) срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (с учетом направления заявителю подписанных со стороны сетевой организации акта осмотра (обследования) электроустановки и акта о выполнении технических условий) не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний (п. 90);

5) срок проведения мероприятий по проверке выполнения технических условий (с учетом выдачи заявителю подписанных со стороны сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления акта о выполнении технических условий) не должен превышать 25 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о готовности к проверке выполнения технических условий либо уведомления об устранении замечаний (п. 102).

04 мая 2012 г. Правительством РФ принято Постановление № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», утверждены «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии».

Правилами п. 36 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии предусмотрено, что документами, подтверждающими технологическое присоединение в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, в отношении которых подано заявление о заключении договора, являются акт о технологическом присоединении, составленный и подписанный потребителем и сетевой организацией (иным владельцем объектов электросетевого хозяйства, производителем электрической энергии (мощности)), к чьим сетям (энергетическим установкам) присоединены энергопринимающие устройства потребителя, и (или) акт разграничения балансовой принадлежности электросетей.

Положениями п. 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27декабря 2004 г. № 861, определено, что документами о технологическом присоединении, согласно являются документы, составляемые (составленные) в процессе технологического присоединения (после завершения технологического присоединения) энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства, в том числе технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения, акт разграничения балансовой принадлежности электросетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

ГК РФ в ч. 1 ст. 309, п. 1 ст. 310 регламентировано, что: 1) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.; 2) односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подп. Б п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2004 г. № 861, для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Федерального закона «Об электроэнергетике».

Положениям ч. 2 ст. 61 ГПК РФ предусмотрено, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда, указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных данным Кодексом.

Правилами ч. 1 ст. 56, ч. 1 ст. 68, ч. 3 ст. 196 ГПК РФ установлено: 1) каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом; 2) в случае, если сторона, обязанная доказывать свои требования или возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны; 3) суд принимает решение по заявленным истцом требованиям; однако суд может выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным законом.

ПАО «Россети Сибирь», согласно выписке из ЕГРЮЛ, является юридическим лицом (ОГРН 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ), и его основным видом деятельности является: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям, тем самым данной юридическое лицо является сетевой компанией.

ЕГРН, согласно выпискам от ДД.ММ.ГГГГ, содержит сведения о том, что по адресу: 

<

адрес>, расположен земельный участок с кадастровым номером №, площадью 2 500 +/- 35 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (далее - Спорный земельный участок или земельный участок :1074), при этом: 1) данные об объекте недвижимости внесены в ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ; 2) правообладателем Спорного земельного участка является ФИО1 на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО3, ФИО4, ФИО5 (л.д. 23 - 24, 26 - 29).

ДД.ММ.ГГГГ, как установлено судом, от ФИО1 в адрес ПАО «Россети Сибирь» поступила заявка на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) в отношении малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), расположенной на Спорном земельном участке.

ПАО «Россети Сибирь» в последующем заключил с ФИО1 договор от ДД.ММ.ГГГГ № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор ТП), в соответствии с которым:

1) ПАО «Россети Сибирь» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ФИО1 «Малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом)», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВт; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует, а ФИО1 обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (п. 1);

2) технологическое присоединение необходимо для электроснабжения «малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №, 

<

адрес> (п. 2);

3) срок действия технологических условий составляет 02 года со дня заключения настоящего договора (п. 4);

4) срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 06 месяцев со дня заключения этого договора (п. 5);

5) ПАО «Россети Сибирь» обязуется: А) надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на ПАО «Россети Сибирь» мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства ФИО1, указанные в технических условиях; Б) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления ФИО1 ПАО «Россети Сибирь» о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий ФИО1, провести с участием ФИО1 осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств ФИО1; В) не позднее 03 (трех) рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абз. 3 п. 6, с соблюдением срока, установленного п. 5 Договора ТП, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО1 к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии ФИО1 акт об осуществлении технологического присоединения и направить его ФИО1 (п. 6);

6) ФИО1 обязуется: А) надлежащим образом исполнить обязательства по Договору ТП, в том числе по выполнению возложенных на ФИО1 мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства ФИО1, указанные в технологических условиях, за исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства ФИО1, указанные в технологических условиях; Б) в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технологических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработки проектной документации является обязательной); В) принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств ПАО «Россети Сибирь»; Г) после осуществления ПАО «Россети Сибирь» фактического присоединения энергопринимающих устройств ФИО1 к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 02 (двух) рабочих дней со дня получения указанного акта от ПАО «Россети Сибирь»; Д) надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; Е) уведомить ПАО «Россети Сибирь» о направлении заявок в иные сетевые организации по технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 02 и более источников электроснабжения (п. 8);

7) размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 07 декабря 2023 г. № 57-э, с изменениями внесенными приказами Министерства тарифной политики Красноярского края от 27 декабря 2023 г. № 115-э, от 23 января 2024 г. № 3-э, от 06 февраля 2024 г. № 4-э, от 20 февраля 2024 г. № 13-э, от 21 марта 2024 г. № 16-э, от 26 апреля 2024 г. № 20-э, от 21 мая 2024 г. № 27-э, и составляет 66 844 руб. 05 коп., в том числе НДС (20%) в размере 11 140 руб. 67 коп. (п. 10);

8) внесение платы за технологическое присоединение осуществляется ФИО1 в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (п. 11);

9) датой исполнения обязательства ФИО1 по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет ПАО «Россети Сибирь» (п. 12);

10) ФИО1 несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки присоединения энергопринимающих устройств ФИО1 (п. 13);

11) Договор ТП может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным ГК РФ (п. 15);

12) сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), при этом, совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки (п. 17);

13) Договор ТП считается заключенным со дня оплаты ФИО1 счета на оплату технологического присоединения по договору (п. 21) (л.д. 10-12).

ПАО «Россети Сибирь» в адрес ФИО1 направлена квитанция №, согласно которой оплата счета за технологическое присоединение по Договору ТП вносится ФИО1 в следующем порядке:

А) 15% в течение 05 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета на оплату;

Б) 30% платы за ТП вносится в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

В) 35% платы за ТП вносится в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; 4) 20% платы за ТП вносится в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении ТП или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Техническими условиями № для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» (приложение к Договору ТП) (далее - ТУ или Спорные технические условия), предусмотрено, что: 1) основным источником питания является: ПС 220 кВ Узловая №; 2) срок действия настоящих технических условий составляет 02 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; 3) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 15 кВт; 4) категория надежности: третья; 5) класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,40 кВ; 6) в целях технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» осуществляет: А) организационные мероприятия: А1) подготовку технических условий на технологическое присоединение; А2) обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством РФ и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке; Б) требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети-Сибирь» - «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов ФИО1: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством от 16 февраля 2008 г. № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством: строительство ЛЭП-10 кВ от точки, указанной в п. № этих ТУ, до новой ТП 10/0,4-ДВ; протяженность и характеристики ЛЭП уточняются проектом; строительство ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов уточнить проектом; строительство ЛЭП-0,4 кВ от новой ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, протяженность и характеристики ЛЭП уточняются проектом; выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. № 442); 7) в целях технологического присоединения ФИО1 осуществляет: ввод от комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП; фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) (л.д. 13-15).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в Манский районный суд Красноярского края с исковым заявлением к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей в сфере предоставления коммунальных услуг.

ДД.ММ.ГГГГ судом вынесено решение, которым исковые требования ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» удовлетворены частично, в связи с чем постановлено: «А) возложить на Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» обязанность в течение 04 месяцев со дня вступления принимаемого решения в законную силу исполнить обязательства по договору о технологическом присоединении от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенному с ФИО1, в отношении объекта «малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №, 

<

адрес>, в соответствии с п. 10 технических условий №, являющихся приложением к указанному договору, а именно: 1) произвести действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств, расположенных на этом спорном земельном участке; 2) выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, и согласовать ее со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством РФ; 3) запроектировать и построить ЛЭП-10 кВ от точки, указанной в пункте № этих ТУ, до новой ТП 10/0,4-ДВ; протяженность и характеристики ЛЭП уточняются проектом; 4) запроектировать и построить ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов уточнить проектом; 5) запроектировать и построить ЛЭП-0,4 кВ от новой ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, протяженность и характеристики ЛЭП уточняются проектом; 6) выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. № 442; Б) взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 судебную неустойку на случай неисполнение принимаемого решения в части возложения на Публичное акционерное общества «Россети Сибири» обязанности по исполнению условий договора о технологическом присоединении от ДД.ММ.ГГГГ № в следующих размерах: 1) 700 руб. 00 коп. за первые 14 календарных дней просрочки исполнения принимаемого судом решения в этой части, исчисляемых со следующего дня с момента истечения срока, установленного для его исполнения; 2) 950 руб. 00 коп., начиная с 15 календарного дня просрочки исполнения решения в этой части и до его фактического исполнения в этой же части; В) взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу ФИО1: 1) 4 000 руб. 00 коп. в качестве договорной неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренной п. 17 договора о технологическом присоединении от ДД.ММ.ГГГГ №.2400.6401.24; 2) 8 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда; 3) 15 000 руб. 00 коп. в качестве штрафа за несоблюдение удовлетворения в добровольном порядке требований потребителя, предусмотренного п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», а всего ко взысканию денежную сумму в размере 27 000 руб. 00 коп.; Г) в остальной части исковые требования ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» - оставить без удовлетворения; Д) взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу муниципального образования «Шалинский сельсовет Манского района Красноярского края» неуплаченную государственную пошлину в размере 13 000 руб. 00 коп.».

Апелляционным определением Красноярского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение от ДД.ММ.ГГГГ изменено в части взыскания с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 судебной неустойки на случай неисполнение принимаемого решения в размере 700 руб. 00 коп. за первые 14 календарных дней просрочки и 950 руб.00 коп., начиная с 15 календарного дня просрочки исполнения решения, и принято в измененной части новое решение, а именно: «1) взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 100 (сто) руб. 00 коп. за каждый календарный день не исполнения решения Манского районного суда Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ в части исполнения обязательств по договору о технологическом присоединении от ДД.ММ.ГГГГ №, которая подлежит начислению со следующего дня после истечения четырехмесячного срока, установленного для исполнения решения, и по день фактического исполнения решения суда в названной части; 2) это же решение изменить в части взыскания с ПАО «Россети Сибирь» штрафа и государственной пошлины; 3) уменьшить размер взысканного с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 штрафа до 6 000 руб. 00 коп., а общий размер взысканной денежной суммы - до 18 000 руб. 00 коп.; 4) уменьшить размер взысканной с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в доход муниципального образования государственной пошлины до 10 000 руб. 00 коп; 5) в остальной части решение от ДД.ММ.ГГГГ оставить без изменения».

ФИО1 в рамках судебного разбирательства по гражданскому делу № предоставлены чеки по операции, в соответствии с которыми: 1) ДД.ММ.ГГГГ им произведена оплату по Договору ТП в размере 10 050 руб. 00 коп.; 2) ДД.ММ.ГГГГ им произведена оплату по Договору ТП в размере 20 000 руб. 00 коп., в связи с чем суд признает Договор ТП заключенным ДД.ММ.ГГГГ (дата оплаты счета по Договору ТП заявителем), а соответственно срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 06 месяцев со дня заключения этого Договора ТП, то есть до ДД.ММ.ГГГГ включительно.

ПАО «Россети Сибирь» в рамках судебного разбирательства каких-либо доказательств полного исполнения обязательств перед ФИО1 по Договору ТП не представило, в том числе и по истечении 04 месяцев со дня вступления решения от ДД.ММ.ГГГГ в законную силу, а соответственно при таких данных суд признает, что ПАО «Россети Сибирь» продолжает не исполнять принятые на себя обязательства по Договору ТП по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, расположенных на Спорном земельном участке, принадлежащем ФИО1

Договором ТП в п. 17, а также в п. 17 Правил технологического присоединения предусмотрено, что сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), при этом, совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

ФИО1 заявлено требование о взыскании неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 56 483 руб. 22 коп., предусмотренной п. 17 Договора ТП, а поскольку технологическое присоединение энергопринимающих устройств, расположенных на Спорном земельном участке, не осуществлено в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно исключительно по вине ПАО «Россети Сибирь», то размер неустойки, установленный п. 17 Договора ТП, подлежащей взысканию с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно п. 17 Договора ТП, составляет 56 483 руб. 22 коп., из расчета: (66 844 руб. 05 коп. (сумма оплаты, установленная Договором ТП) / 0,25% ( размер договорной неустойки) Х 338 дней (за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ)).

ГК РФ в пп. 1, 2 ст. 333 закреплены правила, согласно которым: 1) если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку; если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении; 2) уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

ПАО «Россети Сибирь» согласно предоставленным возражениям на исковое заявление, выразило несогласие с суммой, заявленной ФИО1 договорной неустойки, а поскольку ПАО «Россети Сибирь» предоставлены сведения о возникновении трудностей с исполнением мероприятий по технологическому присоединению, в связи с отсутствием финансирования и тяжелым финансовым положением, то при таких данных суд в силу положений ст. 333 ГК РФ полагает возможным снизить сумму неустойки с 56 483 руб. 22 коп. до 25 000 руб. 00 коп., учитывая представленные Администрацией Сосновоборского муниципального округа Красноярского края сведения о завершении согласительных процедур о месте расположения линий электроснабжения на территории бывшего Есаульского сельсовета Березовского р-на Красноярского края.

Правилами п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» определено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» в п. 46 даны разъяснения, согласно которым при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п. 6 ст. 13 указанного Закона).

ФИО1 заявлено требование имущественного характера о взыскании договорной неустойки в размере 56 483 руб. 22 коп., однако суд в пользу ФИО1 взыскаивает договорную неустойку в размере 25 000 руб. 00 коп. в связи с чем суд определяет размер штрафа, подлежащего взысканию с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 за отказ добровольно удовлетворить требований потребителя в досудебном порядке, на сумму 12 500 руб. 00 коп. (25 000 руб. 00 коп. (договорная неустойка) / 50% (коэффициент штрафа, установленный п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»)).

Положениями ч. 1 ст. 88 ГПК РФ определено, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела, а из положений ч. 1 ст. 98 следует, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

ГПК РФ в ч. 1 ст. 98 регламентировано, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, однако в случае, если иск удовлетворен частично, указанные в этой статье ГПК РФ судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Правилами ч. 1 ст. 103 ГПК РФ установлено, что: 1) издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований; 2) в этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством РФ.

ФИО1 освобожден от уплаты государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии п. 4 ч. 2 ст. 333.36 НК РФ (по искам о защите прав потребителей), при этом им в рамках рассматриваемого гражданского дела заявлены имущественные требования, подлежащие оценке, о взыскании договорной неустойки, которые удовлетворены судом на сумму 25 000 руб. 00 коп., и при таком взыскании размер государственной пошлины силу подп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ составляет 4 000 руб. 00 коп., а соответственно при совокупности таких обстоятельств суд в силу положений ч 1 ст. 98, ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, подпп. 1 и 3 п. 1 ст. 333-19 НК РФ дополнительно взыскивает с ПАО «Россети Сибирь» в пользу бюджета муниципального образования «Манско-Уярский муниципальный округ Красноярского края» неуплаченную государственную пошлину в размере 4 000 руб. 00 коп.

Основываясь на изложенном и руководствуясь ст. 194 - 198, 233 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1, имеющего паспорт гражданина РФ (серия №, №, выдан ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №), к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь», имеющему ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, - удовлетворить частично.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу ФИО1: 1) 25 000 руб. 00 коп. в качестве договорной неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренной п. 17 договора о технологическом присоединении от ДД.ММ.ГГГГ №.2400.6401.24; 2) 12 500 руб. 00 коп. в качестве штрафа, предусмотренного п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», за несоблюдение удовлетворения в добровольном порядке требований потребителя, а всего ко взысканию денежную сумму в размере 37 500 руб.00 коп.

В остальной части исковые требования ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» - оставить без удовлетворения.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу муниципального образования «Манско-Уярский муниципальный округ Красноярского края» неуплаченную государственную пошлину в размере 4 000 руб. 00 коп.

Ответчик вправе подать в Манский районный суд Красноярского края заявления об отмене заочного решения в течение 07 рабочих дней со дня вручения ему копии этого решения при наличии у него уважительных причин для неявки в судебное заседание и доказательств, имеющих существенное значение для правильного разрешения гражданского дела.

Решение также может быть обжаловано участниками процесса в Красноярский краевой суд и в апелляционном порядке в течение месяца со дня истечения срока подачи ответчиком заявления об отмене этого заочного решения, а в случае если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения судом определения об отказе в удовлетворении этого заявления, при этом ответчик вправе принести апелляционную жалобу только после соблюдения ими процедуры подачи заявления об отмене заочного решения.

Председательствующий А.П. Мордвинов

Резолютивная часть решения оглашена 02 марта 2026 г.

Мотивированное решение изготовлено 17 марта 2026 г.

Копия верна

судья Манского районного суда Красноярского края А.П. Мордвинов