Дело № 2-376/2025

75RS0023-01-2024-006119-19

РЕШЕНИЕ

 (не вступило в законную силу)

Именем Российской Федерации

23 января 2025 года.

Черновский районный суд г.Читы

в составе председательствующего Ман-за О.В.,

при помощнике ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Чите, в помещении суда, гражданское дело по иску ФИО2 к ПАО «Россети Сибирь», филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» о возложении обязанности выполнить технологическое присоединение к электрическим сетям, компенсации морального вреда,

у с т а н о в и л :

Истец ФИО2 обратилась в суд с вышеназванными исковыми требованиями, ссылаясь на следующее:

Она, истец, является собственником земельного участка с кадастровым номером № на основании регистрационной записи № и жилого дома с кадастровым номером №, расположенных по адресу: 

<

адрес>. Между ней и ПАО «Россети Сибирь» на основании заявки № от ДД.ММ.ГГГГ заключен типовой договор № об осуществлении технологического присоединения к электрической сети, в соответствии с котором ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» принимает на себя обязательства присоединения энергопринимающих устройство ФИО2, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства. В соответствии с п. 5 раздела 1 типового договора №, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. Ею была внесена оплата расходов на технологическое присоединение в размере 15960 руб. ДД.ММ.ГГГГ. Соответственно, срок, в который ответчиком должны быть исполнены обязательств по договору – ДД.ММ.ГГГГ. Однако, д настоящего времени обязательства ответчиком перед ней не исполнены. ДД.ММ.ГГГГ ею было подано в офис филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» обращение с целью уточнения срока исполнения обязательств по Договору, в ответе указано, что в связи с дефицитом источников финансирования, исполнение договора № в 2024 г. не представляется возможным. 

Просит суд обязать ПАО «Россети Сибирь» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО2 к электрическим сетям в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу. Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО2 компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей и штраф в размере пятидесяти процентов т суммы, присужденной судом за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. 

Истец ФИО2 в суде исковые требования поддержала полностью и пояснила аналогичное вышеизложенному, дополнив, что в настоящее время она переехала жить к маме, т.к. у нее не было возможности оплачивать аренду жилья, поскольку она находится в декретном отпуске, ее супруг на СВО. 

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» ФИО3, действующая на основании доверенности, в суде исковые требования не признала и пояснила, что исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям осложнено обстоятельствами, не зависящими от сетевой организации. Отсутствие финансирования привело к невозможности осуществления поставки к несвоевременному исполнению договора. В случае удовлетворения требований просит суд предоставить срок для исполнения договора не менее 6 месяцев. Также считает необоснованными требования о компенсации морального вреда и штрафа.

Выслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему: 

В соответствии с положениями ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861.

В силу требований ст. 309, ст. 310 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Как следует из материалов дела и установлено в ходе судебного разбирательства, между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО2 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости, строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых устройств 15кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, 0,40 кВ (п. 1 договора). Точки присоединения не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты (п. 4 договора), л.д. 23-25.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения «Малоэтажная жилая застройка», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Россия, Забайкальский край, кадастровый номер земельного участка №, 

<

адрес> (п. 2 Договора). 

Условия типового договора № об осуществлении технологического при соединения к электрическим сетям, технические условия №, счет на оплату по форме № ПД-4 на сумму 15960 рублей размещены сетевой организацией в личном кабинете заявителя.

ФИО2 перечислила плату за технологическое присоединение в размере 15960 рублей, что подтверждается платежным документом от ДД.ММ.ГГГГ, л.д. 19. 

Таким образом, договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № считается заключенным ДД.ММ.ГГГГ. 

В соответствии с условиями данного договора ПАО «Россети Сибирь» обязалось надлежащим образом исполнить обязательства по данному договору, в том числе, по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, с соблюдением срока, указанного в технических условиях, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить в электронной форме и разместить в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии в техническими условиями и акт об осуществлении технологического присоединения; уведомить заявителя о составлении и размещении в личном кабинете заявителя акта о выполнении технический условий и акта об осуществлении технологического присоединения (п. 6 договора).

При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий (п. 7 договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен в 6 месяцев со дня заключения договора (п. 5 договора).

Стороны договорились, что договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета.

В соответствии с п. 10 условий договора размер платы заявителя за технологическое присоединение составляет 15960 руб. Технические условия на технологическое присоединение являются неотъемлемой частью договора, и срок их действия составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (п. 4 договора).

Пунктом 10 технических условий №, являющихся приложением N 1 к договору об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ, определено, что сетевая организация (ответчик) осуществляет организационные мероприятия: выполнение проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 и согласование со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством, л.д. 20. 

Согласно п.п. 11а – 11б указанных технических условий, на заявителя возложены следующие обязанности: ввод от комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП; фактическое присоединение объекта заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности). 

Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (п. 12 Технических условий).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (п. 13 Технических условий). 

ПАО «Россети Сибирь» в нарушение п. 5 вышеуказанного договора технологическое присоединение к электрической сети жилого дома ФИО2 не произведено, срок исполнения которого истек 25 декабря 2024 года, что не оспаривается в ходе судебного разбирательства объяснениями представителя ответчика.

С учетом того, что ПАО «Россети Сибирь» допущено нарушение действующего законодательства в части надлежащего выполнения принятых на себя обязательств об осуществлении технологического присоединения ФИО2 к электросетям до настоящего времени не устранены, права ФИО2 на обеспечение электроснабжением продолжают нарушаться.

Разрешая при таких обстоятельствах спор, суд, руководствуясь приведенными выше положениями законодательства, установив факт неисполнения ответчиком обязательств по заключенному с истцом договору технологического присоединения, при отсутствии доказательств, свидетельствующих о невозможности исполнения ответчиком таких обязательств по независящей от него причине, изменения обстоятельств, вызванных причинами, которые ответчик не может преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру договора и условиям оборота, приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований и возложения на ответчика обязанности осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям, а также необходимости установления ответчику срока для исполнения решения в течение одного месяцев с момента вступления его в законную силу.

При этом суд учитывает и то, что материалы дела бесспорно свидетельствуют о неисполнении ответчиком своих обязательств по договору в установленный срок, при этом каких-либо доказательств того, что данное обстоятельство было обусловлено нарушением условий договора со стороны истца, представлено не было, как не было представлено и доказательств наличия обстоятельств, позволяющих освободить ответчика от ответственности.

Кроме этого, заявленный истцом месячный срок осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям с момента вступления решения в законную силу соответствует обстоятельствам дела и существу допущенного ответчиком нарушения, объема необходимых работ, в связи с чем, требования представителя ответчика о предоставлении срока для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную силу суд считает необоснованным. 

Доводы представителя ответчика о том, что нарушение срока исполнения договора произошло в силу объективных обстоятельств, не зависящих от ответчика, суд находит несостоятельными, которые не могут служить основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Также истцом заявлены требования о компенсации морального вреда в сумме 10000 рублей. 

Истцы, относящиеся к категории потребителей электрической энергии для бытовых нужд как гражданин, имеет право требовать взыскания компенсации морального вреда.

Как следует из разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2022 года N 33 "О практике применения судами норм о компенсации морального вреда", моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации потребителю в случае установления самого факта нарушения его прав (ст. 15 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"). Суд, установив факт нарушения прав потребителя, взыскивает компенсацию морального вреда за нарушение прав потребителя наряду с применением иных мер ответственности за нарушение прав потребителя, установленных законом или договором.

Компенсация морального вреда, причиненного гражданину изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), нарушением иных принадлежащих ему прав или нематериальных благ, в том числе допущенным одновременно с нарушением прав потребителей (например, при отказе продавца удовлетворить требование потребителя о замене товара в случае обнаружения недостатков товара, совершенном в оскорбительной форме, унижающей честь и достоинство потребителя), может быть взыскана судом по общим правилам, то есть при доказанности факта нарушения его личных неимущественных прав либо посягательства на принадлежащие гражданину нематериальные блага.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Учитывая, что судом установлен факт нарушения прав истца ФИО2 в связи с неисполнением ПАО «Россети Сибирь» обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, данное обстоятельство в силу Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" дает право на компенсацию морального вреда.

Согласно абз. 2 п. 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем, размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

По смыслу приведенного правового регулирования разумные и справедливые размеры компенсации морального вреда являются оценочной категорией, четкие критерии его определения применительно к тем или иным категориям дел не предусматриваются. В каждом конкретном случае суд вправе определить такие пределы с учетом обстоятельств конкретного дела, на основании исследования и оценки всех обстоятельств дела и внутреннего убеждения, основанного на необходимости обеспечения соблюдения прав и свобод сторон судебного разбирательства, соответственно, вопреки доводам жалобы ответчика, размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги).

Принимая во внимание установленные судом обстоятельства причинения вреда, степень вины ответчика, длительность неисполнения им обязательства, составляющую значительный период времени, характер и степень нравственных страданий истца (истец находится в декретном отпуске, супруг в зоне СВО), которая в связи с неисполнением ответчиком обязательств претерпевает нравственные страдания вследствие невозможности проживать в собственном доме, а также принципа разумности и справедливости, руководствуясь положениями ст. 15 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" и ст. 1101 ГК РФ, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 8000 рублей. При этом само по себе наличие судебного спора по поводу исполнения обязательств по договору указывает на несоблюдение ответчиком добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.

На основании пункта 6 статьи 13 Закона РФ "О защите прав потребителей", согласно которой при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В связи с тем, что судом в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 8000 рублей, с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО2 подлежит взысканию штраф в размере 4000 рублей, что составляет 50% от взысканной суммы.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ. с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета в сумме 3000 рублей. 

Руководствуясь ст.ст. 194, 199 ГПК РФ, суд 

р е ш и л :

Исковые требования ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка 

<

адрес>, паспорт № №, выдан 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, к.п. №) удовлетворить. 

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (юридический адрес: ул. Бограда, 144А, офис 420, 

<

...>, юридический адрес филиала: ул. Анохина, 7, г.Чита, забайкальский край, 672010, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО2 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (жилой дом по адресу: 

<

адрес>).

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО2 компенсацию морального вреда в размере 8000 рублей, штраф в размере 4000 рублей, а всего 12000 рублей.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» государственную пошлину в доход местного бюджета в сумме 3000 рублей.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Забайкальского краевого суда в течение одного месяца через Черновский районный суд г.Читы. 

Судья:

Мотивированное решение изготовлено 06 февраля 2025 года.