Принято в окончательной форме 22.07.2020 

Дело № 2-1289/2020 (76RS0024-01-2020-000542-21) 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 июля 2020 г. г. Ярославль

Фрунзенский районный суд г. Ярославля в составе 

председательствующего судьи Жуковой Е.М., 

при секретаре судебного заседания Монаховой А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» к ФИО1 о расторжении договора и взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» обратилось в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА НОМЕР, заключенный с ФИО1; взыскании с ФИО1 в пользу ПАО «МРСК Центра» неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению 14975,54 руб., расходов по оплате государственной пошлины 6599,02 руб.

В обоснование исковых требований указано, что между ПАО «МРСК Центра» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА НОМЕР жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

Договором предусмотрены обязательства, как со стороны истца, так и со стороны ответчика. По указанному договору сетевая организация обязуется выполнить мероприятия по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства. Заявитель в свою очередь обязуется выполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя.

В письме филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ответчик был уведомлен о готовности сетевой организации осуществить технологическое присоединение объекта к электрическим сетям.

Фактическое присоединение объекта ответчика к электрическим сетям невозможно осуществить до выполнения заявителем своей части мероприятий, указанных в пункте 11 технических условий.

Обязанность заявителя уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий закреплена в пункте 85 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.. .», утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА N 861 (далее - «Правила»). В силу абзаца 2 пункта 8 договора заявитель также обязуется после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ земельного участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

Вместе с тем, каких-либо уведомлений о выполнении мероприятий технических условий со стороны ответчика в сетевую организацию не поступало. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению в настоящий момент истек.

Невыполнение ответчиком своих обязательств по договору, в том числе невыполнение мероприятий по технологическому присоединению, приводит к тому, что ПАО «МРСК Центра» не может завершить процедуру технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

В адрес ответчика было направлено письмо от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, которое содержало предложение расторгнуть договор в случае отсутствия необходимости технологического присоединения. К указанному письму был приложен проект соглашения о расторжении договора. Однако на предложения расторгнуть договор каких-либо ответов от ответчика не поступало.

Пунктом 17 Договора установлено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 % от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном порядке за год просрочки. Размер платы за технологическое присоединение составляет 16 411,55 руб. Период для расчета неустойки - с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. Неустойка за нарушение со стороны ответчика срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 14 975 руб. 54 коп. 

Истец в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещалась надлежащим образом (извещение возвращено по истечении срока хранения).

Судом определено рассмотреть дело при имеющейся явке.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии со ст.451ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут.

При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.

В соответствии со ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное.

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

В соответствии с п.1 ст. 26 Федерального закона от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

В судебном заседании установлено, что между ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ФИО1 в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами заключен ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА договор НОМЕР об осуществлении технологического присоединения (л.д.14-17).

По условиям указанного договора ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя индивидуального жилого дома, том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учетом характеристик, указанных в договоре.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Срок выполнения условий по договору составляет четыре месяца (п.5 договора).

Сетевая организация обязуется в течение 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технический условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 12 рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (п.6 договора).

Заявитель обязуется после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной) (п.8 договора).

Перечень мероприятий, который должна выполнить заявитель с целью выполнения всех условий заключенного договора, перечислены в Технических условиях для присоединения к электрическим сетям, которые являются неотъемлемой частью договора (л.д.18-20).

Как следует из п.10 Договора размер платы за технологическое присоединение составляет 16 411 руб. 55 коп.

В п.17 Договора сторонами согласовано, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки, а также расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в адрес заявителя сетевая компания направила для подписания два экземпляра договора об осуществлении технологического присоединения индивидуального жилого дома к объектам электросетевого хозяйства, а также уведомление о готовности сетевой организации осуществить фактическое технологическое присоединение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства после подписания договора и выполнения заявителем обязательств (л.д.21).

Уведомление о выполнении мероприятий, перечисленных в Технических условиях, ответчиком в сетевую организацию не направлено. Доказательств обратного материалы дела не содержат.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА сетевая компания направила в адрес ФИО1 претензию, в которой ответчика уведомили о том, что срок исполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения, определенный датой до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, истек; предложили в течение 30 календарных дней уведомить сетевую организацию о выполнении мероприятий, либо расторгнуть договор в случае отсутствия необходимости технологического присоединения; оплатить неустойку, расчет которой был приложен к претензии.

Претензия и приложенные к ней документы, а также проект соглашения о расторжении договора направлены заявителю по месту его жительства.

Однако проект соглашения о расторжении договора ФИО1 не подписан. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Суд признает данное нарушение договора со стороны ответчика существенным, поскольку оно влечет для истца такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что рассчитывал при заключении договора, а именно, прибыли.

Данное обстоятельство, а также факт обращения истца в суд с настоящим иском, со дня которого прошел значительный период времени, и ответчик был извещен о намерении истца расторгнуть договор, суд расценивает как отказ ФИО1 на предложение ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» расторгнуть договор.

При таких обстоятельствах договор подлежит расторжению в судебном порядке.

Истец просит взыскать неустойку, предусмотренную п. 17 Договора за период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - 365 дней из расчета 0,25 % от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств в сумме 14975,54 рублей (расчет неустойки, л.д.27).

Сведений о том, что размер неустойки явно несоразмерен последствиям нарушения обязательств, в материалы дела не представлено. Размер неустойки согласован сторонами спора в договоре.

Наличие оснований для применения положений ст. 333 ГК РФ и уменьшении размера заявленной ко взысканию неустойки, в судебном заседании не установлено. 

Таким образом, проанализировав доказательства в их совокупности, суд находит настоящее исковое заявление подлежащим удовлетворению. 

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в размере 6599,02 руб., которые подтверждены платежным поручением НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА НОМЕР, заключенный с ФИО1.

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «МРСК Центра» неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению 14975,54 руб., расходы по оплате государственной пошлины 6599,02 руб.

Решение может быть обжаловано в Ярославский областной суд путем подачи жалобы через Фрунзенский районный суд г.Ярославля в течение месяца со дня составления мотивированного решения.

Судья Е.М. Жукова