50RS0№-36

РЕШЕНИЕ

ИФИО1

<

адрес> 20 июня 2024 года Домодедовский городской суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи 

С.С. Жуковой, 

при секретаре судебного заседания 

ФИО4, 

с участием в судебном заседании: истца в лице адвоката ФИО5, ордер 1133 от ДД.ММ.ГГГГ

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску ФИО3, ФИО2 к Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Прибрежный Парк» о взыскании неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства, компенсации морального вреда за нарушение прав потребителей, потребительского штрафа, судебных расходов в равных долях, суд 

УСТАНОВИЛ:

Истец, с учётом уточнений в порядке ст. 39 ГПК РФ, обратился в суд с иском к ответчику с требованиями о взыскании в его пользу неустойки в размере 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, компенсации морального вреда в размере 

<

данные изъяты>, штрафа за неисполнение обязательства в добровольном порядке в размере 50% от взысканной судом суммы, расходов по оплате услуг представителя в размере 

<

данные изъяты> копеек, госпошлины в размере 

<

данные изъяты>

В обоснование исковых требований указал, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключен договор участия в долевом строительстве №№ многоэтажного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, с. Ям, корпус 3.1, корпус 3.2, корпус 3.3. Согласно данному договору застройщик обязан передать объект участия в долевом строительстве, а именно квартиру стоимостью 

<

данные изъяты> руб. Срок передачи объекта долевого строительства участнику установлен не позднее ДД.ММ.ГГГГ, однако объект до настоящего времени участнику не передан.

Финансовые обязательства, предусмотренные договором, участником долевого строительства были исполнены в полном объеме.

В судебное заседание истец не явился, обеспечил явку представителя, который поддержал позицию доверителя с учетом уточнений в сторону уменьшения суммы неустойки в связи с мораторием, просил взыскать судрасходы.Не согласился с возражениями ответчика, сообщив о том, что соглашение об изменении срока передачи квартиры застройщиком не заключено. Контррасчет неверен, не согласен с применением к сумме неустойки и потребительского штрафа статьи 333 ГК РФ по доводам возражений, не основанных на нормах материального права и судебной практике.

Ответчик судом извещен надлежащим образом, явку представителя не обеспечил, письменные возражения представлены к судебному заседанию, принятых в материалы дела, в которых содержится ходатайство о применении ст.333 ГК РФ к штрафам и неустойкам, уменьшение компенсации морального вреда и судрасходов. Информация о движении дела заблаговременно размещена на официальном сайте Домодедовского городского суда по адресу: http://domodedovo.mo.sudrf.ru (раздел "Судебное делопроизводство"). Судом предприняты все возможные меры по надлежащему извещению ответчика. Дело рассмотрено по ч.3 ст.167 ГПК РФ. 

Суд, выслушав явившегося представителя истца, изучив письменные возражения ответчика, исследовав письменные доказательства и оценив их допустимость, достоверность в совокупности по правилам ст.67 ГПК РФ, проанализировав действующее законодательство, регулирующее спорные правоотношения приходит к следующему выводу.

В соответствии с п.3 ст.8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» после получения застройщиком в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости застройщик обязан передать объект долевого строительства не позднее предусмотренного договором срока. При этом не допускается досрочное исполнение застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства, если иное не установлено договором.

Согласно ч.2 ст.6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере. 

В силу части 9 статьи 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" к отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной данным Федеральным законом.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, ДД.ММ.ГГГГ между сторонами спора заключен договор участия в долевом строительстве №

<

данные изъяты>, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, зарегистрированный органом регистрации прав, что подтверждено выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, что предусмотрено статьей 4 Федерального закона № 214-ФЗ (в ред. закона от ДД.ММ.ГГГГ). 

Согласно условиям договора объектом долевого строительства является квартира площадью 35,31 кв.м., стоимость которой определена в размере 

<

данные изъяты> рублей, которую участник долевого строительства (истец) в оговоренный срок обязан уплатить Застройщику (ответчику), принявшему обязательства построить жилой многоквартирный дом, получить разрешение на ввод здания в эксплуатацию и передать объект долевого участия по передаточному акту в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. 

Истец, заключив договор для личных, семейных и жилищных целей, исполнил обязательство по оплате объекта долевого участия в полном объеме. Однако, застройщиком были нарушены условия договора, объект долевого строительства истцу не передан в установленный срок. 

Заявленный истцами период просрочки установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма неустойки по уточненному расчету истцов составляет 

<

данные изъяты>

Оценивая исковые требования о взыскании неустойки за нарушение срока передачи участнику долевого строительства объекта недвижимости, суд учитывает стоимость объекта долевого строительства, предусмотренную договором, и уплаченную истцом. Период просрочки, указанный в иске, суд не находит верным.

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что Застройщик принял на себя договорные обязательства передать Участнику долевого строительства объект недвижимости не позднее ДД.ММ.ГГГГ (суббота), согласно ст.107 ГПК РФ, а именно течение срока исчисляемого днями, начинается на следующий день после даты, которой определено ее начало. В сроки, исчисляемые днями, не включаются рабочие дни, учитывая, что 30 сентября (суббота) и 01 октября (воскресенье) 2023 года являются выходными днями и срок исполнения обязательства наступает ДД.ММ.ГГГГ, а период начисления неустойки наступает с ДД.ММ.ГГГГ.

Суд изучил расчеты неустоек, представленные истцом и ответчиком и находит их подлежащими удовлетворению частично. 

Судом установлено, что участником долевого строительства в адрес застройщика направлена претензия, в которой предложено уплатить неустойку за нарушение срока передачи квартиры, которая получена им, но оставлена без ответа и добровольного исполнения. 

Уведомление застройщиком участника долевого строительства о переносе срока строительства до завершения строительства здания не влечет изменения срока, предусмотренного сделкой, поскольку оно не является соглашением подлежащим государственной регистрации. Исполнение федеральных законов подтверждено постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об установлении особенностей передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства» которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что срок передачи объекта может быть изменен по соглашению сторон не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию здания. Сообщение о завершении строительства в соответствии с договором участия в долевом строительстве и о готовности объекта долевого строительства к передаче застройщику, предложение о внесении изменений в договор о сроке передачи застройщиком объекта долевого строительства и его принятия участником долевого строительства, составленные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью уполномоченного лица могут быть направлены участнику долевого строительства по адресу электронной почты, указанному в договоре, либо иным способом указанным в договоре. 

Уведомление ответчика в адрес истца о переносе срока строительства здания, введение его в эксплуатацию и передачи объекта долевого участия до получения застройщиком разрешения на ввод его в эксплуатацию не может быть изменен по соглашению сторон договора, поэтому доводы ООО «СЗ «Прибрежный парк» в возражениях о переносе сроков в одностороннем порядке не принимаются судом. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для применения к ответчику меры гражданско-правовой ответственности и частично удовлетворяет исковые требования по следующим основаниям.

На основании п.1 ст. 333 Гражданского кодекса РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Из разъяснений данных в п.71 Пленума Верховного суда РФ «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств» следует, что при взыскании неустойки с иных лиц правила статьи 333 ГК РФ могут применяться не только по заявлению должника, но и по инициативе суда, если усматривается очевидная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства (пункт 1 статьи 333 ГК РФ). В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, свидетельствующие о такой несоразмерности (статья 56 ГПК РФ, статья 65 АПК РФ). При наличии в деле доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, суд уменьшает неустойку по правилам статьи 333 ГК РФ.

На основании пункта 73 названного постановления Пленума, бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. 

Из пункта 75 упомянутого постановления Пленума следует, что при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ). 

Правила о снижении размера неустойки на основании ст. 333 Гражданского кодекса РФ согласно п.78 Постановления Пленума применяются также в случаях, когда неустойка определена законом. 

В силу пункта 1 постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве» установлено, что в период начисления неустойки (пени) по договорам участия в долевом строительстве, предусмотренной частью 6 статьи 5 и частью 2 статьи 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", не включается период, исчисляемый со дня вступления в силу данного постановления до ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Принимая во внимание ходатайство ответчика об уменьшении неустойки, штрафа по тем основаниям, что прямой вины ответчика в нарушении сдачи дома в эксплуатацию нет. Отсутствия доказательств того, что просрочка по передаче участнику долевого строительства объекта привела к неблагоприятным последствиям для истца и возникших у него значительных убытков от такового нарушения, период просрочки, суд находит несоразмерной последствиям нарушения обязательства, размер неустойки, и на основании ст.333 Гражданского кодекса РФ считает необходимым уменьшить и взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и взыскать в пользу истца. Такой размер неустойки соответствует последствиям нарушения ответчиком своего обязательства перед истцом. Во взыскании неустойки в большем размере надлежит отказать. 

Оценивая исковые требования о взыскании в пользу истца компенсации морального вреда суд исходит из того, что специальный Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 214-ФЗ не регулирует вопросы компенсации морального вреда, в связи с чем разрешение требований истца в этой части определяется нормами Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей».

Согласно нормам п.1 ст.15 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Учитывая факт нарушения прав истца со стороны ответчика, не исполнившего в срок в добровольном порядке свои обязательства по Договору долевого участия в строительстве жилого многоквартирного дома по передаче истцу объекта долевого строительства в установленный договором срок, то у суда имеются основания для взыскания с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда в размере 4 000 рублей. Во взыскании компенсации морального вреда в большем размере надлежит отказать. 

Размер компенсации судом определен с учетом конкретных обстоятельств дела. Данный размер суд находит соразмерным степени нарушения прав истца и соответствующий требованиям разумности и справедливости. 

Оценивая исковые требования истца о взыскании потребительского штрафа, суд исходит из следующего. 

Пункт 6 статьи 13 ФЗ «О защите прав потребителей» предусматривает, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя услуг за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Пунктом 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" установлено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Наличие оснований для снижения и определения критериев соразмерности определяется судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств.

Из материалов дела следует, что истец направил ответчику претензию, которую ответчик получил, но оставил без ответа и не исполнил требование об уплате в добровольном порядке неустойки за нарушение срока передачи истцу объекта долевого строительства, возникшего на основании части 2 статьи 6 Федерального закона № 214-ФЗ. При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства ответчика о применении к заявленному штрафу положение ч.1 ст.333 ГК РФ, поэтому определяет штраф в размере 

<

данные изъяты>

Разрешая требования истца в части возмещения судебных расходов и издержек, суд приходит к следующему.

Статья 103 ГПК РФ гласит, что издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 64 Бюджетного кодекса РФ гласит, что муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального образования вводятся местные налоги, устанавливаются налоговые ставки по ним и предоставляются налоговые льготы по местным налогам в пределах прав, предоставленных представительному органу муниципального образования законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Таким образом, с ответчика в доход бюджета городского округа 

<

адрес>, с учетом уплаченной истцами суммы госпошлины в размере 

<

данные изъяты>, подлежит взысканию государственная пошлина в размере 

<

данные изъяты>. 

По основанию ст. 100 ГПК РФ с ответчика с учетом сложности дела, количества судебных заседаний подлежат взысканию расходы на оказание юридической помощи в сумме 

<

данные изъяты> с учетом разумности и справедливости. Во взыскании судебных расходов, понесенных на оплату юридических услуг в большем размере, надлежит отказать.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве» установлен мораторий до ДД.ММ.ГГГГ, в связи чем судом предоставляется отсрочка исполнения решения. 

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО3, ФИО2 удовлетворить частично.

Взыскать в пользу ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: 

<

адрес>, паспорт № №), ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: 

<

адрес>, паспорт № №) с Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Прибрежный Парк» ( ОГРН: №, ИНН: №) неустойку за нарушение срока передачи объекта долевого участия по договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, компенсацию морального вреда в размере 

<

данные изъяты> 00 копеек, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 

<

данные изъяты>, судебных расходов состоящих из оплаты юридических услуг по соглашению об оказании юридической помощи от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 

<

данные изъяты> 00 копеек, а всего 

<

данные изъяты> копеек в равных долях, то есть по 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> каждому. 

Во взыскании неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов в большей сумме - отказать. 

Взыскать в пользу бюджета городского округа Домодедово с Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Прибрежный Парк» (ОГРН: №, ИНН: №) госпошлину в размере 

<

данные изъяты>

Отсрочить исполнение решения до ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий судья С.С.Жукова