РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

26 марта 2021 года г. Ржев Тверской области

Ржевский городской суд Тверской области в составе 

председательствующего судьи Мирошниченко Ю.С.,

при секретаре судебного заседания Масинец О.Б.,

с участием представителя истца ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице Ржевского филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, 

установил:

ФИО2 обратилась в суд с исковым заявлением к ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице Ржевского филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и с учетом уточнений исковых требований просит обязать исполнить принятые на себя обязательства по договору № от 17 сентября 2018 года и осуществить присоединение электроснабжения земельного участка № по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером №, в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

В обоснование заявленных требований истец указала, что 17 сентября 2018 года между ней и ответчиком заключён договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям указанного выше садового дома, в соответствии с которым сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя вводного устройства, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом ряда указанных характеристик, а заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 5 договора предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора.

Истец в полном объеме выполнил свои обязанности, уведомив ответчика в письменном виде, оплата произведена заявителем в полном объеме, что подтверждается платежными документами.

Неоднократные обращения заявителя, а также направленная претензия оставлены ответчиком без удовлетворения.

Истец ФИО2, извещённая судом надлежащим образом о дне, месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явилась, направила представителя по доверенности ФИО1

В судебном заседании представитель истца ФИО1 поддержал заявленные истцом требования в полном объёме по доводам и основаниям, изложенным в исковом заявлении, просил суд их удовлетворить. 

В судебное заседание представитель ответчика ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице Ржевского филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» не явился, о дне, месте и времени рассмотрения дела извещён судом надлежащим образом, ходатайство об отложении судебного разбирательства не заявлено, заявлений и возражений по существу заявленных исковых требований не представлено.

Заслушав представителя истца, исследовав представленные материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - Правила).

В соответствии с п. 3 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно п.п. "в" п. 7 Правил, процедура технологического присоединения включает, в том числе, выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

В соответствии с п.п. "а" п. 16 Правил договор должен содержать следующие существенные условия: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Как следует из материалов дела, 17 сентября 2018 между ПАО «МРСК Центра» (филиал «МРСК Центра» - «Тверьэнерго») и ФИО2 заключён договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям III категории надёжности.

В соответствии с условиями данного договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя вводного устройства жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению электропринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых электропринимающих устройств 10 кВт; ввод однофазный, категория надёжности III, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,23 кВ; заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (п. 1 договора).

В соответствии с условиями договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ВРУ земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый № (п. 2 договора).

Точки присоединения указаны в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединенные объекты заявителя (п. 3 договора).

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет два года со дня заключения настоящего договора (п. 4 договора). 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения настоящего договора (п. 5 договора).

В соответствии с абз. 1 п. 6 договора технического присоединения, сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Согласно п. 7 договора сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

Размер платы за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 83 рубля 90 копеек. 

Как следует из материалов дела, обязательства истца по договору технологического присоединения исполнены, что подтверждается копией чека-ордера от 17.09.2018, а также претензией об уведомлении выполнения технических условий по договору № от 17.09.2018. 

В соответствии с п.п. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 технических условий от 17.09.2018 № 20548945 сетевая организация осуществляет произвести технологическое присоединение энергопринимающего устройства заявителя после выполнения мероприятий по договору № от 27.02.2018; строительство участка ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 КТПУ 10/0,4 кВ 63 кВА № 434 «Першино-Голышкино» с достройкой участка ВЛ 0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 КТПУ 10/0,4 кВ 63 кВА № 434 «Першино-Голышкино» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,057 км проводом марки СИП-2 сечением 35 мм2 и установкой железобетонных опор. Протяженность и сечение провода определить проектом. Проверку выполнения заявителем технических условий и с проведением осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя с его участием. Маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учета электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния. Физическое соединение (контакт) ВЛ-0,4 кВ с ответвлением к ВПУ заявителя в точке присоединения после выполнения технических условий.

Возложенные по договору № от 17.09.2018 обязанности по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям со стороны ответчика не исполнены до настоящего времени. 

Согласно пунктам 1, 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно статье 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В силу статьи 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Согласно требованиям статьи 27 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Срок исполнения обязательств сетевой организацией определён заключённым между сторонами договором, а также Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей. 

При этом, исполнение ответчиком указанных обязательств по договору в установленный срок не ставится в зависимость от каких-либо дополнительных условий. 

Согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

Доказательства наличия обстоятельств, приведенных в названной выше норме закона, отсутствуют. 

Кроме того, техническими условиями к договору, а именно пунктами 13.1-13.5 на заявителя возложены обязательства по исполнению ряда мероприятий до фактического подключения к электрическим сетям. В частности в соответствии с п.13.5 Технических условий заявитель обязан осуществить готовность к физическому соединению ответвления на опоре (изолированные провода СИП сечением не менее 16 мм2, детали для крепления и присоединения проводов на опоре).

Согласно пункту 6 договора, сетевая организация обязуется в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем о выполнении им вышеуказанных технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, произвести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя. Не позднее 12 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абз. 3 настоящего пункта с соблюдением срока, установленного п. 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический приём (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

Таким образом, мероприятия, направленные на осуществление технологического присоединения, предусмотренные п. 12 Технических условий, ответчиком до настоящего времени не выполнены.

На момент разрешения спора ответчик своих обязательств по договору также не исполнил.

Таким образом, каких-либо нарушений со стороны истца условий заключённого договора не усматривается. 

В соответствии с изложенным, заявленное истцом требование об обязании ответчика осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца в соответствии с условиями договора, в том числе, после выполнения истцом технических условий соответствует требованиям действующего законодательства. Срок, в течение которого данное требование должно быть выполнено, суд считает необходимым установить в один месяц с момента вступления решения суда в законную силу. 

В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию в доход местного бюджета госпошлина пропорционально удовлетворенным требованиям в размере 300 руб. 

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования ФИО2 к публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице Ржевского филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям - удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице Ржевского филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу произвести технологическое присоединение ВРУ земельного участка, почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, кадастровый №, в соответствии с условиями договора № от 17 сентября 2018 года.

Взыскать с публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице Ржевского филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования «Город Ржев Тверской области» в размере 300 (триста) рублей. 

Решение может быть обжаловано в Тверской областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Ржевский городской суд Тверской области в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Председательствующий судья Ю.С. Мирошниченко

Решение в окончательной форме принято 26 марта 2021 года.

1версия для печати