УИД: 52RS0№...-55

Дело №... 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации 

(адрес) 21 ноября 2023 года

Советский районный суд (адрес) в составе председательствующего судьи Зайцевой О.А.

с участием истца ФИО1, представителя ответчика ФИО3,

при секретаре ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Нижний Новгород» о возмещении ущерба и компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд с иском к ответчику ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» о компенсации морального вреда, в обоснование указав следующее.

Истец является собственником дома по адресу: (адрес), СНТ «Волга», уч. 63. Данный дом был подключен к сети газоснабжения в марте 2022 года, несмотря на то, что заявка на подключении данного дома к газораспределительной сети была подана в 2006 году.

В связи с тем, что ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» неправомерно затягивал подключение данного дома к газу, произошло его разрушение от сырости и других связанных с этих причин.

Указанными незаконными действиями ответчика при вышеуказанных обстоятельствах истцу были причинены и причиняются в настоящее время нравственные и душевные страдания, выразившиеся в невозможности проживать в комфортных и безопасных условиях.

На основании изложенного, истец просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 1500000 рублей.

В последующем истцом были уточнены исковые требования, истец просил взыскать с ответчика ущерб в размере 1200000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 300000 рублей.

Истец ФИО1, участвовавший в судебном заседании до удаления суда в совещательную комнату для рассмотрения заявления об отводе председательствующего судьи, исковые требования поддержал в полном объеме, просил удовлетворить.

Представитель ответчика ФИО3 в судебном заседании возражал против заявленных исковых требований, просил отказать в их удовлетворении, поддержал доводы, изложенные в возражении на исковое заявление. 

С учетом изложенного, суд полагает возможным рассмотреть дело при данной явке. 

Суд, выслушав пояснения истца, возражения представителя ответчика, проверив материалы дела, установив значимые по делу обстоятельства, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в совокупности в соответствии со ст.67 ГПК РФ, приходит к следующему.

Согласно ст. 2 Федерального закона от (дата) N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" система газоснабжения - имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа.

Постановлением Правительства РФ от (дата) N 83 утверждены Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, которые регулируют отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, органами местного самоуправления и правообладателями земельных участков, возникающие в процессе определения и предоставления технических условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия), включая порядок направления запроса, порядок определения и предоставления технических условий, а также критерии определения возможности подключения.

В соответствии с п. 2 Правил N 83 под подключением объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения понимается процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также к оборудованию по производству ресурсов.

Получение технических условий является обязательным для газификации жилого дома в соответствии с Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных тем же Постановлением Правительства Российской Федерации.

Для получения технических условий, правообладатель земельного участка обращается в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов капитального строительства (п. 8 Правил определения и предоставления технических условий).

Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотрено, что основанием для отказа в выдаче технических условий правообладателю земельного участка, который намерен осуществить подключение построенного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может являться лишь отсутствие возможности подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения при отсутствии резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса; при отсутствии резерва мощности по производству соответствующего ресурса, за исключением случаев, когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программах организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (п. п. 12, 13 Правил определения и предоставления технических условий).

Судом установлено и следует из материалов дела, ФИО1 является собственником земельного участка, расположенного по адресу: (адрес), Садоводческое товарищество «Волга», участок 63, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от (дата) серия 52-АА №....

На земельном участке №... истцом был построен садовый домик.

В 2012 году истцом было подано заявление в ОАО «Нижегородоблгаз» (в настоящее время ООО ««Газпром газораспределение Нижний Новгород») о рассмотрении вопроса о подключении дома на участке №... в СНТ «Волга» по (адрес) к сетям газоснабжения. Как следует из представленных копий писем, направленных в адрес ответчика, в СНТ «Волга» к газификации готов был только дом, принадлежащий истцу, в стадии строительства находится дом на участке №..., а остальные садовые дома, расположенные в СНТ «Волга», являлись не пригодными для газификации.

Как следует из пояснений представителя ответчика, на территории СНТ «Волга» на момент подачи заявления в 2012 году отсутствовали газопроводы, к которым возможно было бы подключить дом истца, без дополнительных затрат на строительство газопровода, о чем истцу были направлены разъяснения.

Постановлением Правительства РФ от (дата) N 1314 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, которые определяют порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (приведены положения в редакции от (дата)).

В связи с утверждением Правил от (дата) N 1314, Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от (дата) N 83 утратили силу.

Подключением (технологическим присоединением) объекта капитального строительства к сети газораспределения признается совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения; заявителем – юридическое или физическое лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить или осуществляющее на нем строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) построенного на своем земельном участке объекта капитального строительства к сети газораспределения; а исполнителем - газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства (п. 2 Правил).

В соответствии с пунктом 3 Правил подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке: а) направление исполнителю запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения; б) выдача технических условий; в) направление исполнителю заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее соответственно - договор о подключении, заявка о подключении (технологическом присоединении); г) заключение договора о подключении; д) выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренных техническими условиями и договором о подключении; е) получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства заявителя (в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации); ж) составление акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

Порядок заключения договора подключения определен разделом VI Правил. Договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с соблюдением особенностей, определенных Правилами.

В соответствии с договором о подключении заявитель выполняет условия договора о подготовке сети газопотребления и газоиспользующего оборудования, а исполнитель осуществляет действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения и подготовку сети газораспределения.

Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем, кроме случая, когда максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования составляет 500 куб. м и более (п. 112 Правил).

В соответствии с п. 85 Правил, срок осуществления мероприятий по подключению объекта капитального строительства к сети газораспределения

Срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать:

а) 1 год - для заявителей, в случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в точке подключения), в случаях, когда расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии от границы земельного участка до точки подключения, составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется), кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 2 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

б) 1,5 года - для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе - менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до точки подключения, составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

в) 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до точки подключения, составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.

Указанными Правилами определены обязанности исполнителя (газораспределительной организации) и заявителя: заявитель должен построить сеть газопотребления в границах своего участка, а исполнитель (газораспределительная организация) должен построить сеть газораспределения до границ земельного участка заявителя и осуществить фактическое присоединение и пуск газа.

Согласно Правилам "фактическое присоединение" - это комплекс технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и объектов заявителя с осуществлением пуска газа на объекты заявителя.

Постановлением Правительства РФ от (дата) №... в Правила введен раздел VIII «Об особенностях подключения объектов капитального строительства, принадлежащих разным заявителям, а также объектов капитального строительства, расположенных в границах территории садоводства или огородничества и территории, подлежащей комплексному освоению.

В случае необходимости подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства, расположенных в границах территории садоводства и огородничества, запрос о предоставлении технических условий и (или) заявка о подключении (технологическом присоединении) таких объектов подаются исполнителю собственником такого объекта или садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в случае необходимости подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения нескольких объектов капитального строительства, принадлежащих различным лицам и расположенных в пределах территории садоводства или огородничества (п. 115 Правил (в редакции от (дата) (на момент рассмотрения заявки истца).

Согласно п. 117 Правил по договору о подключении в случаях, указанных в пункте 115 настоящих Правил, исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению), включающие в себя мероприятия по строительству сети газораспределения от существующей сети газораспределения до границы земельного участка общего назначения, расположенного в границах территории садоводства или огородничества.

(дата) истцом подано заявление ответчику о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

В ответ на поступившее заявление (дата) истцу было направлено пописанный со стороны ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» договор на подключение (технологическое присоединение) по индивидуальному проекту объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом, по адресу: (адрес), СНТ «Волга», уч. 63» с просьбой подписать и направить экземпляр договора в адресу ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

В соответствии с п. 77 Правил в случае несогласия с представленным исполнителем проектом договора о подключении и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель в течение 30 дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении направляет исполнителю мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении, к которому прилагает при необходимости протокол разногласий и (или) мотивированное требование об изменении дополненных технических условий. Указанный отказ направляется заявителем исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить получение отказа.

В случае ненаправления заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении либо мотивированного отказа от подписания договора о подключении (но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении (технологическом присоединении) аннулируется (п. 78 Правил).

Договор на подключение (технологическое присоединение) и технические условия от (дата) истцом подписаны не были. 

Истец в судебном заседании пояснил, что договор на подключение (технологическое присоединение) и технические условия от (дата) он не подписывал, потому что был не согласен с расчетом предварительного размера стоимости подключения (технологического присоединения).

(дата) в адрес ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» истцом подана заявка о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

В ответ на поданную заявку (дата) истцу было направлено письмо №..., в котором указано, что для подключения объектов капитального строительства, расположенных в границах территории СНТ «Волга» к сети газораспределения необходимо построить сети газораспределения, в связи с чем указали истцу, что для рассмотрения вопроса о подключении к сетям газораспределения принадлежащего истцу жилого дома необходимо представить максимальный часовой расход газа с учетом объема потребления газа газоиспользующим оборудованием объектов капитального строительства, в том числе планируемых, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения, на каждом земельном участке, расположенном в границах территории садоводства или огородничества (но не менее 2 куб.м/час) или подать заявку совместно с СНТ «Волга», в соответствии с Правилами подключения.

(дата) истцом повторно подана заявка о заключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

(дата) были подготовлены технические условия № Н-7-3294/2020/Л и договор № Н-7-3294/Л о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения. Данные документы были выданы истцу, но им не подписаны, что не оспаривалось истцом в судебном заседании. 

В соответствии с ппHYPERLINK "https(марка обезличена)2023". а п. 85 Правил, срок осуществления мероприятий по подключению объекта капитального строительства к сети газораспределения составляет 8 месяцев (в редакции от (дата)). 

В случае несогласия с представленным исполнителем проектом договора о подключении и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении направляет исполнителю мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении, к которому прилагает при необходимости протокол разногласий и (или) мотивированное требование об изменении дополненных технических условий. Указанный отказ направляется заявителем исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить получение отказа (п. 77 Правил).

В случае ненаправления заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении либо мотивированного отказа от подписания договора о подключении (но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении (технологическом присоединении) аннулируется (п. 78 Правил).

(дата) истцом повторно подана заявка о заключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

(дата) истцу были выданы технические условия № Н-7-3753/2021/Л и договор № Н-7-3753/Л о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

(дата) между истцом и ответчиком был заключен договор № Н-7-3753/Л о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, согласно условиям которого исполнитель (ПАО «Газпром газораспределения Нижний Новгород») принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства садовый дом к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования. Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительтва к подключению (технологического присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка: (адрес), СНТ «Волга», уч.63, в соответствии с условиями договора, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

В соответствии с п. 3 Договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 8 месяцев. 

Дополнительным соглашением от (дата) к договору № Н-7-3753/Л о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа продлен до июля 2022 года.

В марте 2022 года жилой дом истца был подключен к сети газораспределения. Истец данный факт подтвердил в судебном заседании.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда (п. 2 ст. 1064 ГК РФ).

Заявляя исковые требования о возмещении материального ущерба, истец указывает, что в результате длительного подключения дома к системе газоснабжения, дом разрушился, обвалился потолок, осыпалась штукатурка, в связи с чем в доме жить невозможно.

В соответствии со статьей 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

В силу части 2 статьи 56 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств (часть 1 статьи 57 ГПК РФ).

По смыслу приведенных положений процессуального закона именно на суд возлагается обязанность по определению предмета доказывания как совокупности обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. Предмет доказывания определяется судом на основании требований и возражений сторон, а также норм материального права, регулирующих спорные отношения.

Следует учитывать, что доказательства подлежат представлению сторонами с учетом распределения бремени доказывания, которое зависит от характера спорного правоотношения и заявленного предмета иска.

Установленная ст. 1064 ГК РФ презумпция вины причинителя вреда предполагает, что на потерпевшем лежит обязанность доказать факт причинения вреда, его размер, а также то обстоятельство, что причинителем вреда является именно ответчик (причинную связь между его действиями и нанесенным ущербом). В свою очередь, причинитель вреда несет только обязанность по доказыванию отсутствия своей вины в таком причинении, если законом не предусмотрена ответственность без вины.

При этом ответственность, предусмотренная выше названной нормой закона, наступает при совокупности условий, включающей наличие вреда, противоправность поведения причинителя вреда и его вину, подтвержденность размера причиненного вреда, а также причинно-следственную связь между противоправными действиями и наступившими неблагоприятными последствиями.

Судом неоднократно предлагалось истцу представить доказательства причинения ему ущерба в заявленном размере. Однако истцом доказательств, подтверждающий факт причинения ущерба, а также его размер, суду не представлено.

Разрешая исковые требования о возмещении ущерба, суд исходит из того, что истцом не представлено доказательств, подтверждающих факт причинения ответчиком ущерба истцу на заявленную сумму в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия) ответчика, и приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований о возмещении ущерба.

В силу пункта 1 статьи 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными главой 59 и статьей 151 этого же кодекса.

Статьей 151 упомянутого кодекса предусмотрено, что, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

В соответствии со статьей 1101 данного кодекса размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости (пункт 2).

Согласно разъяснениям, данным в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от (дата) N 33 "О практике применения судами норм о компенсации морального вреда", под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага или нарушающими его личные неимущественные права (например, жизнь, здоровье, достоинство личности, свободу, личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, неприкосновенность жилища, свободу передвижения, свободу выбора места пребывания и жительства, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, право на уважение родственных и семейных связей, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на использование своего имени, право на защиту от оскорбления, высказанного при формулировании оценочного мнения, право авторства, право автора на имя, другие личные неимущественные права автора результата интеллектуальной деятельности и др.) либо нарушающими имущественные права гражданина.

Разрешая заявленные требования, суд, установив, что договор о присоединении садового дома, расположенного на земельном участке №... в СНТ «Волга», к сетям газораспределения был неоднократно направлялся истцу, им не подписывался в связи с несогласием с установленной ценой за подключение, ответчик от подписания договора не уклонялся, доказательств того, что им чинились препятствия в получении истцом технических условий и подключении к сетям газораспределения также суду не представлено, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований о компенсации морального вреда в связи с длительным подключением дома к сети газоснабжения.

Руководствуясь 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ

В удовлетворении иска ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Нижний Новгород» о возмещении ущерба и компенсации морального вреда – отказать.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционных жалоб через Советский районный суд г.Н.Новгорода. 

Судья О.А. Зайцева

Мотивированное решение изготовлено (дата).