Дело № 2-3226/2023

УИД 91RS0002-01-2023-004913-66

Р Е Ш Е Н И Е

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17.07.2023 г. г. Симферополь

Киевский районный суд города Симферополя в составе:

председательствующего судьи – Сериковой В.А.,

при секретаре – Докаеве И.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ГУП РК «Крымэнерго» о понуждении совершить определенные действия, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к ГУП РК «Крымэнерго», в котором просит возложить на ГУП РК «Крымэнерго» обязанность в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу выполнить надлежащим образом условия договора об осуществлении технологического присоединения №ЛК от ДД.ММ.ГГГГ, осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям и обеспечить электроснабжение земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; понудить ГУП РК «Крымэнерго» в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу заключить с ФИО1 договор об оказании услуг по передаче электрической энергии; взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» компенсацию морального вреда в размере 100 000,00 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 900,00 рублей.

Исковые требования мотивированы тем, что между сторонами заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно условиям которого ответчик обязался выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца к своей электронной сети. Истцом выполнены взятые на себя обязательства по договору, плата за технологическое присоединение внесена, при этом до настоящего времени технологическое присоединение ГУП РК «Крымэнерго» не выполнено.

Стороны в судебное заседание не явились, ответчик представил возражения на исковое заявление и заявление о рассмотрении дела в его отсутствии.

Представитель истца ФИО2 в судебном заседании исковые требования поддержал.

Исследовав все представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Судом установлены следующие обстоятельства.

Между ФИО1 и ГУП РК «Крымэнерго» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №лк от ДД.ММ.ГГГГ и получены технические условия для присоединения к электрическим сетям №лк от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО1 на праве собственности с видом разрешенного использования - индивидуальное жилищное строительство.

Согласно пункту 10 раздела III договора №лк размер и плата за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ № и указывается в счете.

В соответствии с пунктом 11 раздела III договора №лк внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем путем оплаты счета в течение 5 рабочих дней со дня его выставления сетевой организацией.

Так, плата за технологическое присоединение за постоянную форму подключения в размере 16 555,54 рублей истцом оплачена в полном объеме и в сроки, предусмотренные Договором №лк. 

Исходя из положений договора №лк и ТУ №лк ГУП РК «Крымэнерго» принимает на себя обязательства по строительству ЛЭП-0,4 кВ от опоры № В0-0,4 кВ JI-1 ТП-1435. 

Срок осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств составляет 6 месяцев.

Однако, учитывая то, что срок осуществления технологического присоединения составляет 6 месяцев, ФИО1 оформлена заявка в ГУП РК «Крымэнерго» на новые технологические условия для временного присоединения к электрическим сетям №лк от ДД.ММ.ГГГГ, а также заключен договор об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям №лк от ДД.ММ.ГГГГ.

Плата за временное технологическое присоединение в размере 16 555,54 рублей истцом оплачена в полном объеме и в сроки, предусмотренные договора №лк.

Таким образом, ФИО1 оплачены временные и постоянные технические условия на общую сумму - 33 111,08 рублей.

Истец обратился к ответчику по вопросу технологического присоединения к электрическим сетям объекта, после чего ответчик в ответ направил письмо от ДД.ММ.ГГГГ ГУП РК «Крымэнерго» направлено в адрес ФИО1 письмо за исх № (копия прилагается) с предложением заключить дополнительное соглашение, о корректировке Договора №ЛК от ДД.ММ.ГГГГ, а именно о том, что ответчик не осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ и что подключение уже осуществлено ответчиком, при чем к ранее построенной истцом ЛЭП-0,4 кВ, за свои собственные средства.

В связи с отказом ФИО1 от подписания вышеуказанного дополнительного соглашения, ГУП РК «Крымэнерго» письмом от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № Д-258/665 (копия прилагается) уведомило, что осуществить технологическое присоединение по договору №ЛК от ДД.ММ.ГГГГ в ранее планируемые сроки не представляется возможным в связи с тем, что предприятие выполняет большой объем ремонтно-восстановительных работ, связанных с изношенностью сетей и устранением последствий неблагоприятных погодных условий. При этом, сообщив, что строительно-монтажные работы планируется выполнить в срок до ДД.ММ.ГГГГ 

Ранее, Министерство топлива и энергетики Республики Крым письмом от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № Д-11/430/2 уведомило о том, что по информации ГУП РК «Крымэнерго» строительно-монтажные работы по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям по Договору №ЛК от ДД.ММ.ГГГГ планируется осуществить в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, поскольку ГУП РК «Крымэнерго» не осуществлено технологическое присоединение принадлежащего ФИО1 объекта в соответствии с Договором №ЛК от ДД.ММ.ГГГГ, нарушены права истца, как потребителя, при этом усматривается необходимость возложения на ГУП РК «Крымэнерго» обязанности по осуществлению технологического присоединения.

Пунктом 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также – технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861 утверждены, в том числе, Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее Правила № 861).

Пунктом 3 Правил № 861 установлено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств. 

Согласно п. 6 Правил №861 

технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

В силу подп. «в» п. 7 Правил № 861 стороны по договору на осуществление технологического присоединения обязаны выполнить установленные в договоре мероприятия.

В соответствии с подп. «б» п. 16 Правил № 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подп. «б» п. 16 Правил для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Закона об электроэнергетике.

Кроме того, согласно ст. 15 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Из приведенных в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснений следует, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Принимая во внимание характер и объем причиненных истцу нравственных страданий, фактических обстоятельств причинения морального вреда, учитывая требования разумности и справедливости, считаем разумным взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 1 000,00 рублей. 

Вместе с тем, установив отсутствие правовых оснований для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности путем возложения на него обязанности заключить с ФИО1 договор об оказании услуг по передаче электрической энергии на данном этапе правоотношений между сторонами, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в данной части.

Также в соответствии со ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ с ответчика в доход муниципального образования городского округа Симферополь Республики Крым подлежит взысканию государственная пошлина в размере 600 рублей. 

В соответствии со ст. 17 Закона о защите прав потребителей потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по искам, связанным с нарушением их прав, в связи с чем оплаченная при подаче иска истцом государственная пошлина подлежит возврату.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд,-

решил:

Исковое заявление ФИО1 удовлетворить частично. 

Возложить на ГУП РК «Крымэнерго» (ОГРН 

<

***>) обязанность в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу произвести технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, кадастровый № в рамках заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ЛК от ДД.ММ.ГГГГ 

Взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» (ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1 (паспорт гражданина Российской Федерации №) компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, штраф за нарушение прав потребителя в сумме 500 рублей. 

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Вернуть представителю ФИО1 – ФИО2 (паспорт гражданина Российской Федерации №) государственную пошлину, уплаченную по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ го. в размере 900 руб. 

Взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» (ОГРН 

<

***>) в доход местного бюджета 600 рублей в счет государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Крым через Киевский районный суд города Симферополя в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья В.А. Серикова

Решение изготовлено в окончательной форме 24.07.2023 г.