Дело №2-5451/2018

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 июля 2018 года Советский районный суд г. Красноярска в составе: 

председательствующего судьи Яниевой А.А., 

при секретаре Башкатовой В.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Корсун ФИО6 к Публичному акционерному обществу «Межрегиональная сетевая распределительная компания Сибири» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением, уточненным в ходе судебного разбирательства, к ПАО «МРСК Сибири» о обязании последнего осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта – гаража (бокса) №, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> взыскании неустойки в размере 10 065 рублей, компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей, расходов по оплате юридических услуг в размере 7 000 рублей, почтовые расходы в размере 199,90 рублей, штрафа, мотивируя заявленные требования тем, что истец является собственником гаража (бокса) №, расположенного по адресу: 

<

адрес> между истцом и ПАО «МРСК «Сибири» (Сетевая организация) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2400.3867.15 от 13.05.2015 года, согласно условиям которого Сетевая организация принимает на себя обязанность по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств гаража Заявителя, а Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение. Согласно п.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. В силу п.6 договора технологического присоединения Сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. В соответствии с п.10 договора технологического присоединения размер платы составляет 550 рублей, которая оплачена истцом. Однако в установленный договором срок работы ответчик не выполнил. 

В судебном заседании истец ФИО1, представитель истца по устному ходатайству ФИО2 уточненные исковые требования поддержали по основаниям изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика ПАО «МРСК Сибири», представитель третьего лица ПАО «Красноярскэнергосбыт» в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте судебного слушания извещены своевременно и надлежащим образом, причину неявки не сообщил, свои возражения против иска и доказательства в их обоснование в суд не представили. С согласия истца дело рассмотрено в порядке заочного производства в соответствии со ст.233 ГПК РФ.

Выслушав истца, представителя истца, исследовав материалы дела, суд полагает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно положениям п.1 ст.26 Федерального закона от 26.03.2003 года №35-Ф3 «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Согласно ч.1 ст.307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе (ч.2 ст.307 ГК).

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ч.1 ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Как установлено судом, 13.05.2015 года между ПАО «МРСК Сибири» (Сетевая организация) и ФИО1 (Заявитель) был заключен договор №20.2400.3867.15 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя электроустановок гаража (бокса) №, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства включая их проектирование, строительство, реконструкцию к присоединению энергопринимающих устройств. 

Согласно п.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. 

В соответствии с п.6 договора ПАО «МРСК Сибири» обязалось: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе, по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в предыдущем абзаце, с соблюдением срока осуществления технологического присоединения, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничении балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю. Согласно п.7 договора сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. 

В соответствии с п.10 договора Заявитель обязался оплатить услуги ответчика в размере 550 рублей, в том числе, НДС 18% в сумме 83,90 рублей. Заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе, по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. После выполнения мероприятий по технологическому присоединению, в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, заявитель обязан уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий (п.8 договора).

В соответствии с п.10 технических условий, являющихся Приложением №1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2400.3867.15, Сетевая организация осуществляет организационные мероприятия по подготовке технических условий на технологическое присоединение, проверке выполнения технических условий со стороны заявителя, фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя. 

Заявитель осуществляет строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки присоединения, самонесущим изолированным проводом необходимого сечения или кабелем в автосферостойкой изоляции до вводного щита 0,4 кВ энергопринимающего устройства; устанавливает вводное устройство, щит учета с аппаратом защиты от токов коротких замыканий и перенапряжений на номинальный ток согласно подключаемой нагрузке.

Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технического присоединения к электрическим сетям.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п. 5 договора). 

Согласно чека-ордера от 19.11.2015 года ФИО1 оплатил ПАО «МРСК Сибири» денежные средства в размере 550 рублей.

22.01.2016 года ФИО1 направил заявление о присоединении к электрическим сетям. Указанное заявление получено ПАО «МРСК – Сибири», в ответ на которое последний направил в адрес истца Дополнительное соглашение №1 к договору от 13.05.2015 года, согласно которого срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет до 30.12.2017 года, однако до настоящего времени технологическое присоединение не осуществлено. 

Оценив представленные доказательства по правилам ст.67 ГПК РФ в их совокупности и взаимосвязи, суд, удовлетворяя исковые требования истца в части обязания ПАО «МРСК Сибири» осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям, руководствуется положениями п.п.1,2 ст.401 ГК РФ, п.1 ст.26 Федерального закона «Об электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года №861, которым утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, приходит к выводу о том, что ответчик не исполнил обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения, заключенного с истцом 23.08.2017 года, доказательств отсутствия вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств ПАО «МРСК Сибири» суду не представлено, также как и отсутствуют доказательства наличия обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, препятствующих исполнению своих обязательств в установленный договором срок.

При вышеизложенных обстоятельствах, в отсутствие доказательств обратного, суд находит установленным в судебном заседании, что ПАО «МРСК Сибири» нарушило условия заключенного с истцом договора, - в течение 6 месяцев не выполнило работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя электроустановок гаража (бокса) №, расположенного по адресу: 

<

адрес> «Д», стр.8.

При таких обстоятельствах, учитывая, что установленный срок является предельным, его продление не допустимо, а также то, что бездействие ответчика не было обусловлено объективными причинами, с учетом того, что ПАО «МРСК Сибири» не выполнило определенный объем работ по исполнению принятых на себя обязательств по договору от 13.05.2015 года суд находит требования истца подлежащими удовлетворению. С учетом разумности, объема выполнения обязательных технические и согласовательных процедур, соблюдения баланса интересов сторон договора, полагает возможным установить срок в 1 месяц для исполнения ПАО «МРСК Сибири» обязательства по Договору № 20.2400.3867.15 от 13.05.2015 года, заключенного между ПАО «МРСК Сибири» и ФИО1, заключающиеся в электроснабжения гаража, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>с момента вступления решения суда в законную силу.

Поскольку в судебном заседании установлен факт нарушения ответчиком прав истца ввиду ненадлежащего исполнения договорных обязательств и вина ответчика в нарушении прав, учитывая положения Закона РФ «О защите прав потребителей», ст.ст. 151, 1101 ГК РФ, исходя из принципа разумности и справедливости, суд определяет ко взысканию с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 500 рублей.

Рассмотрев исковые требования в части взыскания неустойки, суд приходит к следующему. 

В соответствии с ч.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пунктом 17. Договора, сторонами определено, что в случае нарушения одной из Сторон срока исполнения своих обязательств по настоящему договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.

Суд полагает подлежащим взысканию с ответчика неустойки в размере 62 127,45 рублей за период с 13.11.2015 года по 12.11.2016 года, что составляет 366 дней, исходя из следующего расчета: 

550 х (8,25% х 0,014) х 366 = 23 250,15 рублей.

В соответствии с положением ст.196 ГПК РФ, суд полагает подлежащим взысканию с ответчика в пользу истца неустойку в размере 10 065 рублей. 

Принимая во внимание положения ч.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей», поскольку при рассмотрении дела установлено, что требования истца в добровольном порядке ответчиком в срок, согласованный сторонами и до настоящего времени не удовлетворены, доказательства обратного в деле отсутствуют, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 5 282,50 рублей, исходя из следующего расчета: (500 рублей + 10 065 рублей) х 50 %. 

В соответствии со ст.88 ГПК РФ судебные расходы состоят из издержек, связанных с рассмотрением дела. 

В соответствии со ст.94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся, в том числе, расходы на оплату услуг представителей.

В соответствии со ст.100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Учитывая положения ст.100 ГПК РФ, разрешая вопрос о размере возмещения расходов на оплату юридических услуг в размере 7 000 рублей, подтвержденных документально, исходя из объема и категории дела, его сложности, представления соответствующих доказательств, объема работы в судебных заседаниях, а также исходя из принципа разумности и соразмерности, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца в счет оплаты юридических услуг 5 000 рублей, данная сумма является разумной, достаточной и справедливой, не нарушает прав ни одной из сторон по делу, так как находится в пределах суммы, уплаченной истцом за оказанные услуги и в полной мере соответствует сложности дела, характеру спора и объему работы, выполненной представителем.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ с ПАО «МРСК Сибири» подлежит взысканию госпошлина в доход местного бюджета в размере 1 002 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.194-198, 233-235 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Корсун ФИО7 к Публичному акционерному обществу «МРСК Сибири» о защите прав потребителей, – удовлетворить. 

Обязать Публичное акционерное общество «Межрегиональная сетевая распределительная компания Сибири» выполнить работы, необходимые для технологического присоединения гаража (бокса) №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, стр.8 к электрическим сетям. 

Взыскать с Публичному акционерному обществу «Межрегиональная сетевая распределительная компания Сибири» в пользу Корсуна ФИО8 неустойку в размере 10 065 рублей, штраф в размере 5 282,50 рублей, в счет компенсации морального вреда 500 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 5 000 рублей, всего 20 847,50 рублей. 

Взыскать с Публичному акционерному обществу «Межрегиональная сетевая распределительная компания Сибири» в доход бюджета городского округа 

<

адрес> государственную пошлину в размере 1 002 рублей. 

Ответчик вправе подать в суд, вынесший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение может быть обжаловано в 

<

адрес>вой суд через Советский районный суд 

<

адрес> в течение месяца со дня истечения срока подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения, в случае, если такое заявление подано – в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий: А.А. Яниева 

Дата изготовления мотивированного текста решения – ДД.ММ.ГГГГ.