РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 ноября 2023 года п. Ленинский

Ленинский районный суд Тульской области в составе: 

председательствующего Гусевой В.В., 

при секретаре Гришиной Н.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело №2-2041/2023 (УИД 71RS0015-01-2023-002313-14) по исковому заявлению ФИО2 к АО «Газпром Газораспределение Тула» о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ, штрафа, компенсации морального вреда, взыскании судебных расходов, 

у с т а н о в и л :

ФИО2, с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 39 ГПК РФ, обратился в суд с иском к АО «Газпром газораспределение Тула» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, указав в обоснование требований, что 20.04.2022 между ним и АО «Газпром газораспределение Тула» заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) принадлежащего ему жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> к сети газораспределения, для удовлетворения личных нужд. 

Пунктом 3 Договора определен срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа, который составляет 256 дней с даты заключения договора. 

Пунктом 10 Договора установлено, что в день осуществления фактического присоединения (врезки и пуска газа) стороны подписывают акт о подключении (технологическом присоединении). 

Размер платы по договору составила 83262, 14 рублей.

В нарушение условий договора фактическое подключение газоиспользующего оборудования состоялось 24.07.2023, что подтверждается актом о готовности №/21.07.2023, пусконаладочные работы были произведены 14.09.2023. 

31.01.2023 им в адрес ответчика направлена претензия с требованием произвести подключение к сети газораспределения, выплатить неустойку. Ответчик отказал в выплате неустойки, указав, что работы выполнены в установленный законом срок. 

Срок просрочки исполнения ответчиком обязательств по договору составил 247 дней за период с 09.01.2023 по 14.09.2023, чем нарушены права истца как потребителя, в связи с чем он вправе требовать взыскания неустойки за нарушение срока исполнения обязательств из расчета 3% за каждый день просрочки, что составляет 616971 рублей, рассчитанный как: 83262 рублей*3% * 247 дня просрочки.

Кроме того, в связи с нарушением его права как потребителя ему причинен моральный вред, который оценен в 772800 рублей.

Для защиты интересов с ООО «АБСОЛЮТ» был заключен договор на оказанию юридических услуг №-ЮР/Тула от 19.09.2023, стоимость которого составила 3000 рублей, которую также просил взыскать с ответчика. 

С учетом уточнения исковых требований, просил суд взыскать с АО «Газпром газораспределение Тула» в свою пользу неустойку за нарушение срока исполнения договорных обязательств в размере 616971 рублей, компенсацию морального вреда в размере 772800 рублей, штраф в размере 50% от присужденной к взысканию суммы, а также компенсировать расходы по оплате юридических услуг. 

В судебном заседании истец ФИО2 уточненные требования поддержал и просил удовлетворить по основаниям, указанным в иске.

Представитель ответчика АО «Газпром газораспределение Тула» по доверенности ФИО1 в судебном заседании уточненные требования не признала, не отрицая факта заключения с ФИО2 договора № от 20.04.2022 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации и дополнительного соглашения к нему, а также факта внесения истцом платы по договору: 08.06.2022 – 53249, 20 рублей, 02.06.2023 – 30012, 94 рублей, указала, что истец неверно истолковал указанные в договоре сроки выполнения работ.

Так, работы по догазификации в Тульской области осуществляются на основании «Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Тульской области», утвержденной Постановлением правительства Тульской области от 23.12.2021 №852, согласно которой догазификация 

<

адрес> установлена в июле 2022 года, фактически работы по строительству сетей до границы земельного участка истца были закончены 04.07.2022, то есть в полном соответствии как с утвержденной региональной программой, так и договором. 

В соответствии с п. 6 Договора и п. 61 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 №1547, заявитель обязан осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ, принадлежащего ему земельного участка. Частично выполнение мероприятий в пределах границ земельного участка было поручено исполнителю. Для выполнения работ в границах земельного участка заявителя необходимо предоставление доступа на земельный участок со стороны заявителя. Исполнителем неоднократно предпринимались попытки согласовать с заявителем время для предоставления доступа на земельный участок для выполнения работ. 19.01.2023 с заявителем была согласована дата выполнения работ в границах земельного участка и 23.01.2023 работы по строительству газопровода в границах земельного участка и внутреннего газопровода были выполнены. 

После выполнения работ по строительству сетей газопотребления в границах земельного участка для выполнения фактического подключения и пуска газа согласно положениям Договора и действующего законодательства заявитель должен организовать установку и пуско-наладку газоиспользующего оборудования, а также предоставить исполнителю пакет документов для составления исполнительно-технической документации, заключить договор поставки газа и договор на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования. О необходимости выполнения указанных мероприятий заявитель был проинформирован ответчиком, без их выполнения невозможно осуществить пуск газа в газоиспользующее оборудование заявителя (п.74). После выполнения указанных мероприятий со стороны истца, ответчиком незамедлительно осуществлено фактическое присоединение и пуск газа. 

Выслушав объяснения истца, представителя ответчика, исследовав собранные по делу письменные доказательства, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с требованиями ст.307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

В соответствии со ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу п.1 ст.779 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

На основании п.1 ст.702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст.783 Гражданского кодекса Российской Федерации, общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Судом установлено, что 20.04.2022 между ФИО2 и АО «Газпром газораспределение Тула» заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) принадлежащего истцу объекта жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования.

Заказчик ФИО2 принял обязательства по обеспечению готовности газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка: 

<

адрес> 

По условиям договора исполнитель обязался разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя (проект газоснабжения) и получить на нее положительное заключение экспертизы (при необходимости создания сети газораспределения) в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации; направить заявителю в течение 5 рабочих дней после получения положительного заключения экспертизы на проектную документацию информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического присоединения) (при необходимости создания сети газораспределения); осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора; проверить выполнение заявителем технических условий при условии обеспечения заявителем доступа исполнителя к объекту капитального строительства в срок не позднее, чем за 15 дней до дня подключения к сетям газораспределения и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению); осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного настоящим договором дня подключения (технологического присоединения), но не ранее подписания акта о готовности сетей и составить акт о подключении сетей и т.д.

В результате исполнения ответчиком обязательств по договору, ФИО2 должен был получить подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Пунктом 3 Договора определен срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа, который составляет 256 дней. Период выполнения работ определяется в соответствии с межрегиональной и региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций и (или) графиком выполнения работ, определяющими состав мероприятий по обеспечению технической возможности и (или) предусматривающих реконструкцию существующих сетей газораспределения исполнителя в целях увеличения их пропускной способности, строительство новых газораспределительных сетей и т.п. Последний день срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, считается днем подключения (технологического присоединения) домовладения к сетям газоснабжения. В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день.

Согласно пункту 4 Договора исполнитель обязан осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки подключения; обеспечить подготовку сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску газа; в случае поступления в соответствии с пунктом 12 Правил обращения заявителя осуществить мероприятия по подключению в пределах границ земельного участка заявителя; осуществить фактическое присоединение объекта капитального строительства заявителя (но не ранее подписания акта о готовности) и составить акт о подключении.

Согласно пункту 6 Договора заявитель обязан, в том числе, выполнить возложенные на него обязательства по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, на котором расположен присоединяемый объект капитального строительства заявителя; по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению); уведомить исполнителя об исполнении технических условий в порядке, определенном настоящим договором; подписать акт о готовности в день его составления исполнителем; заключить договор на техническое обслуживание сети газораспределения и (или) газопотребления и внутридомового газового оборудования и договор поставки газа после подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению).

Цена Договора составляет 106498, 39 рублей, оплата производится в следующем порядке: 50 процентов платы, что составляет 53249, 20 рублей, вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора о подключении; 50 процентов платы, что составляет 53249, 19 рублей вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении). В случае, если окончательный размер платы устанавливается путем подписания сторонами дополнительного соглашения к договору, в соответствии с пунктом 12 настоящего договора, порядок и сроки внесения платы устанавливаются соглашением сторон настоящего договора, исходя из графика выполнения работ их стоимости, при этом не менее 50 процентов платы, вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении) (пункт 13 Договора).

Приложением к Договору являются Технические условия № от 01.04.2022 подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, согласно которым заявитель должен был установить газоиспользующее оборудование в помещении с вентиляцией, оборудованным обособленными дымоходами и вентиляционными каналами, а также представить акт первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией. Кроме того, заявитель осуществляет предоставление схемы расположения газораспределения (с указанием длины, диаметра и материалы трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования, строительство (реконструкцию) сети газораспределения от точки подключения до газоиспользующего оборудования по адресу: 

<

адрес>, обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством РФ о техническом регулировании.

01.06.2023 между истцом и ответчиком заключено Дополнительное соглашение к договору № от 20.04.2023 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, в соответствии с которым изменен размер платы за подключение и составляет 83262, 14 рублей; внесение платы осуществляется в следующем порядке: 63, 95 процентов платы, что составляет 53249, 20 рублей, вносится в течении 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора о подключении; 36, 05 процентов платы, что составляет 30012, 94 рублей, вносится в течении 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

Судом также установлено, что ФИО3 свои обязательства по Договору исполнил в полном объеме, оплатив 08.06.2022 – 53249, 20 рублей, 02.06.2023 – 30012, 94 рублей. 

Порядок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства осуществляется на основании положений Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 №1547. Указанными Правилами №1547 введена процедура льготного подключения домовладений физических лиц по программе догазификации, которая предусматривает выполнение работ по подключению на условиях бесплатности для заявителей мероприятий до границ земельных участков заявителей.

Договор с ФИО2 заключен в рамках программы догазификации.

Согласно п.2 Правил №1547 догазификация это осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц.

Из раздела II Правил №1547 следует, что по заявлениям о догазификации орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган публичной власти федеральной территории) утверждает программу газификации.

Работы по догазификации в Тульской области осуществляются на основании «Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Тульской области», утвержденной Постановлением правительства Тульской области от 23.12.2021 №852, согласно которой догазификация 

<

адрес> установлена в июле 2022 года. 

В соответствии с региональной программой газификации АО «Газпром газораспределение Тула» фактически работы по строительству сетей до границы земельного участка истца были закончены 04.07.2022, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта сети газораспределения. 

Как указывалось ранее, согласно п.3 договора определен срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа, который составляет 256 дней с даты заключения договора. Период выполнения работ определяется в соответствии с межрегиональной и региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций и (или) графиком выполнения работ, определяющими состав мероприятий по обеспечению технической возможности и (или) предусматривающих реконструкцию существующих сетей газораспределения исполнителя в целях увеличения их пропускной способности, строительство новых газораспределительных сетей и т.п. Последний день срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, считается днем подключения (технологического присоединения) домовладения к сетям газоснабжения. В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день.

Учитывая, что 04.07.2022 подписан акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения, следовательно, ответчик мероприятия, предусмотренные п. 4 договора № от 20.04.2023 до границ земельного участка, выполнил в полном объеме и в установленные сроки. 

Представитель ответчика, ссылаясь на надлежащее исполнение условий договора со стороны исполнителя, в процессе рассмотрения дела указывал, что подключение объекта возможно только после выполнения заказчиком ряда мероприятий в соответствии с договором о подключении.

Так, пунктом 6 договора и п.74 Правил №1547 установлены мероприятия, которые должен был выполнить истец (в том числе подписать акт о готовности в день его составления и заключить договор на техническое обслуживание сети газораспределения и (или) газопотребления внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и договор поставки газа после подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), которые истцом не выполнены.

В соответствии с условиями договора о подключении и в силу подпункта «в» пункта 72 Правил №1547 ответчик принял на себя обязательство осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) объекта не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения), но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте «г» пункта 71 Правил №1547.

Как указано выше, согласно техническим условиям, заявитель должен был установить газоиспользующее оборудование в помещении с вентиляцией, оборудованным обособленными дымоходами и вентиляционными каналами, а также представить акт первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией. Кроме того, заявитель осуществляет предоставление схемы расположения газораспределения (с указанием длины, диаметра и материалы трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования, строительство (реконструкцию) сети газораспределения от точки подключения до газоиспользующего оборудования по адресу: 

<

адрес> обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством РФ о техническом регулировании.

В связи с неисполнением истцом в установленный срок мероприятий, предусмотренных договором о подключении, ответчиком 13.12.2022 была осуществлена попытка связаться с заказчиком по номеру телефона, указанному ФИО2 при заключении договора, что подтверждено распечаткой звонков, и не оспаривалось истцом. 

19.01.2023 дата выезда для выполнения мероприятий в границах земельного участка заявителя была согласована с истцом, 23.01.2023 ответчиком был осуществлен выезд на земельный участок ФИО2 для устройства сетей газопотребления, что подтверждается путевым листом и нарядом на работу от 23.01.2023 и не оспаривалось сторонами. 

20.03.2023 от заявителя поступили документы для составления исполнительной-технической документации.

Как усматривается из наряда на работу, 21.03.2023 был осуществлен выезд бригады ответчика для мониторинга и устранения недостатков (подрезки цоколя), кроме того, как указал ответчик, была произведена врезка в сеть, то есть фактическое соединение внутреннего газопровода и сети газораспределения на границе земельного участка заявителя. 

25.04.2023 состоялся инструктаж заявителя по пользованию газом.

После составления дополнительного соглашения, его подписания и оплаты заявителем, которое последовало 01.07.2023 – 07.06.2023, 21.07.2023 составлен акт приемки законченного строительством объекта сети газопотребления, который был подписан ФИО2 24.07.2023. В тот же день заявителем заключен договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. 

25.07.2023 выдано разрешение на пуск газа, заявителем заключен договор о поставке газа, также оформлен запрос №05-002477 на выполнение пусконаладочных работ. 

14.09.2023 был произведен пуск газа в газоиспользующее оборудование заявителя. 

Обращаясь с настоящим иском в суд, ФИО2 указал на нарушение ответчиком его прав, предусмотренных Законом РФ 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».

Указанный Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

В соответствии с п.1 ст.28 Закона РФ 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Согласно пункту 5 указанной статьи, в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

В силу пункта 6 указанной статьи требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

В соответствии с п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по вопросам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Следовательно, к спорным правоотношениям подлежат применению Правила №1547.

В силу статьи 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств (п.1); в случае не предоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков, если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению (п.2); ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне (п. 3).

Согласно п. 1 ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (ст.328).

Таким образом, поскольку истец не представил доказательств выполнения возложенных на него обязанностей, предусмотренных положениями договора, суд приходит к выводу об отсутствии вины ответчика в неосуществлении работ по строительству газопровода к земельному участку истца в срок до 09.01.2023. 

Нарушений прав истца ФИО2 со стороны АО «Газпром газораспределение Тула» судом не установлено, поскольку истцом не представлено доказательств своевременного исполнения обязательств, возложенных на него п. 6 Договора №05-0001346 от 20.04.2023 и техническими условиями, что препятствовало исполнению встречных обязательств АО «Газпром газораспределение Тула».

Таким образом, оснований для возложения на ответчика обязанности по осуществлению подключения (технологического присоединения) объекта в рамках договора №05-0001346 от 20.04.2023 не имеется, как и оснований для взыскания с ответчика в пользу истца неустойки, предусмотренной пунктом 1 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», поскольку при установленных судом обстоятельствах нарушения срока исполнения обязательств по договору ответчиком не допущено.

Ссылка истца на направление в адрес АО «Газпром газораспределение Тула» 31.01.2023 претензии не является основанием для удовлетворения иска, поскольку 02.03.2023 ФИО2 было сообщено, что 20.07.2022 он был уведомлен о необходимости предоставления пакета документов для исполнительно-технической документации, для составления договора на техническое обслуживание и пуска газа, вместе с тем, указанный пакет документов предоставлен не был. 

В силу статьи 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Согласно п. 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Поскольку нарушений прав истца со стороны ответчика судом не установлено, а также учитывая, что выполнение обязательств по договору обусловлено выполнением встречных обязательств со стороны истца по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, основания для взыскания в пользу истца компенсации морального вреда не имеется, нет оснований для удовлетворения остальной части требований ФИО2 о взыскании с АО «Газпром газораспределение Тула» штрафа, а также судебных расходов на оплату юридических услуг, заявленных истцом ко взысканию. 

На основании изложенного, оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении иска ФИО2 в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

решил:

в удовлетворении исковых требований ФИО2 к АО «Газпром Газораспределение Тула» о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ, штрафа, компенсации морального вреда, взыскании судебных расходов отказать. 

Решение суда может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд Тульской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение суда в окончательной форме изготовлено 29.11.2023.

Председательствующий