Дело № 2-1173/2025

УИД № 74RS0049-01-2025-001429-45

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 сентября 2025 года г. Троицк

Троицкий городской суд Челябинской области в составе:

председательствующего: Панасенко Е.Г.,

при секретаре: Таранюк А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к публичному акционерному обществу «Россети Урал» о возложении обязанности выполнить мероприятия по техническому присоединению к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Урал», в котором просит возложить обязанность на ПАО «Россети Урал» выполнить предусмотренные договором мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу; взыскать неустойку за нарушение срока исполнения обязательства по договору в размере 30 000 руб.; взыскать судебную неустойку в размере 3% в день за каждый день неисполнения решения суда, взыскать компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 35 000 руб. 

В обоснование иска ссылается на то, что она является собственником земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №. Между ней и ПАО «Россети Урал» заключен договор осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям с техническими условиями от 12 марта 2024 года №. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев с даты оплаты счета. Истцом произведена оплата по договору в полном объеме. Однако ответчиком обязательства по договору не выполнены, подключение участка не произведено.

Так же, между ней и ПАО «Россети Урал» на основании заявки на технологическое присоединение № от 26 февраля 2024 года заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, приложеним к которому являются технические условия № от 12 марта 2024 года.

Срок осуществления мероприятий, составляющий 6 месяцев, определен в соответствии с п.4 счета на оплату № от 12 марта 2024 года.

Указывает на то, что до настоящего времени мероприятия по выполнению технических условий со стороны сетевой организации не совершены, что является нарушением ее прав и законных интересов.

Договор технологического присоединения заключен 13 марта 2024 года (дата оплаты договора), следовательно, мероприятия со стороны сетевой организации должны были быть выполнены до 13 сентября 2024 года. Однако до настоящего времени обязательства по вышеуказанному договору не выполнены. 

Истец ФИО1 в судебном заседании не участвовала, о дне и месте судебного разбирательства извещена надлежащим образом.

Представитель истца – ФИО2 в судебном заседании участвовал, исковые требования поддержал, ссылаясь на основания указанные в иске.

Представитель ответчика ПАО «Россети Урал» - ФИО3 в судебном заседании участвовала, просила в удовлетворении исковых требований отказать. В материалы дела представлены письменные возражения (л.д.41-43).

Представитель третьего лица СНТ «Космос» в судебном заседании не участвовал, о дне и месте судебного разбирательства извещался надлежащим образом.

В соответствии со ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) суд признал возможным рассмотреть дело в отсутствие истца, представителя третьего лица.

Заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 539 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии (п. 1).

Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии (п. 2).

К отношениям по договору снабжения электрической энергией правила данного параграфа применяются, если законом или иными правовыми актами не установлено иное (п. 4).

Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии установлены Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Закон № 35-ФЗ).

Согласно ст. 26 Закона №35-ФЗ технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер (п. 1).

Под однократностью понимается разовое осуществление процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, а также построенных линий электропередачи, в объеме максимальной мощности таких энергопринимающих устройств, указанной в документах, подтверждающих технологическое присоединение, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Однократность технологического присоединения к электрическим сетям означает, что плата за технологическое присоединение взимается однократно; при изменении формы собственности или собственника (заявителя или сетевой организации) не требуется осуществления новой процедуры технологического присоединения; изменение формы собственности или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присоединение; реконструкция объекта капитального строительства, ранее присоединенного к электрическим сетям, при которой не осуществляется реконструкция и увеличение мощности энергопринимающего устройства, или при которой не осуществляется изменение категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, влекущее изменение схемы внешнего электроснабжения, не требует осуществления нового (повторного) технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Согласно абз. 16 п. 1 ст. 26 Закона № 35-ФЗ по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (п. 1 ст. 26 Закона № 35-ФЗ и п. п. 16, 17 Правил № 861).

Правительство Российской Федерации постановлением от 27 декабря 2004 года № 861 утвердило Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (Правила № 861).

В соответствии с абз. 1 п. 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению (абз. 2 п. 3 Правил №861).

В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, должны быть указаны:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина на территории Российской Федерации, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета, номер мобильного телефона и адрес электронной почты;

б) место жительства заявителя;

в) сведения, предусмотренные подпунктами "б" и "л" пункта 9 настоящих Правил;

г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя (п. 14 Правил №861).

Из Правил №861 следует, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии).

Судом установлено, что ФИО1 является собственником земельного участка, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на основании договора купли-продажи земельного участка от 02 февраля 2024 года (л.д.22-25).

Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, 12 марта 2024 года между ФИО1 и ПАО «Россети Урал» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. По условиям договора сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ФИО1 для электроснабжения объекта – «малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом) 

<

адрес> кадастровый номер участка №, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт., категория надежности III (третья), класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

Срок выполнения мероприятий по техническому присоединению составляет 6 месяцев со дня оплаты счета. 

Размер платы за техническое присоединение установлен в счете на оплату № от 12 марта 2024 года, и составляет 104 250 руб. 

Согласно п. 2 счета на оплату, внесение платы за техническое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 15% платы за технологическое присоединение 15 637,50 руб., в том числе НДС (20%) 2 606,25 руб. вносятся в течение 5 дней со дня выставления сетевой организацией счета; 30% платы за техническое присоединение 31 275 руб., в том числе НДС (20%) 5 212,50 руб. вносятся в течение 20 дней со дня выставления сетевой организацией счета; 35% платы за технологическое присоединение 36 487,50 руб., в том числе НДС (20%) 6 081,25 руб. вносятся в течение 40 дней со дня выставления сетевой организацией счета; 20% платы за технологическое присоединение 20 850 руб., в том числе НДС (20%) 3 475 руб. вносятся в течение 10 дней со дня размещения акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям в Личном кабинете. С даты оплаты настоящего счета договор об осуществлении тех.присоединения считается заключенным. С даты оплаты настоящего счета стороны осуществляют мероприятия, указанные в технических условиях №61-ТУ-65330.

Неотъемлемой частью договора являются технические условия № от 12 марта 2024 года для присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ФИО1 для электроснабжения объекта – «малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом) 

<

адрес>, кадастровый номер участка №, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт., категория надежности III (третья), класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ. (п. п. 1, 2, 3, 4, 5 технических условий).

Пунктом 10 технических условий предусмотрено, что сетевая организация осуществляет (до границ участка заявителя): новое строительство; предусмотреть установку однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ киоскового типа с трансформатором мощностью от 100 до 250 кВа включительно взамен демонтируемой ТП-2791. На вводе в РУ-0,4 кВ вновь устанавливаемой ТП-10/0,4 кВ установить технический учет электрической энергии (мощности) трехфазный полукосвенного включения 0,4 кВ. количество точек учета: одна. Строительство воздушной ЛЭП 0,4 кВ от ТП-2791 до границы земельного участка на железобетонных опорах, одноцепной, изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 мм включительно, протяженностью 0,520 км. Трассу ЛЭП определить проектом. Ответвление от опоры ВЛ-0,4 кВ до измерительного комплекса электрической энергии выполнить проводом марки СИП сечением не менее 16 мм протяженностью 0,003 км. Наличие скруток и паек не допускается. Установить коммерческий учет электрической энергии (мощности) трехфазный прямого включения 0,4 кВ в точке присоединения, согласно п.7.1 технических условий. Количество точек учета: одна. Прибор учета в split- исполнении со степенью защиты корпуса от пыли и влаги не хуже IP54, разместить с креплением на опоре ВЛ 0,4 кВ либо в разрыв вводного провода. Прибор учета должен быть укомплектован удаленным (выносным) дисплеем. Реконструкция отсутствует. На вводе в РУ-0,4 кВ вновь устанавливаемой ТП-2791 предусмотреть электронный счетчик активной электроэнергии, класса точности не менее 1,0, трансформаторы тока с действующим межповерочным интервалом класса точности 0,5 с передачей данных GSM/GPRS или возможностью интеграции в существующую систему сбора данных. Приборы учета электроэнергии должны соответствовать требованиям СТО 34.01-5.1-009-2019 Стандарта ПАО «Россети» «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования». Установить устройства защиты от перенапряжений. Тип, количество и место установки определить проектом. Выполнить расчет установок релейной защиты в полном объеме. Вышеизложенный объем работ оформить проектно-сметной документацией, выполненной на основании требований нормативно-правовых актов.

Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (п.12 технических условий).

ФИО1 исполнила обязательства по договору от 12 марта 2024 года, внесла оплату за техническое присоединение 13 марта 2024 года, следовательно, обязанность по технологическому присоединению должна быть выполнена до 13 сентября 2024 года включительно.

Вместе с тем ПАО «Россети Урал» до настоящего времени не осуществило техническое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО1 

Разрешая заявленные требования, оценив представленные доказательства, установив неисполнение ПАО «Россети Урал» в предусмотренный договором срок мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта к электрическим сетям, суд приходит к выводу о наличии оснований для возложения на ПАО «Россети Урал» обязанности осуществить мероприятия по техническому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств истца в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Согласно п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1).

Как следует из разъяснений, указанных в п. п. 28, 31, 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», на основании п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка). 

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (п. 2 ст. 308.3 ГК РФ). 

Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ). 

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. 

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Таким образом, судебная неустойка призвана прежде всего стимулировать должника к исполнению решения суда, устанавливается судом в целях дополнительного воздействия на должника. При этом размер судебной неустойки законом не установлен, он определяется по усмотрению суда с учетом обстоятельств дела и исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды должником из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Принимая во внимание характер спора, конкретные обстоятельства дела, руководствуясь принципами разумности и справедливости, суд устанавливает размер подлежащей взысканию с ПАО «Россети Урал» в пользу ФИО1 неустойки в размере 3000 руб. ежемесячно до момента фактического исполнения решения суда. 

В данном случае отношения сторон характеризуются длительным периодом неисполнения ответчиком обязательств по договору, а более высокий размер направлен на ускорение защиты нарушенного права.

Как разъяснено в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с абз.3 пп. «в» п. 16 Правил № 861, договор должен содержать существенные условия, к числу которых отнесены положения об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе (пп. «в»): обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Следовательно, к правоотношениям между сторонами при расчете неустойки не подлежат применению нормы Закона РФ «О защите прав потребителей» при наличии специальных норм, регулирующих правоотношения, указанные в пп. «в» п. 16 Правил № 861.

Из расчета суда, неустойка за просрочку исполнения обязательства составит 66 459,38 руб., исходя из следующего: 0,25% от общей цены договора 104 250 руб. (плата за технологическое подключение) за каждый день нарушения обязательства, но не более чем за один год (104 250 руб. х 0,25%) х 255 дн. (за период с 14 сентября 2024 года по 26 мая 2025 года (день подачи иска)) = 66 459,38 руб.).

Истец просит взыскать неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 30 000 руб. 

Установив, что ответчиком нарушен установленный договором срок исполнения обязательства – до 13 сентября 2024 года, суд приходит к выводу о взыскании с ПАО «Россети Урал» в пользу ФИО1 неустойку за нарушение срока исполнения обязательств в размере 30 000 руб. в пределах заявленного требования.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Принимая во внимание, что факт нарушения прав истца как потребителя подтвержден представленными в материалы дела доказательствами, суд полагает, что компенсация морального вреда в размере 5 000 руб. отвечает принципам разумности и справедливости и позволяет соблюсти баланс интересов сторон.

Согласно ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В силу ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: расходы на оплату услуг представителей, а также другие признанные судом необходимыми расходы, понесенные сторонами.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Истец также просит взыскать с ответчика расходы по оплате юридических услуг в размере 35 000 руб., что подтверждается договором на оказание юридических услуг №116 от 03 мая 2025 года (л.д.30), чеком по операции ПАО Сбербанк от 17 июля 2025 года (л.д.29).

С учетом принципа разумности пределов возмещения расходов, категории спора, сложности дела, объема заявленных и удовлетворенных требований, проделанной представителем работы, суд считает разумной и справедливой сумму расходов по оплате услуг представителя в размере 25 000 руб.

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом, вопреки данной норме от сторон не поступило каких-либо других доводов и возражений по иску и доказательств в их обоснование. 

Суд, вынося решение, исходит из доказательств, находящихся в деле и дает им оценку в соответствии со ст. 67 ГПК РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным требованиям. Другие требования истец не заявлял.

В силу ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, с ПАО «Россети Урал» подлежит взысканию в доход местного бюджета государственная пошлина в размере 7 000 руб.

Руководствуясь ст. 194- 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к публичному акционерному обществу «Россети Урал» о возложении обязанности выполнить мероприятия по техническому присоединению к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Возложить обязанность на ПАО «Россети Урал» (№) в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер участка №.

Взыскать с ПАО «Россети Урал» (№) в пользу ФИО1 (

<

данные изъяты> неустойку за нарушение срока исполнения обязательства за период с 14 сентября 2024 года по 23 мая 2025 года в размере 30 000 руб.; компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 25 000 руб.

В случае неисполнения решения суда в установленный срок определить ко взысканию с ПАО «Россети Урал» (№) в пользу ФИО1 

<

данные изъяты> судебную неустойку в размере 3 000 руб. ежемесячно до момента фактического исполнения решения суда.

Взыскать с ПАО «Россети Урал» (№) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 7 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Челябинский областной суд, путем подачи апелляционной жалобы через Троицкий городской суд Челябинской области, в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий: