Дело № 2-128/2020

22RS0011-02-2019-003792-04

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

26 мая 2020 года г. Рубцовск 

Рубцовский городской суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Хоченовой Е.В.,

при секретаре Мельниковой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Алтайской краевой общественной организации «Агентство по защите прав потребителей «Сутяжник» в интересах ФИО1, ФИО2 ФИО3 к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Светлова» о проведении ремонта подъездов, 

УСТАНОВИЛ:

...вая общественная организация «Агентство по защите прав потребителей «Сутяжник» (далее – АКОО «АЗПП «Сутяжник») обратилась в суд с иском в интересах ФИО1, ФИО2, ФИО3 к ответчику к Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Светлова» (далее – ООО «УК «Светлова») о защите прав потребителей – возложении обязанности произвести текущий ремонт подъездов №1, 2, 4 по .... В обоснование требований указано, что ФИО1, ФИО2, ФИО3 являются собственниками квартир № ... в .... Ответчик ООО «УК «Светлова» является компанией, обслуживающей жилой дом в городе Рубцовске, в котором проживают истцы. Ссылаясь на ст.ст. 154, 161 Жилищного кодекса РФ, п. 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491, указывает, что содержание общего имущества включает в себя текущий и капитальный ремонт, содержание общего имущества. В нарушении закона управляющая компания с начала обслуживания жилого дома ни разу не произвела ремонт подъездов жилого дома. Действиями ответчика истцам причинен моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, пережитых ими в результате неправомерных действий, компенсацию которого истцы оценили в сумме 1 000 рублей в пользу каждого. Истцы просили обязать ответчика ООО «УК «Светлова» произвести текущий ремонт подъездов №1, 2, 4 жилого ... по ... в течение месяца со дня вынесения решения суда; взыскать с ООО «УК «Светлова» в пользу истцов компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей каждому. 

Истцы ФИО1, ФИО3 в судебном заседании поддержали заявленные требования.

Истец ФИО2 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена в установленном законом порядке.

Представитель АКОО «АЗПП «Сутяжник» ФИО4 в судебном заседании поддержал заявленные требования в полном объеме, просил возложить на ответчика обязанность по проведению ремонта подъездов в соответствии с экспертным заключением.

Представитель ответчика ООО «УК «Светлова» ФИО5 в судебном заседании исковые требования не признала. Необходимость в проведении ремонта подъездов не оспаривала, указала, что управляющая компания готова провести ремонт согласно сметы, составленной специалистами управляющей компании. 

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения участников процесса, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

В силу п. 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Согласно ч.ч. 2, 3 названной нормы при управлении многоквартирным домом управляющей организацией, она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.

В соответствии со ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива, лица, указанного в п. 6 ч. 2 ст. 153 настоящего Кодекса, либо в случае, предусмотренном ч. 14 ст. 161 настоящего Кодекса, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Порядок содержания общего имущества в многоквартирном доме регламентируется соответствующими Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 и Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном дома, и порядке их содержания и выполнения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290.

В силу п. 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем, в том числе: соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества.

На основании п. 16 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме надлежащее содержание общего имущества обеспечивается собственниками помещений путем заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией.

При этом, в силу п. 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, в состав общего имущества включаются: помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование); крыши; ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции); ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры); иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома.

Судом установлено, что истцы ФИО1, ФИО2, ФИО3 являются собственниками жилых помещений в многоквартирном жилом ... в ..., что подтверждается представленными в материалы дела правоустанавливающими документами, выписками из ЕГРН.

Компанией, осуществляющей управление многоквартирным жилым домом по ... в ... является ООО «УК «Светлова» (ранее «ООО «УК «Наш Дом»), что подтверждается приказом Государственной инспекции Алтайского края от 20.07.2018 «О переоформлении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» и не оспаривалось сторонами. 

Приступая к управлению домом, управляющая компания в силу закона взяла на себя обязанность за плату оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту указанного жилого дома.

06.11.2019 представителями ООО «УК «Светлова» произведен осмотр подъездов № 1, 2, 4 жилого ... в ..., установлена необходимость в поведении ремонта указанных подъездов, о чем составлены соответствующие акты. 

Доказательств, что в указанный период управляющей организацией производились какие-либо работы по ремонту подъездов многоквартирного дома по ... в ... ответчиком не представлено. 

В ходе рассмотрения дела, судом было назначено проведение судебной строительно-технической экспертизы для определения технического состояния подъездов № 1, 2, 4 жилого ... в ..., вида работ, которые необходимо выполнить. 

Согласно заключению эксперта №1983/19 от 18.03.2020, выполненному экспертами ООО «Лаборатория судебной строительно-технической экспертизы», установлено, что техническое состояние подъездов № 1, №2, №4 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ... неудовлетворительное (не соответствует требованиям МДК 2-03.2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», а также требованиям строительных норм и правил); для устранения выявленных дефектов и повреждений в помещении подъездов № 1, №2, №4 требуется проведение ремонтно-строительных работ.

Экспертным осмотром выявлены следующие повреждения. 

В подъезде №1:

1) штукатурный слой стен и потолков: имеются локальные разрушения, трещины и отслоения штукатурного слоя от основания на промежуточной площадке 4-5 (участок стены между оконными блоками);

2) побелка (стены в тамбуре, верхняя часть стен в помещении подъезда, откосы входного дверного проема, потолки): имеются следы увлажнения, разводы, высолы и пятна коричневого цвета на поверхности окрасочного слоя на отдельных участках; имеются локальные отслоения и отпадения окрасочного слоя от основания; массовые потемнения и загрязнения окрасочного слоя;

3) окраска масляными составами (отдельная стена на входной площадке, нижняя часть стен в помещении подъезда, боковые поверхности лестничных маршей): на поверхности окрасочного слоя имеются потемнения и загрязнения, локальные отслоения и отпадения окрасочного слоя от основания;

4) полы: 

- в тамбуре и на входной площадке – бетонные: имеется стирание поверхности в ходовых местах, выбоины, сколы и волосные трещины в бетонной поверхности пола; 

- на промежуточных и этажных площадках – бетонные, с окраской масляными составами по части периметра помещений, на промежуточной площадке 4-5 и на площадке пятого этажа с окраской по всей площади площадок: имеется стирание поверхности в ходовых местах, отдельные мелкие выбоины, сколы и волосные трещины в бетонной поверхности пола; имеются потемнения, загрязнения и разрушения окрасочного слоя;

- на лестничных маршах, за исключением лестничных маршей между площадками четвертого и пятого этажа – бетонные ступени с окраской масляными составами ходовой поверхности и подступенков по боковым сторонам: имеются стирания ходовой поверхности, сколы и локальные разрушения бетона отдельных ступеней; имеются потемнения, загрязнения и разрушения окрасочного слоя;

- на лестничных маршах между площадками четвертого и пятого этажа – бетонные ступени с окраской масляными составами: имеются сколы и локальные разрушения бетона отдельных ступеней; имеются потемнения, загрязнения и разрушения окрасочного слоя;

5) перильное ограждение – металлическое с деревянными поручнями, с окраской масляными составами: имеются сколы и локальные разрушения древесины на отдельных участках деревянных поручней; отсутствуют отдельные вертикальные элементы металлического перильного ограждения лестничного марша между промежуточной площадкой 4-5 и площадкой пятого этажа, часть металлического перильного ограждения лестничного марша между входной площадкой и площадкой первого этажа отсутствует; имеются потемнения, загрязнения и частичное разрушение окрасочного слоя деревянных поручней и металлического ограждения;

6) оконные блоки – деревянные с окраской масляными составами: со стороны помещения подъезда отсутствуют створки оконных блоков, за исключением нижней створки верхнего оконного блока на площадке 4-5, отсутствует нижняя створка верхнего оконного блока на промежуточной площадке 4-5 со стороны улицы, отсутствуют приборы оконных блоков; имеются потемнения, загрязнения и локальные разрушения окрасочного слоя оконных блоков;

7) дверной блок между тамбуром и помещением подъезда – деревянный с окраской масляными составами: имеются потемнения, загрязнения и локальные разрушения окрасочного слоя дверного блока и наличников; имеется стертость и частичное разрушение древесины порога деревянного дверного блока; полотно дверного блока имеет не плотный притвор;

8) элементы системы отопления с окраской масляными составами, металлические этажные распределительные щитки с окраской масляными составами и деревянные коммуникационные шкафы с окраской водными (побелка) составами, металлические групповые почтовые ящики с окраской масляными составами: имеются потемнения, загрязнения и частичное разрушение окрасочного слоя элементов на отдельных участках; отсутствуют запирающие устройства отдельных створок металлических групповых почтовых ящиков; отсутствуют отдельные элементы запирающих устройств створок деревянных коммуникационных шкафов на площадках первого, третьего и пятого этажей; имеется деформация створки металлического этажного распределительного щитка на площадке первого этажа;

9) система освещения в помещении тамбура: имеются открытые участки линий освещения тамбура.

В подъезде №2:

1) побелка (стены в тамбуре, верхняя часть стен в помещении подъезда, откосы входного дверного проема, потолки): имеются следы увлажнения, разводы, высолы и пятна коричневого цвета на поверхности окрасочного слоя на отдельных участках; имеются локальные отслоения и отпадения окрасочного слоя от основания; массовые потемнения и загрязнения окрасочного слоя;

2) окраска масляными составами (отдельная стена входной площадки, нижняя часть стен в помещении подъезда, боковые поверхности лестничных маршей): на поверхности окрасочного слоя имеются потемнения и загрязнения, отслоения и отпадения окрасочного слоя от основания;

3) полы:

- на входной площадке, в тамбуре, и на площадке первого этажа – бетонные: имеется стирание поверхности в ходовых местах, отдельные мелкие выбоины, сколы и волосные трещины в бетонной поверхности пола;

- на промежуточных площадках 1-2, 2-3, 3-4 и площадке четвертого этажа – бетонные, с окраской масляными составами по части периметра помещений: имеется стирание поверхности в ходовых местах, отдельные мелкие выбоины, сколы и волосные трещины в бетонной поверхности пола; имеются потемнения, загрязнения и разрушения окрасочного слоя;

- на промежуточной площадке 4-5 и площадках второго, третьего и пятого этажей – бетонные, с окраской масляными составами: имеется стирание поверхности в ходовых местах, отдельные мелкие выбоины, сколы и волосные трещины в бетонной поверхности пола; имеются потемнения, загрязнения и разрушения окрасочного слоя;

- на лестничном марше между входной площадкой и площадкой 1-го этажа – бетонные ступени: имеются стирания ходовой поверхности, сколы и локальные разрушения бетона отдельных ступеней;

- на лестничных маршах, за исключением лестничных маршей между площадками четвертого и пятого этажа – бетонные ступени с окраской масляными составами ходовой поверхности по боковым сторонам и подступенков: имеются стирания ходовой поверхности, сколы и локальные разрушения бетона отдельных ступеней; имеются потемнения, загрязнения и разрушения окрасочного слоя;

- на лестничных маршах между площадками четвертого и пятого этажа – бетонные ступени с окраской масляными составами: имеются потемнения, загрязнения и разрушения окрасочного слоя;

4) перильное ограждение – металлическое с деревянными поручнями, с окраской масляными составами: на отдельных участках отсутствуют деревянные поручни; имеются локальные потемнения, загрязнения, частичное разрушение окрасочного слоя и поверхности древесины поручней; имеются потемнения, загрязнения и частичное разрушение окрасочного слоя металлического перильного ограждения; часть металлического перильного ограждения лестничного марша между входной площадкой и площадкой первого этажа отсутствует;

5) оконные блоки – деревянные с окраской масляными составами: отсутствуют отдельные створки оконных блоков; имеются потемнения, загрязнения и локальные разрушения окрасочного слоя оконных блоков; отдельные створки оконных блоков имеют остекление из нескольких стекол; отсутствуют приборы оконных блоков;

6) дверной блок между тамбуром и помещением подъезда – деревянный с окраской масляными составами, перегородка между тамбуром и помещением подъезда – деревянная с окраской водными (побелка) составами: имеются потемнения, загрязнения и локальные разрушения окрасочного слоя дверного блока; полотно деревянного дверного блока имеет не плотный притвор; имеются повреждения древесины отдельных элементов деревянного дверного блока; имеется стертость и частичное разрушение древесины порога деревянного дверного блока; имеется повреждение штукатурного слоя перегородки со стороны помещения тамбура;

7) элементы системы отопления с окраской масляными составами, металлические этажные распределительные щитки с окраской масляными составами и деревянные коммуникационные шкафы с окраской водными (побелка) составами, лестница и люк в чердачное помещение с окраской масляными составами, металлические групповые почтовые ящики с окраской масляными составами: имеются потемнения, загрязнения и частичное разрушение окрасочного слоя элементов на отдельных участках; отсутствуют запирающие устройства отдельных створок металлических групповых почтовых ящиков, металлического этажного распределительного щитка; отсутствуют отдельные элементы запирающих устройств створок отдельных деревянных коммуникационных шкафов; имеется деформация створок металлических отдельных этажных распределительных щитков; деревянные коммуникационные шкафы на площадках второго и пятого этажей не закреплены; расшатано шарнирное крепление створки деревянного коммуникационного шкафа на площадке второго этажа;

8) система освещения в помещении тамбура, линия системы электроснабжения квартиры на площадке первого этажа: имеются открытые участки линий освещения тамбура и линия системы электроснабжения квартиры на площадке первого этажа; отсутствует крышка распределительной электрической коробки на площадке первого этажа.

В подъезде №4:

1) побелка (верхняя часть стен в помещении подъезда и тамбура, откосы входного дверного проема, откосы оконных проемов, боковые поверхности лестничных маршей, потолки): имеются следы увлажнения, разводы, высолы и пятна коричневого цвета на поверхности окрасочного слоя на отдельных участках; имеются локальные отслоения и отпадения окрасочного слоя от основания; массовые потемнения и загрязнения окрасочного слоя;

2) окраска масляными составами (нижняя часть стен в помещении подъезда и тамбура): на поверхности окрасочного слоя имеются потемнения и загрязнения, локальные отслоения и отпадения окрасочного слоя от основания;

3) полы:

на входной площадке и в тамбуре – бетонные, с окраской масляными составами по части периметра помещения: имеются неровности и разрушения бетонной поверхности пола, выбоины; имеются потемнения, загрязнения и разрушения окрасочного слоя;

- на промежуточной площадке 1-2 и площадках первого и второго этажей – бетонные, с окраской масляными составами: имеется стирание поверхности в ходовых местах, отдельные мелкие выбоины, сколы и волосные трещины в бетонной поверхности пола; имеются потемнения, загрязнения и разрушения окрасочного слоя;

- на промежуточных площадках 2-3, 3-4, 4-5 и площадках третьего, четвертого и пятого этажей – бетонные: имеется стирание поверхности в ходовых местах, отдельные мелкие выбоины, сколы и волосные трещины в бетонной поверхности пола;

- на лестничных маршах между входной площадкой и площадкой 1-го этажа, между площадкой 1-го этажа и площадкой 2-го этажа – бетонные ступени с окраской масляными составами по боковым сторонам ходовой поверхности и с окраской масляными составами подступенков: имеются стирания ходовой поверхности, сколы и локальные разрушения бетона отдельных ступеней; имеются потемнения, загрязнения и разрушения окрасочного слоя;

- на лестничном марше между площадкой 2-го этажа и промежуточной площадкой 2-3 – бетонные ступени с окраской масляными составами ходовой поверхности и подступенков по боковым сторонам: имеются сколы и локальные разрушения бетона отдельных ступеней; имеются потемнения, загрязнения и разрушения окрасочного слоя;

- на лестничных маршах между промежуточной площадкой 2-3 и площадкой 5-го этажа – бетонные ступени: имеются стирания ходовой поверхности, сколы и локальные разрушения бетона отдельных ступеней;

4) перильное ограждение – металлическое с деревянными поручнями, с окраской масляными составами: на отдельных участках отсутствуют деревянные поручни; имеются локальные потемнения, загрязнения, частичное разрушение окрасочного слоя и поверхности древесины поручней; имеются потемнения, загрязнения и частичное разрушение окрасочного слоя металлического перильного ограждения; часть металлического перильного ограждения лестничного марша между входной площадкой и площадкой первого этажа отсутствует;

5) оконные блоки – из поливинилхлоридных профилей: отсутствует ручка распашной створки на промежуточной площадке 4-5;

6) дверной блок между тамбуром и помещением подъезда – деревянный с окраской масляными составами, перегородка между тамбуром и помещением подъезда – деревянная с окраской водными (побелка) составами: имеются потемнения, загрязнения и локальные разрушения окрасочного слоя дверного блока; полотно деревянного дверного блока имеет не плотный притвор; имеются повреждения древесины деревянного дверного блока (отверстие в полотне); имеется стертость и частичное разрушение древесины порога деревянного дверного блока; имеются щели в перегородке между тамбуром и помещением подъезда;

7) элементы системы отопления с окраской масляными составами, металлические этажные распределительные щитки и деревянные коммуникационные шкафы с окраской масляными составами, металлические групповые почтовые ящики с окраской масляными составами: имеются потемнения, загрязнения и частичное разрушение окрасочного слоя элементов на отдельных участках; отсутствуют запирающие устройства отдельных створок металлических групповых почтовых ящиков, металлического этажного распределительного щитка; имеется деформация отдельных створок металлических этажных распределительных щитков и отдельных деревянных коммуникационных шкафов; не закреплены отдельные деревянные коммуникационные шкафы;

8) система освещения в помещении тамбура, линии питания квартир, магистраль системы электроснабжения: имеются открытые участки линий освещения тамбура, линий питания квартир и магистрали системы электроснабжения; имеется разрушение выключателя системы освещения в помещении тамбура.

Объем и виды подлежащих выполнению ремонтно-строительных работ определены на стр. 54-71 экспертного заключения №1983/19 от 18.03.2020.

Анализом данных, полученных в ходе проведения экспертного осмотра и данных, содержащихся в нормативно-технической документации, установлено, что ремонтные работы по устранению выявленных дефектов и повреждений в помещении указанных подъездов относятся к текущему ремонту.

Экспертное заключение соответствуют предъявляемым к нему законом требованиям, эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Сторонами спора указанное заключение эксперта не оспаривалось, доказательств, опровергающих выводы эксперта, либо вызывающих сомнение в их правильности или обоснованности, суду представлено не было. 

Поскольку услуги и работы по обслуживанию мест общего пользования, являющиеся предметом данного иска, отнесены к услугам по содержанию общего имущества многоквартирного дома, то плата за данные услуги должна производиться за счет средств, вносимых собственниками (нанимателями) в счет платы на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома. 

Управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором (пункт 42 Правил содержания общего имущества). 

При таких обстоятельствах, суд находит исковые требования об обязании произвести текущий ремонт подъездов № 1, 2, 4 жилого ... в ... подлежащими удовлетворению. 

В силу ч.2 ст.206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд полагает необходимым установить срок для выполнения ремонтных работ в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Поскольку судом установлено нарушение ответчиком прав истцов как потребителей, то с указанного ответчика в пользу истцов ФИО1, ФИО2, ФИО3 в соответствии со ст.151 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и разъяснений, содержащихся в п.45 Постановления Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» подлежит взысканию компенсация морального вреда. 

Учитывая обстоятельства дела, представленные доказательства характера и степени причиненных истцам нравственных страданий, обстоятельств причинения вреда, степень вины нарушителя, с учетом требований разумности и справедливости, определяя размер компенсации морального вреда, суд полагает возможным взыскать с ООО «УК «Светлова» в пользу каждого из истцов компенсацию морального вреда в размере по 200 рублей. Оснований для взыскания компенсации морального вреда в ином размере, в том числе в размере указанном истцом 1000 руб. суд в отсутствие достаточных доказательств не усматривает.

Согласно пункту 6 статьи 13 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и разъяснений содержащихся в п.п. 46, 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду. 

Обстоятельств, позволяющих освободить ответчика от оплаты штрафа, по вышеуказанным основаниям, в материалах дела не имеется. Таким образом, удовлетворение исковых требований истца в части компенсации морального вреда, безусловно, влечет наложение на ответчика штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя. Размер штрафа, исходя из присужденной судом денежной суммы, составляет 50 руб., который подлежит взысканию с ответчика в пользу каждого из истцов, а также в пользу АКОО «АЗПП «Сутяжник». 

Согласно ст. 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии со ст. 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на оплату услуг представителей; другие признанные судом необходимыми расходы.

В ходе рассмотрения по делу судом было назначено проведение судебной строительно-технической экспертизы, производство которой поручено ООО «Лаборатория судебной строительно-технической экспертизы», с возложением оплаты на ООО «УК «Светлова».

Экспертное заключение составлено и направлено в суд. Однако, оплата за производство экспертизы произведена не была. Стоимость экспертизы согласно представленного в материалы дела расчета составляет 48 000 руб.

На основании ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с ответчика ООО «УК «Светлова» в пользу ООО «Лаборатория судебной строительно-технической экспертизы» подлежат взысканию расходы по оплате за производство экспертизы в размере 48 000 руб.

В соответствии с частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом статей 333.19, 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации, с ответчика в доход бюджета Муниципального образования ... края подлежит взысканию государственная пошлина за подачу иска в сумме 300 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Алтайской краевой общественной организации «Агентство по защите прав потребителей «Сутяжник» в интересах ФИО1, ФИО2, ФИО3 к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Светлова» о защите прав потребителей - возложении обязанности произвести текущий ремонт подъездов, удовлетворить частично.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Светлова» произвести текущий ремонт подъездов №1, 2, 4 многоквартирного ..., в ... края, в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, выполнив следующие ремонтностроительные работы: в подъезде №1 входной тамбур: демонтаж проводки линий освещения тамбура, выполненной открытым способом; восстановление проводки линий освещения тамбура скрытой прокладкой в штробе стены; восстановление штукатурного слоя в местах пробивки штробы; локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; замена порога деревянного дверного блока; перенавеска полотна дверного блока с устранением неплотного притвора; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка), верхнего откоса входного дверного проема (побелка) и потолка (побелка); окраска масляными составами деревянного дверного блока между тамбуром и помещением подъезда с подготовкой окрашиваемой поверхности;

входная площадка и лестничный марш между тамбуром и площадкой 1-го этажа: локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша; восстановление вертикальных элементов металлического перильного ограждения лестничного марша; подготовка оснований стен и потолков с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен, отдельной стены входной площадки) и потолков (побелка); окраска масляными составами элементов системы отопления с подготовкой окрашиваемой поверхности; устройство отсутствующего участка металлического перильного ограждения с деревянным поручнем; окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами подступенков и ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 1-го этажа: установка запирающего устройства створки деревянного коммуникационного шкафа; устранение деформаций створки металлического этажного распределительного щитка; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами металлического этажного распределительного щитка с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска водными (побелка) составами деревянного коммуникационного шкафа с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами металлических групповых почтовых ящиков с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами бетонной поверхности пола по части периметра помещения с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 1-го этажа и промежуточной площадкой (1-2): локальная заделка выбоин бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен и боковых поверхностей лестничного марша) и потолка (побелка); окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами подступенков и ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (1-2): локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; установка отсутствующих створок оконных блоков с остеклением листовым стеклом; установка приборов нижнего оконного блока; установка запирающих устройств отдельных створок металлических групповых почтовых ящиков; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка); окраска масляными составами деревянных оконных блоков с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами металлических групповых почтовых ящиков с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами бетонной поверхности пола по части периметра помещения с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между промежуточной площадкой (1-2) и площадкой 2-го этажа: локальная заделка выбоин бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен и боковой поверхности лестничного марша) и потолка (побелка); окраска масляными составами подступенков и ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 2-го этажа: локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; установка запирающего устройства створки деревянного коммуникационного шкафа; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окрас-ка масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами металлического этажного распределительного щитка с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска водными (побелка) составами деревянного коммуникационного шкафа с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами бетонной поверхности пола по части периметра помещения с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 2-го этажа и промежуточной площадкой (2-3): локальная заделка выбоин бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен и боковой поверхности лестничного марша) и потолка (побелка); окраска масляными составами подступенков и ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (2-3): локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; установка отсутствующих створок оконных блоков с остеклением листовым стеклом; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка); окраска масляными составами деревянных оконных блоков с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами бетонной поверхности пола по части периметра помещения с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между промежуточной площадкой (2-3) и площадкой 3-го этажа: локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен и боковой поверхности лестничного марша) и потолка (побелка); окраска масляными составами подступенков и ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 3-го этажа: локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; установка запирающего устройства створки деревянного коммуникационного шкафа; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами металлического этажного распределительного щитка с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска водными (побелка) составами деревянного коммуникационного шкафа с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами бетонной поверхности пола по части периметра помещения с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 3-го этажа и промежуточной площадкой (3-4): локальная заделка выбоин бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен и боковой поверхности лестничного марша) и потолка (побелка); окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами подступенков и ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (3-4): локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; установка отсутствующих створок оконных блоков с остеклением листовым стеклом; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка); окраска масляными составами деревянных оконных блоков с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами бетонной поверхности пола по части периметра помещения с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между промежуточной площадкой (3-4) и площадкой 4-го этажа: локальная заделка выбоин бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен и боковой поверхности лестничного марша) и потолка (побелка); окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами подступенков и ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 4-го этажа: локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; установка запирающего устройства створки деревянного коммуникационного шкафа; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами металлического этажного распределительного щитка с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска водными (побелка) составами деревянного коммуникационного шкафа с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами бетонной поверхности пола по части периметра помещения с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между площадкой 4-го этажа и промежуточной площадкой (4-5): локальная заделка выбоин бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен и боковой поверхности лестничного марша) и потолка (побелка); окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами бетонной поверхности ступеней лестничного марша;

промежуточная площадка (4-5): железнение бетонной поверхности пола; установка отсутствующих створок оконных блоков с остеклением листовым стеклом; установка приборов верхнего оконного блока; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев, протравкой потолка в местах наличия следов замачивания и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка); окраска масляными составами деревянных оконных блоков с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами бетонной поверхности пола с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между промежуточной площадкой (4-5) и площадкой 5-го этажа: локальная заделка выбоин бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша; восстановление вертикальных элементов металлического перильного ограждения лестничного марша; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами бетонной поверхности ступеней лестничного марша;

площадка 5-го этажа: локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; установка запирающего устройства створки деревянного коммуникационного шкафа; восстановление запирающего устройства створки деревянного коммуникационного шкафа; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами металлического этажного распределительного щитка с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска водными (побелка) составами деревянного коммуникационного шкафа с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами бетонной поверхности пола с предварительной подготовкой поверхности;

в подъезде №2 входной тамбур: демонтаж проводки линий освещения тамбура, выполненной открытым способом; восстановление проводки линий освещения тамбура скрытой прокладкой в штробе стены; восстановление штукатурного слоя в местах пробивки штробы; локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; восстановление штукатурного слоя деревянной перегородки со стороны помещения тамбура; замена порога деревянного дверного блока; перенавеска полотна дверного блока с устранением неплотного притвора; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка), откосов входного дверного проема (побелка) и потолка (побелка); окраска масляными составами деревянного дверного блока между тамбуром и помещением подъезда с подготовкой окрашиваемой поверхности;

входная площадка и лестничный марш между тамбуром и площадкой 1-го этажа: локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша; подготовка оснований стен и потолков с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен, отдельной стены входной площадки) и потолков (побелка); окраска масляными составами элементов системы отопления с подготовкой окрашиваемой поверхности; устройство отсутствующего участка металлического перильного ограждения с деревянным поручнем; окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 1-го этажа: демонтаж проводки линии питания квартиры, выполненной открытым способом; восстановление проводки линии питания квартиры скрытой прокладкой в штробе стены; восстановление штукатурного слоя в местах пробивки штробы; устранение деформаций створки металлического этажного распределительного щитка; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; установка крышки распределительной электрической коробки; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами металлического этажного распределительно-го щитка с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска водными (побелка) составами деревянного коммуникационного шкафа с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между площадкой 1-го этажа и промежуточной площадкой (1-2): подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен и боковых поверхностей лестничного марша) и потолка (побелка); замена участка деревянного поручня, имеющего повреждения древесины; окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) и подступенков с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (1-2): железнение бетонной поверхности пола; установка отсутствующих створок оконных блоков с остеклением листовым стеклом; установка приборов верхнего оконного блока; установка запирающих устройств отдельных створок металлических групповых почтовых ящиков; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка); окраска масляными составами деревянных оконных блоков с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами металлических групповых почтовых ящиков с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между промежуточной площадкой (1-2) и площадкой 2-го этажа: локальная заделка выбоин бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен и боковой поверхности лестничного марша) и потолка (побелка); окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) и подступенков с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 2-го этажа: локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; установка запирающего устройства створки деревянного коммуникационного шкафа; закрепление коробки и перенавеска створки деревянного коммуникационного шкафа; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окрас-ка масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами металлического этажного распределительного щитка с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска водными (побелка) составами деревянного коммуникационного шкафа с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами бетонной поверхности пола с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между площадкой 2-го этажа и промежуточной площадкой (2-3): восстановление деревянного поручня перильного ограждения на отдельном участке; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен и боковой поверхности лестничного марша) и потолка (побелка); окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) и подступенков с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (2-3): локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; установка отсутствующих створок оконных блоков с остеклением листовым стеклом; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка); окраска масляными составами деревянных оконных блоков с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами бетонной поверхности пола по части пери метра помещения с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между промежуточной площадкой (2-3) и площадкой 3-го этажа: подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен и боковой поверхности лестничного марша) и потолка (побелка); окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) и подступенков с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 3-го этажа: локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; закрепление деревянного коммуникационного шкафа к стене; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев, протравкой потолка в местах наличия следов замачивания и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами металлического этажного распределительного щитка с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска водными (побелка) составами деревянного коммуникационного шкафа с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами бетонной поверхности пола с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между площадкой 3-го этажа и промежуточной площадкой (3-4): локальная заделка выбоин бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен и боковой поверхности лестничного марша) и потолка (побелка); окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) и подступенков с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (3-4): локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; установка отсутствующих створок оконных блоков с остеклением листовым стеклом; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка); окраска масляными составами деревянных оконных блоков с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами бетонной поверхности пола по части периметра помещения с предварительной подготовкой поверхности;

лестничный марш между промежуточной площадкой (3-4) и площадкой 4-го этажа: локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен и боковой поверхности лестничного марша) и потолка (побелка); окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) и подступенков с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 4-го этажа: локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; установка запирающего устройства створки деревянного коммуникационного шкафа; закрепление деревянного коммуникационного шкафа к стене; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами металлического этажного распределительного щитка с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска водными (побелка) составами деревянного коммуникационного шкафа с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между площадкой 4-го этажа и промежуточной площадкой (4-5): подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен и боковой поверхности лестничного марша) и потолка (побелка); окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша и подступенков с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (4-5): локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; установка отсутствующих створок оконных блоков с остеклением листовым стеклом, замена остекления створок из нескольких стекол на цельное листовое стекло; установка приборов верхнего оконного блока; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев, протравкой стен и потолка в местах наличия следов замачивания и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка); окраска масляными составами деревянных оконных блоков с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами бетонной поверхности пола с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между промежуточной площадкой (4-5) и площадкой 5-го этажа: подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев, протравкой стен и потолка в местах наличия следов замачивания и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша и подступенков с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 5-го этажа: локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; закрепление деревянного коммуникационного шкафа к стене; устранение деформаций створки металлического этажного распределительного щитка; установка запирающего устройства створки металлического этажного распределительного щитка; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев, протравкой стен и потолка в местах наличия следов замачивания и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами металлического этажного распределительного щитка с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска водными (побелка) составами деревянного коммуникационного шкафа с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами лестницы и люка в чердачное помещение с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами бетонной поверхности пола с подготовкой окрашиваемой поверхности;

в подъезде №4 входной тамбур: демонтаж проводки линий освещения тамбура, выполненной открытым способом; восстановление проводки линий освещения тамбура скрытой прокладкой в штробе стены; восстановление штукатурного слоя в местах пробивки штробы; локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; ремонт деревянной перегородки между тамбуром и помещением подъезда с устранением щелей; замена порога деревянного дверного блока; замена отдельного элемента деревянного дверного блока, имеющего повреждения древесины (отверстие); замена выключателя системы освещения тамбура; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка), откосов входного дверного проема (побелка) и потолка (побелка); перенавеска полотна деревянного дверного блока с устранением неплотного притвора; окраска масляными составами деревянного дверного блока между тамбуром и помещением подъезда с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами бетонной поверхности пола с подготовкой окрашиваемой поверхности;

входная площадка и лестничный марш между тамбуром и площадкой 1-го этажа: локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша; устройство отсутствующего участка металлического перильного ограждения с деревянным поручнем; восстановление деревянного поручня перильного ограждения; подготовка оснований стен и потолков с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка); окраска масляными составами элементов системы отопления с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами подступенков и ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами бетонной поверхности пола с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 1-го этажа: демонтаж проводки линий питания квартиры, выполненной открытым способом; восстановление проводки линий питания квартиры скрытой прокладкой в штробе стены; восстановление штукатурного слоя в местах пробивки штробы; локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами металлического этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами бетонной поверхности пола с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между площадкой 1-го этажа и промежуточной площадкой (1-2): локальная заделка выбоин бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковых поверхностей лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) и подступенков с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (1-2): локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; установка запирающих устройств отдельных створок металлических групповых почтовых ящиков; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, откосов оконных проемов, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка); окраска масляными составами металлических групповых почтовых ящиков с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами бетонной поверхности пола с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между промежуточной площадкой (1-2) и площадкой 2-го этажа: локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен и боковой поверхности лестничного марша) и потолка (побелка); окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) и подступенков с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 2-го этажа: локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; устранение деформаций створки металлического этажного распределительного щитка; закрепление деревянного коммуникационного шкафа к стене; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами металлического этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами бетонной поверхности пола с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между площадкой 2-го этажа и промежуточной площадкой (2-3): локальная заделка выбоин бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша и подступенков (по боковым сторонам) с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (2-3): железнение бетонной поверхности пола; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев;

восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и откосов оконных проемов, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

лестничный марш между промежуточной площадкой (2-3) и площадкой 3-го этажа: локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 3-го этажа: локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; устранение деформаций створок металлического этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев;

восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка);

окраска масляными составами металлического этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между площадкой 3-го этажа и промежуточной площадкой (3-4): подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (3-4): локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и откосов оконных проемов, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка);

лестничный марш между промежуточной площадкой (3-4) и площадкой 4-го этажа: подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 4-го этажа: локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев, протравкой стен и потолка в местах наличия следов замачивания и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами металлического этажного распределительно-го щитка и деревянного коммуникационного шкафа с подготовкой окрашиваемой поверхности;

лестничный марш между площадкой 4-го этажа и промежуточной площадкой (4-5): локальная заделка выбоин бетонной поверхности отдельных ступеней лестничного марша; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев, протравкой стен и потолка в местах наличия следов замачивания и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и боковой поверхности лестничного марша, окраска масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

промежуточная площадка (4-5): локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев, протравкой стен и потолка в местах наличия следов замачивания и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и откосов оконных проемов, окраска масляными составами нижней части стен) и потолков (побелка); установка ручки распашной створки верхнего оконного блока;

лестничный марш между промежуточной площадкой (4-5) и площадкой 5-го этажа: подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности;

площадка 5-го этажа: локальная заделка выбоин и железнение бетонной поверхности пола; установка запирающего устройства створки металлического этажного распределительного щитка; восстановление деревянного поручня перильного ограждения на отдельном участке; подготовка оснований стен и потолка с расчисткой отстающих отделочных слоев, протравкой стен и потолка в местах наличия следов замачивания и восстановлением штукатурного слоя на поврежденных участках; восстановление окрасочного слоя стен (побелка верхней части стен, окраска масляными составами нижней части стен) и потолка (побелка); окраска масляными составами металлического этажного распределительного щитка и деревянного коммуникационного шкафа с подготовкой окрашиваемой поверхности; окраска масляными составами деревянного поручня и металлического перильного ограждения с подготовкой окрашиваемой поверхности.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Светлова» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 200 рублей, штраф в размере 50 рублей, всего взыскать 250 рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Светлова» в пользу ФИО2 компенсацию морального вреда в размере 200 рублей, штраф в размере 50 рублей, всего взыскать 250 рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Светлова» в пользу ФИО3 компенсацию морального вреда в размере 200 рублей, штраф в размере 50 рублей, всего взыскать 250 рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Светлова» в пользу Алтайской краевой общественной организации «Агентство по защите прав потребителей «Сутяжник» штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в сумме 150 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований Алтайской краевой общественной организации «Агентство по защите прав потребителей «Сутяжник» в интересах ФИО1, ФИО2, ФИО3 отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Светлова» в пользу ООО «Лаборатория судебной строительно-технической экспертизы» расходы за проведение судебной строительно-технической экспертизы в размере 48 000 рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Светлова» в доход бюджета муниципального образования ... края государственную пошлину в сумме 300 руб.

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Рубцовский городской суд Алтайского края.

Председательствующий Е.В.Хоченова