Дело № 2-4456/17

РЕШЕНИЕ

Именем российской Федерации

24 августа 2017 года

Свердловский районный суд г.Красноярска в составе:

Председательствующего судьи Богдевич Н.В.

при секретаре Волчек Ю.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

ФИО2 к ООО «Зодчий» о взыскании неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства, убытков, компенсации морального вреда, штрафа в порядке Закона РФ «О защите прав потребителей», 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с вышеуказанным иском. Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зодчий» и ООО «ПромИнвест» был заключен договор о долевом участии в строительстве жилого 

<

адрес> квартале жилых домов в 1Х микрорайоне «Пашенный» в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПромИнвест» переуступило право требования по договору долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СТС-Красноярск», а ООО «СТС-Красноярск» по договору переуступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ уступило право требования истцу ФИО1, 

<

адрес> расположенный по адресу: 

<

адрес> от Застройщика ООО «Зодчий». По данному договору ООО «Зодчий» принял на себя обязательства в предусмотренный договором срок передать истцу на праве собственности двухкомнатную 

<

адрес>, расположенную на 12 этаже жилого 

<

адрес>. В соответствии с договором срок передачи квартиры – ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Зодчий» нарушил срок передачи объекта участнику долевого строительства - истцу, уведомление о необходимости принятия квартиры по акту приема-передачи от него не поступало, акт приема-передачи был подписан сторонами ДД.ММ.ГГГГ, фактически квартира была передана истцу – ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ответчик нарушил срок передачи объекта с собственность участнику долевого строительства, в связи с чем, обращаясь в суд за восстановлением своего нарушенного права, истец просит взыскать с ответчика в свою пользу неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 361 904,40 рублей, компенсацию морального вреда 50 000 рублей, убытки, связанные с расходами истца на наем жилого помещения в размере 97 550 рублей, штраф, юридические услуги 5 000 рублей. 

Представитель истца – ФИО5 по доверенности в судебном заседании требования поддержала в полном объеме. Дала суду пояснения по существу иска, просила дополнительно взыскать расходы по оформлению доверенности в 1500 рублей..

Истец – ФИО1 в судебное заседание не явилась, суд о причинах неявки не уведомила, доверила представительство своих интересов своему представителю.

Представитель ответчика ФИО6 по доверенности в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований по существу исковых требований, в случае удовлетворения исковых требований просил применить положения ст. 333 ГК РФ в отношении неустойки и штрафа, снизить размер компенсации морального вреда.

Третьи лица – ООО «Горизонт», ООО «Колизей Инвест Холдинг» - в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания были извещены надлежащим образом и своевременно, о причинах неявки суду не сообщили.

Дело рассмотрено судом в порядке ст. 167 ГПК РФ в отсутствие неявившихся участников процесса.

Заслушав участников процесса, исследовав доказательства по делу, суд приходит к выводу, о частичном удовлетворении требований по следующим основаниям.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. При этом, в силу ст. 310 ГК РФ, не допускается одностороннего отказа от исполнения обязательства.

Исходя из ст.6 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» за № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере. В случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии со ст. 8 указанного ФЗ РФ, передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства осуществляется по подписанным сторонами передаточному акту или иному документу о передаче (ч.1). Застройщик не менее, чем за месяц до наступления установленного договором срока передачи объекта долевого строительства или в случае, если договором предусмотрен срок начала передачи и принятия объекта долевого строительства, не менее чем за 14 рабочих дней до наступления срока начала передачи и принятия обязан направить участнику долевого строительства сообщение о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче. Сообщение должно быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по указанному участником долевого строительства почтовому адресу или вручено участнику долевого строительства лично под расписку. При этом срок начала передачи и принятия объекта долевого строительства не может быть установлен ранее, чем за 14 дней и позднее, чем за один месяц до установленного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства (ч.4).

Как установлено в судебном заседании и усматривается из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зодчий» (Застройщик) и ООО «ПромИнвест» был заключен договор о долевом участии в строительстве «Многоэтажного жилого 

<

адрес> ( 2 этап), в квартале жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями социально-бытового и торгового назначения в микрорайоне «Пашенный» в 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПромИнвест» и ООО «СТС-Красноярск» был заключен договор уступки права требования по договору от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СТС-Красноярск» был заключен уступки права требований № с истцом ФИО1 по договору долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ.

Расчет за приобретаемую квартиру истцом был произведен полностью, что подтверждается справкой ООО «СТС-Красноярск» от ДД.ММ.ГГГГ, документы приобщены к делу.

В соответствии с п.1.4 договор о долевом участии в строительстве жилого 

<

адрес> квартале жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями социально-бытового и торгового назначения в микрорайоне «пашенный» в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Застройщик обязан в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ передать участнику долевого строительства квартиру по акту приема –передачи.

Таким образом, все права и обязанности участника, предусмотренные договором долевого участия в отношении вышеуказанного жилого помещения, переходят к приобретателю права с момента государственной регистрации договора уступки прав требования.

Судом установлено, что право требования исполнения ответчиком обязательств по договору об участии в долевом строительстве перешло к истцу в соответствии с приведенными нормами Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Также в судебном заседании установлено, что застройщик в указанный срок не сдал жилой дом.

Акт приема-передачи объекта долевого строительства – 

<

адрес>Д в 

<

адрес> между сторонами подписан ДД.ММ.ГГГГ ( приобщен к делу), фактически квартира была передана истцу – ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается соглашением сторон (л.д.27), сторонами не оспорено и установлено судом.

При установленных обстоятельствах, суд при разрешении настоящего спора приходит к выводу, что ООО "Зодчий" несвоевременно исполнило принятые на себя обязательства по передачи объекта участнику долевого строительства ФИО1 в связи с чем, требования истца о взыскании неустойки обоснованы.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 9 указанного ФЗ, участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора в случае неисполнения застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства в срок, превышающий установленный договором срок передачи такого объекта на два месяца.

Пунктом 3 статьи 401 ГК установлено, что, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств

В материалах дела отсутствуют доказательства наличия обстоятельств, являющихся по смыслу указанной выше правовой нормы чрезвычайными и непредотвратимыми, которые могут служить основанием для освобождения ответчика от ответственности за нарушения срока передаче истцу объекта долевого строительства, которое им фактически было признано и денежные средства были возвращены участку.

Статья 330 ГК РФ признает неустойкой определенную законом или договором денежную сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Согласно части первой статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или договорной.

Ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера неустойки с применением ст. 333 ГК РФ, полагая указанный размер не соответствующим последствиям нарушения обязательств. Суд, принимая во внимание ходатайство ответчика, с учетом положений ст. 333 ГК РФ, приходит к выводу о снижении размера неустойки.

Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ именно законодатель устанавливает основания и пределы необходимых ограничений прав и свобод гражданина в целях защиты прав и законных интересов других лиц.

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

При таких обстоятельствах, исходя из требований ст.ст. 17, 55 Конституции России, соблюдения баланса прав и интересов сторон, а также баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, исходя из принципа разумности и соразмерности неустойки в размере 361 904,40 рублей, заявленного истцом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Суд полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства с применением ст. 333 ГК РФ в размере 80 000 рублей.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

При таких обстоятельствах, с учетом принципа разумности и справедливости, степени нравственных страданий истца, суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 2 000 рублей. 

В соответствии с положениями п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку судом установлено, что требования истца не были ответчиком добровольно удовлетворены, то с ответчика подлежит взысканию штраф на основании п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей".

При таких обстоятельствах с ответчика в пользу потребителя подлежит взысканию штраф, с учетом ходатайства стороны ответчика о применении ст.333 ГК РФ, судом определяется ко взысканию с ответчика штраф в размере 5 000 рублей. 

В соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка (штраф) явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

С учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в пункте 2 Определения N 263-0 от ДД.ММ.ГГГГ, положения п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба.

Заявленные истцом требования о взыскании убытков в размере 97 550 рублей. связанные с необходимостью найма жилого помещения за период семь месяцев из расчета 13 935,871 рублей ежемесячно, удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

В обоснование данных требований истцом представлен договор аренды жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> ул. 

<

адрес>,12-14 (л.д. 35-36), из которого следует, что договор аренды заключен с ДД.ММ.ГГГГ на один год (п.7 договора), арендная плата 13 000 рублей ежемесячно, коммунальные платежи оплачивает арендодатель.

При этом истцом доказательств суду несения расходов по вине ответчика в период нарушения сроков передачи истцу объекта долевого строительствам по оплате за аренду данного жилого помещения суду не представлено, доказательств внесения арендной платы не установлено судом при рассмотрении спор. Кроме того, согласно паспорта истца (л.д.4-5), ФИО1 имеет регистрацию по месту жительства с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>141. 

В силу ст.15 ГК РФ, истцом доказательств несения убытков – расходов по аренде жилого помещения по вине ответчика, а также доказательств необходимости аренды жилого помещения, в связи с нарушением сроков передачи объекта долевого строительства со стороны ответчика, суду не представлено в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ. Также суд учитывает, что истица в период нарушения ее прав со стороны ответчика имела право пользования на иное жилое помещение, где зарегистрирована по месту жительства в 

<

адрес>. 

Кроме того, в порядке ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы в размере 5 000 рублей, заявленные истцом, с учетом категории сложности дела, принципа разумности и достаточности, объема выполненной работы представителем. Несение данных расходов подтверждается письменными материалами дела (л.д.41). расходы истца по оформление доверенности на представителя в размере 1500 рублей возмещению не подлежат, поскольку доверенность выдана общая, не связана с представлением интересов истца по данному спору.

В соответствии ст.103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию гос.пошлина в доход местного бюджета в размере 7 119,04 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь, ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 к ООО «Зодчий» о взыскании неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства, убытков, компенсации морального вреда, штрафа в порядке Закона РФ «О защите прав потребителей», - удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Зодчий» в пользу ФИО2 неустойку в размере 80 000 рублей, в счет компенсации морального вреда 2 000 рублей, судебные расходы в размере 5 000 рублей, штраф в размере 5000 рублей.

В части требований ФИО2 к ООО «Зодчий» о взыскании убытков - отказать. 

Взыскать с ООО «Зодчий» в доход местного бюджета г.Красноярска государственную пошлину в размере 7 119,04 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Свердловский районный суд г. Красноярска в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме, с 31 августа 2017 года. 

Судья Богдевич Н.В.