Гр. дело №2-546/2018

Р Е Ш Е Н И Е

 

Именем Российской Федерации 

16 мая 2018 года п.Ува 

Увинский районный суд Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Лобанова Е.В.,

при секретаре Пантюхиной И.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 обратился в суд с иском о взыскании с ФИО2 денежных средств в размере *** рублей, мотивируя свои требования следующим.

*** ответчиком (подрядчиком) была составлена расписка о получении денежных средств в размере *** рублей на выполнение работ по изготовлению и монтажу лестничного марша по адресу: ***. Срок окончания работ установлен до ***. Ответчик нарушил срок выполнения работ на 1 год 7 месяцев.

В силу п.2 ст.715 Гражданского кодекса российской федерации (далее – ГК РФ), если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В судебном заседании истец ФИО1 свои требования поддержал в полном объеме, пояснил, что к установленному договором подряда сроку ответчик работу не выполнил, полученные денежные средства не возвратил.

В судебном заседании ответчик ФИО2 не участвовал, о месте и времени его проведения был извещен надлежащим образом, что подтверждается почтовым уведомлением о вручении судебной корреспонденции.

В соответствии со ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) дело рассмотрено без участия неявившегося в судебное заседание ответчика

Заслушав объяснения истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему 

Судом установлено, что *** ответчик ***2 выдал расписку, по условиям которой он обязуется сделать лестницу истцу ***1 в срок до ***. По указанной расписке ответчик ***2 получил от истца ***1 денежные средства в размере *** рублей в качестве предварительной оплаты изготовления лестницы, а также материалы: брусок березовый сушеный на сумму *** рублей, клей и саморезы на сумму *** рублей, доски (хвоя) на сумму *** рублей, анкеры на сумму *** рубля, всего получил денежных средств и материалов на общую сумму *** рубля.

Применительно к ст.ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно п.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п.1 ст.703 ГК РФ договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Положениями ст.708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Согласно п.1 ст.709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Таким образом, по мнению суда, представленной в материалы дела распиской сторонами были определены все существенные условия договора подряда: предмет договора (изготовление лестницы), срок начала (***) и окончания работ (***), цена договора (*** рублей). Кроме того, сторонами определена стоимость материалов, переданных истцом ответчику для изготовления лестницы.

В соответствии с п. 2 ст.715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 

В силу п.2 ст.405 ГК РФ, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

В связи с нарушением ответчиком условий договора об окончании работы к определенному сторонами сроку истцом в адрес ответчика была направлена претензия, в которой истец просил ответчика изготовить и смонтировать лестничный марш в срок до *** либо возвратить денежные средства в размере *** рубля в тот же срок. 

Тем самым истец в своей претензии обозначил, что в случае невыполнения ответчиком работы к новому сроку он отказывается от исполнения договора, требуя возврата денежных средств.

Данная претензия ответчиком получена ***, ответа на нее не поступило. 

Поскольку ответчик ***2 при рассмотрении дела не доказал факт выполнения либо частичного выполнения взятых на себя обязательств по изготовлению лестницы, а также факт полного либо частичного возврата полученных им от ***1 денежных средств и материалов, суд, руководствуясь принципами равноправия и состязательности сторон в гражданском процессе, ст.56 ГПК РФ, согласно которой каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом, находит исковые требования ***1 о взыскании денежных средств в размере *** рублей обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В силу ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Истцом при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в размере *** рублей, которые подлежат взысканию с ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст.194 – 199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Иск ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств удовлетворить. 

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 денежные средства в размере *** рублей, а также судебные расходы в размере *** рублей.

Решение может быть обжаловано сторонами в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение месяца со дня его вынесения через Увинский районный суд.

Дата изготовления решения в окончательной форме 21.05.2018 года.

Судья Е.В. Лобанов