Дело ...

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации 

04 июня 2024 года г.Улан-Удэ

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ в составе судьи Очировой Т.В., при секретаре Шмелёвой А.А., рассматривая в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО "Россети Сибирь" об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, 

УСТАНОВИЛ:

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец ФИО1, в лице своего представителя по доверенности ФИО4, с учетом уточнений просит обязать ПАО «Россети Сибирь» в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств, находящихся по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ..., в соответствии с условиями договора от 06.02.2019; взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в ее пользу в связи с неисполнением обязательств по договору неустойку в размере 11 985,66 руб., компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., штраф в размере 5 992,83 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 руб. 

Требования мотивированы тем, что 06.02.2019 между ней и ответчиком был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ........ Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения сельскохозяйственных построек, расположенных по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка .... В установленный договором срок ПАО «Россети Сибирь» свои обязательства не исполнило.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, извещена, направила заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие. 

В судебном заседании представитель истца ФИО4 исковые требования с учетом уточнений поддержал. 

Представитель ПАО «Россети Сибирь» ФИО2 в судебном заседании не отрицала факт неисполнения ПАО «Россети Сибирь» обязательств по договору, суду пояснила, что имеются существенные обстоятельства, препятствующие исполнению договора, а именно истек срок действия технических условий (далее ТУ) ... к договору ......., с заявлением о продлении истец не обращалась. ТУ является неотъемлемой частью договора на технологическое присоединение. Истечение срока действия технических условий прекращает их действие и создает невозможность удовлетворения требований истца в части обязания исполнить технические условия. Ранее направленный отзыв на исковое заявление поддержала. 

Заслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (п. 1 ст. 309 ГК РФ).

Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в статье 12 ГК РФ, а также иными способами, предусмотренными законом.

В силу абзаца восьмого статьи 12 ГК РФ одним из способов защиты является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, 06.02.2019 г. между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 был заключен договор ....... об осуществлении технологического присоединения, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учетом конкретных технических характеристик; заявитель обязалась оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

П.2 договора установлено, что технологическое присоединение необходимо для электроснабжения сельскохозяйственных построек, расположенных по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ...

Согласно п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора. В силу п.21 договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

В соответствии с п. 10 договора размер платы за технологическое присоединение составляет 13134,96 руб. Плата за технологическое присоединение внесена ФИО1 в установленном договором размере. 

Решением Закаменского районного суда Республики Бурятия от 06.11.2020 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до 01.08.2021.

Как установлено судом и не оспаривается стороной ответчика, до настоящего времени договор об осуществлении технологического присоединения ПАО «Россети Сибирь» не исполнен. 

При таких обстоятельствах исковые требования ФИО1 о понуждении ПАО «Россети Сибирь» к исполнению договора об осуществлении технологического присоединения признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Вопреки позиции стороны ответчика, истечение срока действия технических условий не является непреодолимым препятствием исполнения договора о технологическом присоединении, поскольку оно может быть устранено сторонами, соответственно, это обстоятельство не может приравниваться к обстоятельствам, прекращающим обязательство невозможностью исполнения. 

В соответствии с частью 2 статьи 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Таким образом, реализуя требования части 2 статьи 206 ГПК РФ, суд возлагает на ответчика обязанность в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу осуществить работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств.

Установленный судом срок для исполнения решения суда является разумным и обеспечивает соблюдение баланса интересов сторон. При этом суд также принимает во внимание дату заключения договора - 06.02.2019, срок исполнения мероприятий по договору и его продление.

Согласно п.17 договора сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 % процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки. 

Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты. 

Согласно заявленным исковым требованиям, истец просит взыскать неустойку в размере 11 985,66 руб., рассчитанную согласно договору ....... от ***

С учетом того, что суд пришел к выводу о нарушении ответчиком своих обязательств по договору, требования истца о взыскании неустойки подлежат удовлетворению в размере 11 985,65 руб. (13 134,96*0,25%*365 день= 11 985,65 руб.)

В ходе судебного разбирательства суду не были представлены доказательства несоразмерности заявленной к взысканию неустойки, в связи с чем, суд полагает ее подлежащей удовлетворению в полном объеме.

Требования истца о взыскании штрафа и компенсации морального вреда, основанные на положениях Закона РФ «О защите прав потребителей» не подлежат удовлетворению, поскольку рассматриваемые отношения сторон названным законом не регулируются, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения сельскохозяйственного производства. Земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ... относится к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства. 

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в пользу истца в размере 300 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>) в течение 1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО1, расположенных по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка ... в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ***. 

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 (...) неустойку в размере 11 985,65 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 300 руб. 

В остальной части исковые требования ФИО1 (...) оставить без удовлетворения. 

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляции в Верховный Суд Республики Бурятия в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, через Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ.

Решение в окончательной форме принято 11.06.2024.

Судья Т.В. Очирова 

...