Дело № 2-752/17

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об утверждении мирового соглашения

23 марта 2017 года город Ульяновск

Заволжский районный суд города Ульяновска в составе:

председательствующего судьи О.В. Миллер

при секретаре Ю.И. Лазаревой,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «ДАРС-Мобайл» о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства, компенсации морального вреда, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО к «ДАРС-Мобайл» о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства, компенсации морального вреда.

В обоснование иска указал, что 12 августа 2014 года заключил с ответчиком договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома 

<

адрес>, в соответствии с которым ответчик обязался осуществить строительство многоквартирного жилого дома, сдать в эксплуатацию и передать в собственность участнику после окончания строительства однокомнатную квартиру, общей площадью 25,8, кв.м., проектный номер №. Цена договора составила 1 111 400 руб. Срок сдачи дома в эксплуатацию – 28 февраля 2015г., срок передачи квартиры – не более 60 рабочих дней с 28.02.2015 года, т.е. 28.05.2015 года.

Свои обязательства по указанному договору истец исполнил в полном объеме, оплатил полностью стоимость квартиры. Ответчик же не выполнил принятые на себя обязательства по передаче квартиры в срок, установленный соглашением сторон – 28.05.2015. квартира была передана только 21.09.2015, что подтверждает актом приема-передачи объекта долевого строительства. 

Просят взыскать неустойку в размере 70 296 руб. 05 коп. за период с 29.05.2015 по 21.09.2015 года, компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб., расходы по оплате услуг представителя 4 000 рублей, штраф в размере 35 148 руб. 02 коп. 

В судебное заседание от представителя истца ФИО2 (доверенность от 03.02.2017) и представителя ответчика ООО «ДАРС-Мобайл» ФИО3 (доверенность №256 от 21.07.2016)., действующих в пределах своих полномочий, поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения, по условиям которого:

ООО «ДАРС-Мобайл» обязуется выплатить истцу ФИО1 в срок до 14.04.2017 года неустойку за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства в сумме 65 000 руб., компенсацию морального вреда 3 000 руб., расходы по оплате услуг представителя 4 000 руб., всего 72 000 рублей.

При данных обстоятельствах истец ФИО1 от остальных исковых требований к ООО «ДАРС-Мобайл» отказывается.

Просят суд мировое соглашение утвердить, а производство по делу прекратить.

Последствия, предусмотренные ст.221 ГПК РФ, а именно, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, сторонам разъяснены и понятны.

В соответствии с п.4 ст.220 ГПК РФ, суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

Обсудив заявленное ходатайство, суд полагает возможным утвердить мировое соглашение, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Руководствуясь ст.ст.34, 220, 221 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

По гражданскому делу по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «ДАРС-Мобайл» о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства, компенсации морального вреда утвердить мировое соглашение, по условиям которого: 

ООО «ДАРС-Мобайл» обязуется выплатить истцу ФИО1 в срок до 14.04.2017 года неустойку за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства в сумме 65 000 руб., компенсацию морального вреда 3 000 руб., расходы по оплате услуг представителя 4 000 руб., всего 72 000 рублей.

При данных обстоятельствах истец ФИО1 от остальных исковых требований к ООО «ДАРС-Мобайл» отказывается.

Производство по гражданскому делу прекратить в связи с утверждением мирового соглашения.

Разъяснить, что в соответствии по ст.221 ГПК РФ повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

На определение может быть подана частная жалоба в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд города Ульяновска в течение 15 дней.

Судья - О.В. Миллер