Дело № 2-349/2026 26 февраля 2026 года

УИД 78RS0018-01-2025-003039-56

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Покровской Ю.В.,

при секретаре Кокаревой Д.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» к ФИО1 об обязании исполнить условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки,

установил:

Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» в лице Новгородского филиала обратилось в Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга с иском к ФИО2 и просит обязать Ответчика в течение месяца с момента вступления решения в законную силу исполнить обязательства по договору от 17.08.2021 года № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанные в пункте 7, а именно: получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов и предоставить копию в сетевую организацию. Также просит взыскать с Ответчика неустойку в сумме 342 429 рублей 32 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 31061 рублей.

В обоснование заявленного требования указывает на то, что 14.07.2021 года от ФИО1 поступила заявка на заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям базы отдыха «Аленушка». 17.08.2021 года между ПАО «Россети Северо-Запад» и ФИО1 заключен договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее-Договор). В соответствии с п. 1.1 Договора, сетевая организация принимает на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ- 0,4 кВ в совокупности с питающей распределительной сетью объекта, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению электроустановок заявителя, урегулирования отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых электроустановок Заявителя составляет 410 кВт, максимальная мощность ранее присоединяемых электроустановок Заявителя составляет 250 кВт, максимальная мощность вновь присоединяемых электроустановок Заявителя составляет 160 кВт, категория надежности третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 10 кВ. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: База отдыха «Аленушка», расположенной по адресу: 

<

адрес>, Березовикское с/п, земельный участок с кадастровым номером №. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение. Пунктом 4 Договора установлено, что технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. Срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год с даты заключения Договора (п. 5 Договора). Пунктом 6 Договора установлено, что сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе не позднее 30 рабочих дней со дня уведомления Заявителем о получении разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока, установленного пунктом 5, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактически прием (подачу) напряжения и мощности, составить акт об осуществлении технологического присоединения и направить заявителю. Заявитель обязуется (п. 7 Договора) получить разрешение федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов (п. 14 Технических условий также установлена обязанность Заявителя получить разрешение и предоставить копию в сетевую организацию). После осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо предоставить мотивированный отказ от подписания в течение 3 рабочих дней со дня получения акта. В рамках исполнения Основного Договора, 17.11.2021 года между истцом и Ответчиком заключен Договор № об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям в отношении базы отдыха «Аленушка». Возможность осуществления временного технологического присоединения предусмотрена пунктом 2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, заключаемого на период осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения. Под постоянной схемой электроснабжения понимается схема электроснабжения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, осуществившего технологическое присоединение энергопринимающих устройств, которая применяется в результате исполнения договора. 03.11.2022 года Сетевая организация оказала ФИО1 услуги по временному технологическому присоединению энергопринимающих устройств для энергоснабжения базы отдыха «Аленушка», о чем составлен акт. Энергоснабжение по временной схеме должно осуществляться на срок до исполнения основного договора. Однако до настоящего времени обязанность Ответчика по исполнению Основного договора, не исполнена, в нарушение пункта 7 Договора № Ответчиком не получены и не представлены в сетевую организацию документы от федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору (Ростехнадзора), а именно разрешение на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов. В связи с чем у ПАО «Россети Северо-Запад» отсутствуют правовые основания для составления и подписания акта технологического присоединения, подтверждающего фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям. 31.05.2025 года Истец исполнил свои обязательства, предусмотренные техническими условиями по Основному договору № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, установил прибор учета электрической энергии «Миртек-135». Ответчику неоднократно направлялись претензионные письма о необходимости предоставить необходимые документы от Ростехнадзора. Однако до настоящего времени Ответчик свои обязательства не исполнил.

Представитель истца ПАО «Россети Северо-Запад», действующая на основании доверенности, ФИО3 в судебное заседание явилась, поддержала исковые требования по изложенным в иске основаниям.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен о дате, времени месте рассмотрения дела, доверил представлять свои интересы ФИО4, действующей на основании доверенности.

Представитель истца, действующая на основании доверенности, ФИО4 в судебное заседание явилась, просила в иске отказать. Указала на то, что согласно пункту 15 технических условий срок выполнения технических условий составляет 2 года со дня заключения договора, то есть до 17.08.2023 года. 03.11.2022 года между сторонами подписан акт об осуществлении временного технологического присоединения. 31.05.2023 года между сторонами подписан акт о выполнении технических условий, а также в этот же день осуществлялась проверка трансформаторных подстанций и счетчиков, после которой актом № от 31.05.2023 зафиксировано, что ведется коммерческий учет электроэнергии, счетчик находится на балансе ПО «БЭС», а также в заключении указано, что учет электроэнергии соответствует требованиям коммерческого (не временного) узла учета. Таким образом, с 31.05.2023 года на ТП 160 и ТП 250, расположенных на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществлялось постоянное подключение электрической энергии. ФИО2 заключен договор электроснабжения с гарантирующим поставщиком ООО «ТНС Энерго Тула» и ежемесячно осуществлялась плата за потребление электрической энергии. В пункте 14 Технических условий, выданных ПАО Россети к договору № от 19.07.2021 указано, что для присоединения по третьей категории надежности с мощностью от 150 до 670 кВт (в данном случае 250 и 160 кВт) разрешение уполномоченного органа не требуется. Данное условие соответствует подпункту «г» пункта 7 Правил технологического присоединения №, действовавших на момент заключения договора. Требование истца о предоставлении разрешения Ростехнадзора является неправомерным, поскольку Сетевая Организация сама исключила такую необходимость в своих же документах. Технические условия выполнены в полном объеме, что подтверждается пунктом 6 акта о выполнении технических условий №, который составлен представителями истца и подписан обеими сторонами 31.05.2023 года. На основании этого акта было осуществлено постоянное технологическое присоединение, которое действует по настоящее время. Следовательно, Ответчик исполнил свои обязательства в рамках договора. Истец, подписав акт о выполнении технических условий и осуществив временное подключение, фактически принял работу Ответчика и подтвердил выполнение тех.условий, а также готовность объекта к подключению. 26.08.2025 года на обеих ТП (ТП-160 и ТП-250) были заменены счетчики, что фиксировалось на видеорегистратор и никаких препятствий виде отсутствия разрешения территориального Ростехнадзора также не испрашивалось. Истец обязан был проверить наличие разрешения Ростехнадзора до подписания акта. Оснований для взыскания неустойки не имеется. Просит применить срок исковой давности, предусмотренный ч. 1 ст. 725 ГК РФ. Истец должен был знать о том, нарушено ли его право, с момента получения (приемки) Истцом результатов работ.

Изучив материалы дела и оценив в совокупности все добытые по делу доказательства, суд считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Порядок технологического присоединения регулируется нормами Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Правилами №.

В соответствии с пунктом 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Пункт 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861устанавливает следующую процедуру технологического присоединения: а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, увеличить объем максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения; точки присоединения, виды производственной деятельности без пересмотра (увеличения) величины максимальной мощности, но с изменением схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя; б) заключение договора; в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором; г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок; д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности; е) составление акта об осуществлении технологического присоединения.

Судом установлено и из материалов дела следует, что 17 июля 2019 года между истцом и ответчиком заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно п. 1 договора, сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ- 0,4 кВ в совокупности с питающей распределительной сетью объекта, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению электроустановок заявителя, урегулирования отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых электроустановок Заявителя составляет 410 кВт, максимальная мощность ранее присоединяемых электроустановок Заявителя составляет 250 кВт, максимальная мощность вновь присоединяемых электроустановок Заявителя составляет 160 кВт, категория надежности третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 10 кВ. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно п. 2 договора, Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: База отдыха «Аленушка», расположенной по адресу: 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым номером №.

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в Приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (п. 4).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора (п. 5).

В соответствии с п. 20 договора, последний считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.

В соответствии с п. 7 договора, заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, заявитель обязуется уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий

получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов.

Приложением к данному договору обозначены Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 19.07.2021 года.

В рамках исполнения Основного Договора, 17.11.2021 года между истцом и Ответчиком заключен Договор № об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям в отношении базы отдыха «Аленушка». Возможность осуществления временного технологического присоединения предусмотрена пунктом 2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, заключаемого на период осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения.

03.11.2022 года Сетевая организация оказала ФИО1 услуги по временному технологическому присоединению энергопринимающих устройств для энергоснабжения базы отдыха «Аленушка», о чем составлен акт от 03.11.2022 года.

Энергоснабжение по временной схеме должно осуществляться на срок до исполнения основного договора. Заявитель выполнил мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные техническими условиями.

По результатам осмотра энергопринимающих устройств заявителя, сетевой организацией составлен акт от 31.05.2023 года о выполнении технических условий.

В адрес сетевой организации не поступало разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов заявителя.

В связи с непредставлением заявителем в адрес сетевой организации разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов заявителя, сетевой организацией в адрес заявителя направлена претензия от 23.07.2025 № о необходимости оплаты неустойки в соответствии с п. 16 договора.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 Правил № 861 осуществлению сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности, составлению акта об осуществлении технологического присоединения предшествует получение заявителем разрешения органа федерального государственного энергетического надзора разрешения на допуск в эксплуатацию своих энергопринимающих установок в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 85.

В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13, 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4) настоящих Правил не требуется.

ФИО5, не относящийся к категориям заявителей, которым не требуется получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора, не исполнил свою обязанность по получению соответствующего разрешения.

Учитывая, что ответчик своих обязательств по договору не исполнил, суд полагает требования истца об обязании Ответчика в течении месяца с момента вступления решения в законную силу исполнить обязательства по договору от 17.08.2021 года № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанные в пункте 7, а именно: получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов и предоставить копию в сетевую организацию подлежат удовлетворению.

Пунктом 16 договора предусмотрено, что в случае нарушения одной из сторон сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению такая сторона уплачивает другой стороне неустойку, равную 0,25% от общего размера платы за каждый день просрочки.

Размер неустойки за период с 01.06.2023 по 01.06.2024 составляет 342429 рублей 32 коп.

Ответчиком данные расчеты не оспорены, судом проверены и признаны арифметически верными.

Согласно п. 16(6) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств: а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий; б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий; в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий; г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 16 вышеприведенных Правил № 861, а также на основании пункта 18 договора технологического присоединения энергопринимающих устройство при нарушении сторонами срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую ответчик обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

В силу ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Как указано в пункте 69 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При взыскании неустойки с иных лиц правила статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации могут применяться не только по заявлению должника, но и по инициативе суда, если усматривается очевидная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Учитывая длительность периода неисполнения обязательств, а также характер правоотношений сторон, отсутствие доказательств наступления неблагоприятных последствий для истца, суд полагает, что заявленная ко взысканию неустойка за просрочку выполнения мероприятий в сумме 342429 руб. 32 коп. является завышенной и несоразмерной последствиям нарушения обязательств.

При этом учитывая, что снижение неустойки не должно вести к необоснованному освобождению должника от ответственности за нарушение обязательств, с учетом положений ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд полагает возможным снизить неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению до 30 000 руб.

Довод представителя ответчика о пропуске срока исковой давности не состоятелен по причине того, что по настоящее время спорный договор является действующим, так как в нем не содержится положений о сроке его действия. Положениями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор) установлен только срок для выполнения мероприятий по технологическому присоединению (п. 5 договора) и срок действия технических условий (п. 4 договора), но не срок действия договора. Более того, действующим законодательством (п. 27 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861) предусмотрена возможность продления срока действия ранее выданных технических условий по инициативе заявителя, в случае, если мероприятия по технологическому присоединению им не были исполнены в ранее согласованный срок. Истечение срока действия технических условий не прекращает договор технологического присоединения в целом.

В силе ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца надлежит взыскать расходы по оплате госпошлины в размере 31061 рублей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Иск Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» к ФИО1 об обязании исполнить условия договора об осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки – удовлетворить частично.

Обязать ФИО1 

<

данные изъяты> получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов и предоставить копию в сетевую организацию.

Взыскать с ФИО1 

<

данные изъяты> в пользу ПАО «Россети Северо-Запад» ИНН 

<

***> неустойку за просрочку мероприятий по технологическому присоединению за период с 01.06.2023 по 01.06.2024 в размере 30000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 31061 рублей.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга.

Судья: Ю.В. Покровская

Мотивированное решение изготовлено 20.03.2026 г.