78RS0021-01-2021-000065-25

Дело № 2-396/2021 09 июня 2021 года

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Сестрорецкий районный суд города Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Максимовой А.В., 

при секретаре Соболевой Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО4 к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, расходов по уплате государственной пошлины 

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 обратилось в суд с иском о расторжении договора № ОД-ГтЭС-36130-18/50777-Э-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1, в связи с его существенным нарушением со стороны ответчика с даты принятия судебного акта, взыскании неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению в размере 10 037 руб. 50 коп., взыскании расходов по уплате государственной пошлины, указав, что в соответствии с п. 1 договора сетевая организация приняла обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ответчика. Пунктом 8 договора установлена обязанность ФИО1 исполнить надлежащим образом в определенный договором срок мероприятия по технологическому присоединению, в том числе по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, по уведомлению сетевой организации о выполнении технических условий. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Размер платы за технологическое присоединение составляет 550 руб. и подлежит уплате в течение 10 дней с даты заключения договора. Обязательства сетевой организации, предусмотренные п. 6 договора и п. 10 технических условий выполнены в полном объеме. Однако ответчик до настоящего времени уведомление в сетевую организацию о выполнении им технических условий не направил, таким образом, истец вправе требовать расторжения договора; размер неустойки за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 10 037 руб. 50 коп.

В судебное заседание представитель ФИО6 не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о рассмотрении дела извещен надлежащим образом, возражений на иск не представил, ходатайств об отложении рассмотрения дела или о рассмотрении дела в свое отсутствие не заявлял. 

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц на основании ст. 167 ГПК РФ. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о том, что иск подлежит удовлетворению частично по следующим основаниям.

ДД.ММ.ГГГГ сторонами заключен договор № ОД-ГтЭС-36130-18/55777-Э-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства заявителя, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №; максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 15 кВт, категория надежности - третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4кВ (л.д. 13-16).

Пунктом 8 договора установлена обязанность ФИО1 исполнить надлежащим образом обязательства по договору, в том числе выполнить возложенные мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п. 5 договора).

Размер платы за технологическое присоединение составляет 550 руб. и подлежит уплате в течение 10 дней с даты заключения договора (п.п. 10,11 договора).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 в адрес ответчика направлена претензия о расторжении договора и уплате неустойки, согласно которой истцом обязательства, предусмотренные п. 6 договора и п. 10 технических условий исполнены.

Положениями п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Пунктом 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, а также существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

В силу п. 3 Правил № сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Пунктом 16 Правил № предусмотрено, что договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям должен содержать существенные условия, в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению, а также срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора.

Согласно п. 16(3) Правил № обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В силу пп. «г» п. 18 названных Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в частности, выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией.

В соответствии с п. 16(5) Правил №, а также п. 16 договора нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Пунктом 16(6) указанных Правил предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем, в том числе в случае, если заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий;

Ответчик не направил истцу уведомление о выполнении технических условий в пределах границ своего участка, ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение, доказательства обратного в материалах дела отсутствуют, ФИО1 не представлены.

Учитывая, что ответчиком нарушен срок исполнения технических условий и обязательств по договору более чем на 12 месяцев, что является существенным нарушением, а истцом обязательства по технологическому присоединению объекта ответчика были исполнены в 6 месячный срок, что подтверждается претензией в адрес ответчика, направленной ДД.ММ.ГГГГ, требования ФИО8 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям подлежат удовлетворению.

При этом требования истца о расторжении договора в части указания на расторжение договора с даты принятия судебного акта не основаны на законе и не подлежат удовлетворению, поскольку расторжение договора может быть произведено с даты вступления судебного акта в законную силу. 

Абзацем 3 подп. «в» п. 16 Правил технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № предусмотрено обязательное указание в договоре положений об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 руб., уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 % от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Содержание указанного абзаца аналогично содержанию п. 17 договора, заключенного сторонами ДД.ММ.ГГГГ.

Размер неустойки, подлежащий взысканию с ответчика, составит 10 037 руб. 50 коп. (550*0,05*365) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

С учетом срока просрочки исполнения обязательства ответчиком, а также учитывая, что неустойка не носит явно чрезмерный характер, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для ее снижения. 

В соответствии со ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ФИО1 в пользу ПАО «Россети Ленэнерго» надлежит взыскать расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 402 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 167, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО9 удовлетворить частично.

Расторгнуть договор № № ОД-ГтЭС-36130-18/55777-Э-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства, заключенный ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 и ФИО1.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО11 неустойку в размере 10 037 руб. 50 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6 402 руб., в удовлетворении остальной части иска – отказать.

Решение может быть обжаловано в Санкт - Петербургский городской суд через Сестрорецкий районный суд Санкт - Петербурга в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Судья А.В.МАКСИМОВА

Дата принятия решения суда в окончательной форме 16 июня 2021 года.