Дело № 2-618/2020

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

«26» ноября 2020 года г. Починок, Смоленская область

Починковский районный суд Смоленской области в составе

председательствующего судьи Примерова А.В.,

с участием помощника прокурора Починковского района Смоленской области Ивашкевич С.В.,

при секретаре Чурилиной Л.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Починковского района Смоленской области в защиту интересов неопределенного круга лиц к Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области о возложении обязанности по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения,

у с т а н о в и л:

Прокурор Починковского района Смоленской области обратился в суд с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц к Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области возложении обязанности осуществить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения на реке Россожа ..., в срок до 31 декабря 2021 года.

Иск мотивирован тем, что по обращению Б. о ненадлежащем состоянии гидротехнического сооружения в д. Обухово Починковского района Смоленской области, была проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности гидротехнических сооружений Администрацией Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, в ходе которой установлено наличие дефектов гидротехнического сооружения, связанных с износом запорных элементов, течи и разуплотнения, в связи с чем в адрес главы муниципального образования Мурыгинского сельского поселения было внесено представление об устранении нарушений Федерального закона «О безопасности гидротехнический сооружений», по результатам рассмотрения которого Администрацией Мурыгинского сельского поселения вопрос о проведении ремонта гидротехнического сооружения не решен. 

** ** ** комиссией проведено преддекларационное обследование гидротехнического сооружения на реке Россожа ..., о чем составлен акт от ** ** **. Согласно п. 12.9, п. 17.1, п. 17.4 указанного акта во время проведения преддекларационного обследования гидротехнического сооружения комиссией выявлены следующие дефекты: наличие древесной растительности на верховом и низовом откосах плотины; отсутствие возможности маневрирования шандорными затворами водосбросного сооружения; нарушена целостность и герметичность шандорных затворов водосбросного сооружения; наличие оползневых процессов и размывов в нижнем бьефе плотины; отсутствие антикоррозийного покрытия металлических конструкций водосброса; наличие мусора в отводящем канале; наличие строительного мусора в нижнем бьефе плотины; нарушение целостности железобетонных конструкций, имеются участки с оголенной арматурой в нижнем бьефе плотины; гидротехническое сооружение на реке Россожа ... Мурыгинского сельского поселения не готово к локализации и ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций; уровень безопасности гидротехнического сооружения – неудовлетворительный.

В силу п. 3 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 16.09.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 8 устава Мурыгинского сельского поселения, к вопросам местного значения сельского поселения относится, в том числе, владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения. 

Таким образом, поскольку Администрация Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области является органом местного самоуправления, осуществляющим владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, то является лицом, ответственным за обеспечение безопасности гидротехнического сооружения, соблюдения норм и правил его эксплуатации. При этом, невыполнение собственником обязанностей по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения, осуществлению текущего и капитального ремонта, техническому обслуживанию и эксплуатационному контролю, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О безопасности гидротехнических сооружений", может привести к причинению вреда жизни, здоровью людей, окружающей средне, а также к возникновению чрезвычайной ситуации.

Просит обязать Администрацию Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области в срок до 31 декабря 2021 года осуществить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения на реке Россожа ..., а именно: произвести вырубку древесной растительности на верховом и низовом откосах плотины; восстановить целостность и герметичность шандорных затворов водосбросного сооружения; защитить нижний бьефе плотины от оползневых процессов и размывов; осуществить мероприятия по восстановлению антикоррозийного покрытия металлических конструкций водосбросного сооружения; убрать строительный мусор в нижнем бьефе плотины; осуществить мероприятия по восстановлению целостности железобетонных конструкций в нижнем бьефе плотины; разработать проектно-сметную документацию на проведение ремонта гидротехнического сооружения.

В судебном заседании помощник прокурора Починковского района Смоленской области Ивашкевич С.В. требования, изложенные в иске, поддержала полностью. Пояснила, что невыполнение Администрацией Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области обязанностей по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения, осуществлению текущего и капитального ремонта, техническому обслуживанию и эксплуатационному контролю, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О безопасности гидротехнических сооружений", может привести к причинению вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, а также к возникновению чрезвычайно ситуации.

Представитель ответчика – Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области в судебное заседание не явился, надлежаще извещен о времени и месте судебного заседания, в письменном ходатайстве просят рассмотреть дело в отсутствие представителя, возражений против заявленных исковых требований не имеют.

Суд, заслушав прокурора, исследовав письменные материалы дела в их совокупности, приходит к следующему.

Федеральным законом от 21.07.1997 N 117-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О безопасности гидротехнических сооружений", регулирующим отношения, возникающие при осуществлении деятельности по обеспечению безопасности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, установлены обязанности органов государственной власти, собственников гидротехнических сооружений и эксплуатирующих организаций по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О безопасности гидротехнических сооружений" под обеспечением безопасности гидротехнического сооружения понимается разработка и осуществление мер по предупреждению аварий гидротехнического сооружения.

Положениями статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О безопасности гидротехнических сооружений" предусмотрено, что собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация обязаны: обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт; обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнического сооружения, природных и техногенных воздействий и на основании полученных данных осуществлять оценку безопасности гидротехнического сооружения, в том числе регулярную оценку безопасности гидротехнического сооружения и анализ причин ее снижения с учетом работы гидротехнического сооружения в каскаде, вредных природных и техногенных воздействий, результатов хозяйственной и иной деятельности, в том числе деятельности, связанной со строительством и с эксплуатацией объектов на водных объектах и на прилегающих к ним территориях ниже и выше гидротехнического сооружения; обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев безопасности гидротехнического сооружения, а также правил его эксплуатации, требования к содержанию которых устанавливаются федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их компетенцией; развивать системы контроля за состоянием гидротехнического сооружения; систематически анализировать причины снижения безопасности гидротехнического сооружения и своевременно осуществлять разработку и реализацию мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения и его безопасности, а также по предотвращению аварии гидротехнического сооружения; обеспечивать проведение регулярных обследований гидротехнического сооружения; создавать финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; организовывать эксплуатацию гидротехнического сооружения в соответствии с разработанными и согласованными с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, правилами эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечивать соответствующую обязательным требованиям квалификацию работников эксплуатирующей организации; создавать и поддерживать в состоянии готовности локальные системы оповещения на гидротехнических сооружениях I и II классов; содействовать федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, в реализации их функций; совместно с органами местного самоуправления информировать население о вопросах безопасности гидротехнических сооружений; финансировать мероприятия по эксплуатации гидротехнического сооружения, обеспечению его безопасности, а также работы по предотвращению и ликвидации последствий аварий гидротехнического сооружения; заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию, консервацию и ликвидацию гидротехнического сооружения в случае его несоответствия обязательным требованиям; обеспечивать внесение в Регистр сведений о гидротехническом сооружении; обеспечивать проведение аттестации работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация несет ответственность за безопасность гидротехнического сооружения (в том числе возмещает в соответствии со статьями 16, 17 и 18 настоящего Федерального закона ущерб, нанесенный в результате аварии гидротехнического сооружения) вплоть до момента перехода прав собственности к другому физическому или юридическому лицу либо до полного завершения работ по ликвидации гидротехнического сооружения.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, на территории муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области находится гидротехническое сооружение (дамба) ... на реке Россожа.(л.д. 15), собственником которого является Мурыгинское сельское поселение Починковского района Смоленской области, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ** ** **, выданымУправлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии ... (л.д. 10).

Согласно кадастровому паспорту здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, извлечению из технического паспорта, гидротехническое сооружение по адресу: ... протяженностью 150 м: (дамба) ... на реке Россожа, насыпная из суглинка и песка, гравийной смеси, откосы закреплены посевом трав. Основные размере дамбы: длина – 150 метров, ширина по гребню – 12 метров, высота – 3 метра. Со стороны пруда на реке Россожа установлен водоспуск, предназначенный для искусственного стока воды. По гребню дороги – 3 метра, длина – 150 метров. Пруд находится на реке Россожа .... Дно – естественный грунт, берега водоема не благоустроены. Объем пруда составляет 370 тыс. м. кв. Площадь зеркала – 13 га (л.д. 11, 12-16).

Прокуратурой Починковского района Смоленской области ** ** ** была проведена проверка соблюдения Администрацией Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений, в ходе которой было установлено, что находящееся на территории Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области гидротехническое сооружение на пруду реки Россожа .... имеет дефекты, связанные с износом запорных элементов, течи, разуплотнения, видимые при визуальных осмотрах. Данные показатели относятся к контролируемым показателям технического состояния оборудования ГТС, которые должны быть закреплены в критерии безопасности ГТС, которые являются составной частью декларации безопасности ГТС и разрабатываются собственником ГТС.

В нарушение требований ст. 9 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений», Администрацией Мурыгинского сельского поселения не обеспечено соблюдение обязательных требований при эксплуатации гидротехнических сооружений, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт, не обеспечена разработка и своевременное уточнение критериев безопасности гидротехнического сооружения, а также правил его эксплуатации, требования к содержанию которых устанавливаются федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их компетенцией.

** ** ** прокуратурой Починковского района Смоленской области по результатам проведенной проверки в адрес главы Администрации Мурыгинского сельского поселения было вынесено представление от ** ** ** № ** об устранении нарушений Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений», безотлагательно принять меры к устранению нарушений (л.д. 17-18). 

** ** ** заместителем руководителя Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в отношении Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» следующими действиями: не допускать эксплуатацию объекта «Гидротехнические сооружения на р. Россожа ...: - без контроля (мониторинга) за показателями состояния гидротехнического сооружения, природных и техногенных воздействий и оценки безопасности гидротехнического сооружения на основании полученных данных, в том числе регулярной оценки безопасности гидротехнического сооружения в каскаде, вредных природных и техногенных воздействий, результатов хозяйственной и иной деятельности, в том числе деятельности, связанной со строительством и с эксплуатацией объектов на водных объектах и на прилегающих к ним территориях ниже и выше гидротехнического сооружения; - без соблюдения обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их технического обслуживания, эксплуатационного контроля и текущего ремонта: - без систематического анализа причин снижения безопасности гидротехнического сооружения и своевременного осуществления разработки и реализации мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения и его безопасности, а также по предотвращению аварии гидротехнического сооружения; - без проведения регулярных обследований гидротехнического сооружения.

В соответствии с частью 5 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» предложено Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения указанных требований, а также направить в МТУ Ростехнадзора уведомление об исполнении настоящего предостережения в срок, не позднее ** ** ** (л.д. 42-44).

Из ответов главы муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 09.09.2020 и от 16.09.2020 прокурору Починковского района Смоленской области по рассмотрению представления следует, что Администрацией Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области рассмотрение представление прокуратуры Починковского района Смоленской области от ** ** ** от ** ** ** № ** об устранении нарушений Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений», указанные в представлении требования признаны законными и обоснованными. По итогам рассмотрения представления сообщают, что Администрацией Мурыгинского сельского поселения сделан запрос начальнику Департамента Смоленской области по природным ресурсам экологии о рассмотрении вопроса выделения денежных средств на 2021 год для разработки проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения ...» (л.д. 19, 20).

Согласно поступившему из Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии о рассмотрении вопроса выделения денежных средств на 2021 год для разработки проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения ...» от ** ** ** следует, что в соответствии с законом Смоленской области от 19.12.2019 № 130-з «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные ассигнования на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области на проведение проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, не предусмотрены. В случае внесения изменений в областной закон в части распределения на 2021-2022 бюджетных ассигнований, направленных на вышеуказанные цели, вопрос о включении мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта гидротехнического сооружения ... Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области в областную государственную программу «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» будет рассмотрен дополнительно (л.д. 22, 21). 

** ** ** прокурору Починковского района Смоленской области главой муниципального образования Мурыгинского сельского поселения направлено сообщение, из которого следует, что гидротехническое сооружение на реке Россожа ... находится в неудовлетворительном состоянии и требует текущего ремонта: 1) нарушена целостность и герметичность затворов водосбросного сооружения; 2) наличие оползневых процессов и размывов в нижнем бьефе плотины; 3) отсутствует антикоррозийное покрытие металлических конструкций водосброса; 4) нарушение целостности железобетонных конструкций, имеются участки с оголенной арматурой в нижнем бьефе плотины.

Денежные средства в бюджете Мурыгинского сельского поселения на разработку проектно-сметной документации и ремонт отсутствуют.

** ** ** произведено преддекларационное обследование данного ГТС с участием представителя Ростехнадзора, составлен акт (л.д. 24).

Согласно акту преддекларационного обследования гидротехнического сооружения пруда на реке Россожа ... от ** ** **, утвержденного главой муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, указанное гидротехническое сооружение находится в муниципальной собственности муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области. Администрация Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области непосредственно собственными силами и средствами осуществляет безопасное эксплуатирование ГТС. Специалисты с гидротехническим образованием отсутствуют. 

Во время преддекларационного обследования ГТС комиссией были выявлены следующие дефекты: 1) наличие древесной растительности на верховом и низовом откосах плотины; 2) отсутствует возможность маневрирования шандорными затворами водосбросного сооружения; нарушена целостность и герметичность шандорных затворов водосбросного сооружения; 4) наличие оползневых процессов и размывов в нижнем бьефе плотины; 5) отсутствуют антикоррозийное покрытие металлических конструкций водосброса; 6) наличие мусора в отводящем канале; 7) наличие строительного мусора в нижнем бьефе плотины; 8) наблюдается нарушение целостности железобетонных конструкций, имеются участки с оголенной арматурой в нижнем бьефе плотины; 9) проектная документация отсутствует; 10) эксплуатирующей организацией за период эксплуатации ГТС не проводился комплексный анализ ГТС с оценкой их прочности. устойчивости и эксплуатационной надежности; 11) не обеспечена необходимая квалификация работников, обслуживающих ГТС; 12) отсутствуют аттестованные специалисты в области безопасности ГТС; 13) отсутствуют протоколы аттестации в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора.

Гидротехнические сооружения на реке Россожа ... ранее не декларировались. Основные причины аварий на ГТС: внешние причины возможных аварий: - прохождение весенне-летнего половодья 1% (для сооружений IV класса в соответствии с СП 58 13330.2012) [5н]) с резким подъемом уровней; - прохождение шуги и льда в верхнем бьефе; - водная и снеговая эрозия; внутренние причины возможных аварий: - отсутствие периодического визуального контроля; - отсутствие своевременных ремонтных работ на плотине; - заиление и замусоривание водосливного сооружения; - локальные оползни верхового и низового откосов в районе водосброса; - недостаточная устойчивость откосов; - наклон стенок выходной части; - разрушение крепления боковых откосов рисбермы. Перечисленные факторы могут инициировать аварии на плотине, развивающиеся по следующим сценариям: А1: уменьшение пропускной способности водослива из-за льда и шуги и замусоривания; А2: частичное оползание откосов земляной плотины в примыканиях к коренным берегам.

Согласно выводам, итоговая оценка уровня безопасности ГТС: готовность объекта к локализации и ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций на ГТС – не готов. Согласно таблице 5 Приложения 1 к «Инструкции о ведении Российского регистра ГТС….», уровень безопасности ГТС – неудовлетворительный ввиду снижения механической или фильтрационной прочности, превышения предельно допустимых значений критериев безопасности для работоспособного состояния сооружений и оснований, другие отклонения от проектного состояния, способные привести к развитию аварии.

Перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасности ГТС и сроки их выполнения для последующего включения в план работы эксплуатирующей организации на период действия очередного разрешения на эксплуатацию ГТС, утверждаемый в установленном порядке руководителем организации (собственника ГТС, эксплуатирующей организации-декларанта): 1) провести вырубку древесной растительности на верховом и низовом откосах плотины (2 квартал 2021 года); 2) восстановить целостность и герметичность шандорных затворов водосбросного сооружения (2 квартал 2021 года); 3) защитить нижний бьефе плотины от оползневых процессов и размыва (2 квартал 2021 года); 4) предусмотреть мероприятия по восстановлению антикоррозийного покрытия металлических конструкций водосбросного сооружения (2 квартал 2021 года); 5) убрать строительный мусор в нижнем бьефе плотины (2 квартал 2021 года); 6) предусмотреть мероприятия по восстановлению целостности железобетонных конструкций в нижнем бьефе плотины (2 квартал 2021 года); 7) провести комплексный анализ ГТС с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности (2 квартал 2021 года); 8) провести аттестацию специалистов в области безопасности ГТС в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора (3 квартал 2021 года); 9) разработать проектную документацию (4 квартал 2021 года); 10) проводить планово-предупредительные и текущие ремонтные работы для содержания сооружений в удовлетворительном техническом состоянии (постоянно); 11) проверять состояние, а при необходимости пополнять резервные запасы аварийных материалов (постоянно) (л.д. 26-41).

Таким образом, судом установлено и не оспаривается стороной ответчика, что гидротехническое сооружение на реке Россожа ..., являющееся муниципальной собственностью Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, находится в неудовлетворительном состоянии и требует текущего ремонта. Являясь собственником гидротехнического сооружения, Администрация Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области обязана соблюдать требования Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений".

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении требований прокурора о возложении на ответчика обязанность принять меры по проведению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности гидротехнического сооружения на реке Россожа ... (произвести вырубку древесной растительности на верховом и низовом откосах плотины; восстановить целостность и герметичность шандорных затворов водосбросного сооружения; защитить нижний бьефе плотины от оползневых процессов и размывов; осуществить мероприятия по восстановлению антикоррозийного покрытия металлических конструкций водосбросного сооружения; убрать строительный мусор в нижнем бьефе плотины; осуществить мероприятия по восстановлению целостности железобетонных конструкций в нижнем бьефе плотины; разработать проектно-сметную документацию на проведение ремонта гидротехнического сооружения).

Устранение нарушений является непосредственной обязанностью собственника ГТС, на что содержится прямое указание в законе, поскольку Администрация Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области несет ответственность за надлежащее содержание и принятие мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений находящихся в ее собственности.

В соответствии с частью 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.

Учитывая положения части 2 статьи 206 ГПК РФ, а также принимая во внимание объем мероприятий, которые необходимо провести для устранения выявленных нарушений, особенности финансирования мероприятий по устранению выявленных нарушений, суд считает необходимым установить срок для исполнения решения суда до 31 декабря 2021 года. 

Указанный срок с учетом характера и объема действий ответчика, необходимых для исполнения решения суда, по мнению суда, является разумным и достаточным для устранения имеющихся нарушений.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

р е ш и л:

Исковые требования прокурора Починковского района Смоленской области удовлетворить.

Обязать Администрацию Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области осуществить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения на реке Россожа ..., а именно: произвести вырубку древесной растительности на верховом и низовом откосах плотины; восстановить целостность и герметичность шандорных затворов водосбросного сооружения; защитить нижний бьефе плотины от оползневых процессов и размывов; осуществить мероприятия по восстановлению антикоррозийного покрытия металлических конструкций водосбросного сооружения; убрать строительный мусор в нижнем бьефе плотины; осуществить мероприятия по восстановлению целостности железобетонных конструкций в нижнем бьефе плотины; разработать проектно-сметную документацию на проведение ремонта гидротехнического сооружения, в срок до 31 декабря 2021 года.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Починковский районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья: А.В.Примеров