Дело 2-4537/2024

25RS0004-01-2024-001555-60

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

29 октября 2024 года г. Владивосток

Первореченский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе:

председательствующего судьи Страдымовой А.А.,

при секретаре Лозинской О.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к МУП «ВПЭС» о защите прав потребителя, 

у с т а н о в и л:

Истец обратился в суд с вышеназванным иском, указав в обоснование, что она является собственником жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес>, переулок Хасанский, 

<

адрес>, кадастровый №.

ДД.ММ.ГГГГ между истцом и Муниципальным унитарным предприятием 

<

адрес> «Владивостокское предприятие электрических сетей» заключен договор №-ТП-22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащий, в том числе, технические условия на технологическое присоединение в виде приложения, неотъемлемого от Договора.

В соответствии с п.1 Договора Ответчик принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе - по обеспечению готовности объектов электросетевого устройства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, с учетом характеристик, указанных в данном пункте.

Срок для осуществления указанных работ согласно п. 5 Договора составляет 12 месяцев с даты заключения Договора, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п.1 технических условий Ответчик обязался выполнить работы по: реконструкции существующей ВЛ-0,4 кВ тп-4753 в связи с увеличением мощности; проверке существующего учета электрической энергии на соответствие требованиям НТД и сделать корректировку при необходимости.

Согласованную в п.10 Договора обязанность по оплате услуг Ответчика в размере 34 810 рублей 75 копеек по счету от ДД.ММ.ГГГГ № истец выполнила своевременно и в полном объеме, двумя платежами от ДД.ММ.ГГГГ оплачено 20 886,45 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 13 924,30 рублей.

Кроме того, истцом выполнены предусмотренные Договором и Техническими условиями обязательства, что подтверждается уведомлением Ответчика без номера и даты, а также актом от ДД.ММ.ГГГГ №.

В установленный Договором срок, работы Ответчик не выполнил.

Истец неоднократно обращалась к Ответчику по телефону по поводу решения данного вопроса, на что сотрудники сетевых сетей отвечали, что задержка связана с невыполнением соответствующих мероприятий районной ВПЭС. В связи с несвоевременным исполнением обязательств по договору истец просит суд взыскать неустойку в размере 11748 руб. 63 коп., компенсацию морального вреда в размере 250000 руб. 

В судебном заседании представитель истца поддерживал исковые требования в полном объеме, просил их удовлетворить.

Представитель ответчика в судебном заседании просила отказать в удовлетворении требований по основаниям, изложенным в иске. 

Выслушав пояснения лиц, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

Из материалов дела следует, что между МУПВ «ВПЭС» и истцом был заключен договор №-ТП-22 от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения (увеличении мощности с 15 кВт до 25 кВт) ранее присоединённого к электрическим сетям жилого дома по адресу: 

<

адрес>, пер. Хасанский, 

<

адрес>, кадастровый номер объекта №.

В соответствии с п.1 Договора Ответчик принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе - по обеспечению готовности объектов электросетевого устройства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, с учетом характеристик, указанных в данном пункте.

Срок для осуществления указанных работ согласно п. 5 Договора составляет 12 месяцев с даты заключения Договора, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного Заявителем экземпляра договора в сетевую организацию (абз.15 пункта 15 Правил №, пункт 21 Договора).

Подписанный Заявителями экземпляр договора поступил в сетевую организацию ДД.ММ.ГГГГ, следовательно, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению до ДД.ММ.ГГГГ включительно.

ДД.ММ.ГГГГ Сетевой организацией в целях реализации технических условий №-ТП-22 для осуществления коммерческого учета потребления электрической энергии на опоре ВЛ-0,4 кВ установлен прибор учёта «Фобос-3» №» № с ограничением потребления мощности 25 кВт, что подтверждается Актом № от 30.06,2023 допуска прибора учёта в эксплуатацию и Актом № от ДД.ММ.ГГГГ программной конфигурации многотарифного счетчика «Фобос- 3 IQOLS-C».

ДД.ММ.ГГГГ сторонами был подписан Акт об осуществлении технологического присоединения (увеличения мощности) № АО -5652-ТП-22 по техническим условиям № от ДД.ММ.ГГГГ, т.е. обязательства по Договору ответчиком исполнены в полном объеме.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 14 "Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденных Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, в редакции Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Правила), независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Кроме того подпунктом а (2) п. 25 Правил на сетевую организацию возложена обязанность урегулировать все отношения с иными лицами, возникающие в ходе исполнения Договора технологического присоединения.

Согласно пп."в" п.16 и абз.1 п.17 Правил, предусмотрена ответственность сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором уплатить другой стороне договора неустойку.

В соответствии с п. 17 Договора сторона Договора, нарушившая срок мероприятий по технологическому присоединению, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке.

Неустойка за нарушение срока выполнения мероприятий по Договору может быть начислена не ранее даты наступления срока исполнения обязательств по Договору - ДД.ММ.ГГГГ.

Размер платы по Договору был определен Постановлением Агентства по тарифам 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 34 810, 75 рублей.

Период просрочки исполнения мероприятий по технологическому присоединению с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата подписания акта ТП) составляет 101 календарный день.

Согласно п. 17 Договора сумма неустойки составляет: 8 789 руб. 71 коп. (34 810,75 руб, х 0,25% х 101 дней).

В соответствии со ст. 333 ГК РФ ходатайствуем о снижении размера взыскиваемой неустойки ввиду ее явной несоразмерности последствиям нарушенного обязательства.

Согласно положениям статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. При этом, лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле.

Оснований для снижения неустойки судом не установлено. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с ответчика неустойки в размере 8 789 руб. 71 коп.

Поскольку факт нарушения прав истца, как потребителя, нашел свое подтверждение, в соответствии с положениями статьи 15 Закона "О защите прав потребителей" в пользу истца взыскивается компенсация морального вреда в размере 10 000 руб.

На основании статьи 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" с ответчика в пользу истца полежит взысканию штраф в размере 9394 руб. 85 коп.

Кроме того, в соответствии со статьей 103 ГПК РФ с ответчика в муниципальный бюджет подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 700 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 13, 194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования ФИО1 к МУП «ВПЭС» о защите прав потребителя – удовлетворить частично. 

Взыскать с МУП «ВПЭС» в пользу ФИО1 неустойку в размере 8789 рублей 71 копейку, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей 00 копеек, штраф за нарушение законодательства о защите прав потребителя, в размере 9 394 рубля 85 копеек.

Взыскать с МУП «ВПЭС» в доход местно бюджета госпошлину в размере 700 рублей.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в 

<

адрес>вой суд через Первореченский районный суд 

<

адрес> течение месяца с момента его вынесения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ

ФИО4Страдымова