Мотивированное 

решение

 изготовлено 19 октября 2023 года

Дело № 2-4826/2023

66RS0007-01-2023-003890-03

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург 12 октября 2023 года

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области в составе председательствующего судьи Прокопенко Я.В.

при секретаре Афанасьевой В.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к ФИО2 о взыскании денежных средств. 

В обоснование исковых требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ между сторонами заключен договор №, согласно которому ответчик обязуется изготовить и произвести монтаж лестницы на стальном каркасе с балюстрадой и деревянными элементами из сосны, по адресу: 

<

адрес>. По договору предусмотрена предоплата в размере 90 000 руб., которую заказчик передал изготовителю ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего была составлена расписка. После получения предоплаты изготовитель не уведомил о начале изготовления стального каркаса, о сроках его готовности и монтажа. Изготовление и монтаж лестницы должны были быть осуществлены в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ работы были произведены частично, работы не соответствуют эскизному решению изготовителя. Сроки полного окончания работ исполнитель не называет, от выполнения работ уклоняется, на звонки не отвечает. На претензию от ДД.ММ.ГГГГ поступил ответ о том, что работы будут произведены в полном объеме до ДД.ММ.ГГГГ, ответчик работы не выполнил в указанную дату. 

Просит взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 денежные средства, уплаченные по договору, в размере 90 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 877 рублей 20 копеек, штраф за нарушение сроков изготовления продукции в размере 0,1 % в день от стоимости недопоставленной или несмонтированной в срок продукции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 930 рублей. 

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещен о судебном заседании.

Ответчик ФИО2 явку в судебное не обеспечил, извещен судом надлежащим образом, об уважительных причинах неявки в судебное заседание не сообщил, об отложении не ходатайствовал, отзыв на иск не представил. 

Судом определено о рассмотрении дела при установленной явке в порядке заочного производства.

Суд, исследовав имеющиеся в деле доказательства, приходит к следующему.

Согласно статье 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

В силу положений ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу ст. 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности). Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Согласно п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно п. 1 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

В силу ст.702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно положениям ст. 703 Гражданского кодекса Российской Федерации договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Согласно положениям ст. 705 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором подряда:

риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона;

риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

Согласно положениям ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Согласно положениям ст. 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Цена работы может быть определена путем составления сметы.

В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 настоящего Кодекса.

Согласно положениям ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Согласно положениям ст. 732 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения. Если по характеру работы это имеет значение, подрядчик должен указать заказчику конкретное лицо, которое будет ее выполнять.

Согласно ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Судом установлено и следует из материалов дела, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключен договор №, по условиям которого ответчик обязался изготовить и смонтировать, а истец оплатить следующие изделия: интерьерную лестницу на стальном каркасе с балюстрадой на втором этаже и деревянными элементами из сосны. 

Изготовить и смонтировать продукцию в срок 30 рабочих дней на объекте заказчика (п. 2.1.1. договора).

Цена договора составляет 130 000 рублей (п. 4.1. договора). 

Пунктом 4.3. договора установлен порядок осуществления оплаты: предоплата в размере 90 000 рублей осуществляется в момент заключения договора. Расчет 40 000 рублей производится после изготовления и установки продукции. 

За нарушение сроков изготовления продукции изготовитель выплачивает штраф в размере 0,1 % в день от стоимости недопоставленной или несмонтированной в срок продукции (п. 7.1. договора). 

Согласно п. 9.1. договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и поступления полной суммы предоплаты, указанной в п. 4.3 на счёт изготовителя. И действует до полного исполнения обеими сторонами обязательств по данному договору, о чем свидетельствует подписанный обеими сторонами акт сдачи-приемки продукции.

Истцом произведена оплата по договору ДД.ММ.ГГГГ в размере 90 000 рублей, о чем ответчиком составлена расписка от ДД.ММ.ГГГГ. Итого истец произвел оплату ответчику по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 90 000 рублей.

Истцом обязательства в части своевременной оплаты выполнены в срок и в полном объеме. 

Соответственно, с учетом того, что договор вступил в силу с момента его подписания и получения суммы предоплаты ДД.ММ.ГГГГ, с указанного дня следует отсчитывать 30 рабочих дней, предусмотренных на поставку и монтаж, которые истекали ДД.ММ.ГГГГ.

В указанную дату ответчиком обязательства не исполнены.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика была направлена претензия с установлением срока, когда ответчик должен закончить работы (до ДД.ММ.ГГГГ) или вернуть предоплату в размере 90 000 рублей.

Претензия направлена ответчику посредством мессенджера ВотсАпп, что подтверждается представленной перепиской, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ ответчик указывает истцу, что сегодня все будет ясно, ДД.ММ.ГГГГ ответил, что свяжется с истцом, все доложит, ДД.ММ.ГГГГ ответчик спрашивает у истца будет ли тот в пятницу дома, таким образом, ответчик сроков окончания работ, возврата денежных средств не указал.

В предусмотренный договором для изготовления и монтажа продукции в срок ответчиком не выполнены работы по изготовлению и монтажу интерьерной лестницы на стальном каркасе с балюстрадой на втором этаже и деревянными элементами из сосны, согласно техническим характеристикам и дизайн-проекту.

Доказательств обратного материалы дела не содержат.

Таким образом, сумма, подлежащая возврату истцу ответчиком, составляет 90 000 рублей. 

С учетом вышеизложенного требование о взыскании с ответчика денежных средств, уплаченных по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 90 000 рублей 00 копеек подлежит удовлетворению. 

На основании ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Истцом заявлено требование о взыскании штрафа за нарушение сроков изготовления продукции в соответствии с пунктом 6.1. договора № от ДД.ММ.ГГГГ в размере в размере 0,1 % в день от стоимости недопоставленной или несмонтированной в срок продукции.

Истцом произведен расчет штрафа с ДД.ММ.ГГГГ (со дня, следующего после срока окончании выполнения работ) по ДД.ММ.ГГГГ (день подачи искового заявления), которая составила 6 930 рублей.

Поскольку ответчиком нарушен срок изготовления продукции, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 930 рублей.

Согласно ч. 1 ст. 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Истцом уплачена государственная пошлина в общей сумме 3 877 рублей 20 копеек. 

С учетом удовлетворенных требований с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 3 877 рублей 20 копеек. 

Руководствуясь ст.ст. 194 – 199, главой 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 (паспорт №) к ФИО2 (паспорт № о взыскании денежных средств удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 денежные средства, уплаченные по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 90 000 рублей 00 копеек; неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 930 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 877 рублей 20 копеек.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Я.В. Прокопенко