Дело № 2-4139/2017

11 декабря 2017 года

решение

Именем российской федерации

Пушкинский районный суд города Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи

ФИО1,

при секретаре 

ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3 к ООО «СК «Дальпитерстрой» о взыскании неустойки, морального вреда и штрафа, 

с участием истца ФИО3, представителя истца, адвоката по ордеру ФИО4.

представителя ответчика ФИО5 по доверенности, 

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с указанным иском и просит: взыскать в его пользу с ответчика неустойку за нарушение сроков передачи квартиры по договору долевого участия в размере 1 853 552,05 руб., компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., штраф в размере 50% от суммы присужденной судом.

В обоснование исковых требований указывает, что между ФИО3 (участник долевого строительства) и ООО «СК «Дальпитерстрой» (застройщик) 11.02.2015 был заключен договор № 1002-Ш/463-1-Д-И-СБ-731, в соответствии с которым ответчик обязался в предусмотренный Договором срок построить с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, корп. 1 на земельном участке площадью 34 885 кв. м. по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, территория предприятия «Шушары», участок 463 (Объект), и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, передать истцу Объект долевого строительства - квартиру.

В соответствии с п.п. 1.2 и 2.1 Договора, согласно условиям договора долевого участия ответчик обязан не позднее II квартала 2015 передать истцу квартиру, состоящую из 3-х комнат, с условным номером 731, расположенную в 7 секции, на 4 этаже, общей площадью 80,3 кв. м. жилого дома.

Истец, как участник долевого строительства, полностью исполнил свои обязательства по Договору, в том числе оплатил стоимость квартиры в размере 4 191 660 руб.

Квартира истцу была передана только 07.07.2017 по акту приема-передачи помещения.

27 июля 2017 истец направил претензию в ООО «СК «Дальпитерстрой» с требованием уплатить ему неустойку за нарушение сроков передачи квартиры по договору долевого участия. Однако претензия осталась без ответа.

Неустойка за период с 01.07.2015 по 07.07.2017 составляет 1 853 552,05 руб., из расчета: 4 191 660 руб. х 737 дня х 2 х 1/300 х 9,00%) = 1 853 552,05 рублей.

Истец ФИО3 и представитель истца ФИО4 в судебное заседание явились, исковые требования поддерживают.

Представитель ответчика ООО «СК «Дальпитерстрой» ФИО5 по доверенности, в судебное заседание явился. Исковые требования признал частично, просил применить ст. 333 ГК РФ по снижению заявленных истцом неустойки и штрафа.

Суд, выслушав участников процесса, изучив материалы дела, находит иск подлежащим удовлетворению в части, по следующим основаниям.

В соответствии со статьями 309 и 314 Гражданского кодекса РФ обязательства должным исполняться надлежащим образом и в срок, предусмотренные обязательством.

Судом установлено, что между ФИО3 (участник долевого строительства) и ООО «СК «Дальпитерстрой» (застройщик) 11.02.2015 был заключен договор № 1002-Ш/463-1-Д-И-СБ-731, в соответствии с которым ответчик обязался в предусмотренный Договором срок построить с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, корп. 1 на земельном участке площадью 34 885 кв. м. по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, территория предприятия «Шушары», участок 463 (Объект), и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, передать истцу Объект долевого строительства - квартиру.

В соответствии с п.п. 1.2 и 2.1 Договора, согласно условиям договора долевого участия ответчик обязан не позднее II квартала 2015 передать истцу квартиру, состоящую из 3-х комнат, с условным номером 731, расположенную в 7 секции, на 4 этаже, общей площадью 80,3 кв. м. жилого дома.

Истец, как участник долевого строительства, полностью исполнил свои обязательства по Договору, в том числе оплатил стоимость квартиры в размере 4 191 660 руб.

Квартира истцу была передана только 07.07.2017 по акту приема-передачи помещения.

27 июля 2017 истец направил претензию в ООО «СК «Дальпитерстрой» с требованием уплатить ему неустойку за нарушение сроков передачи квартиры по договору долевого участия. Однако претензия осталась без ответа.

Неустойка за период с 01.07.2015 по 07.07.2017 составляет 1 853 552,05 руб., из расчета: 4 191 660 руб. х 737 дня х 2 х 1/300 х 9,00%) = 1 853 552,05 рублей.

ООО «СК «Дальпитерстрой» 10.11.2011 года выдано разрешение на строительство 78-16010921-2011 жилого дома по адресу: Санкт- Петербург, пос. Шушары, территория предприятия «Шушары», участок 463, срок действия указанного разрешения продлевался до 31.12.2016.

Частью 2 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Таким образом, поскольку дом не был введен в эксплуатацию во II квартале 2015 года, как это обусловлено договором, обязательства по передаче истцу квартиры в сроки, предусмотренные договором, ответчиком исполнены не были, ООО «СК «Дальпитерстрой» была допущена просрочка исполнения обязательства.

Доказательств уважительности причин просрочки исполнения обязательств, ответчиком суду в нарушение статьи 56 ГПК РФ представлено не было.

Истец просит взыскать неустойку за период с 01.07.2015 по 07.07.2017, которая составляет 1 853 552,05 руб., из расчета: 4 191 660 руб. х 737 дня х 2 х 1/300 х 9,00%) = 1 853 552,05 рублей.

Представителем ответчика ООО «СК «Дальпитерстрой» было заявлено ходатайство об уменьшении размера неустойки и штрафа.

Статьей 333 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Пунктом 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 01 июля 1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 1 Гражданского кодекса РФ» предусмотрено, что при разрешении вопроса об уменьшении неустойки следует иметь в виду, что размер неустойки может быть уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. При оценке таких последствий судом могут приниматься во внимание, в том числе, обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям нарушения обязательства.

В силу п. 6 ст. 395 Гражданского кодекса РФ, если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд по заявлению должника вправе уменьшить предусмотренные договором проценты, но не менее чем до суммы, определенной исходя из ставки, указанной в пункте 1 настоящей статьи.

Разрешая ходатайство ответчика о снижении размера взыскиваемой неустойки, суд принимает во внимание доводы ответчика о том, что ускорение хода строительства без нарушения технических норм и правил невозможно. Также суд учитывает, что истец, не предъявляет требований о расторжении договора, что свидетельствует о сохранении интереса в получении квартиры.

Принимая во внимание изложенное, учитывая, что истцом не представлено доказательств факта значительности последствий нарушения ответчиком срока исполнения своих обязательств, а также учитывая, что применение санкций, направленных на восстановление прав потребителя, нарушенных вследствие ненадлежащего исполнения обязательства, должно соответствовать последствиям нарушения, но не должно служить средством обогащения потребителя, а также принимая во внимание обстоятельства, послужившие основанием для нарушения ответчиком срока исполнения обязательств по договору, суд полагает возможным снизить размер взыскиваемой неустойки до 800 000 рублей, учитывая, что данный размер неустойки не ниже предела, определяемого соразмерно величине учетной ставки Банка России, установленной в оспариваемый период.

В соответствии со статьей 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Определяя размер компенсации морального вреда - 15 000 рублей, суд учитывает в соответствии со статьей 1101 Гражданского Кодекса РФ характер причиненных истцу физических и нравственных страданий, степень вины причинителя вреда, фактические обстоятельства, при которых был причинен моральный вред, а так же требования разумности и справедливости.

Частью 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Предусмотренный ч. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» штраф имеет гражданско-правовую природу и по своей сути является предусмотренной законом мерой ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, то есть является формой предусмотренной законом неустойки.

В соответствии с п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

Указанный штраф взыскивается независимо от того, заявлялось ли такое требование суду. Размер штрафа составляет 407 500 рублей. ((800 000+15 000):2).

Применение ст.333 ГК РФ возможно при определении размера как неустойки, так и штрафа, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей». С учетом фактических обстоятельств дела, суд не находит оснований для уменьшения размера штрафа.

В соответствии со ст.ст.103 ГПК РФ с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, с учетом размера удовлетворенных исковых требований, суд взыскивает государственную пошлину в сумме 14 537,50 рублей в доход федерального бюджета.

руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «СК «Дальпитерстрой» в пользу ФИО3 неустойку в размере 800 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб., штраф в размере 407 500 руб., а всего: 1 222 500 руб., в остальной части иска отказать.

Взыскать с ООО «СК «Дальпитерстрой» государственную пошлину в доход государства в размере 14 537,50 руб.

Решение может быть обжаловано в Санкт- Петербургский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья: