Дело № 2-610/17

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

23 марта 2017 года город Ульяновск

Заволжский районный суд города Ульяновска в составе:

председательствующего судьи Петровой С.А.

при секретаре Журавель С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1, ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «ДАРС-Мобайл» о взыскании неустойки за нарушение срока сдачи объекта долевого строительства, убытков, компенсации морального вреда, стоимости устранения недостатков выполненной работы,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО2 обратились в суд с иском к ООО «ДАРС-Мобайл» о взыскании неустойки за нарушение срока сдачи объекта долевого строительства, убытков, компенсации морального вреда, стоимости устранения недостатков выполненной работы, указав в обоснование требований о том, что 18.05.2015 года между ними и ответчиком был заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № (по ген.плану) с объектами соцкультбыта в 

<

адрес>, в соответствии с которым ответчик обязался осуществить строительство многоквартирного жилого дома и передать объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру общей площадью 47,90 кв.м, проектный номер № в срок не позднее 22.09.2015, объект долевого строительства передан им 28.12.2015. При приеме объекта были выявлены недостатки выполненных строительных работ, стоимость устранения которых составляет 16 961 руб. 32 коп. 16.01.2017 ответчику была направлена претензия о возмещении стоимости устранения недостатков жилого помещения и затрат, понесенных в связи с заключением договора на оказание услуг по проведению оценки, которая была получена 16.01.2017, ответчик должен был удовлетворить требования до 26.01.2017 включительно; за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке ответчик должен выплатить неустойку в сумме 12 720 руб. 99 коп. Считают, что в связи с нарушением ответчиком их прав, как потребителей, им причинен моральный вред, который они оценивают в 10 000 руб. (каждому). Просят взыскать с ООО «ДАРС-Мобайл» в пользу ФИО1, ФИО2 неустойку за просрочку сдачи объекта долевого строительства за период с 23.09.2015 по 27.12.2015 в размере 113 367 руб. 13 коп., в счет уменьшения цены договора ввиду наличия строительных недостатков в размере 16 961 руб. 32 коп., неустойку за неудовлетворение требований потребителя в претензионном порядке в размере 12 720 руб. 99 коп., обязать ответчика произвести восстановительные работы системы вентиляции в квартире 

<

адрес>; взыскать с ответчика в пользу ФИО2 убытки, понесенные в связи с оплатой оценки в размере 8 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.; в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.; взыскать с ответчика в пользу истцов судебные расходы в размере 11 400 руб., из которых 1 000 руб. за составление претензии, 2 000 руб. за составление искового заявления, 7 000 руб. за представительство интересов в суде, 1 400 руб. за оформление нотариальной доверенности; за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом. 

В судебном заседании стороны выразили желание заключить мировое соглашение. Просят утвердить мировое соглашение, по условиям которого: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДАРС-Мобайл» обязуется в срок до 14.04.2017 года выплатить ФИО2, ФИО1 неустойку 85 000 руб., стоимость строительных недостатков 14 000 руб., оплату экспертизы 8 000 руб., моральный вред 4 000 руб., судебные расходы 4 400 руб., а ФИО2, ФИО1 от остальной части требований к обществу с ограниченной ответственностью «ДАРС-Мобайл» отказываются.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ДАРС-Мобайл» обязуется произвести работы системы вентиляции в квартире 

<

адрес>.

Условия мирового соглашения занесены в протокол судебного заседания и подписаны сторонами. 

Последствия утверждения мирового соглашения представителю истицы и представителю ответчика разъяснены и понятны.

Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересы иных лиц, 

Руководствуясь ст. 39,173, 220 ГПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ФИО2, ФИО1 и обществом с ограниченной ответственностью «ДАРС-Мобайл», в соответствии с которым:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДАРС-Мобайл» обязуется в срок до 14.04.2017 года выплатить ФИО2, ФИО1 неустойку 85 000 руб., стоимость строительных недостатков 14 000 руб., оплату экспертизы 8 000 руб., моральный вред 4 000 руб., судебные расходы 4 400 руб., а ФИО2, ФИО1 от остальной части требований к обществу с ограниченной ответственностью «ДАРС-Мобайл» отказываются.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ДАРС-Мобайл» обязуется произвести работы системы вентиляции в квартире 

<

адрес>.

Производство по гражданскому делу по иску ФИО1, ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «ДАРС-Мобайл» о взыскании неустойки за нарушение срока сдачи объекта долевого строительства, убытков, компенсации морального вреда, стоимости устранения недостатков выполненной работы прекратить в связи с утверждением мирового соглашения.

На определение может быть подана частная жалоба в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд города Ульяновска в течение 15 дней.

Судья С.А. Петрова