Дело № 2-233/2020

УИД: 44RS0005-01-2020-000180-48

Р Е Ш Е Н И Е

 

Именем Российской Федерации

29 мая 2020 г. гор.Галич Костромской области

Галичский районный суд Костромской области в составе:

председательствующего судьи Балашовой Е.В.,

при секретаре Чижовой Н.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения и взыскании неустойки,

у с т а н о в и л :

ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» обратилось в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения и взыскании неустойки, мотивируя свои требования тем, что между сторонами 04.02.2019 заключен договор ..... об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя садового дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сдт «Криптон», кад ....., в течение 6 месяцев со дня заключения договора (п.5 раздела 1 Договора).

В соответствии с п.п.1,5 договора истец принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, а ответчик обязался надлежащим образом выполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка.

В соответствии с разделом 3 Договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.12.2017 №17/554 и составляет 550 рублей. Внесение данной платы предусмотрено в течение 15 календарных дней с момента заключения договора (п.11). В приложении к договору приведены технические условия, необходимые для присоединения к электрическим сетям.

05.07.2019 сетевая организация направила в адрес ФИО1 уведомление о готовности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» к технологическому присоединению.

11.09.2019 в адрес ответчика направлена претензия №МР1-КМ/5-1/5207/18 о невыполнении в срок мероприятий по договору технологического присоединения, которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

Поскольку ответчик не выполнил мероприятия по технологическому присоединению, соглашение о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения оставлено без ответа, на основании ст.ст. 309, 310, 330, 450 ГК РФ, ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» просит расторгнуть договор от 04.02.2019 ..... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по III категории надежности и взыскать с ответчика в соответствии с пунктом 17 раздела V вышеуказанного договора неустойку за несвоевременное выполнение мероприятий по данному договору в размере 907 руб. 50 коп.

Представитель истца ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»ФИО2, действующий по доверенности, в поступившем в суд заявлении просит судебное заседание провести без его участия При этом представитель уточнил исковые требования и просит взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» неустойку по договору от 04.02.2019 ..... в размере 907 руб. 50 коп.

Ответчик ФИО1 иск не признал, ссылаясь на то, что уведомление о готовности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» к технологическому присоединению не получал, поскольку не проживает в 

<

адрес>.

Выслушав ответчика ФИО1, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.1 ст. 26 ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, а также существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежавших сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. 

Сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств (п.3 Правил).

Подпункты а и б п.16 Правил гласят, что договор должен содержать следующие существенные условия, в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать.

В соответствии с п.17 Правил, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

В ходе рассмотрения дела установлено, что 4 февраля 2019 г. между ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» и ФИО1 заключен договор ..... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по III категории надежности садового дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сдт «Криптон», кад ...... 

По настоящему договору сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя садового дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 (кВт); категория надежности III; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединения 0,4(кВ); обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (п.1). 

Согласно п.5 данного договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев.

В соответствии с п.8 договора, заявитель обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копию разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения. 

Размер платы за технологическое присоединения определяется в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27 декабря 2017 г. № 17/554 и составляет 550 руб. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в течение 15 календарных дней с момента заключения договора (пункты 10 и 11 договора). 

Во исполнение договорных обязательств, с учетом Технических условий для присоединения к электрическим сетям, являющихся неотъемлемой частью договора, ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» выполнило мероприятия, необходимые для технологического присоединения объекта ответчика к электрическим сетям (объектам электросетевого хозяйства) сетевой организации, что подтверждается документами, представленными истцом. 

05 июля 2019 г. ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» уведомило ФИО1 о выполнении мероприятий по технологическому присоединению (письмо № МР1-КМ/5-2/3897, л.д.14).

11 сентября 2019 г. истцом в адрес ответчика направлена претензия (л.д.18-19) о невыполнении в срок мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения. 

Однако Уведомление и претензия оставлены ответчиком без ответа.

В судебном заседании установлено, что 6 мая 2020 г. истцом составлен акт допуска прибора учета по адресу, указанному в договоре, в эксплуатацию. 

В соответствии со ст.309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п.1 ст.310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

При рассмотрении дела свое несогласие с иском ответчик обосновывает неполучением уведомления от сетевой организации.

Однако материалами дела достоверно подтверждено направление данного уведомления ответчику по адресу, указанному им в договоре. Отсутствие ФИО1 по адресу регистрации и несообщение об этом истцу, не может служить обстоятельством, исключающим исполнение ответчиком обязательств по договору. 

Согласно ст.330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с абзацем 3 подпункта в п.16 Правил, предусмотрена ответственность сторон в виде уплаты неустойки за нарушение сроков по договору. 

Так, обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. 

ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» представлен суду расчет договорной неустойки за нарушение сроков оплаты ответчиком по договору об осуществлении технологического присоединения от 04 февраля 2019 г. ...... Размер неустойки составляет 907 руб. 50 коп.

Расчет истцом произведен правильно и сомнений у суда не вызывает.

В соответствии с п.1 ст.333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Принимая во внимание длительное неисполнение обязательств по договору, оснований для снижения неустойки суд не усматривает. Размер неустойки не завышен и не является обременительным для ответчика.

При таких обстоятельствах, проанализировав материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго».

Согласно ст.88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Как следует из ч.1 ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

При подаче иска ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» уплачена государственная пошлина по данному требованию в размере 400 руб., что подтверждается платежным поручением ..... от 10.03.2020. 

Таким образом, с ответчика ФИО1 в пользу ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» подлежит взысканию государственная пошлина в размере 400 руб.

На основании ст.ст.309, 310, 330, 333 ГК РФ, Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», руководствуясь ст.ст.12, 88, 98, 198 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» неустойку по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 04.02.2019 ..... в размере 907 руб. 50 коп. и госпошлину в сумме 400 руб., а всего взыскать 1307 (одну тысячу триста семь) руб. 50 коп. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Костромской областной суд через Галичский районный суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья Е.В.Балашова

Решение принято в окончательной форме - 04 июня 2020 г.

Судья