Дело № 2-3720/18

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

15 ноября 2018года г. Калининград

Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе:

председательствующего судьи Чесноковой Е.В.

при секретаре Орловой А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Янтарьэнерго» к ФИО1 о понуждении к исполнению обязательств по договору технологического присоединения, взыскании неустойки за неисполнение обязательств по договору, судебной неустойки,

У с т а н о в и л:

АО «Янтарьэнерго» обратилось в суд с иском к ФИО1, просит обязать ФИО1 в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу исполнить абзац 2 п.8 договора технологического присоединения от 06.02.2013года №415/05/13 и п.11 технических условий №Z-1373/12, взыскать с ответчика неустойку за неисполнение обязательств по договору технологического присоединения от 06.02.2013года № 415/05/13 в размере 1254,18рубля за период с 07.02.2014года по 15.06.2018года в соответствии с представленным расчетом, взыскать в пользу АО «Янтарьэнерго» с ответчика в случае неисполнения судебного акта судебную неустойку в размере 100рублей в день, начиная с первого дня (по истечении месячного срока, установленного для добровольного исполнения) до фактического исполнения.

В обоснование иска истец указывает, что между сторонами был заключен договор от 06.02.2013года №415/05/13 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя – склада для хранения овощей, которое будет располагаться по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, бывшие земли ТОО «Васильково».

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению по условиям договора составляет один год с даты его подписания.

Согласованный сторонами объем необходимых к выполнению мероприятий определен в технических условиях №Z-1373/12, являющихся неотъемлемой частью договора.

Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям возможно только после выполнения сторонами своих обязательств по договору и техническим условиям.

АО «Янтарьэнерго» неоднократно (20.09.2017года и 05.03.2018года) уведомляло ответчика об исполнении условий договора и готовности осуществить фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям.

Ввиду отсутствия энергопринимающего устройства необходимого для фактического присоединения и уклонения ФИО1 от выполнения обязательств, установленных п.8 договора и п.11 технических условий, исполнить договор технологического присоединения в полном объеме, а именно произвести фактическое подключение энергопринимающих устройств, принадлежащих ответчику, АО «Янтарьэнерго» не имеет возможности, такое поведение ответчика по мнению истца существенно нарушает баланс законных интересов сторон и добросовестные ожидания истца относительно результатов исполнения договора.

В соответствие с условиями договора нарушение одной из сторон сроков исполнения своих обязательств влечет уплату другой стороне неустойки.

Кроме того, в силу положений п.1 ст.330ГК РФ по требованию кредитора суд вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения судебного акта.

Истец АО «Янтарьэнерго» о месте, времени судебного заседания извещен надлежаще, своего представителя для участия в деле не направил, представителем истца ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие представителя АО «Янтарьэнерго».

Ответчик ФИО1 о месте, времени судебного разбирательства извещен судом надлежаще, в судебное заседание не явился.

Исследовав материалы дела и дав им оценку, суд находит исковые требования АО «Янтарьэнерго» не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с положениями ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики определяются Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике". 

Согласно пункту 1 статьи 26 этого Закона (в редакции действующей на дату заключения договора) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на основании договора об осуществлении технологического присоединения, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения. Указанный договор является публичным.

Передача электрической энергии неразрывно связана с технологическим присоединением к электрическим сетям, мероприятия по технологическому присоединению к электрической сети осуществляются с целью последующей передачи электрической энергии для потребителя. Возможность заключения договора на передачу электроэнергии обусловлена необходимостью заключения обязательного для сетевой организации договора на технологическое присоединение.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. Порядок заключения и выполнения договора урегулированы в разделе II Правил N 861, где указано, что помимо прочего договор должен содержать перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора), срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, положение об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения своих обязательств, в том числе право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре (пункт 16 "б", "в" Правил N 861).

Согласно пункту 16.3 Правил технологического присоединения обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, названными в пунктах 12.1 - 14 и 34 Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, ответчик ФИО1 является собственником земельного участка по адресу (местоположение) установленного относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир расположенный восточнее шоссе Калининград-Гурьевск, почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>

Данный земельный участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения.

06.02.2013года между сторонами был заключен договор №415/05/12 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ЩВУ объекта Заявителя, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, присоединение энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 15,00кВт, а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Пунктом 2 договора предусмотрено, что технологическое присоединение необходимо для электроснабжения склада для хранения овощей, который будет располагаться по адресу: 

<

адрес>

Согласно п. п. 4 - 5 договора от 06.02.2013года, технические условия являются неотъемлемой частью данного договора. Срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1год.

В соответствии с п. 6 договора Сетевая организация приняла на себя следующие обязательства:

- исполнить обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условия;

- в течение 10 рабочих дней со дня уведомления Заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителя;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;

- не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномо федерального органа исполнительной власчти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока, установленного п.5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактические прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии Заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их Заявителю.

Обязательства заявителя изложены в пункте 8 договора, согласно которому заявитель обязался:

- исполнить обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях;

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка Заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору

- получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов;

- после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности, подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологмического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 10 дней со дня получения указанных актов от сетевой организации;

- надлежащим образом исполнить обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

- уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Согласно Техническим условиям от 16.05.2012года №Z-1373/12 для присоединения к электрическим сетям, являющимся неотъемлемой частью договора, год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя - 2012 год.

По Техническим условиям сетевая организация в целях усиления существующей сети обязалась от ПС 110/15 кВ 0-24 до ТП 254-4 построить воздушно-кабельную линию 15кВ сечением токопроводящих жил 95кв.м на воздушном участке и 150кв.ми-на кабельном; для присоединения ЛЭП по п.10.1 в ЗРУ 15кВ ПС 0-24 линейную ячейку оборудовать: силовым выключателем 24кВ, 630А, трансформаторами тока, средствами РЗиА для защиты и автоматики ЛЭП 15кВ; обеспечить подключение ЛЭП по п.10.1 к телекомплексу «Систел», для чего на ПС 0-24 заменить КП «Гранит» на КП «Систел»; в РУ 15кВ ТП 254-4 оборудовать линейную ячейку выключателями нагрузки; от ТП 254-4 до оп. №43 магистрали ВЛ 15-47 или оп. №43-1 ответвл. ВЛ 15-47 к ТП 47-4 построить ВЛ 15кВ сечением токопроводящих жил не менне 95кв.мм, установить ДР в сторону ТП 47-1.

В целях присоединения нового потребителя: на границе участка построить трансформаторную подстанцию (ТП), конструкцию ТП и мощность трансформаторов определить проектом; от опор № (уточнить при проектировании) ЛЭП 15кВ по п.10.1 до ТП по п.10.6 построить ЛЭП 15кВ сечением токопроводящих жил не менее 50кв.м (протяженность 20м). Присоединение выполнить через отключающий пункт. Для варианта КЛ- выполнить расчет емкостных токов замыкания на землю.

По Техническим условиям Заявитель обязался произвести монтаж электросети от точки присоединения (через ЩВУ) до ВРУ 0,4 кВ объекта СИП или КЛ соответствующей пропускной способности. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. На вводном устройстве установить автоматический выключатель с номинальным током теплового расцепителя в соответствии с расчетной мощностью; установить приборы учета для расчетов за электроэнергию в соответствии с требованиями ПУЭ устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности; место посадки объекта на застраиваемом участке согласовать с филиалом ОАО «Янтарьэнерго» «ЗЭС».

Срок действия Технических условий – 5 лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Пунктом 7 договора предусмотрено, что сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий.

В соответствии с п. 10 договора размер платы за технологическое присоединение составляет 550рублей. 

Факт оплаты ответчиком денежных средств за технологическое присоединение истцом не оспаривался.

Таким образом, исходя из условий договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек 06.02.2014года, а срок действия технических условий 06.02.2018года.

20.09.2017года сетевая организация направила в адрес заявителя ФИО1 уведомление о выполнении сетевой организацией в полном объеме своих обязательств по техническим условиям и готовности осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств при условии выполнения заявителем обязательств, предусмотренных договором и техническими условиями.

Аналогичное уведомление направлено в адрес заявителя 05 марта 2018года.

Обращаясь в суд с настоящим иском о возложении на ФИО1 обязанности после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий, предусмотренной абз.2 ст.8 заключенного сторонами договора об осуществлении технологического присоединения, а также осуществить мероприятия, возложенные на заявителя, п.11 технических условий, истец ссылается на то, что ответчик незаконно уклоняется от исполнения своих обязательств по договору и техническим условиям, затягивая своими действиями процесс завершения технологического присоединения.

Вместе с тем, возникновение итогового результата в виде технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя на земельном участке истца осуществляется в интересах заявителя, а не сетевой организации.

Невыполнение заявителем со своей стороны условий технологического задания, а также не извещение ответчика о готовности к подключению не имеют правового значения, поскольку договором, а также Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям предусмотрен определенный порядок действий сторон по техническому подключению объектов заявителя к электрическим сетям, согласно которым только после уведомления заявителя о выполнении им обязанностей по договору сетевая организация осуществляет проверку выполнения технических условий заявителем.

Поскольку установленный в договоре срок мероприятий по технологическому присоединению истек 06.02.2014года, заявитель не совершил никаких действий, направленных на достижение результата, предусмотренного договором в период его действия, срок действия технических условий истек, о продлении срока действия технических условий, что предусмотрено п.9 договора заявитель не обращался, при том, что продление срока действия технических условий является правом, а не обязанностью заявителя, в силу специфики заключенного сторонами договора, возложение на заявителя обязанности по исполнению предусмотренных договором обязательств, а именно, после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий ( абз.2 ст.8 заключенного сторонами договора об осуществлении технологического присоединения), а также осуществить мероприятия, возложенные на заявителя, п.11 технических условий, объективно не возможно, в этой связи такие требования истца не подлежат удовлетворению. 

Кроме того, суд учитывает и то обстоятельство, что нарушение предусмотренных договором обязательств имело место и со стороны сетевой организации, уведомление о готовности осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств объекта заявителя и выполнении сетевой организацией своих обязательств по техническим условиям, направлено в адрес заявителя только в сентябре 2017года, что свидетельствует о нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре и является предусмотренным законом основанием для расторжения заявителем договора в одностороннем порядке. 

При этом, заявляя требования о взыскании неустойки, сторона злоупотребляет своими правами, поскольку очевидно, что по состоянию на 06.02.2014года технологическое присоединение энергопринимающих устройств не произошло ввиду бездействия каждой из сторон. Доказательств не выполнения ответчиком определенных договором требований, не позволяющих сетевой организации исполнять свои обязательства по договору, истец не представил.

При таком положении, требования истца о взыскании с ответчика предусмотренной договором неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору, не подлежат удовлетворению.

Поскольку в иске о понуждении ответчика к исполнению обязательства в натуре отказано, не имеется оснований и для удовлетворения требований истца о взыскании с ответчика судебной неустойки.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В иске АО «Янтарьэнерго» к ФИО1 о понуждении к исполнению обязательств по договору технологического присоединения, взыскании неустойки за неисполнение обязательств по договору технологического присоединения, судебной неустойки, - отказать.

Решение может быть обжаловано сторонами посредством подачи апелляционной жалобы в Калининградский областной суд через Ленинградский районный суд города Калининграда в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 22 ноября 2018года.

Судья: Е.В. Чеснокова