РЕШЕНИЕ

ИменемРоссийскойФедерации

20.06.2018гКрасногорскийгородскойсудМосковскойобластивсоставе:

председательствующегосудьиКаверинойО.В.

присекретареЕгоровойЮ.А.

рассмотреввоткрытомсудебномзаседанииделоискуШараповаРушанаФаритовичакООО«Хайгейт»озащитеправпотребителя

УСТАНОВИЛ:

ШараповР.Ф.предъявилкООО«Хайгейт»искозащитеправпотребителя.Вобоснованиетребованийпредставительуказывает,что08.02.2016гмеждусторонамизаключендоговор№ДУ-11-003участиявдолевомстроительстве,поусловиямкоторогоответчикобязалсянепозднее29.09.2017г.передатьистцуобъектдолевогостроительства,-квартирупостроительномуадресу:Московскаяобласть,Красногорскийрайон,вблизиг.Красногорска,наземельномучасткескадастровымномером50:11:0040203:48,

<

адрес>,квартирасусловнымномером3,однакосрокиисполненияобязательстваответчикомнарушены,квартирапереданаистцутолько19.02.2018г.

Неустойказапериодс30.09.2017гпо19.02.2018г.составит245105руб30коп.

Указаннуюсумму,атакже10000рубвсчеткомпенсацииморальноговредаиштрафвсоответствиисп.6ст.13ЗаконаРФ«Озащитеправпотребителей»,судебныерасходыпроситвзыскатьсответчика.

Представительответчикавсудебноезаседаниенеявился,просилрассмотретьделовегоотсутствие,снизитьнеустойку,применивположенияст.333ГКРФ.

Выслушавобъясненияучаствующихвделелиц,изучивматериалыдела,исследовавиоценивдоказательствавсовокупности,судсчитаетисковыетребованияподлежащимичастичномуудовлетворению.

Всоответствиисост.6ЗаконаРФот30.12.2004г.N214-ФЗ"Обучастиивдолевомстроительствемногоквартирныхдомовииныхобъектовнедвижимости"вслучаенарушенияпредусмотренногодоговоромсрокапередачиобъектадолевогостроительствазастройщикуплачиваетдольщикунеустойкувразмере1/300ставкирефинансированияЦБРФ,действующейнаденьисполненияобязательства,отценыдоговоразакаждыйденьпросрочки.Еслиучастникомдолевогостроительстваявляетсягражданин,такаянеустойкауплачиваетсязастройщикомвдвойномразмере.

Судомустановлено,что08.02.2016гмеждусторонамизаключендоговор№ДУ-11-003участиявдолевомстроительстве,поусловиямкоторогоответчикобязалсянепозднее29.09.2017г.передатьистцуобъектдолевогостроительства,-квартирупостроительномуадресу:Московскаяобласть,Красногорскийрайон,вблизиг.Красногорска,наземельномучасткескадастровымномером50:11:0040203:48,

<

адрес>,квартирасусловнымномером3,однакосрокиисполненияобязательстваответчикомнарушены,квартирапереданаистцутолько19.02.2018г.

Неустойказапериодс30.09.2017гпо19.02.2018г.составит245105руб30коп.

Всоответствиисост.333ГКРФсудсчитаетвозможнымснизитьразмернеустойкидо115000руб.

Приэтомсудучитываетнебольшойпериодпросрочкисоразмерностьвзыскиваемойнеустойкипоследствиямнарушенияобязательств,необходимостисоблюдениябалансаинтересовсторон.

Всилуст.15ЗаконаРФ«Озащитеправпотребителей»всчеткомпенсацииморальноговредавпользуистцаследуетвзыскать5000руб,атакжештраф,предусмотренныйп.6ст.13тогожеЗакона.

Согласност.ст.98,100ГПКРФсответчикаподлежатвзысканиюрасходыпооплатеуслугпредставителявразумныхпределах10000руб.

Вудовлетворенииостальнойчаститребованийследуетотказать.

Руководствуясьст.ст.193-198ГПКРФ,суд

РЕШИЛ:

Исковыетребованияудовлетворитьчастично.

ВзыскатьсООО«Хайгейт»впользуШараповаРушанаФаритовичанеустойкузапериодс30.09.2017гпо19.02.2018г115000руб,компенсациюморальноговреда5000руб,штраф60000руб,расходыпооплатеуслугпредставителя10000руб,авсего190000руб.

Вудовлетворенииостальнойчаститребованийотказать.

РешениеможетбытьобжаловановМосковскийобластнойсудвтечениеодногомесяцасмоментапринятиясудомрешениявокончательнойформе.

Судья:О.В.Каверина