Дело № 2-1637/2020 г. Выборг

УИД 47RS0005-01-2020-000798-15

Р Е Ш Е Н И Е

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

09 сентября 2020 года.

Выборгский городской суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Вериго Н. Б.,

при секретаре Саидовой Х. К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества " Россети Ленэнерго" к ФИО1 о расторжении договора, взыскании неустойки, убытков, 

установил:

Публичное акционерное общество " Россети Ленэнерго" (ранее ПАО «Ленэнерго») первоначально обратилось в Выборгский городской суд Ленинградской области с исковым заявлением к ФИО1 о расторжении договора о технологическом присоединении к электрическим сетям, взыскании неустойки, убытков, просило: расторгнуть Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.07.2018 № ОД-ВЭС-21316-18/31067-Э-18, заключенный между ПАО «Ленэнерго» и ФИО1; взыскать с ФИО1, Дата года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: Ленинградская 

<

адрес> неустойку за нарушение сроков оплаты расходов за технологическое присоединение в размере 660 (шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек; неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению в размере 10 037 (десять тысяч тридцать семь) рублей 50 копеек; убытки в размере 4 080 (четыре тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, расходы по уплате госпошлины в размере 6 592 (шесть тысяч пятьсот девяносто два) рублей.

В обоснование заявленных исковых требований истец указал, что 23.07.2018 между ПАО «Ленэнерго» и ФИО1 заключен Договор №ОД- ВЭС-21316-18/31067-Э-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта «дом», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Первомайское сельское поселение, п. Первомайское, кадастровый номер №.

В соответствии с п. 1 Договора Сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ответчика.

Пунктом 8 Договора установлена обязанность ответчика исполнить надлежащим образом, в определённый Договором срок, мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, а также обязанность по оплате расходов на технологическое присоединение.

Согласно п.5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора, т.е. до 23.11.2018.

В соответствии с п. 10 Договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 26.12.2017 №648-п и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18% 83,90 рубля.

Согласно п. 11 Договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора, то есть до 03.08.2018. 

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов за технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (п. 12 Договора).

Обязанность Ответчика по оплате расходов за технологическое присоединение исполнена только 27.08.2018, с нарушением срока оплаты на 24 дня, что подтверждается оборотно-сальдовой ведомостью по счету 62 (по Договору №ОД-ВЭС-21316-18/31067-Э- 18 от 23.07.2018).

Подпунктом «в» п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее - Правила ТП), и абз.1 п. 17 Договора предусмотрена обязанность одной из сторон Договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 55"0 рублей, уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном абз.1 п. 17 Договора порядке, за год просрочки.

Заявитель считается просрочившим исполнение обязательств по оплате расходов за технологическое присоединение с 04.08.2018 по 27.08.2018.

Размер неустойки по образовавшейся задолженности по состоянию на 27.08.2018 составляет 660 рублей 00 копеек, согласно расчету: 24 (кол-во дней просрочки) *0,05* 550, 00 руб. (общий размер платы за ТП) =660 рублей.

Таким образом, размер неустойки по Договору за неисполнение обязательств по оплате расходов за технологическое присоединение составляет 660 (шестьсот шестьдесят) рублей.

Сетевой организацией в полном объеме исполнены обязательства по обеспечению технической возможности осуществления технологического присоединения объекта ответчика к электрическим сетям, что подтверждается Уведомлением №ЭСКЛ/16- 01/14119 от 23.07.2018.

Нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны Заявителя наступает с 24.11.2018.

Поскольку сведения о готовности энергопринимающих устройств ответчика отсутствовали, в соответствии со ст.450.1, ст.453 ГК РФ, в адрес ответчика направлена претензия №ВЭС/031/1113/118 от 25.02.2019 с предложением о расторжении Договора в случае невыполнения обязательств по Договору и требованием об уплате начисленной неустойки за просрочку исполнения обязательств.

Требования, изложенные в указанной претензии, ответчик не исполнил. Ответа от ФИО1 на данную претензию не поступило.

Просрочка ответчика за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению наступает с 24.11.2018 по 04.02.2020 и составляет 438 дней.

Размер неустойки по образовавшейся задолженности по состоянию на 04.02.2020 отставляет 12 045, 00 рублей, согласно расчету: 438 (кол-во дней просрочки) *0,05* 550, 00 руб. (общий размер платы за ТП) = 12 045, 00 рублей.

С учетом ограничения, установленного пп. «в» п. 16 Правил ТП и п.17 Договора общий размер неустойки не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки и составляет 10 037, 50 рублей.

Таким образом, ответчик считается просрочившим исполнение обязательств по договору с 24.11.2018 по 04.02.2020.

Расчет неустойки в соответствие с п. 17 Договора: 5%*550,00*365 = 10 037,50 рублей, где 5 - размер неустойки за каждый день просрочки (%), 550,00 - размер платы по Договору (руб.), 365 - количество дней просрочки (с учетом ограничения, установленного п.17 Договора - 1 год).

Таким образом, размер неустойки по Договору за год просрочки составляет 10 037 (десять тысяч тридцать семь) рублей 50 копеек.

Согласно абз.2 п.17 Договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым п.17, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Согласно п. 16(5) Правил ТП, нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

В соответствие с п. 16(6) Правил ТП срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем в случае не направления в адрес сетевой организации уведомления о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомления об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий.

Пункт 18 Правил ТП предусматривает, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий сетевой организацией и заявителем, включая проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий.

Договор между Истцом и Ответчиком был заключен 23.07.2018, обязательства по выполнению технических условий должны быть исполнены в соответствии с Договором до 23.11.2018.

Просрочка заявителя в исполнении мероприятий составляет более 12 месяцев.

Таким образом, неисполнение Ответчиком обязательств, предусмотренных п.8 Договора является основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации.

В соответствии с условиями Договора, он может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с Приложением № 2 к Приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 26.12.2017 г. N 648-п «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности», ставка для расчета платы за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю составляет 272 руб. за каждый кВт, без учёта НДС.

Присоединяемая мощность по Договору: 15 кВт, 272 руб. х 15 кВт = 4 080 руб. Таким образом, сумма убытков, понесённых Истцом при исполнении Договора, составляет 4 080 (четыре тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек.

Ни в установленный срок, ни на момент подачи искового заявления ответчиком не исполнены обязательства по выполнению Технических условий со стороны ответчика и перечислению неустойки на расчетный счет ПАО «Россети Ленэнерго».

Неисполнение ответчиком обязательств нарушает законные права истца и является основанием для защиты нарушенных прав в судебном порядке.

Представитель истца ПАО «Россети Ленэнерго» надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явилась, в заявлении, адресованном суду, требования поддержала, также просила рассмотреть дело в её отсутствие, требования удовлетворить.

Ответчик ФИО1 надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явилась, возражений не представила. 

Суд, исследовав доказательства, приходит к следующему. 

Из материалов дела следует, что 23.07.2018 между ПАО «Ленэнерго» и ФИО1 заключен Договор №ОД- ВЭС-21316-18/31067-Э-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта «дом», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Первомайское сельское поселение, п. Первомайское, кадастровый номер №.

В соответствии с п. 1 Договора Сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ответчика.

Пунктом 8 Договора установлена обязанность ответчика исполнить надлежащим образом, в определённый Договором срок, мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, а также обязанность по оплате расходов на технологическое присоединение.

Согласно п.5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора, т.е. до 23.11.2018.

В соответствии с п. 10 Договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 26.12.2017 №648-п и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18% 83,90 рубля.

Согласно п. 11 Договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора, то есть до 03.08.2018. 

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов за технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (п. 12 Договора).

Обязанность Ответчика по оплате расходов за технологическое присоединение исполнена только 27.08.2018, с нарушением срока оплаты на 24 дня, что подтверждается оборотно-сальдовой ведомостью по счету 62 (по Договору №ОД-ВЭС-21316-18/31067-Э- 18 от 23.07.2018).

Подпунктом «в» п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее - Правила ТП), и абз.1 п. 17 Договора предусмотрена обязанность одной из сторон Договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 55"0 рублей, уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном абз.1 п. 17 Договора порядке, за год просрочки.

Ответчик считается просрочившим исполнение обязательств по оплате расходов за технологическое присоединение с 04.08.2018 по 27.08.2018.

Размер неустойки по образовавшейся задолженности по состоянию на 27.08.2018 составляет 660 рублей 00 копеек, согласно расчету: 24 (кол-во дней просрочки) *0,05* 550, 00 руб. (общий размер платы за ТП) =660 рублей.

Таким образом, размер неустойки по Договору за неисполнение обязательств по оплате расходов за технологическое присоединение составляет 660 (шестьсот шестьдесят) рублей.

Сетевой организацией в полном объеме исполнены обязательства по обеспечению технической возможности осуществления технологического присоединения объекта ответчика к электрическим сетям, что подтверждается Уведомлением №ЭСКЛ/16- 01/14119 от 23.07.2018.

Нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны Заявителя наступает с 24.11.2018.

Поскольку сведения о готовности энергопринимающих устройств ответчика отсутствовали, в соответствии со ст.450.1, ст.453 ГК РФ, в адрес ответчика направлена претензия №ВЭС/031/1113/118 от 25.02.2019 с предложением о расторжении Договора в случае невыполнения обязательств по Договору и требованием об уплате начисленной неустойки за просрочку исполнения обязательств.

Требования, изложенные в указанной претензии, ответчик не исполнил. Ответа от ФИО1 на данную претензию не поступило.

Просрочка ответчика за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению наступает с 24.11.2018 по 04.02.2020 и составляет 438 дней.

Размер неустойки по образовавшейся задолженности по состоянию на 04.02.2020 отставляет 12 045, 00 рублей, согласно расчету: 438 (кол-во дней просрочки) *0,05* 550, 00 руб. (общий размер платы за ТП) = 12 045, 00 рублей.

С учетом ограничения, установленного пп. «в» п. 16 Правил ТП и п.17 Договора общий размер неустойки не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки и составляет 10 037, 50 рублей.

Таким образом, ответчик считается просрочившим исполнение обязательств по договору с 24.11.2018 по 04.02.2020.

Расчет неустойки в соответствие с п. 17 Договора: 5%*550,00*365 = 10 037,50 рублей, где 5 - размер неустойки за каждый день просрочки (%), 550,00 - размер платы по Договору (руб.), 365 - количество дней просрочки (с учетом ограничения, установленного п.17 Договора - 1 год).

Таким образом, размер неустойки по Договору за год просрочки составляет 10 037 (десять тысяч тридцать семь) рублей 50 копеек.

Согласно абз.2 п.17 Договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым п.17, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Согласно п. 16(5) Правил ТП, нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

В соответствие с п. 16(6) Правил ТП срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем в случае не направления в адрес сетевой организации уведомления о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомления об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий.

Пункт 18 Правил ТП предусматривает, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий сетевой организацией и заявителем, включая проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий.

В соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Договор между Истцом и Ответчиком был заключен 23.07.2018, обязательства по выполнению технических условий должны быть исполнены в соответствии с Договором до 23.11.2018.

Просрочка заявителя в исполнении мероприятий составляет более 12 месяцев. Таким образом, неисполнение ответчиком обязательств, предусмотренных п.8 говора является основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации.

В соответствии с условиями договора, он может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с п. 2 ст. 328 ГК РФ в случае не предоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе отказаться от исполнения этого обязательства.

Пунктом 2 ст.450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

при существенном нарушении договора другой стороной;

в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с п. 5 ст. 453 ГК РФ, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

В соответствии с Приложением № 2 к Приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 26.12.2017 г. N 648-п «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности», ставка для расчета платы за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю составляет 272 руб. за каждый кВт, без учёта НДС.

Присоединяемая мощность по Договору: 15 кВт, 272 руб. х 15 кВт = 4 080 руб. Таким образом, сумма убытков, понесённых истцом при исполнении Договора, составляет 4 080 (четыре тысячи восемьдесят) рублей.

До настоящего времени ответчиком не исполнены обязательства по выполнению Технических условий со стороны Заявителя и перечислению неустойки на расчетный счет ПАО «Россети Ленэнерго».

Указанные обстоятельства подтверждены материалами дела, ответчиком не опровергнуты.

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается в обоснование своих требований или возражений по делу.

Доказательств, опровергающих установленные судом обстоятельства, ответчиком суду не представлено, в ходе рассмотрения дела не добыто.

Неисполнение ответчиком обязательств нарушает законные права истца в связи с чем, заявленные требования основаны на законе и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования публичного акционерного общества " Россети Ленэнерго" к ФИО1 о расторжении договора, взыскании неустойки, убытков, удовлетворить.

Расторгнуть Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.07.2018 № ОД-ВЭС-21316-18/31067-Э-18, заключенный между ПАО «Ленэнерго» и ФИО1.

Взыскать с ФИО1, Дата года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> неустойку за нарушение сроков оплаты расходов за технологическое присоединение в размере 660 (шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек; неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению в размере 10 037 (десять тысяч тридцать семь) рублей 50 копеек; убытки в размере 4 080 (четыре тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, расходы по уплате госпошлины в размере 6 592 (шесть тысяч пятьсот девяносто два) рублей, а всего взыскать –21 369, 50 рублей (двадцать одна тысяча триста шестьдесят девять рублей 50 копеек).

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца с момента изготовления решения в окончательной форме в Ленинградский областной суд через Выборгский городской суд.

Судья Н. Б. Вериго

47RS0005-01-2020-000798-15

Подлинный документ находится в производстве Выборгского городского суда Ленинградской области, подшит в деле №2-1637/2020