дело № 2-2511/2019

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 ноября 2019 года город Севастополь

Ленинский районный суд города Севастополя в составе:

Председательствующего – судьи Прохорчук О.В.

секретарь судебного заседания – Бутакова А.А.,

с участием:

истца – ФИО1,

представителя истца - ФИО2, по устному ходатайству,

представителя ответчика – ФИО3, на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к Публичному акционерному обществу по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» о понуждении совершить определенные действия,

установил:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ПАО по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» о понуждении ответчика произвести работы по подключению (технологическому присоединению) на объект капитального строительства – жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, к сети газораспределения, принадлежащей истцу на праве собственности, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходам газа) газоиспользующего оборудования и пуску газа в течение 10 дней согласно договору.

Исковые требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ПАО по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» заключен договор о подключении (технологическим присоединении) объекта капитального строительства - жилого дома по адресу: 

<

адрес>, к сети газораспределения, принадлежащей истцу на праве собственности, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходам газа) газоиспользующего оборудования.

Согласно условиям договора срок выполнения мероприятий по подключению объекта капитального строительства и пуску газа составляет 1 год со дня заключения договора. Соответственно обязательства ответчика должны были быть исполнены в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Однако до настоящего времени обязательства по договору ответчиком не исполнены. Таким образом, ответчиком нарушены права истца как потребителя.

Истцом условия договора в части оплаты выполнены в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ. Акт о готовности сетей газораспределения и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) подписан сторонами ДД.ММ.ГГГГ. Акт разграничения имущественной принадлежности и акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон также были подписаны ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ истцом подана претензия в адрес ответчика, однако оставлена без удовлетворения.

В судебном заседании истец заявленные требования уточнила, просила иск удовлетворить в части понуждения ответчика осуществить пуск газа к объекту капитального строительства в течение 10 дней согласно договору, поскольку все иные мероприятия ответчиком выполнены.

Представитель ответчика исковые требования признал частично, полагая, что срок должен быть установлен судом в 30 дней.

Выслушав пояснения истца и представителей сторон, исследовав представленные письменные доказательства, суд приходит к выводу о том, что уточненные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ПАО по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» и ФИО4 заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения №.

Согласно предмету указанного договора ответчик обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) жилого дома по адресу: 

<

адрес>, к сети газораспределения, а истец обязалась оплатить услуги по подключению (техническому присоединению).

Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 1 год со дня заключения настоящего договора (пункт 3 договора).

Исполнитель обязан, в том числе, осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капительного строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора (пункт 5 договора).

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства составляет 59 220 руб. (пункт 10 договора).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 16 договора).

Согласно ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на судебную защиту его прав и свобод.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать восстановления нарушенного права.

Способы защиты гражданских прав предусмотрены ст.12 ГК РФ.

Согласно положениям ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в ГК РФ, и заключаются в обязанности одного лица (должника) совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, либо воздержаться от определенного действия, а также в корреспондирующем этому праве кредитора требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии с положениями ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный правовыми актами, в котором содержатся элементы различных договоров. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано правовыми актами.

Как следует из положений ст. ст. 309 - 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ или одностороннее изменение условий обязательства не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 1, п. 2 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства (ч. 1). Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (ч. 2).

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Как следует из материалов дела, оплата по договору произведена ФИО1 в полном объеме: ДД.ММ.ГГГГ – в размере 29 610,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в размере 29 610,00 руб.

Обязательства по настоящему договору ПАО по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» до настоящего времени в полном объеме не исполнены. ДД.ММ.ГГГГ, после возбуждения судом производства по настоящему делу, ответчиком осуществлена врезка на действующем газопроводе, ДД.ММ.ГГГГ между сторонами заключен договор на оказание услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, ДД.ММ.ГГГГ между сторонами заключен договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, истцу выдана расчетная книжка оплаты за природный газ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществлена оплата пуско-наладочных работ по вводу в эксплуатацию надземного газопровода к жилому дому при длине до 100 м, за первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и бытового счетчика. Пуск газа к объекту капитального строительства, принадлежащему истцу, до настоящего времени не осуществлен.

Доказательств невозможности выполнения условий договора в полном объеме ответчиком суду не представлено.

В соответствии с ч. ч. 1, 5 ст. 28 указанного Закона исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Таким образом, учитывая, что ПАО по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» нарушены условия договора в части срока выполнения работ, который истек ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, по пуску газа в жилой дом истца, суд полагает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Руководствуясь статьями 194-199, 321 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

иск удовлетворить.

Обязать Публичное акционерное общество по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» выполнить условия договора № от ДД.ММ.ГГГГ по пуску газа в жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Публичного акционерного общества по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» в пользу ФИО1 расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 (трехсот) руб.

Решение может быть обжаловано в Севастопольский городской суд путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд города Севастополя в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья

В окончательной форме решение принято ДД.ММ.ГГГГ.