Дело № 2- 3627 / 2018 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

08 октября 2018 года г.Чебоксары

Ленинский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики в составе:

председательствующего судьи Филипповой Н.И.,

при секретаре судебного заседания Сидорове А.Ю., 

с участием истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 ФИО5 к ООО «Жилой комплекс «ПОБЕДА» о взыскании неустойки, штрафа, судебных расходов,

установил:

ФИО1 обратилась в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью ООО «Жилой комплекс «ПОБЕДА» с требованиями о взыскании неустойки за просрочку передачи гаражных боксов за период с дата в размере 97 944 руб., штрафа в соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», судебных расходов.

В обоснование исковых требований в заявлении указано, что в соответствии с договорами ----- участия в долевом строительстве подземной двухуровневой парковки Жилого Комплекса по адрес от дата застройщик обязался в срок до дата передать истцу, как участнику долевого строительства, гаражные боксы под строительными номерами ----- подземной двухуровневой парковки Жилого Комплекса по адрес, а истец - уплатить цену договоров в размере 630 000 руб. Указанная стоимость уплачена Истцом в полном объеме. Однако, в нарушение п.2.2 договора объект долевого строительства по настоящее время истцу не передан. Ссылаясь на изложенные обстоятельства, положения Закона РФ «О защите прав потребителей», ФЗ от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве», истец просит взыскать вышеуказанные суммы с ответчика в ее пользу.

Истец ФИО1 в ходе судебного заседания исковые требования поддержал по изложенным в исковом заявлении основаниям.

Представитель ответчика ООО «Жилой комплекс «ПОБЕДА», надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явился.

С учетом мнения истца, суд приходит к выводу о рассмотрении дела в соответствии со ст. 167 ч.1 и ч.3 ГПК РФ при имеющейся явке. 

Выслушав пояснения истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пункту 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» к отношениям, возникающим из договора участия в долевом строительстве, заключенного гражданином в целях приобретения в собственность жилого помещения и иных объектов недвижимости исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, законодательство о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной данным законом.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон) по договору участия в долевом строительстве (далее - договор) одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Судом установлено, что дата между истцом и ответчиком был заключен договор ----- участия в долевом строительстве подземной двухуровневой парковки Жилого Комплекса по адрес, в соответствии с которым ответчик обязался в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить подземную двухуровневую парковку на ------ машиномест по адресу: адрес и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать объект долевого строительства - гаражный бокс ----- этой подземной парковки участнику долевого строительства, а участник долевого строительства обязался уплатить обусловленную цену договора и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. Договором плановый срок завершения строительства объекта установлен дата, срок передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства - до дата. Цена договора на момент заключения договора составляет 315 000 рублей. 

дата между истцом и ответчиком был заключен договор ----- участия в долевом строительстве подземной двухуровневой парковки Жилого Комплекса по адрес в соответствии с которым ответчик обязался в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить подземную двухуровневую парковку на ------ машино-мест по адресу: адрес и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать объект долевого строительства – гаражный бокс ----- участнику долевого строительства, а участник долевого строительства обязался уплатить обусловленную цену договора и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. Договором участнику долевого строительства объекта долевого строительства - до дата. Цена договора на момент заключения договора составляет 315 000 рублей.

Истцом обязательства по договору исполнены, однако ответчик своих обязательств по передачи объекта долевого строительства в собственность истца в срок, установленный договором, а именно - до дата не исполнил. Истцом в адрес ООО «ЖК «Победа» была направлена претензия с требованием о выплате неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства истцу, однако ответчик требования истца не исполнил.

В соответствии со ст.8 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства осуществляются по подписываемым сторонами передаточному акту или иному документу о передаче.

Передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее, чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

После получения застройщиком в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости застройщик обязан передать объект долевого строительства не позднее предусмотренного договором срока. При этом не допускается досрочное исполнение застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства, если иное не установлено договором.

Застройщик не менее чем за месяц до наступления установленного договором срока передачи объекта долевого строительства или в случае, если договором предусмотрен срок начала передачи и принятия объекта долевого строительства, не менее чем за четырнадцать рабочих дней до наступления срока начала передачи и принятия обязан направить участнику долевого строительства сообщение о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче, а также предупредить участника долевого строительства о необходимости принятия объекта долевого строительства и о последствиях бездействия участника долевого строительства, предусмотренных частью 6 настоящей статьи. Сообщение должно быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по указанному участником долевого строительства почтовому адресу или вручено участнику долевого строительства лично под расписку. При этом срок начала передачи и принятия объекта долевого строительства не может быть установлен ранее, чем за четырнадцать дней и позднее, чем за один месяц до установленного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства. Участник долевого строительства, получивший сообщение застройщика о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче, обязан приступить к его принятию в предусмотренный договором срок или, если такой срок не установлен, в течение семи рабочих дней со дня получения указанного сообщения.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Частью 2 ст. 6 Закона установлено, что в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Просрочка за период с дата. составляет ------ дней, ставка рефинансирования на день исполнения обязательства – на дата. составляет ------ % годовых.

Неустойка составляет 97 944 руб. ------ 

В соответствии со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Заявления об уменьшении суммы неустойки от ответчика не поступало, в связи с чем суд не усматривает оснований для ее уменьшения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

Сумма штрафа составляет 48 972 руб. (------ 

Оснований для уменьшения суммы штрафа суд не находит.

Истец также просит взыскать расходы на оплату услуг представителя в размере 3000 руб. 

Несение истцом указанного вида расходов подтверждается договором возмездного оказания юридических услуг от датаг., заключенным между истцом и ИП ФИО3, и квитанцией ----- от датаг. 

В соответствии со ст.100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

С учетом объема выполненных работ, требований разумности и справедливости, суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату услуг представителя в размере 3 000 руб.

Согласно ст.103 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ с ответчика подлежит взысканию госпошлина в доход бюджета города Чебоксары в размере 3 138 руб. 32 коп. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Взыскать с ООО «Жилой комплекс «ПОБЕДА» в пользу ФИО1 ФИО6 неустойку за нарушение срока передачи участнику долевого строительства объектов долевого строительства за период с дата в размере 97 944 руб. 00 коп.; штраф в соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» в размере 48 972 руб. 00 коп., расходы на оплату услуг представителя в размере 3 000 руб.

Взыскать с ООО «Жилой комплекс «ПОБЕДА» в доход бюджета города Чебоксары государственную пошлину в размере 3 138 руб. 32 коп. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Чувашской Республики через Ленинский районный суд города Чебоксары в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Судья Н.И. Филиппова