Дело № 2-1918/17

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об утверждении мирового соглашения

09 июня 2017 года город Ульяновск

Заволжский районный суд города Ульяновска в составе

председательствующего судьи Николаевой Н.Д.,

при секретаре Пекарской О.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1, ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Запад-2» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО5 обратился в суд с иском к ООО «Запад-2» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда.

В обоснование иска указали, что 23.12.2015 между ними и ответчиком был заключен договор № № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Стоимость договора в размере 2497250 руб. была участниками оплачена в полном объеме. В соответствии с договором от 23.12.2015 объект долевого строительства – трехкомнатная квартира проектный номер 142, должна быть передана истцам не позднее 25.10.2016. Фактически квартира была передана 21.12.2016, то есть с просрочкой на 58 дней. Согласно ст. 6 Закона об участии в долевом строительстве застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Центральным Банком России установлена ключевая ставка в размере 9,75 %. Просят взыскать с ответчика в свою пользу неустойку в размере 94 146 руб. 32 коп., в счет компенсации морального вреда 15000 руб. в пользу каждого.

Истцы ФИО1 и ФИО2 в судебное заседание не явились, о слушании дела извещены.

В судебном заседании представитель истцов ФИО3, действующий на основании доверенности от 12.04.2017, и представитель ответчика ООО «Запад-2» ФИО4, действующий на основании доверенности от 21.07.2016, заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения, по условиям которого: ООО «Запад-2» обязуется выплатить ФИО1, ФИО2 в срок до 28.06.2017 неустойку в размере 51000 руб., компенсацию морального вреда в размере 4000 руб., в равных долях на каждого по 27500 руб., а ФИО1, ФИО2 отказываются от остальных своих исковых требований в полном объеме.

Производство по делу просят прекратить. 

В силу ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

Условия мирового соглашения изложены сторонами в письменном виде, заявление подписано ими и приобщено к материалам дела. Полномочия представителя истца и представителя ответчика на заключение мирового соглашения предусмотрены в доверенностях. 

Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ. 

Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересы иных лиц, суд считает, что соглашение подлежит утверждению, а производство по делу следует прекратить.

Руководствуясь ст.ст. 39, 173, ст. 221 ГПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу по иску ФИО1, ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Запад-2» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, по условиям которого: 

общество с ограниченной ответственностью «Запад-2» обязуется выплатить ФИО1, ФИО2 в срок до 28.06.2017 неустойку в размере 51000 руб., компенсацию морального вреда в размере 4000 руб., в равных долях на каждого по 27500 руб., а ФИО1, ФИО2 отказываются от остальных своих исковых требований в полном объеме.

Производство по настоящему делу прекратить.

На определение может быть подана частная жалоба в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд города Ульяновска в течение 15 дней.

Судья Н.Д. Николаева