Дело № 2-5652/2025

УИД 41RS0№-36

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 сентября 2025 года г. Петропавловск-Камчатский

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в составе:

председательствующего судьи Белоусова А.С.,

при секретаре ФИО3,

с участием истца ФИО2, представителя ответчика ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ПАО «Камчатскэнерго» о защите прав потребителя,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4 обратилась в суд с иском к ПАО «Камчатскэнерго» о защите прав потребителя. 

В обоснование заявленных требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ между сторонами заключен договор № № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения объекта – «Садоводство», расположенного по адресу: 

<

адрес>). Срок осуществления мероприятий - 6 месяцев со дня заключения договора. Размер стоимости услуги за технологическое присоединение составил 63 840 руб. Договор считается заключенным co дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п. 21 договора). Оплата по договору произведена истцом 12 декабря 2023 года. В соответствии с условиями договора ответчик должен исполнить взятые на себя обязательства до 13 июня 2024 года. 7 мая 2024 года истец уведомила ответчика o выполнении технических условий. 4 июня 2024 года ответчик осмотрел в присутствии истца выполненные ею технические условия, o чем был составлен акт. В течение трех дней после проверки выполнения ею технических условий (до 10 июня 2023 года) ответчик должен осуществить фактическое присоединение электропринимающих устройств к электрическим сетям, чего сделано не было. 

10 октября 2024 года в адрес ответчика направлена претензия относительно не выполнения условий заключенного договора. 12 ноября 2024 года истцом получен ответ на претензию, в котором были указаны причины неисполнения обязательств. Поскольку свои обязательства по договору ответчик не выполнил, истец вынуждена обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов.

На основании изложенного, истец ФИО2 просила суд взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока выполнения работ за период с 13 ноября 2024 года по 1 сентября 2025 года в размере 63 840 руб., компенсацию морального вреда в размере 150 000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, а также обязать ответчика выполнить принятые обязательства по договору в срок до 1 ноября 2025 года.

В судебном заседании истец ФИО2 исковые требования поддержала, по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Дополнительно суду пояснила, что подключение к электроустановке сетевой организации в настоящее время осуществлено.

Представитель ответчика ФИО5, действующая на основании доверенности, в судебном заседании возражала против удовлетворения иска, ссылаясь на доводы, изложенные в письменном отзыве на иск. Суду пояснила, что на сегодняшний день ответчиком обязательства по договору исполнены в полном объеме. В случае удовлетворения требований истца, просила снизить размер взысканной неустойки, ссылаясь на то, что срок выполнения работ по договору был нарушен не по вине ответчика. Полагала, что размер компенсации морального вреда в сумме 150 000 руб. не отвечает требованиям разумности и справедливости и подлежит снижению до 5 000 руб.

Выслушав истца и представителя ответчика, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему выводу. 

В силу положений статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии со статьей 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают, в том числе, из договора. 

Согласно статье 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ). 

В силу положений статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 ГК РФ). 

Отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»). 

В соответствии с пунктом 1, 2 статьи 27 Закона «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги). 

Согласно положениям пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. 

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. 

Согласно пункту 5 статьи 38 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в отношении любого обратившегося потребителя гарантирующий поставщик обязан самостоятельно урегулировать отношения, связанные с оперативно-диспетчерским управлением, приобретением и передачей электрической энергии обслуживаемым им потребителям, с иными осуществляющими указанные виды деятельности организациями. 

Таким образом, приведенными нормами действующего законодательства установлена ответственность гарантирующего поставщика перед потребителем, в том числе за действия третьих лиц, привлеченных для оказания услуг потребителю либо для выполнения работ по заданию гарантирующего поставщика.

Постановлением Правительства РФ № 861 от 27 декабря 2004 года утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения), которые определяют: порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения. 

Согласно абзацу 2 пункта 3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. 

В соответствии с пунктом 6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. 

Анализ положений пунктов 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения позволяет прийти к выводу о том, что сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, и мощность которых составляет до 15 кВт. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» установлено, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (п. 4 ст. 13, п. 5 ст. 14, п. 6 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», ст. 1098 Гражданского кодекса РФ).

В судебном заседании установлено, что ФИО2 является собственником земельного участка с кадастровым номером № и жилого дома с кадастровым номером №, расположенным по адресу: 

<

адрес>, что подтверждается выписками из Единого государственного реестра недвижимости.

Из материалов дела следует, что 24 ноября 2023 года истец обратилась в ПАО «Камчатскэнерго» с заявкой на присоединение объекта к электрическим сетям с максимальной мощностью 15 кВт (ранее присоединенная мощность 5 кВт), на объект «садоводство» расположенное по адресу: Камчатский край, р-н Елизовский, снт Узон.

На основании указанного заявления, 24 ноября 2023 года между ФИО2 и ПАО «Камчатскэнерго» согласованы Условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № № (далее – Договор) с учетом Технических условий для присоединения объекта к электрическим сетям (Приложение к Договору), согласно которым Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: «Электроустановка 0,4 кВ садоводства», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых электропринимающих устройств – 15 кВт, категория надежности – 3, класс напряжения электрических сетей – 0,4 кВт, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств – 2 кВт (по уровню напряжения 0,23 кВт). Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (п. 1 договора).

Согласно п. 2 Договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: «Садоводство», расположенное по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>

В силу п. 4 Договора Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего Договора и приведены в Приложении. Срок действия Технических условий составляет пять лет co дня заключения настоящего Договора. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев co дня заключения настоящего Договора (п. 5 Договора). 

Приложением к данному Договору являются Технические условия от 24 ноября 2023 года № 04-ПС «Водозабор»-691. 

В п. 10 данных ТУ указаны мероприятия, которые необходимо выполнить Сетевой организации, a в п.11 Заявителю. 

12 декабря 2023 года цена договора оплачена истцом в полном объеме, что не оспаривалось ответчиком.

В силу п. 21 Договора Договор считается заключенным co дня оплаты Заявителем счёта на оплату технологического присоединения.

Таким образом, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, истекал 12 июня 2024 года. 

В соответствии с п. 6 Договора, сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в частности: в течение 10 рабочих дней co дня уведомления заявителем Сетевой организации o выполнении им Технических условий осуществить проверку выполнения Технических условий заявителем, произвести c участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых ЭПУ заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения ЭПУ на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже); не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием напряжения мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю. 

Пунктом 8 Договора на заявителя возложена обязанность по выполнению мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителем. 

Из материалов дела видно, что 4 июня 2024 года между ФИО2 (заявитель) и ПАО «Камчатскэнерго» (сетевая организация) составлен и подписан акт o выполнении Технических условий, согласно которому Обществом проведён осмотр электроустановок заявителя. B ходе проведения осмотра установлены: перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру: 

<

адрес> (Садоводство): ВРУ-0,4 кВ, СИП-4х16(15м); устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики: 32А; автономный резервный источник питания: отсутствует. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные Техническими условиями, выполнены ФИО2 в полном объёме и она готова к фактическому присоединению.

Из содержания искового заявления следует, что в оговоренный срок ответчиком обязательства по договору не были исполнены.

10 октября 2024 года истец обратилась к ответчику с претензией, в которой просила выплатить неустойку в размере 63 840 руб.

В ответ на указанную претензию ФИО2 письмом от 12 ноября 2024 года № сообщено о причинах неисполнения условий договора в оговоренный срок и способах их устранения.

Согласно Наряду-Допуску № для работы в электроустановках производителю работ поручается: ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-585 произвести монтаж 

опоры № и провода СИП-2 3х70+1х54,6 в пролётах опор № к ЗУ № 

№:376 согласно ТК №,6. Работу начать: дата 6 июня 2025 время 09:30, работу закончить: дата 20 июня 2025 время: 17:00. 

8 июля 2025 должностным лицом филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС 

составлен Акт допуска прибора учёта электрической энергии №. B графе «Прочее» (п. 9 данного Акта) указано: «максимальная мощность 15 кВт, линия ЦЭС без питания, без подключения Заявителя». 

21 июля 2025 года ПАО «Камчатскэнерго» составлено Уведомление об обеспечении Сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Таким образом, судом установлено, что, в нарушение установленного п. 5 договора срока предоставления услуги ответчиком фактическое технологическое присоединение объекта энергопотребления в срок до 12 июня 2024 года не было осуществлено, что является нарушением прав потребителя.

Пунктом 5 статьи 28 Закона «О защите прав потребителей» предусмотрено, что в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). 

Таким образом, неустойка является мерой гражданско-правовой ответственности, которая применяется в случае нарушения исполнителем установленных законом или договором сроков выполнения работы (оказания услуги). 

Как уже указано выше, что стоимость услуги технологического присоединения составила 63 840 руб. и была полностью оплачена потребителем ответчику 12 декабря 2023 года. 

Срок исполнения обязательства, исчисляемый с учетом п. 5 договора, истекал 12 июня 2024 года, в связи с чем, требования о взыскании неустойки подлежит удовлетворению за период с 13 июня 2024 года по 16 июля 2025 года (день вынесения решения суда) в сумме 63 840 руб. 

В соответствии со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств. 

Пунктом 32 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). 

Признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение. При этом в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом конкретных обстоятельств дела. 

Согласно ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

В нарушение ст. 56 ГПК РФ, ответчик не представил суду доказательств чрезмерности заявленной истцом неустойки в сумме 63 840 руб. 

В этой связи, ходатайство об уменьшении неустойки за нарушение сроков удовлетворению не подлежат. 

В судебном заседании истец ФИО2 суду пояснила, что на день рассмотрения дела в суде мероприятия по технологическому присоединению ответчиком выполнены. 

При указанных обстоятельствах, суд приходит выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований истца о возложении на ответчика обязанности исполнить условия договора технологического присоединения объекта энергопотребления к электрической сети в срок до 1 ноября 2025 года. 

Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. 

В соответствии с п. 45 Постановления Пленума ВС РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. 

Установив факт нарушения прав потребителя, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требования истца о компенсации морального вреда. Определяя размер такой компенсации, суд принимает во внимание характер и степень причиненного вреда, обстоятельства его причинения, длительность нарушения прав истца, характер неудобства, которое испытывал потребитель, суд полагает, что сумма в размере 30 000 руб. соответствует объему защищаемого права, а также требованиям разумности и справедливости. 

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей», п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

Принимая во внимание, что ответчик добровольно не удовлетворил законное требование истца, суд взыскивает с ответчика в пользу истца штраф в размере 46 920 руб. ((63 840 + 30 000)х50%). 

На основании положений ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 7 000 руб. 

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

иск ФИО2 удовлетворить частично.

Взыскать с ПАО «Камчатскэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, неустойку за нарушение срока выполнения работы за период с 13 июня 2024 года по 16 июля 2025 года в размере 63 840 руб., компенсацию морального вреда в размере 30 000 руб., штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере 46 920 руб.

В удовлетворении исковых требований в оставшейся части – отказать.

Взыскать с ПАО «Камчатскэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа государственную пошлину в размере 7 000 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Петропавловск-Камчатский городской суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 13 октября 2025 года

Председательствующий подпись А.С. Белоусов 

Копия верна

Судья А.С. Белоусов

Подлинник решения находится в деле 

Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края № 2-5652/2025