Дело №2-294/2021

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

30 июля 2021 года город Обоянь

Обоянский районный суд Курской области в составе председательствующего судьи Романенко И.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем Слядневой Е.В., с участием представителя истца ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «МРСК Центра» в лице филиала «Курскэнерго» к ФИО2 о взыскании убытков и неустойки,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «МРСК Центра» в лице филиала «Курскэнерго» обратилось в суд с иском к ФИО2 о взыскании убытков и неустойки, мотивируя свои требования тем, что между истцом и ответчиком 12 июля 2017 года был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № (Ю-3484). Согласно данному договору истец принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ответчика, а последний взял на себя обязательство оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. Присоединяемый объект – теплица по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №. Срок выполнения мероприятий по техприсоединению составляет 1 года. В рамках договора ответчика были выданы технические условия. Согласно п.10 договора размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей. Однако ответчик свои обязательства не выполнил, мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ своего земельного участка по состоянию на 12 июля 2018 года не произвел. В связи с неисполнением договора, истец понес прямые затраты в размере 151 195 рублей 18 копеек, в том числе на подготовку и выдачу технических условий ответчику, на строительство ВЛ-10кВ, выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ. Кроме того, в соответствии с п.17 договора в связи с неисполнением ответчиком своих обязательств, последний должен оплатить истцу неустойку по договору за период с 12 июля 2018 года по 07 июня 2019 года в размере 9 075 рублей. В связи с изложенным истец просит взыскать с ответчика убытки, понесённые истцом в связи с неисполнением ответчиком своих договорных обязательств, в сумме 151 195 рублей 18 копеек, неустойку в указанном размере, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 4 405 рублей. 

В судебном заседании представитель истца ФИО1 заявленные требования поддержал по изложенным в иске основаниям.

Ответчик в суд не явился, о дате, месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом. В поданном суду заявлении просил рассмотреть гражданское дело в своё отсутствие, против удовлетворения исковых требований не возражал.

В связи с изложенным, руководствуясь требованиями ст.167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствии неявившегося ответчика.

Выслушав участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться, надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В силу ст.ст. 421, 310 ГК РФ граждане свободны в заключении договора. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с ч.1 ст.26 Федерального закона от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергия, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным липам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 (далее Правила №861) установлены порядок и процедура технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче ТУ.

Пунктом 3 Правил №861 установлено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения,

Согласно п.16(6) Правил №861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем, если он не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий. 

В соответствии с п.1 ст.393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

В силу ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права.

Пунктом 16 Правил №861 установлена обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

В суде установлено, что между истцом и ответчиком 12 июля 2017 года заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №41494281 (Ю-3484), в соответствии с которым сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя вводного устройства теплицы, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Согласно п.2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения теплицы по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора (п.4 договора).

В соответствии с п.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения, договора. 

Из п.10 договора следует, что размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей. 

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на. технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (п.12 договора).

Заявитель как того требует п.8 договора, обязуется, надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

В технических условиях для присоединения к электрическим сетям (приложении №1 к договору) указан Перечень работ и срок действия технологических условий. Согласно п.10 технических условий сетевая организация осуществляет строительство новых линий электропередачи.

ПАО «МРСК Центра» в лице филиала «Курскэнерго», выполняя обязательства перед ответчиком по договору об осуществлении технологического присоединения, понесло расходы в сумме 151 195 рублей 18 копеек, которые согласно акту компенсации фактических затрат состоят из стоимости подготовки и выдачи сетевой организацией технических условий заявителю в сумме 4 882 рубля 05 копеек, строительства ВЛ-10кВ в сумме 121 113 рублей 93 копейки и НДС в сумме 25 199 рублей 20 копеек.

Пунктом 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям предусмотрена обязанность ответчика по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены при соединяемые энергопринимающие устройства заявителя в указанном в п.16 Правил №861 размере.

В судебном заседании установлено, что ответчик по состоянию на 12 июля 2018 года не исполнил свои договорные обязательства в части выполнения возложенных на него договором мероприятий по техприсоединению в пределах границ участка и соответственно не направил истцу уведомление о выполнении им мероприятий по техприсоединению, в связи с чем истцом понесены убытки в размере 151 195 рублей 18 копеек, которые подлежат взысканию с ответчика. 

Кроме того, поскольку ответчик не выполнил мероприятия по технологическому присоединению, требования истца о взыскании неустойки в сумме 9 075 рублей за период с 12 июля 2018 года по 07 июня 2019 года также подлежат удовлетворению. Расчет неустойки, предоставленный истцом, судом проверен судом и признан правильным.

В соответствии с ч.1 ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Учитывая, что исковые требования удовлетворены в полном объёме, на основании ст.98 ГПК РФ, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате госпошлины в сумме 4 405 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ПАО «МРСК Центра» в лице филиала «Курскэнерго» к ФИО2 о взыскании убытков и неустойки, удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу ПАО «МРСК Центра» в лице филиала «Курскэнерго» убытки по договору об осуществлении технологического присоединения №41494281 (Ю-3484) от 12 июля 2017 года в размере 151 195 рублей 18 копеек, неустойку по договору за период с 12 июля 2018 года по 07 июня 2019 года в размере 9 075 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 405 рублей, а всего 164 675 (сто шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей 18 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд через Обоянский районный суд Курской области в течение месяца с момента изготовления решения в окончательной форме, то есть с 06 августа 2021 года.

Председательствующий