РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Сочи.

28.06.2019 г.

Центральный районный суд г.Сочи Краснодарского края в составе

председательствующего судьи Качур С.В.,

при секретаре судебного заседания Балашовой П.П., 

рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску ПАО "Кубаньэнерго" в лице Сочинских электрических сетей к ФИО1 о взыскании задолженности и неустойки по договору технологического присоединения,

установил:

Истец просит взыскать с ФИО1 1209009,51 рублей, в том числе: задолженность по договору технологического присоединения в сумме 10624634,05 рублей, неустойку в связи с неисполнением условий договора в сумме 130201,46 рублей, судебные расходы по уплате госпошлины в размере 14174 рублей. 

В порядке ст.39 ГПК РФ истец изменил исковые требования, и просит суд взыскать с ФИО1 в пользу ПАО "Кубаньэнерго" 4424437,26 рублей, в том числе сумму основного долга по договору технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 1952447,07 рублей, неустойку в размере 2441819,19 рублей, а также расходы по уплате госпошлины в размере 30171 рублей. 

В обосновании исковых требований истец указал, что между истцом и ответчиком заключен договор технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ № к электрическим сетям энергопринимающего устройства объекта: "земельный участок для детского садоводства" расположенный по адресу: Краснодарский край, г.Сочи, ЖСТ "Чаевод" по кварталу "ДРСУ-2", уч. №.

В соответствии с условиями договора, согласно п.11 Ответчик принял на себя обязательства:

произвести оплату в размере 638785,83 рублей в течение 60 дней со дня заключения договора, т.е. до 10.03.2017 г.; 

произвести оплату в размере 425857,22 рублей в течение 180 дней со дня заключения договора, т.е. до 08.07.2017 г.

Указанные обязательства ответчиком не исполнены, денежные средства в размере 1064643,05 рублей на расчетный счет ПАО "Кубаньэнерго" в полном объеме не внесены.

В порядке досудебного урегулирования спора в адрес ответчика были направлены претензии от 23.11.2018 г. № СЭС/113/5/4104 и от 06.03.2019 г. № СЭС/113/5/711 которые оставлены без удовлетворения.

В соответствии с п.5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня его заключения, т.е. до 10.01.2018 г. Однако, в установленные Договором сроки, ответчик не исполнил со своей стороны мероприятия, указанные в ТУ. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах" с 01.01.2019 г. размер ставки НДС составляет 20 %, о чем Заявитель был уведомлен письмом от 03.10.2018 г. № СЭС/113/1/2229. Таким образом, размер платы по договору составляет 2165375,68 рублей в т.ч. НДС, порядок оплаты определен в п.11 Договора.

Однако, в нарушение принятых на себя обязательств, ответчиком не была в срок осуществлена оплата по Договору в полном объеме. В настоящее время оплата по Договору произведена в размере 212928,61 рублей, согласно акту сверки взаимных расчетов, имеющемуся в материалах дела. На основании изложенного, задолженность по оплате за услуги по технологическому присоединению составляет 1952447,07 рублей с НДС.

В соответствии со ст.12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем взыскания неустойки.

Согласно п.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями, обязательствами договора, требованиями закона и иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота.

При этом, согласно п.17 Договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 % от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Таким образом, нарушение сроков исполнения обязательств со стороны Заявителя, с момента истечения срока, установленного в п.5 Договора, составило 457 дней.

С учетом положений п.17 Договора, сроков, установленных п.5 Договора, Заявителю начислена неустойка в сумме 2441819,19 рублей.

В судебном заседании представитель ПАО "Кубаньэнерго" по доверенности ФИО2 доводы, изложенные в иске, поддержала, на удовлетворении требований настаивала.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте назначенного судебного заседания извещен надлежащим образом. Направил своего представителя ФИО3, которая возражала против удовлервеия требований.

Изучив материалы дела, суд находит, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Между истцом и ответчиком заключен договор технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ № к электрическим сетям энергопринимающего устройства объекта: "земельный участок для детского садоводства" расположенный по адресу: Краснодарский край, г.Сочи, ЖСТ "Чаевод" по кварталу "ДРСУ-2", уч. № 7

Для исполнения указанных обязательств истец выполнил комплекс организационных и технических мероприятий, обеспечивающих электроснабжение указанного выше объекта ответчика и произвел резервирование мощности для целей указанного технологического присоединения на центре питания ПС 220/110/10 кВ "Дагомыс", что исключает возможность других заявителей воспользоваться зарезервированной за ответчиком мощностью. В свою очередь, согласно Договору и техническим условиям ответчик должен надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору. Указанные обязательства ответчиком не исполнены, денежные средства в полном объеме на расчетный счет не поступили.

Принимая решение, суд руководствуется следующим. 

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством РФ или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством РФ об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). 

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических лиц и физических лиц, процедура технологического присоединения, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и критерии наличия (отсутствия) технологической возможности технологического присоединения регулируется Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. 

В соответствии с п.16 Правил договор должен содержать существенные условия, к числу которых относятся: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством РФ в сфере электроэнергетики (при осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом особенностей, установленных разделом III настоящих Правил); порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Принимая во внимание, что наличие задолженности и размер неустойки за невыполнение условий договора технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ № подтверждены документально, суд считает исковые требования о взыскании с ответчика в пользу истца 4424437,26 рублей, в том числе суммы основного долга по договору технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 1952447,07 рублей, неустойки в размере 2441819,19 рублей, обоснованными и подлежащими удовлетворению. Расчет суммы неустойки судом проверен и признан верным. 

В соответствии с ч.1 ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Таким образом, оснований для отклонения заявленных требований у суда не имеется.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 30171 рублей подлежат отнесению на ответчика по правилам статьи 98 ГПК РФ.

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО "Кубаньэнерго" сумму основного долга по договору технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 1952447 рублей 07 копеек, неустойку в размере 2441819 рублей 19 копеек, а также судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 30171 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Центральный районный суд г.Сочи в течение месяца с момента составления мотивированного решения суда.

Мотивированное решение составлено 03.07.2019 г.

Председательствующий