№ 2-1248/2024 

10RS0011-01-2023-013068-41

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 мая 2024 года г. Петрозаводск

Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе:

председательствующего судьи Саврук Ю.Л., 

при секретаре Костевой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Прионежская сетевая компания» об обязании произвести технологическое присоединение, взыскании неустойки,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к АО «Прионежская сетевая компания», который мотивировал тем, что 15.05.2023 между сторонами заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, условия договора отражены в типовых условиях договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условиях № для присоединения к электрическим сетям. Согласно п.1.1., п.1.2. договора и пунктов 1,2 технических условий сетевая организация принимает на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя воздушный кабельный вход, электроустановки заявителя: дом, расположенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Подсолнух» (земельный участок в кадастровым номером №). Согласно п.1.5 и 2.1.2 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, сетевая организация в течение 10 дней проверяет выполнение технических условий заявителем. 07.07.2023, 17.07.2023 заявитель уведомил сетевую организацию о выполнении технических условий. Услуги по договору были оплачены в полном объеме. Истец неоднократно обращался к ответчику с просьбой выполнить свою часть договора и подключить объект к электрическим сетям. Вместе с тем в установленный срок условия договора АО «Прионежская сетевая компания» не были выполнены, в связи с чем истец просит обязать ответчика исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение одного дня со дня вступления решения суда в законную силу; взыскать с ответчика в пользу истца судебную неустойку за неисполнение решения суда в части невыполнения фактического присоединения по договору технологического присоединения, в размере 10000 руб. за каждый день, начиная с первого дня (по истечении одного рабочего дня со дня вступления решения суда в законную силу) по седьмой день неисполнения решения суда; 15000 руб. за каждый день – с восьмого по пятнадцатый день неисполнения решения суда, 20000 руб. за каждый день – с пятнадцатого дня неисполнения решения суда и все последующие дни неисполнения решения; взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору в размере 18240 руб., а также возложить на ответчика расходы по оплате услуг представителя в размере 35000 руб., расходы по оплате государственной пошлины.

Определением судьи от 18.03.2024 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные исковые требования, привлечены Министерство имущественных и земельных отношений РК, Администрация Прионежского муниципального района РК.

Истец и его представитель по доверенности Дивизионный О.В. в судебном заседании исковые требования поддержали в полном объеме, по доводам, изложенным в иске.

Представитель ответчика ФИО2, действующая на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования не признала, поддержала доводы, изложенные в отзыве на исковое заявление и дополнениях к нему.

Третьи лица в судебное заседание своих представителей не направили, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Заслушав лиц, участвующих в деле, допросив специалиста, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, а также существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - Правила).

Согласно п. 3 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им указанных Правил. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (п. 6 Правил).

Согласно п. 16 Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В пункте 16.3 Правил установлено, что обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными пункте 14 этих Правил (физического лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику), распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Пунктом 103 Правил предусмотрено, что действие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, не ставится в зависимость от факта составления договора, подписанного сторонами в письменной форме. Наличие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, подтверждается документом об оплате (полностью или в установленных настоящими Правилами случаях частично) заявителем сетевой организации выставленного ею и размещенного в личном кабинете заявителя счета на оплату технологического присоединения по договору, предусмотренному пунктом 105 Правил. 

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, между ФИО1 и АО «ПСК» на основании заявки истца от 15.05.2023 № заключен договор об осуществлении технологического присоединения, согласно условиям которого ответчик взял на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта недвижимого имущества (дом), расположенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Подсолнух» (кадастровый номер земельного участка №). Указанный земельный участок с 12.05.2023 принадлежит на праве собственности истцу, что подтверждается сведениями из Единого государственного реестра недвижимости.

В силу технических условий № ПР0279-23 ответчик осуществляет: разработку проекта электроснабжения объекта; мероприятия по усилению существующей сети; строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛИ-0.4 кВ ф.2 от ТП-464 до границы участка заявителя; мероприятия по организации расчетного учета электроэнергии в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-технических документов; обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.

При этом на истце в силу технических условий № ПР0279-23 (п.11) лежала обязанность на границе балансовой принадлежности обеспечить готовность энергопринимающих устройств, позволяющих действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности). 

Согласно п.1.5 условий типового договора, п.14 технических условий, а также нормативным требованиям абзаца 13 подпункта «б» пункта 16 Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

АО «ПСК» 30.05.2023 разместило в личном кабинете заявителя документы в соответствии с перечнем, установленным п.105 Правил, в том числе счет (квитанцию) на оплату стоимости технологического присоединения в размере 47880 руб. 

Мотивированного отказа от заключения договора с приложением об изменении размещенных документов в адрес АО «ПКС» от ФИО1 не поступало, что не оспаривалось истцом в судебном заседании.

ФИО1 осуществил оплату счета 01.06.2013, что подтверждается приходным кассовым ордером № от 01.06.2023.

В силу положений п.п.103.105 Правил датой заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям является 01.06.2023.

В подпункта «е» пункта 7 Правил для заявителей указанных в пунктах 12(1), 13(2) -13(5) и п.14 Правил технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 Кв и ниже, процедура технологического присоединения оканчивается составлением уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме согласно приложению №1(1) к Правилам.

Согласно п.109 Правил, абз.2 п.2.1.3 договора по результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая организация в течение одного рабочего дня составляет уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по установленной форме и размещает это уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в личном кабинете заявителя.

Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям – документ, составленный по окончании процедуры технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителей, указных в пунктах 12(1), 13(2) -13(5) и п.14 Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 Кв и ниже, и подтверждающий технологическое присоединение к электрическим сетям в установленном порядке, в котором определены технические характеристики технологического присоединения, в том числе величина максимальной мощности, границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон и границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и (или) объектов электросетевого хозяйства (п.1 Правил недисриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861).

Материалами дела подтверждается, что 01.12.2023 АО «ПСК» в личном кабинете ФИО1 размещено уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям № от 01.12.2023, в котором определены технические характеристики технологического присоединения, в том числе величина максимальной мощности, границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон и границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и (или) объектов электросетевого хозяйства.

В соответствии со ст.408 Гражданского кодекса РФ надлежащее исполнение прекращает обязательство.

С учетом изложенного, оценив, представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу, что мероприятия по технологическому присоединению объектов истца выполнены АО «ПСК» согласно техническим условиям от 01.06.2023 № в полном объеме 01.12.2023, в то числе осуществлено строительство ВЛИ-0,4 Кв от опоры №7 ВЛИ-0.4 кВ ф.2 от ТП-464 до границы участка заявителя.

Указанная электрическая сеть введена в эксплуатацию 01.12.023 и имеет диспетчерское наименование «ВЛИ-0,4 Кв-ВЛИ-0.4 кВ ф.4 от оп.7 до оп.19 ф.2 от ТП-464 (протяженность 0,008 км)», что подтверждается распоряжением о вводе в эксплуатацию объекта №543/3 от 01.12.2023.

Доводы истца о том, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 30 рабочих дней, подлежат отклонению судом, поскольку в соответствии с абзацами 2-6 подпункта «б» пункта 16 Правил данный срок применяется для заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил, при одновременном наличии условий, которые в отношении объектов истца не соблюдены.

При этом, указание истца о необходимости АО «ПСК» осуществить фактическое присоединение объектов к электрическим сетям, не является основанием для удовлетворения требований истца обязать ответчика исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение одного дня со дня вступления решения суда в законную силу, поскольку как установлено и следует из технических условий результатом исполнения обязательств АО «ПСК» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а такая возможность сетевой организацией обеспечена, а непосредственно физическое соединение объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств заявителя осуществляется действиями заявителя.

Показания допрошенного в судебном заседании по ходатайству истца как специалиста ФИО3 о том, что именно сетевая организация осуществляет физическое соединение объектов, суд оценивает критически, поскольку документов, подтверждающих наличие специального образования в материалы дела не представлено. 

Таким образом, исковые требования истца в части возложения на ответчика обязанности исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение одного дня со дня вступления решения суда в законную силу, удовлетворению не подлежат.

Поскольку в удовлетворении требовании истца в данной части отказано, то не подлежат и удовлетворению требования ФИО1 о взыскании судебной неустойки, неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств.

Согласно ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии с ч.1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. 

Поскольку оснований для удовлетворения иска суд не усматривает, суд полагает не подлежащими возмещению истцу расходы по оплате услуг представителя, расходы по оплате государственной пошлины.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд 

решил:

В удовлетворении иска ФИО1 к АО «Прионежская сетевая компания» об обязании произвести технологическое присоединение, взыскание неустойки отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Петрозаводский городской суд.

Судья Ю.Л. Саврук

Мотивированное решение составлено 24.05.2024.