Дело №2-1167/2024

УИД 44RS0002-01-2024-000351-05

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 марта 2024 года г. Кострома

Ленинский районный суд г. Костромы в составе председательствующего судьи Балаевой Н.С., при секретаре Тощаковой А.А., при участии истца ФИО1, ее представителя ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО3 о неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с исковым заявлением к ответчику ИП ФИО3, указывая, что 20 апреля 2021 года между ней и ответчиком был заключён агентский договор на оказание услуг № ЗУ-ЗУ 24/2021, а в последствии дополнительное соглашение к договору № ЗУ-ЗУ 24/2021 от 24 февраля 2022 года, предметом которого является осуществление строительства объекта в течение 18 месяцев с момента вступления настоящего договора в законную силу (в срок не включается зимний период года), а именно индивидуального жилого дома, общей площадью 96,6 кв.м, на земельном участке, расположенном по адресу: ..., кадастровый номер № принадлежащим мне на праве собственности. В силу п 2.1 договора, общая стоимость по договору составляет 1400000 рублей. Оплата в размере 1400000 рублей произведена 25.02.2022 года. В силу п. 3.1, 3.2,2.3 договора, монтаж дома осуществляется в течение 18 месяцев с момента предоставления полного пакета документов, указанного в п 4.4.1 договора. Срок. Установленный в п.3.2 настоящего договора срок прерывается на зимний период года. Срок передачи объекта по договору с учётом вышеуказанных положений договора истец 21.08.2023 года. В настоящее время объект мне не передан. На 26.01.2024 года просрочка установленных сроков выполнения работы по агентскому договору составляет 159 дней. Взыскиваемая неустойка должна быть ограничена ценой договора 1400000 рублей. Поскольку факт нарушения её прав как потребителя имеет место быть, поскольку в установленный договором срок объект мне передан не был, то с ответчика в мою пользу подлежит взысканию компенсация морального вреда. Противоправными действиями ИП ФИО3 мне причинён моральный вред в виде эмоциональной травмы (повышение артериального давления), размер компенсации которого я оцениваю в 100000 рублей. 

Истец просит взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 неустойку за неисполнение условий договора в размере 1400000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере пятьдесят процентов от суммы, присуждённой судом в пользу потребителе (700000 рублей), компенсацию причинённого морального вреда в размере 100000 рублей.

Истец ФИО1, ее представитель ФИО2 в судебном заседании поддержали исковые требования к ответчику по основаниям, изложенным в иске. истец пояснила суду, что претензий в адрес ответчика не направляла, строительство дома на участке не начато.

Ответчик ИП ФИО3 в судебное заседание не явилась, извещена о времени и месте рассмотрения дела посредством направления в ее адрес судебного извещения, которое ею не получено.

Дело рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Суд, заслушав истца и ее представителя, приходит к следующему.

Закон РФ «О защите прав потребителей» регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

В соответствии с положениями Закона РФ «О защите прав потребителей», под потребителем понимается гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Исполнитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.

В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя (п. 1).

Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона (п. 3).

При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу) (п. 4).

В соответствии с положениями ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования (п. 1).

Судом установлено и подтверждено материалами дела, что 20 апреля 2021 г. между ИП ФИО3 и ФИО1 был заключен агентский договор на оказание услуг № ЗУ-ЗУ249/2021 согласно которому агент от своего имени и поручению принципала в интересах и за счет средств принципала обязался осуществить строительство объекта, а именно: выполнить услугу по привлечению от своего имени подрядной организации для строительства на земельном участке объекта по адресу: ... кадастровый № - индивидуального жилого дома площадью 74,8 кв.м. на ленточном фундаменте и обеспечить его возведение, ФИО1 обязалась принять построенный Объект путем подписания акта приема-передачи и полностью оплатить Договор. 

В силу п. 2.1, 2.2 Договора, Общая стоимость по договору составляет 1100000 руб., оплату Заказчик производит в момент заключения договора. 

Денежные средства по договору ФИО4 оплачены в полном размере. 

В силу п. 3.1, 3.2, 3.3 Договора (с учетом дополнительного соглашения от 24 февраля 2023 г.), монтаж дома осуществляется в течение 18 месяцев с момента вступления настоящего Договора в силу, то есть с момента предоставления полного пакета документов, указанного в п. 4.4.1 Договора. Срок, установленный в п. 3.2 настоящего Договора, прерывается на Зимний период года. 

В силу п. 1.4 договора с учетом допсоглашения, зимний период года означает холодное время года, которое включает в себя следующие месяцы: декабрь, январь, февраль, март, апрель. 

08 июня 2022 года ответчику был передан пакет документов, в связи с чем, срок, предусмотренный договором, начинает течь с 09 июня 2022 года и продолжил свое течение по 30 ноября 2022 г. (пять полных месяцев), срок прервался на зимние месяцы: декабрь 2022 года, январь, февраль, март, апрель 2023 года, затем срок продолжил течение с 01 мая 2023 года и по 30 ноября 2023 года (семь месяцев). На момент рассмотрения дела, предусмотренный договором срок 18 месяцев, не истек, течение его прервано зимним периодом года. 

ИП ФИО3 на момент рассмотрения дела объект истцу ФИО1 не передан. 

Оценив представленные в дело доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что между сторонами заключен договор бытового подряда, по которому исполнитель принял на себя обязательства по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке, принадлежащем заказчику, за плату в установленный договором срок. На момент рассмотрения дела срок договора не истек, промежуточные сроки договором не предусмотрены, с требованиями о расторжении договора истец к ответчику не обращалась, претензий о выплате неустойки не направляла. Доказательств подтверждающих, что ответчик нарушил обязательства, предусмотренные договором, по указанным в иске основаниям, суду не представлено. Таким образом, по изложенным в иске основаниям, требования истца о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь ст.ст. 194-198, 233- 235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО3 о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа отказать.

Ответчик вправе подать в Ленинский районный суд г. Костромы заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья: Н.С. Балаева

Мотивированное решение изготовлено 12 марта 2024 года.