РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 марта 2025 г. адрес

Симоновский районный суд адрес, в составе председательствующего судьи фио, при секретаре судебного заседания фио, с участием истца фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2222/2025 по иску ФИО1 к ПАО «Россети Московский регион» о защите прав потребителей,  

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с исковым заявлением к ПАО «Россети Московский регион» о защите прав потребителей, мотивируя свои требования тем, что 2 декабря 2023 г. между истцом и ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Плата за услуги по указанному договору составила сумма и оплачена истцом в полном объеме. Срок исполнения ответчиком обязательств по указанному договору истек 3 июня 2024 г., однако обязательства ответчиком до настоящего времени не исполнены. В связи с неисполнением ответчиком принятых на себя обязательств, истец понес убытки на оплату стоимости топлива для генератора в размере сумма в день, в связи с чем, истец просит суд обязать ПАО «Россети Московский регион» исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с обеспечением максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств не менее 15 кВт, в отношении принадлежащего истцу земельного участка, расположенного по адресу: адрес, адрес, кадастровый номер № 50:23:0040438:3428, взыскать с ПАО «Россети Московский регион» неустойку за период с 4 июня 2023 г. по 5 сентября 2024 г. из расчета 3% за каждый день просрочки в сумме сумма, убытки за период с 3 июня 2024 г. по 3 ноября 2024 г. в сумме сумма, денежную компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере 50% от присужденных судом сумм. 

Истец в судебное заседание явился, исковые требования поддержал в полном объеме. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, представил в адрес суда возражения на исковое заявление, в которых просил суд в удовлетворении исковых требований отказать. 

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Выслушав истца, исследовав письменные материалы дела и представленные доказательства, суд приходит к следующему.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ч. 1 ст. 310 ГК РФ Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической и тепловой энергии, законодательство Российской Федерации об электроэнергетике основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики федеральных законов, а также указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, принимаемых в соответствии с указанными федеральными законами.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила).

В силу п. 3 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. 

Согласно п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

Из пункта 7 Правил следует, что процедура технологического присоединения состоит из нескольких этапов и заканчивается составлением акта об осуществлении технологического присоединения. Договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения гл. 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Судом установлено и следует из материалов дела, что 12 декабря 2023 г. между ПАО «Россети Московский регион» и ФИО1 заключен договор № Ю8-23-302-189051 (389976) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств истца, расположенных на земельном участке с жилым строением, по адресу: адрес, адрес, кадастровый номер 50:23:0040438:3428. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным в момент поступления платы, указанной в п. 14 настоящих технических условий, на индивидуальный счет. 

Размер платы за технологическое присоединение составляет сумма 

Оплата за технологическое присоединение произведена истцом 11 декабря 2023 г.

Вместе с тем, в установленный договором срок, то есть до 11 июня 2023 г., обязательство по технологическому присоединению сетевой организацией не исполнено.

Согласно ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Возражая против удовлетворения заявленных исковых требований, в части обязания исполнитель договор, ответчик указывает, что обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств истца, расположенных на земельном участке с жилым строением, по адресу: адрес, адрес, кадастровый номер 50:23:0040438:3428, исполнены сетевой организацией 16 июля 2024 г. 

Данные доводы ответчика подтверждаются представленными в материалы дела уведомлением об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, актом допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии от 18 июля 2024 г., а также фотоснимками от 16 июля 2024 г. 

Таким образом, принимая во внимание, что обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств истца сетевой организацией исполнены, что не оспорено истцом, суд приходит к выводу, что оснований для удовлетворения требований в данной части не имеется. 

Рассматривая требования истца о взыскании с ответчика неустойки, предусмотренной ч. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, за нарушение срока исполнения обязательства, суд учитывает разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, изложенные в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда от 28 июня 2002 г. № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" согласно которым, при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В силу абзаца первого п. 2 указанного постановления Пленума если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами. 

В соответствии с п. 16 Правил договор должен содержать существенные условия, к числу которых отнесены положения об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе, обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки (подпункт "в" п. 16 Правил).

Таким образом, поскольку ответственность сторон, в данном случае, регулируется специальном нормой, а именно Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, суд приходит к выводу, что к правоотношениям, возникшим между сторонами на основании заключённого договора технологического присоединения, положения ч. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителем применены быть не могут.

Произведя расчет подлежащей взысканию с ответчика неустойки, за нарушение сроков исполнения обязательства за период с 12 июня 2024 г. по 18 июля 2024 г., суд приходит к выводу о том, что с ПАО «Россети Московский регион» в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере сумма (53 076,64 * 0,25% * 37).

Рассматривая требования истца о взыскании с ответчика убытков, суд исходит из следующего. 

В соответствии с абз. 6 п. 1 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В силу п. 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» убытки, причиненные потребителю в связи с нарушением изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) его прав, подлежат возмещению в полном объеме, кроме случаев, когда законом установлен ограниченный размер ответственности. При этом следует иметь в виду, что убытки возмещаются сверх неустойки (пени), установленной законом или договором, а также что уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают лицо, нарушившее право потребителя, от выполнения в натуре возложенных на него обязательств перед потребителем (пункты 2, 3 статьи 13 Закона).

Под убытками в соответствии с пунктом 2 статьи 15 ГК РФ следует понимать расходы, которые потребитель, чье право нарушено, произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, утрату или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые потребитель получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право потребителя, получило вследствие этого доходы, потребитель вправе требовать возмещения, наряду с другими убытками, упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем такие доходы.

При определении причиненных потребителю убытков суду в соответствии с пунктом 3 статьи 393 ГК РФ следует исходить из цен, существующих в том месте, где должно было быть удовлетворено требование потребителя, на день вынесения решения, если Законом или договором не предусмотрено иное.

Вместе с тем, каких – либо доказательств, свидетельствующих о причинении истцу убытков, в связи с нарушением ответчиком сроков исполнения принятых на себя обязательств, в виде оплаты стоимости топлива для генератора, истцом в материалы дела не представлено. 

В связи с чем, в удовлетворении исковых требований в данной части необходимо отказать. 

Рассматривая требования истца о взыскании с ответчика денежной компенсации морального вреда суд учитывает, что согласно ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими правоотношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Установив в ходе судебного разбирательства факт нарушения прав истца как потребителя, гарантированных Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", в соответствии с правилами ст. 15 вышеназванного закона, учитывая при этом фактические обстоятельства дела, характер причиненных истцу нравственных страданий, период нарушений прав истца со стороны ответчика, применив принципы разумности и справедливости, суд полагает необходимым частично удовлетворить исковые требования о взыскании денежной компенсации морального вреда в размере сумма, с учётом положений ст. ст. 1099-1101 ГК РФ.

Как следует из п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей, при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

Поскольку в судебном заседании установлен факт нарушения ответчиком прав истца, как потребителя, суд приходит к выводу, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере сумма (4 909,59+5 000/50%).

При этом вопреки просьбе ответчика, оснований для применения положений ст. 333 ГПК РФ к исчисленному судом размеру штрафа суд не усматривает. 

В связи с тем, что истец был освобожден от уплаты госпошлины при подаче иска, в силу ч. 1 ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета адрес подлежит взысканию государственная пошлина, исчисленная в соответствии со ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, в размере сумма

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к ПАО «Россети Московский регион» о защите прав потребителей - удовлетворить частично. 

Взыскать с ПАО «Россети Московский регион» (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 (паспортные данные) неустойку за период с 12 июня 2024 г. по 18 июля 2024 г. в размере сумма, денежную компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере сумма 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с ПАО «Россети Московский регион» (ИНН 

<

***>) государственную пошлину в бюджет адрес в размере сумма    

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Симоновский районный суд адрес.

Мотивированное решение суда изготовлено 7 октября 2025 г.

фио ФИО2